Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-15008/2017

16 мая 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  11 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  16 мая 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью  "Царскосельская топливная компания" (адрес:  Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пер БЕЛОВОДСКИЙ 3196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Ахматовская, д.2, лит.А, пом.6Н, ОГРН:  1027809012054);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Аркада" (адрес:  Россия 197110, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КОРПУСНАЯ 9/А/71-Н, ОГРН:  1147847342070);

о взыскании 1 940 170 руб. 24 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 24.04.2017

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 21.10.2016

установил:

ООО «ПГСК» после уточнения исковых требований просит взыскать с ООО "Строительная компания "Аркада" 1 685 298 руб. 51 коп. задолженности на основании договоров подряда № 01/прим от 28.11.2014, № 17/КР от 10.06.2015.

В связи с заключением договора уступки права требования от 17.04.2017 суд на основании ст.48 АПК РФ производит замену истца на ООО "Царскосельская топливная компания".

Заявлением от 11.05.2017 истец отказался от иска в части взыскания 254 871 руб. 73 коп.

Ответчик иск отклонил.

Судом установлено:

Между ООО «Промышленная Гражданская Строительная Компания» и ООО «СК «Аркада» - ответчиком по делу были заключены договоры подряда № 01/прим от 28.11.2014 и № 17/кр от 10.06.2015.

Предметом исковых требований является взыскание гарантийного удержания по указанным договорам. 

Согласно разделу 5 договора № 01/прим от 28.11.2014 платёж за выполненные работы в размере 90 % от стоимости работ, указанной в Документах по унифицированной форме КС-2 производится в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующих документов по унифицированной форме КС-2 и КС-3.

Оставшиеся 10 % от стоимости по ведомости договорной цены и объёмов работ Заказчик удерживает в качестве гарантийных удержаний в качестве меры по обеспечению исполнения Подрядчиком обязательств по Договору и выплачивает в следующем порядке:

- платёж в размере 8 % гарантийных удержаний от стоимости работ по ведомости договорной цены и объёмов работ производится в течение 10 банковских дней по окончанию всех работ по Договору и по истечении 6 месяцев с момента подписания Сторонами Итогового акта о приёмке выполненных работ и завершении силами Заказчика работ по плиточному покрытию террас, на основании счёта, выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком за 10 рабочих дней до предполагаемой даты платежа;

платёж в размере 2 % гарантийных удержаний от стоимости работ по ведомости договорной цены и объёмов работ производится в течение 10 банковских дней по окончанию всех работ по Договору и по истечении 12 месяцев с момента подписания Итогового акта о приемке выполненных работ и завершении силами Заказчика работ по плиточному покрытию террас, на основании счёта, выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком за 10 рабочих дней до предполагаемой даты платежа.

Разделом 5 договора подряда № 17кр от 10.06.2015 предусмотрено, что платеж за выполненные работы, в размере 92,5% от стоимости работ, указанной в документах по унифицированной форме КС-2, производится в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующих документов по унифицированной форме КС-2 и КС-3.

Оставшиеся 7,5 % от стоимости работ по ведомости договорной цены и объёмов работ Заказчик удерживает в качестве Гарантийных удержаний в качестве меры по обеспечению исполнения Подрядчиком обязательств по Договору и выплачивает в следующем порядке:

- платёж в размере 6 % гарантийных удержаний от стоимости работ по ведомости договорной цены и объёмов работ производится в течение 10 банковских дней по окончанию всех работ по Договору и по истечении 6 месяцев с момента подписания Сторонами Итогового акта о приёмке выполненных работ, на основании счёта, выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком за 10 рабочих дней до предполагаемой даты платежа;

платёж в размере 1,5 % гарантийных удержаний от стоимости работ по ведомости договорной цены и объёмов работ производится в течение 10 банковских дней по окончанию всех работ по Договору и по истечении 12 месяцев с момента подписания Итогового акта о приемке выполненных работ, на основании счёта, выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком за 10 рабочих дней до предполагаемой даты платежа.

Пунктом 1.19 договоров подряда № 01/прим от 28.11.2014 года и № 17/Кр от 10.06.2015 года предусмотрено, что итоговый акт о приёмке выполненных работ и итоговая справка о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждают итоговое (заключительное) выполнение работ по Договору в полном объёме.

В настоящее время итоговый акт о приемке выполненных работ не подписан, следовательно, срок выплаты гарантийного удержания по договорам не наступил.

Учитывая, что истец отказался от исковых требований в размере 254 871 руб. 73 коп., в этой части производство по делу подлежит прекращению. Уплаченная государственная пошлина в размере 2 549 руб. 00 коп. подлежит возврату. 

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В части взыскания задолженности в размере 254 871 руб. 73 коп. производство по делу прекратить. 

В остальной части иска отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Царскосельская топливная компания" справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 2 549 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.