Арбитражный суд Хабаровского края 

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-6909/2025

г. Хабаровск

12 августа 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Трещевой В.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем Яровым Е.Р., 

рассмотрел в заседании суда дело по иску Федерального казенного учреждения  

«Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе  

России Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  

адрес: 680000, 

<

...>) 

к Закрытому акционерному обществу «Строительная промышленная компания  

Зевра» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 689000, Чукотский автономный  

округ, 

<

...>) об обязании устранения недостатков при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 68 от 21.05.2024,  

диплом о высшем образовании, от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом; 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать Закрытое акционерное общество «Строительная промышленная компания Зевра» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в период с 01.06.2026 по 31.08.2026 устранить недостатки работ, выполненных по государственному контракту № 0322100024520000175_80758 от 12.10.2020 на ремонт автомобильной дороги А-384 подъездная дорога от г. Анадыря к аэропорту Анадыря (Угольный) на участке км 25+164 –  

км 30+500. Чукотский автономный округ, зафиксированные в акте от 14.05.2024, путем  

производства следующих видов работ: 1. Устранить выбоины на км 26+563 слева 70*40, 90*30: - произвести фрезирование покрытия в месте выбоин; - выполнить подрунтовку места фрезирования; 

- выполнить устройство нового покрытия по типу основной дороги.  

2. Устранить шелушение, выкрашивание, растрескивание цементобетонного  

покрытия на км 26+563 в объеме 27 кв.м.: 

-произвести санацию трещин (разделка, очистка, просушка, заливка герметиком  

(мастикой). 3. Устранить выбоины на км 28+157 слева 50*87, 45*37: - произвести фрезирование покрытия в месте выбоин; - выполнить подрунтовку места фрезирования: 

- выполнить устройство нового покрытия по типу основной дороги. 4. Устранить выбоину на км 28+179 слева 90*120:  

- произвести фрезирование покрытия в месте выбоин; - выполнить подрунтовку места фрезирования; 

- выполнить устройство нового покрытия по типу основной дороги.  

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Строительная промышленная  

компания Зевра» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  

бюджета госпошлину в размере 50 000 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья В.Н.Трещева