Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-59652/2020

18 апреля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  18 апреля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Новиковой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "АВД-ГРУПП" (адрес:  190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 3, литер А, офис/пом 210/38, ОГРН:  

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Луга-Лес" (адрес: 188800, 

<

...>; ОГРН 

<

***>)

третье лицо: ЛОГКУ "Ленобллес" 

о взыскании 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: не явился (извещен)

от третьего лица: не явился (извещен)

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АВД - Групп» (далее - ООО «АВД-Групп», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Луга-Лес» (далее - ООО «Луга-Лес», ответчик) о взыскании задолженности по договору № 106/пп от 06.05.2019 в размере 4768948 руб.

          Определением от 12.07.2021 производство по делу приостановлено, назначена экспертиза. 

Определением от 24.03.2022 производство экспертизы прекращено. Возобновлено производство по делу.

В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные требования.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ответчик представил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Арбитражный суд, в порядке статей 123, частью 4 статьи 137, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом мнения истца, признав надлежащим уведомление ответчика и третьего лица, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

           Требования истца заявлены в связи с неполной оплатой работ по договору № 106/пп от 06.05.2019, выполнение которых подтверждено имеющимися в деле актами, подписанными, в том числе, ответчиком, а именно:  

Акт Сдачи-приёмки работ от 23.05.2019 на сумму 557904 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за период с января по декабрь 2019 года, отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 28.05.2019 на сумму 319176 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом актом приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанным 28.05.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 28.05.2019 на сумму 683928 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом актом приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанным 17.06.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 30.05.2019 на сумму 418200 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом актом приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанным 30.05.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 30.05.2019 на сумму 399672 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом актами приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанными 29.05.2019 и 17.06.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 04.06.2019 на сумму 181440 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом актами приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанными 13.05.2019, 14.05.2019, 26.05.2019, 28.05.2019, 30.05.2019, актом приёма-сдачи выполненных работ за апрель 2019 года, подписанным 29.04.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 14.06.2019 на сумму 72600 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом актами приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанными 29.05.2019 и 17.06.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 17.06.2019 на сумму 570024 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом актами приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанными 29.05.2019 и 17.06.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 17.06.2019 на сумму 960048 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом актами приёма-сдачи выполненных работ за май-июнь 2019 года (подписанным 28.06.2019), за май 2019 года (подписанным 29.05.2019) и за июнь 2019 года (подписанным 05.06.2019).

Акт Сдачи-приёмки работ от 09.07.2019 на сумму 852480 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 11.07.2019 на сумму 628 800,00. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанным 30.05.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 11.07.2019 на сумму 980 928,00 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом Актами приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанными 29.05.2019 и 17.06.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 12.07.2019 на сумму 204 960,00 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом Актами приёма-сдачи выполненных работ за июнь 2019 года, подписанными 17.06.2019 (два акта), 18.06.2019, 20.06.2019, 25.06.2019, 28.06.2019

Акт Сдачи-приёмки работ от 16.07.2019 на сумму 478 608,00 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 23.07.2019 на сумму 484848 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом актом приёма-сдачи выполненных работ за май-июнь 2019 года, подписанным 28.06.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 24.07.2019 на сумму 869760 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом актом приёма-передачи выполненных работ за 2019 года, подписанным 26.07.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 09.08.2019 на сумму 987840 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом актом приёма выполненных работ по Калининскому участковому лесничеству от 08.08.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 27.08.2019 на сумму 1188000 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом Актом приёмасдачи выполненных работ за август 2019 года, подписанным 30.08.2019, актом приёма-передачи выполненных работ за 2019 года, подписанным 26.08.2019, актом приёма-сдачи выполненных лесохозяйственных мероприятий за сентябрь 2019 года по Вещевскому участковому лесничеству, подписанным 05.09.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 29.08.2019 на сумму 285324 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанным 27.08.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 11.09.2019 на сумму 191520 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за август 2019 года, подписанным 30.08.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 12.09.2019 на сумму 543036 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом Актами приёма-сдачи выполненных работ за сентябрь 2019 года, подписанными 12.09.2019 и 16.09.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 02.10.2019 на сумму 203400 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за сентябрь 2019 года, подписанным 30.09.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 02.10.2019 на сумму 738504 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанным 25.10.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 03.10.2019 на сумму 409224 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за сентябрь 2019 года, подписанным 30.09.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 04.10.2019 на сумму 895680 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за сентябрь 2019 года, подписанным 30.09.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 08.10.2019 на сумму 13800 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за январь-декабрь 2019 года, Отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 08.10.2019 на сумму 79296 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за май 2019 года, подписанным 30.05.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 08.10.2019 на сумму 99600 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 08.10.2019 на сумму 20400 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 09.10.2019 на сумму 286260 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Отчётом о воспроизводстве лесов и лесоразведении за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом об охране лесов от пожаров за период с января по декабрь 2019 года, Отчётом о защите лесов за период с января по декабрь 2019 года.

Акт Сдачи-приёмки работ от 11.10.2019на сумму 93600 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ от 04.10.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 11.10.2019 на сумму 146016 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанным 30.10.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 18.10.2019 на сумму 78000 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанным 15.10.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 22.10.2019 на сумму 163200 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанным 25.10.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 22.10.2019 на сумму 254592 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанным 25.10.2019.

Акт Сдачи-приёмки работ от 06.11.2019 на сумму 1440000 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом Актами приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанными 31.10.2019 (два акта).

Акт Сдачи-приёмки работ от 06.11.2019 на сумму 404352 руб. Выполнение работ подтверждается представленными третьим лицом Актами приёма-сдачи выполненных работ за октябрь 2019 года, подписанными 30.10.2019 (два акта).

Акт Сдачи-приёмки работ от 05.12.2019 на сумму 85560 руб. Выполнение работ подтверждается представленным третьим лицом Актом приёма-сдачи выполненных работ от 29.11.2019.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на исковое заявление от 11.09.2020, согласно которому он считает заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, полагая, что лесохозяйственные работы выполнены истцом некачественно. В обоснование ссылался на многочисленные постановления ЛОГКУ «Леноблес» о привлечении ответчика к административной ответственности. В качестве доказательств представил постановление ЛОГКУ «Леноблес» №У-353/20 от 12.08.2020, согласно которому ответчик привлечен к административной ответственности за оставление ликвидной древесины в квартале 60 Житковского участкового лесничества. 

В возражениях на отзыв, истец выразил свое несогласие с доводами ответчика в силу того, что ответчиком ранее каких-либо замечаний по качеству работ не заявлялось, все работы приняты по актам выполненных работ без каких-либо замечаний и без предъявления претензий по качеству. Подписание актов выполненных работ ответчиком не оспаривается. Также истец указал, что ответчик ссылается только на одно Постановление ЛОГКУ «Ленобллес», составленное 12.08.2020, с привязкой на акт сдачи-приемки от 08.10.2019. По остальным актам ответчик претензий не имеет. Также истец указывает, что с момента подписания акта и составления постановления ЛОГКУ «Ленобллес» прошло 10 месяцев.

По ходатайству ответчика, определением от 12.07.2021 назначена судебная экспертиза, утверждены следующие вопросы:

- Определить объем работ, выполненных ООО «АВД-Групп» по договору на выполнение лесохозяйственных работ № 106/лл от 06.05.2019 согласно перечню в приложении.

- Имеются ли в указанных лесохозяйственных работах нарушения нормативных требований и условий договора по качеству выполненных работ?

- Определить стоимость работ, выполненных ООО «АВД-Групп» по договору на выполнение лесохозяйственных работ № 106/лл от 06.05.2019, исходя из установленных договором расценок, фактически выполненного объема работ и их качества?

В качестве экспертов утверждены ФИО3 и ФИО4 - ООО «Проектно-экспертное бюро «Аргумент».

Производство по делу приостановлено до получения результатов экспертизы. Срок проведения экспертизы судом установлен до 09.09.2021.

В связи с не поступлением в материалы дела результатов экспертизы, определениями от 23.09.2021, 19.11.2021, 14.01.2022 срок приостановления производства по делу продлевался.

Истец, ввиду длительного отсутствия результатов экспертизы, заявил о невозможности проведения экспертизы, в связи с уничтожением предмета экспертного исследования, вызванного естественными свойствами леса расти и изменятся. 

Определением от 24.03.2022 производство экспертизы прекращено по причине невозможности получения объективных результатов исследования, в связи с естественным природным изменением предмета экспертизы, суд перешел к рассмотрению спора по существу.

Как следует из материалов дела между истцом и ответчиком 06.05.2019 заключен договор на выполнение лесохозяйственных работ № 106/лл (далее - договор). Перечень работ, объемы и цены выполняемых в рамках договора работ указаны в приложении № к договору (п. 1.1 договора). Согласно п. 3.1, 4.3 договора по факту выполнения работ стороны подписывают акты выполненных работ, которые служат основанием для оплаты таких работ в течение пяти банковских дней с даты подписания соответствующих актов.

Истцом в материалы дела представлены акты сдачи-приемки работ, подписанные сторонами, согласно которым ООО «АВД-ГРУПП» выполнило работы для ООО «ЛУГА-ЛЕС» на общую сумму 17270581 руб. Вышеуказанные акты подписаны ответчиком без замечаний, работы выполнены в полном объеме. Кроме того, выполнение спорных работ также подтверждается представленными третьим лицом актами приёмки результатов работ у ответчика должностными лицами Ленинградского областного государственного казенным учреждения «Управление лесами Ленинградской области»

Работы ответчиком оплачены частично, претензия, направленная истцом  на сумму 5768948 руб., также оплачена частично на сумму 1000000 руб. (п/п 1901 от 15.05.2020). Задолженность составила 4768948 руб.

Третьим лицом ЛОГКУ «Ленобллес» в материалы дела также представлены копии актов приема-сдачи выполненных работ на территории Северо-Западного лесничества (Балтийское, Большепольское, Бородинское, Вещевское, Красносокольское, Комсомольское участковые лесничества), подписанные со стороны ООО «Луга-Лес» и представителей Северо-Западного лесничества, а также копии отчетов, представленные ООО «Луга-Лес» по договорам аренды.

В соответствии с представленными в материалы дела документами, все акты по работам ООО «Луга-Лес» подписаны со стороны ЛОГКУ «Ленобллес» без замечаний. В указанных актах имеются работы, выполненные истцом по договору № 106/лл.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо (статья 65 АПК РФ).

Ответчиком не представлено в материалы дела надлежащих доказательств некачественного выполнения истцом работ по договору, а также не представлено доказательств полной оплаты выполненных истцом и принятых ответчиком работ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о обоснованности требования истца. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, что требования истца удовлетворены в полном объеме, расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Луга-Лес» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВД-групп» задолженность по договору в размере 4768948 руб.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 46845 руб. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Новикова Е.В.