Именем Российской Федерации

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041, Россия, 

<

...>

тел./факс 

<

***>; 

 e-mail: a68.info@arbitr.ru;

http://www.tula.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула                                                                                                                 Дело № А68-7992/2016

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2017г.

Решение в полном объеме изготовлено 23 января 2017г.

 

Арбитражный суд Тульской области в составе:

Судьи  Андреевой Е.В.

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Щербакова К.А.

рассмотрел  в  судебном  заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОНГ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к открытому акционерному обществу «Щекиноазот» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 1 031 320 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 23 313 руб.

при участии в заседании:

От истца – ФИО1, представитель по доверенности от 16.01.2017г. №б/н; 

От ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 05.02.2014г. №246.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОНГ» обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу «Щекиноазот» о взыскании задолженности в размере 1 031 320 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 23 313 руб.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление. 

В обоснование исковых требований общество с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОНГ» ссылается на следующие обстоятельства. 

12.10.2015г. ОАО «Щекиноазот» (заказчик) направил в адрес ООО «Аквастронг» (подрядчик) договор подряда №2832д на обследование трубопровода промливневой  канализации, выполнение  работ  по  восстановлению проходимости трубопровода промливневой канализации по всему сечению, очистки от мусора, предоставлении видеофайла о состоянии трубопроводов и колодцев по окончании работ, и других работ, определенных Техническим заданием (Приложение №1 к договору). 

В соответствии с п.3.1 договора цена работ определена по смете в 874 000 руб. и 18% НДС в размере 157 320 руб.

Приложением №1 к договору является Техническое задание. В п.3.4 Технического задания от 14.09.2015г. указано, что заказчик передает подрядчику действующие коммуникации, подлежащие очистке, по акту. Подписание договора состоялось 12.10.2015г.

В Приложении №1 к договору в Техническом задании в объем работ была включена прочистка открытого ж\б лотка, проходимостью 85%. Однако к моменту подписания договора к Техническому заданию заказчиком не была приложена и не передана подрядчику схема-чертеж участка трубопровода ПЛК, подлежащего очистке.

После того, как заказчиком была найдена в архиве схема-чертеж необходимого для производства работ участка трубопровода ПЛК, выяснилось наличие осложненного строения канализации по сравнению с визуальным наружным осмотром участка трубопровода. В результате не по вине подрядчика сдвинулся срок начала работ. Кроме того, в п.2 Технического задания (Приложение №1 к договору) указан объем по очистке открытого ж\б лотка в размере 15% от общей заполненности, а фактически при выполнении этих работ, объем работ по очистке этого объекта составил 60%. 

В связи с тем, что технически эту работу можно было выполнить только вручную, а спресованность очищаемой массы оказалась велика, срок исполнения этих работ непредвиденно для подрядчика увеличился не по вине последнего.

В результате вышеперечисленных обстоятельств (задержкой с получением схемы чертежа участка трубопровода ПЛК, увеличенный объем очистки открытого ж\б лотка с 15% до 60%), срок исполнения работ увеличился объективно не по вине подрядчика до полутора месяцев вместо 14 дней, предусмотренных условиями договора.

Письмом №93 от 22.12.2015г. подрядчик предложил заказчику заключить дополнительное соглашение к договору на увеличение срока исполнения работ до 31.12.2015г. и увеличить сумму договора на 165 000 руб. без НДС. Ответ на это письмо от заказчика не поступил.

Письмом №97 от 30.12.2015г. подрядчик направил заказчику документы о выполнении работ: локальные сметы, акты выполненных работ КС-2, КС-3, счет №147, счет-фактуру №145, для подписания и последующего перечисления денег на счет подрядчика.

Письмом №120 от 15.01.2016г. заказчик оставил без ответа предложение подрядчика о подписании дополнительного соглашения к договору о продлении срока исполнения работ и увеличение цены договора.

Письмом №501 от 05.02.2016г. заказчик оставил без ответа письмо №97 от 30.12.2015г., не подписал документы подрядчика и деньги за фактически выполненные работы не оплатил до настоящего времени.

В связи с тем, что ответчик уклоняется от приемки выполненных работ, от оплаты за произведенные работы по договору подряда, от проведения досудебных переговоров по поводу решения настоящего спора, истец обратился с иском в арбитражный суд для взыскания компенсации за проделанную по договору подряда работу.

Возражая против удовлетворения исковых требований открытое акционерное общество «Щекиноазот» ссылается на следующие обстоятельства. 

Согласно п.2.1 договора №2832д от 12.10.2015г. ООО «Аквастронг» приняло обязательство выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору) на сумму 1 031 320 руб. с НДС 18%.

В силу п.2.2 названного договора объем работ, выполняемых подрядчиком, включает в себя:

- обследование трубопровода промливневой канализации;

- выполнение работ по восстановлению проходимости трубопровода промливневой канализации по всему сечению, очистка от мусора и отложений колодцев до лотка, предоставление видеофайла, и других работ, определенных Техническим заданием (Приложение №1 к договору).

Согласно п.17.1 договора подрядчик до завершения работ должен в соответствии с условиями договора:

а) закончить все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору);

б) устранить все замечания по качеству работ;

в) произвести предусмотренные СНиП испытания инженерных систем;

д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории строительной площадки;

е) сдать в полном объеме исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

В силу п.7.10 договора подрядчик обязан в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты завершения работ на объекте в соответствии с рабочей документацией, направить заказчику письменное уведомление о завершении производства работ на объекте.

В силу п.18.1 договора сдача-приемка выполненных работ за отчетный период, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ).

Журнал учета выполненных работ подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 3-х суток по окончании работ, к которому относятся выполненные работы. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период (6 экз.), в том числе в электронном виде формата Microsoft Ехсеl (версия не выше 2003 года), cправку о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ) (6 экз.) подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 3-х суток по окончании работ.

Названные выше положения договора подрядчиком нарушены. Для приемки выполненных работ подрядчику следует руководствоваться положениями договора, регулирующими сдачу- приемку работ.

Кроме того, в силу п.18.3 договора после окончания работ, входящих в объем обязательств подрядчика по договору, производится сдача объекта заказчику с подписанием акта выполнения работ.

Приемка выполненных работ на объекте оформляется актом рабочей комиссии. Дата проведения рабочей комиссии определяется заказчиком (п.18.4 договора). 

Рабочая комиссия назначается заказчиком на основании заявления подрядчика. Подрядчик оформляет заявление не позднее, чем за двое суток до предполагаемой даты окончания работ (п.18.5 договора).

В силу п.2.2 договора и п.3.5 Технического задания подрядчик обязан предоставить заказчику отчет с телевизионным обследованием по окончании работ на бумажном и цифровом носителе.

Письмами от 15.01.2016г. №120 и от 05.02.2016г. №501 подрядчику предлагалось:

- представить заказчику объективные доказательства качественно выполненной работы по всему участку промливневой канализации; 

- предоставить заказчику документально, количество утилизированного мусора после очистки коллекторов, колодцев;

- произвести уборку от мусора после очистки железобетонного лотка;

- предоставить заказчику отчет с телевизионным обследованием по окончании работ на бумажном и цифровом носителе.

Названные в письмах замечания не устранены.

Во множестве участков промливневой канализации остались подстои воды, полноценная проходимость трубопровода промливневой канализации по всему сечению отсутствует.

По смыслу ст.309, ч.1 ст.711 ГК РФ обязанность оплаты у заказчика наступает при условии исполнения подрядчиком принятых обязательств.

Полученный 27.06.2016г. от подрядчика акт выполненных работ формы КС-2 №145 от 30.12.2015г. был мотивированно отклонен заказчиком.

В октябре 2016г. с участием подрядчика состоялись переговоры по вопросу исполнения договора. В адрес подрядчика был направлен акт о выявленных недостатках по договору №2832д от 12.10.2015г. До настоящего времени подрядчик надлежащим образом договор не исполнил, полноценная проходимость трубопровода промливневой канализации по всему сечению отсутствует.

Из материалов дела суд установил:  

12.10.2015г. между открытым акционерным обществом «Щекиноазот» (заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОНГ» (подрядчик) заключен договор подряда №2832д (далее – договор), в соответствии с п.2.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору) (далее – работы), а заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. 

На основании п.1.15 договора объект - действующая промливневая канализация, расположенная по адресу: промышленная площадка ОАО «Щекиноазот» по адресу: 

<

...>. 

Работы - весь комплекс работ, выполняемых подрядчиком в соответствии с договором и рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений, проведение испытаний, сдачу объекта заказчику по акту выполнения работ, иных неразрывно связанных с объектом работ, в том числе и в течение гарантийного срока – п.1.21 договора. 

Согласно п.2.2 договора объем работ, выполняемых подрядчиком, включает в себя обследование трубопровода промливневой канализации, выполнение работ по восстановлению проходимости трубопровода промливневой канализации по всему сечению, очистка от мусора и отложений колодцев до лотка, предоставление видеофайла о состояния трубопроводов и колодцев по окончании работ, и других работ, определенных Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Подрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, за свой риск собственными и/или при необходимости, привлеченными силами и средствами, в соответствии с утвержденной рабочей документацией, а заказчик обязуется создать подрядчику предусмотренные договором условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену (п.2.3 договора).

В соответствии с п.1.9 договора договорная цена - денежная сумма, оговоренная в статье 3 договора, которая выплачивается подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по договору в порядке и на условиях, определенных в статье 4 договора. 

В силу п.3.1 договора договорная цена работ, являющихся предметом настоящего договора, определена на основании смет, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 874 000 руб. (включая транспортные и командировочные расходы, проживание, питание рабочих, доставка к месту работ), кроме того НДС 18% - 157 320 руб. Стоимость работ является фиксированной, изменению не подлежит и включает в себя все необходимые затраты на производство работ. 

Заказчик в полном объеме осуществляет финансирование работ, являющихся предметом договора. Оплата выполненных работ заказчиком производится за фактически выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней на основании актов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов на оплату выполненных работ и счетов-фактур. В случае нарушения сроков предоставления подрядчиком учетной документации в соответствии с п.18.1 договора, оплата выполненных работ заказчиком сдвигается соразмерно времени задержки оформления документов, указанных в п.16.1 договора и предъявления счета-фактуры. Стороны пришли к соглашению об отсутствии у подрядчика права на получение с ОАО «Щекиноазот» процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (законных процентов) в порядке, предусмотренном статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (пп.4.1 – 4.3 договора). 

В силу п.8.1 договора заказчик производит оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 4 договора. 

В статье 5 договора стороны согласовали сроки и порядок выполнения работ. В соответствии с пп.5.1 - 5.3 договора срок выполнения работ, являющихся предметом договора, составляет: начало работ - после двухстороннего подписания данного договора в течение трех суток; окончание работ - четырнадцать суток от начала работ. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в настоящей статье и статьях 24, 28 договора. Подрядчик имеет право по согласованию сторон на технически обоснованное продление  срока выполнения работ в следующих случаях: изменения Технического задания (Приложение №1 к договору) по причинам, не зависящим от подрядчика в объеме, существенно влияющем на срок исполнения последним обязательств по договору; действия обстоятельств непреодолимой силы. 

На основании пп.7.1, 7.3, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.16, 7.20 договора подрядчик выполняет все работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с рабочей документацией, иными условиями договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, подрядчик обязан согласовать с заказчиком; в течение 3-х рабочих дней, следующих за датой вступления договора в силу, назначает ответственных представителей для координации и согласования с заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет заказчику официальное уведомление. К уведомлению прилагаются выданные подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. Сообщается название специальной техники, сопутствующие данные по технике и о сроках пребывания на площадке заказчика; в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предъявляются заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ; по завершении работ, в течение 10 календарных дней, следующих за датой подписания акта выполнения работ, вывозит с площадки производства работ все собственное оборудование и специальную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с заказчиком демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после себя объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам; в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты завершения работ на объекте в соответствии с рабочей документацией, направляет заказчику письменное уведомление о завершении производства работ на объекте; устраняет в течение срока, согласованного заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по договору, без изменения сроков выполнения работ; в срок не позднее 10 дней до начала приемки результата выполненных работ, предоставляет представителю заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, соответствующем действующим нормативным документам Ростехнадзора и регламентам заказчика;  подготавливает и представляет рабочей комиссии всю необходимую документацию в соответствии с действующим законодательством. 

Пунктами 12.1, 12.2 договора предусмотрено, что с момента начала работ до их завершения подрядчик ведет Общий и специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007; подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в «Общий журнал работ».

Подрядчик обязан вести и предоставлять заказчику учетную документацию, которая включает в себя:

- Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, не позднее 3-х суток по окончанию работ; 

- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (6 экз.), не позднее 3-х суток по окончанию работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (4 экз.), не позднее 3-х суток по окончанию работ; 

- счет-фактуру на выполненные работы не позднее 3-х суток по окончанию работ (п.13.1 договора).

Журнал учета выполненных работ - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый подрядчиком, подписываемый сторонами, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (п.1.12 договора). 

Справка о стоимости выполненных работ - первичный учетный документ (форма КС-3 Госкомстата РФ), составляемый подрядчиком на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), подтверждающий выполнение подрядчиком работ за отчетный период, подписываемый сторонами (п.1.24 договора).

Согласно п.15.2 договора подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ на объекте требованиям законодательства, Технического задания (Приложение №1 к договору).

В соответствии с пп.17.1 - 17.3 договора подрядчик до завершения работ должен в соответствии с условиями договора:

а) закончить все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору);

б) устранить все замечания по качеству работ;

в) произвести предусмотренные СНиП испытания инженерных систем; 

д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории строительной площадки;

е) сдать в полном объеме исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы. 

В пятидневный срок с момента получения извещения подрядчика о готовности объекта к сдаче по акту выполнения работ заказчик назначает рабочую комиссию для приемки результата выполненных работ. Подрядчик представляет рабочей комиссии завершенные работы. После рассмотрения рабочей комиссией всех материалов в соответствии с п.21.1 и принятия решения, заказчик оформляет акт выполнения работ с подписями членов рабочей комиссии.

Порядок сдачи-приемки завершенных работ предусмотрен сторонами в статье 18 договора.  Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ). Журнал учета выполненных работ, подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 3-х суток по окончании работ, к которому относятся выполненные работы. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период (6 экз.), в том числе в электронном виде формата Microsoft Ехсеl (версия не выше 2003 года), справку о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ) (6 экз.) подрядчик предоставляет заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 3-х суток по окончании работ. Работы по договору выполняются отдельными этапами на основании Технического задания (Приложение №1 к договору). Этапами работ считаются объемы работ, выполненные исполнителем и принятые заказчиком и получателем на основании актов по формам КС-2, КС-3. Подписание сторонами форм КС-2 и КС-3 означает переход права собственности на результаты работ от подрядчика к заказчику, при этом риски утраты и повреждения результатов работ переходят от подрядчика к заказчику при подписании сторонами акта выполнения работ. В течение 3-х рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика Журнала учета выполненных работ и акта о приемке выполненных работ, заказчик обязан направить подрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ и акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных подрядчиком работ. В случае получения подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и акт о приемке выполненных работ заказчику.

После окончания работ, входящих в объем обязательств подрядчика по договору, производится сдача объекта заказчику с подписанием акта выполнения работ. Приемка выполненных работ на объекте оформляется актом рабочей комиссии. Дата проведения рабочей комиссии определяется заказчиком. Рабочая комиссия назначается заказчиком на основании заявления подрядчика. Подрядчик оформляет заявление не позднее, чем за двое суток до предполагаемой даты окончания работ. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком, в составе своего представителя, представителя проектной организации, подрядчика. Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти, органов государственного надзора осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Подрядчик после оформления приемки работ заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. Дата подписания сторонами акта выполнения работ определяет момент перехода к заказчику обязанностей по содержанию объекта. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, заказчик обязан в течение 10 дней подписать акт выполнения работ (пп.18.1 – 18.9 договора). 

В силу пп.1.1, 1.2, 1.5, 1.7 договора «акт выполнения работ» - документ, составляемый подрядчиком по форме приложения №3 и подтверждающий, что работы по договору выполнены полностью и в срок. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), составляемый подрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а Госкомстата РФ) и представленной исполнительной документации, подтверждающий выполнение подрядчиком работ за отчетный период, подписываемый сторонами. «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания сторонами акта выполнения работ. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с рабочей документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству работ.

Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, считает, что исковое заявление не подлежит удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Спорные правоотношения возникли в результате исполнения договора подряда, правовое регулирование которого осуществляется общими нормами обязательственного права и положениями главы 37 ГК РФ.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается в силу ст.310 ГК РФ.

В силу ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч.1 ст.711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст.740 ГК РФ).

На основании ч.1 ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Частью 1 ст.746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Кодекса.

В силу ч.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (ст.ст.711 и 746 ГК РФ).

Согласно чч.1, 2 ст.720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Частью 1 и 2 ст.753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Применительно к ч.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (ч.6 ст.753 ГК РФ). 

Из анализа указанных норм следует, что по договору подряда подрядчик обязан выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику. Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который должен быть оплачен заказчиком. Поэтому основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Документом, удостоверяющим выполнение подрядчиком работ и их приемку заказчиком, является акт приема-сдачи работ. Заказчик вправе полностью отказаться от оплаты выполненных работ при установлении факта исключения возможности использования результата этих работ.

Как предусмотрено пп.1.1, 1.2 договора акт выполнения работ - документ, составляемый подрядчиком по форме приложения №3 и подтверждающий, что работы по договору выполнены полностью и в срок. Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), составляемый подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а Госкомстата РФ) и представленной исполнительной документации, подтверждающий выполнение подрядчиком работ за отчетный период, подписываемый сторонами.

В соответствии с ч.1 ст.64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В силу ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В силу п.2.2 договора объем работ, выполняемых подрядчиком, включает в себя:

- обследование трубопровода промливневой канализации;

- выполнение работ по восстановлению проходимости трубопровода промливневой канализации по всему сечению, очистка от мусора и отложений колодцев до лотка, предоставление видеофайла, и других работ, определенных Техническим заданием (Приложение №1 к договору).

Согласно п.17.1 договора подрядчик до завершения работ должен в соответствии с условиями договора:

а) закончить все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору);

б) устранить все замечания по качеству работ;

в) произвести предусмотренные СНиП испытания инженерных систем;

д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории строительной площадки;

е) сдать в полном объеме исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

Письмом №97 от 30.12.2015г. подрядчик направил заказчику документы о выполнении работ: локальные сметы, акты выполненных работ КС-2, КС-3, счет №147, счет-фактуру №145, для подписания и последующей оплаты. 

Письмами заказчика от 15.01.2016г. №120, от 05.02.2016г. №501 подрядчику предлагалось:

- представить заказчику объективные доказательства качественно выполненной работы по всему участку промливневой канализации; 

- предоставить заказчику документально количество утилизированного мусора после очистки коллекторов, колодцев;

- произвести уборку от мусора после очистки железобетонного лотка;

- предоставить заказчику отчет с телевизионным обследованием по окончании работ на бумажном и цифровом носителе.

В письмах от 15.01.2016г. №120, от 05.02.2016г. №501 указано, что во множестве участков промливневой канализации остались подстои воды, полноценная проходимость трубопровода промливневой канализации по всему сечению отсутствует.

Названные замечания подрядчиком устранены не были. 

Полученный 27.06.2016г. повторно от подрядчика акт выполненных работ формы КС-2 №145 от 30.12.2015г. был отклонен заказчиком, поскольку замечания заказчика подрядчик не устранил. 

В ходе проверки качества выполненных работ заказчиком был составлен акт от 05.12.2016г. о выявленных недостатках по договору №2832д от 12.10.2015г., согласно которому: 

- не убран мусор после очистки железобетонного лотка;

- не предоставлен заказчику отчет с телевизионным обследованием по окончании работ на бумажном и цифровом носителе;

- во множестве участков промливневой канализации остались подстои воды, полноценная проходимость трубопровода промливневой канализации по всему сечению отсутствует.

В силу ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч.1 ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Доказательств сдачи ответчиком и принятия истцом результата работ на сумму 1 031 320 руб., суду не представлено. 

Оценив обстоятельства дела и представленные доказательства в их совокупности в соответствии со ст.71 АПК РФ, суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта выполнения работ надлежащим образом и передачи результата качественно выполненных работ ответчику. Истец надлежащим образом не исполнил договор, полноценная проходимость трубопровода промливневой канализации по всему сечению, как этого требует договор, отсутствует, равно как отсутствует отчет с телевизионным обследованием по окончании работ. 

При указанных обстоятельствах, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для признания факта выполнения истцом спорных работ и удовлетворения требований о взыскании их стоимости в заявленном размере.

На основании изложенного, исковые требования общества с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОНГ» удовлетворению не подлежат. 

Исходя из принятого решения, в соответствии со ст.110 АПК РФ затраты по оплате государственной пошлины в размере 23 313 руб. относятся на истца.    

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОНГ» отказать.   

Затраты по оплате государственной пошлины отнести на истца.    

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.

Судья                                                            Е.В.Андреева