Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-4595/2017

г. Калининград

23 Октября 2018 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «СК Монолит» в течение девяти месяцев с момента вступления  решения суда в законную силу устранить недостатки и дефекты, допущенные в ходе  производства работ и выявленные по результатам судебной экспертизы согласно  заключению эксперта № А21-4595/2017-03-ТЗ/18, в рамках гарантийных обязательств  по муниципальному контракту № 2014.92744, а именно:  

произвести строительно-техническое обследование чаши бассейна, обходных  дорожек и иных помещений бассейна, с целью установления причин множественных  протечек в уровне первого этажа, и устранить выявленные дефекты (пункт 6.3.8, лист  заключения 72);  

провести работы по детальному обследованию, выполнению проверочных  расчетов строительных конструкций и фундаментов здания, с целью определения  текущей категории технического состояния и установления причин возникновения  трещин в стенах и определению способов из заделки;  

разработать проектную и рабочую документацию по капитальному ремонту  подвальных помещений и дренажной системы в соответствии с действующим  законодательством РФ, в соответствии с заданием на проектирование мероприятий по  восстановлению (усилению) несущих конструкций (пункт 5.7.4., лист заключения 66),  

ведомостью дефектов и повреждений (приложение Б к заключению, 77-81 лист  заключения), ведомостью объёмов работ (к дефектной ведомости на устранение  обнаруженных недостатков, являющихся причиной затопления подвальных помещений,  лист заключения 223-229) с учетом результатов обследований, рекомендованных для  проведения в указанном задании. Согласовать разработанную проектную и рабочую  документацию с МАДОУ ЦРР д/с № 122 и МКУ «УКС»;  

выполнить работы в соответствии с разработанной проектной и рабочей  документацией по капитальному ремонту подвальных помещений и дренажной  системы, согласованной с МАДОУ ЦРР д/с № 122 и МКУ «УКС», сдать выполненные  работы по акту МАДОУ ЦРР д/с № 122 и МКУ «УКС»;  

выполнить работы, которые не были учтены экспертом при составлении  предварительной стоимости работ, которые описаны экспертом как работы по  «устранению обнаруженных недостатков» (пункт 5.8, лист заключения 71-72), а именно:  

- модернизация элементов оконных проемов, согласно проектной документации  (дооборудование форточек системой регулирования);  

Устранить следующие недостатки: - по всему периметру бассейна восстановить оклейку специализированными 

прорезиненными уголками, предотвращающими травматизм при эксплуатации  бассейна;  

- провести работы по устранению нарушений наружной водосточной системы  кровли здания, а также работы по восстановлению фасада здания.  

Взыскать с ООО «СК «Монолит» в пользу МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА  КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 122 в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Т.В.Пахомова