РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело №А40-118636/2024-52-799

05 ноября 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 05 ноября 2024 года.

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Будагиловой Б.Б. рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «МАКСИ СТРОЙ» (ОГРН:

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2007, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: акционерному обществу «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (ОГРН:

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 38 944 550,30 руб. по договору от 03.11.2020 №ВКЩ-2020-16, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 978 644,78 руб. по состоянию на 20.05.2024, далее по день фактической оплаты.

 

при участии:

от истца – ФИО1 (паспорт, диплом, доверенность от 12.02.2024),

от ответчика – ФИО2 (паспорт, диплом доверенность от 25.12.2023), 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ СТРОЙ»  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»  (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 38 944 550,30 руб. по договору от 03.11.2020 №ВКЩ-2020-16, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 978 644,78 руб. по состоянию на 20.05.2024, далее по день фактической оплаты.

Истец заявленные требования поддержал, заявил отказ от иска в части взыскания задолженности.

Ответчик, против иска возражал.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства в порядке ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований на основании нижеследующего.

Между АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (далее - Ответчик, АО «ЦДС», Подрядчик) и ООО «МАКСИ СТРОИ» (далее - Истец, Субподрядчик) заключен договор от 03.11.2020 № ВКЩ-2020-16 (далее - Договор), предметом которого является строительство автомобильной дороги «Воскресенское-Каракашево-Щербинка (далее - Объект).

В рамках данного Договора Подрядчиком поручено, а Субподрядчиком приняты на себя обязательства по выполнению подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги «Воскресенское-Каракашево-Щербинка» в соответствии с нормами действующего законодательства, Проектной документацией, Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), в сроки, установленные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), передать результат качественно выполненных работ с комплектом надлежаще оформленной исполнительной документации Подрядчику в предусмотренном Договором порядке.

Государственным заказчиком по данному Объекту является Государственное казенное учреждение города Москвы «Москворечье» (далее - Заказчик, Третье лицо), государственный контракт от 15.12.2018 № ЭА-15/12/18-1ГК (далее - Контракт).

В соответствии с условиями Договора, с учетом дополнительного соглашения от 21.03.2024 № 21, цена Договора составляет 301 919308 (Триста один миллион девятьсот девятнадцать тысяч триста восемь) рублей 94 копейки.

В соответствии с пунктом 4.2 Договора оплата выполненных работ производится после выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ, Календарным графиком производства работ, Техническим заданием путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика в Банке. Оплата работ производится на основании представленных Субподрядчиком и подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры.

В рамках исполнения обязательств по Договору Субподрядчиком были выполнены работы на общую сумму 301 919 308 (Триста один миллион девятьсот девятнадцать тысяч триста восемь) рублей 94 копейки, а именно: КС-2, КС-3 № 1 от 01.12.2020 (выполнение работ с 03.11.2020 по 01.12.2020) на сумму 575 613,43 руб. КС-2, КС-3 № 2 от 22.01.2021 (выполнение работ с 02.12.2020 по 22.01.2021) на сумму 5 960 934,70 руб. КС-2, КС-3 № 3 от 22.02.2021 (выполнение работ с 23.01.2021тпо 22.02.2021) на сумму 5 755 498,44 руб. КС-2, КС-3 № 4 от 22.03.2021 (выполнение работ с 21.02.2021 по 22.03.2021) на сумму 10 294 895,50 руб. КС-2, КС-3 № 5 от 26.04.2021 (выполнение работ с 23.03.2021 по 26.04.2021) на сумму 8 925 653,21 руб. КС-2, КС-3 № 6 от 01.06.2021 (выполнение работ с 27.04.2021 по 01.06.2021) на сумму 12 154 453,50 руб. КС-2, КС-3 № 7 от 23.06.2021 (выполнение работ с 02.06.2021 по 23.06.2021) на сумму 6 707 082,79 руб. КС-2, КС-3 № 8 от 09.09.2021 (выполнение работ с 29.06.2021 по 09.09.2021) на сумму 16 540 536,12 руб. КС-2, КС-3 №9 от 22.10.2021 (выполнение работ с 15.06.2021 по 22.10.2021) на сумму 681 183,98 руб. КС-2, КС-3 № 10 от 22.10.2021 (выполнение работ с 15.06.2021 по 22.10.2021) на сумму 884 451,84 руб. КС-2, КС-3 № 11 от 19.11.2021 (выполнение работе 15.06.2021 по 19.11.2021) на сумму 1 375 578,10 руб.КС-2, КС-3 № 12 от 21.04.2022 (выполнение работ с 20.11.2021 по 20.03.2022) на сумму 22 958 065,73 руб. КС-2, КС-3 № 13 от 21.04.2022 (выполнение работ с 20.11.2021 по 20.03.2022) на сумму 1 156 920,67 руб. КС-2, КС-3 № 14 от 26.05.2022 (выполнение работ с 21.03.2022 по 20.04.2022) на сумму 10 430 652,32 руб. КС-2, КС-3 № 15 от 26.05.2022 (выполнение работ с 21.03.2022 по 20.04.2022) на сумму 284 646,05 руб. КС-2, КС-3 № 16 от 27.07.2022 (выполнение работ с 21.04.2022 по 27.07.2022) на сумму 8 461 586,95 руб. КС-2, КС-3 № 17 от 17.08.2022 (выполнение работ с 01.07.2022 по 31.07.2022) на сумму 9 406 545,11 руб. КС-2, КС-3 № 18 от 05.09.2022 (выполнение работ с 12.01.2022 по 30.06.2022) на сумму 3 558 314,89 руб. КС-2, КС-3 № 19 от 03.10.2022 (выполнение работ с 01.08.2022 по 31.08.2022) на сумму 18 513 256,06 руб. КС-2, КС-3 № 20 от 12.01.2023 (выполнение работ с 01.09.2022 по 30.12.2022) на сумму 37 552 460,82 руб.  КС-2, КС-3 № 21 от 03.04.2023 (выполнение работ с 31.12.2022 по 20.03.2023) на сумму 33 196 939,44 руб. КС-2, КС-3 № 22 от 18.04.2023 (выполнение работ с 01.07.2022 по 10.08.2023) на сумму 12 991 288,61 руб. КС-2, КС-3 № 23 от 20.04.2023 (выполнение работ с 21.03.2023 по 20.04.2023) на сумму 30 098 786,81 руб. КС-2, КС-3 № 24 от 20.03.2024 (выполнение работ с 30.05.2023 по 31.07.2023) на сумму 19 914 936,44 руб. КС-2, КС-3 № 25 от 20.03.2024 (выполнение работ с 22.05.2023 по 14.11.2023) на сумму 11 265 942,49 руб. КС-2, КС-3 № 26 от 01.04.2024 (выполнение работ с 13.11.2023 по 21.03.2024) на сумму 12 273 084,94 руб.

Подрядчиком в рамках исполнения своих обязательств по Договору Субподрядчику перечислены денежные средства в общей сумме 115 789 632,88 руб., что подтверждается платежными поручениями: от 23.11.2020 № 19401 на сумму 3 000 000 руб., от 29.12.2020 № 23692 на сумму 39 515,12 руб., от 27.01.2021 № 806 на сумму 2 000 000 руб., от 12.02.2021 № 1320 на сумму 5 000 000 руб., от 20.02.2021 № 2423 на сумму 1 869 886,42 руб., от 02.03.2021 № 2783 на сумму 555 370,17 руб., от 07.04.2021 № 4949 на сумму 1 000 000 руб., от 12.04.2021 № 4317 на сумму 3 619 057,60 руб., от 23.04.2021 № 6471 на сумму 2 000 000 руб., от 29.04.2021 № 4317 на сумму 7 768 436,39 руб., от 14.05.2021 № 7762 на сумму 684 506,94 руб., от 18.06.2021 № 9978 на сумму 1 000 000 руб., от 28.06.2021 № 9563 на сумму 5 000 000 руб., от 21.07.2021 № 12304 на сумму 5 000 000 руб., от 29.07.2021 № 12255 на сумму 5 000 000 руб., от 09.09.2021 № 15559 на сумму 1 000 000 руб., от 10.09.2021 № 15156 на сумму 3 000 000 руб., от 17.11.2021 № 19705 на сумму 986 350,57 руб., от 18.01.2022 № 521 на сумму 866 614,20 руб., от 21.03.2022 № 3776 на сумму 5 000 000 руб., от 06.04.2022 № 4479 На сумму 4 000 000 руб., от 11.04.2022 № 4903 на сумму 2 000 000 руб., от 02.06.2022 № 7023 на сумму 10 000 000 руб., от 21.06.2022 № 8723 на сумму 399 895,47 руб., от 22.06.2022 № 7755 на сумму 3 000 000 руб., от 20.07.2022 № 10075 на сумму 4 000 000 руб., от 07.09.2022 № 13640 на сумму 2 000 000 руб., от 09.09.2022 № 13785 на сумму 972 112,43 руб., от 09.09.2022 № 13786 на сумму 1 027 887,57 руб., от 15.09.2022 № 14111 на сумму 2 000 000 руб., от 07.10.2022 № 15328 на сумму 12 000 000 руб., от 23.06.2023 № 8094 на сумму 1 000 000 руб., от 18.07.2023 № 9566 на сумму 4 000 000 руб., от 14.11.2023 № 14577 на сумму 15 000 000 руб.

Пунктом 4.18 Договора в редакции дополнительного соглашения от 06.09.2021 № 6 предусмотрено, что Подрядчик при расчетах с Субподрядчиком за выполненные и принятые работы удерживает услуги генподряда в размере 3% от стоимости работ, принятых Подрядчиком за отчетный период, в возмещение расходов Подрядчика за услуги, оказанные.

Общая сумма удержанных Подрядчиком денежных средств за услуги генподряда по Договору составила 7 620 677,33 руб. Сумма, подлежащая удержанию за услуги генподряда по Договору по КС-3 №№ 24-26, составляет 1 303 618, 91 руб.

В целях обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика, включая, но не ограничиваясь, обязательств по возмещению убытков, причиненных некачественным выполнением работ Субподрядчиком, выявленных Подрядчиком в период производства работ по Договору, а также в течение гарантийного срока, указанного в Договоре, Субподрядчик обязан внести в пользу Подрядчика обеспечительный платеж в размере 4% от цены Договора (пункт 6.3.1 Договора в редакции дополнительного соглашения от 06.09.2021 № 6).

Общая сумма гарантийного обеспечения по Договору составила 11 899 061,67 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2024 по делу № А40-35566/2024 - 56-270 между ООО «МАКСИ СТРОЙ» и АО «ЦДС» утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым Ответчик перечисляет Истцу в соответствии с графиком оплату за выполненные работы (КС-2, КС-3 № 21 и КС-2, КС-3 № 23) на общую сумму 16 263 201,90 руб.

Исходя из вышеизложенного, учитывая произведенные между сторонами зачеты взаимных требований на общую сумму 97 945 230,86 руб., задолженность Подрядчика перед Субподрядчиком по оплате выполненных работ по подписанным с двух сторон КС-2, КС-3 № 24 составляет 17 083 254,79 руб., по КС-2, КС-3 № 25 -10 447 326,52 руб., по КС-2, КС-3 № 26 - 11 413 968,99 руб.

В соответствии с пунктами 2.1 и 8.3 Договора Подрядчик обязан осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, установленном Договором.

Пунктом 4.2 Договора предусмотрена оплата выполненных работ по Договору в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком оплаты от Заказчика.

Работы, выполненные Субподрядчиком в рамках Договора, и отраженные в КС-2, КС-3 №№24-26, отражены в актах о приемке выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ КС-3 № 58 и КС-3 № 59, подписаны Заказчиком и Подрядчиком, и в полном объеме оплачены Заказчиком, что подтверждается платежными поручениями: от 14.11.2023 № 1375, от 25.12.2023 № 1592. Данная информация отражена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Таким образом, срок оплаты выполненных Субподрядчиком работ по КС-2, КС-3 № 24 и КС-2, КС-3 № 25 - 20.03.2024, по КС-2, КС-3 № 26 - 01.04.2024.

13.06.2024 между ООО «МАКСИ СТРОЙ» и АО «ЦДС» подписано Соглашение о взаимозачете встречных требований, а именно о зачете задолженности по оплате выполненных работ по КС-2, КС-3 №№ 24, 25, 26  по договору от 03.11.2020 № ВКЩ-2020-16 на сумму 38 974 550,30 руб.

Таким образом, истец заявил отказ  от исковых требований в части взыскания суммы основного долга по договору.

Ответчик возражений не заявил, отзыв не представил.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Суд установил, что данный отказ от иска не противоречит закону, иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, подписан полномочным лицом.

При указанных обстоятельствах, суд прекращает производство по делу в части взыскания долга в размере 38 944 550,30 руб.

В связи с чем подлежит рассмотрению требование о взыскании процентов по ст.395 ГК РФ в размере 1 387 243,35 руб. за период с 21.03.2024 по 13.06.2024г.

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Ответчиком контррасчет не представлен, оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

При вышеуказанных обстоятельствах, с учетом совокупности представленных в материалы дела доказательств, суд пришел к выводу о доказанности требований истца.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части взыскания долга в размере 38 944 550,30 руб. Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с акционерного общества «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МАКСИ СТРОЙ» (ИНН:

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 387 243,35 руб., госпошлину в размере 200 000 руб.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья

Р.Е. Галиева