АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-1418/23

27 декабря 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   20 декабря 2023 г.

Полный текст решения изготовлен            27 декабря 2023 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцева Ю. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ТАГСТРОЙМЕТАЛЛ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест-Девелопмент» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности  в размере 1 056 867,81 рублей, пени в размере 107 103,39 рублей, 

при участии:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности;

от ответчика: представитель  не явился.

Установил:

ООО «ТАГСТРОЙМЕТАЛЛ» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО Стройинвест-Девелопмент» о взыскании задолженности и неустойки в общем размере 1 158 257,28 руб.

Определением суда от 24.01.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

От ответчика поступил отзыв, в котором против удовлетворения исковых требований возражал, ссылаясь на тот факт, что истцом допущены нарушения при исполнении своих обязательств по договору.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеются основания, предусмотренные частью 5 статьи 227 АПК РФ, для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 27.06.2023 назначена судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам СЧУ «Ростовский Центр Судебных Экспертиз», ФИО3, ФИО4.

03.11.2023 в Арбитражный суд Ростовской области поступило заключение СЧУ «Ростовский Центр Судебных Экспертиз» от 31.10.2023, а также счет № 0311 от 03.11.2023 в размере 68 699, 52 руб.

Судом приобщено к материалам дела заключение СЧУ «Ростовский Центр Судебных Экспертиз» от 31.10.2023, а также счет № 0311 от 03.11.2023 в размере 68 699, 52 руб. В связи с чем производство по делу возобновлено. 

В Арбитражный суд Ростовской области от истца на основании экспертного заключения поступило ходатайство об уточнении исковых требований.

Судом уточнения приняты к рассмотрению.

Представитель истца по поддержал исковые требования в уточненной редакции полном объеме, дал пояснения.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на официальном сайте в сети Интернет. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявление рассмотрено судом в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного.

Определения суда, выносимые по рассматриваемому делу, опубликованы на официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Между истцом и ответчиком заключен договор № 04/22-П от 22.04.2022, по условиям которого истец, выступающий подрядчиком принимает на себя обязательства по изготовлению металлоконструкций и выполнению монтажных работ на объекте ответчика, выступающего заказчиком с использованием давальческих или собственных материалов, а заказчик обязался произвести приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, предусмотренном договором, спецификациями, рабочей документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на территории РФ (п.1.1. договора).

Пунктом 1.3 договора определено, что виды и стоимость работ, выполняемых подрядчиком, согласовываются сторонами в спецификациях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ, выполняемых подрядчиком, определяется договорной ценой, указанной в спецификациях к договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Как установлено пунктом 3.1 договора, фактически выполненные работы оплачиваются заказчиком в срок и на условиях, установленных в спецификациях к договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что срок выполнения работ устанавливается в спецификациях к договору, подписанных обеими сторонами.

Порядок сдачи-приемки работ определен пунктом 6.2 договора: для приемки-передачи работ подрядчик предъявляет заказчику документацию на выполненные объемы работ, оформленную актами выполненных работ или универсальными передаточными документами, а заказчик в случае отсутствия замечаний к качеству выполненных работ должен рассмотреть и принять их к оплате или предоставить мотивированный отказ по качеству и количеству работ в течение 7 календарных дней. Одновременно указанные акты выполненных работ или универсальные передаточные документы являются уведомлением подрядчика заказчик о фактической готовности к сдаче результатов выполненных работ.

В рамках договора сторонами подписаны спецификации № 3 от 06.06.2022, №4 от 04.07.2022, № 5 от 04.07-2022, № 6 от 04.07.2022, № 7 от 04.07.2022, № 8 от 15.07.2022, № 9 от 31.08.2022 на изготовление металлоконструкций и проведение строительно-монтажных работ на объекте заказчика по адресу Краснодарский кран, 

<

...>.

В обоснование иска истец указал, что несмотря на то, что истцом обязательства по договору и соответствующим спецификациям к нему исполнены в полном объеме - изготовлены металлоконструкции, произведен их монтаж, выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные спецификациями к договору, ответчик до настоящего времени не оплатил выполненные работы в полном объеме.

Так, в соответствии со спецификацией № 3 от 06.06.2022 истец обязался своими силами и с использованием собственных материалов изготовить металлические конструкции модульной сборной металлоконструкции 11x12 м и выполнить монтажные работы по их установке на конструкцию фундаментов на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 3 от 06.06.2022 составила 1 415 000 рублей, в том числе НДС 20 % - 235 833,33 рублей.

Порядок оплаты работ предусмотрен пунктами 4.1-4.3 спецификации № 3 от 06.06.2022:

- аванс в сумме 900 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора и спецификации и выставления счета на оплату;

- частичная оплата в размере 300 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора и спецификации;

- частичная оплата в размере 215 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания предусмотренных спецификацией работ и подписания универсального передаточного документа или акта о приемке выполненных работ.

Предусмотренные спецификацией № 3 от 06.06.2022 работы по изготовлению и установке на фундаменты модульной сборной металлоконструкции 11x12 м. выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 45 от 01.07.2022.

Предусмотренный спецификацией пятидневный срок оплаты работ истек 06.07.2022.

Ответчик произвел частичную оплату работ на сумму 1 363 000 рублей:

- платежным поручением № 131 от 20.06.2022 -900 000 рублей;

- платежным поручением № 152 от 07.07.2022 – 150 000 рублей;

- платежным поручением № 175 от 31.08.2022 – 313 000 рублей.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 3 от 06.06.2022, составляет 52 000 рублей.

В соответствии со спецификацией № 4 от 04.07.2022 истец обязался своими силами с использованием давальческих материалов заказчика выполнить монтажные работы по установке стеновых и кровельных сэндвич-панелей на каркас Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 4 от 04.07.2022 составила 650 738,31 рублей, в том числе НДС 20 % 108 456,39 рублей.

Порядок оплаты работ предусмотрен пунктами 5.1-5.2 спецификации № 4 от 04.07.2022:

- аванс в сумме 455 500 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего договора и спецификации и выставления счета на оплату;

- оплата в размере 195 238,31 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания предусмотренных спецификацией работ и подписания универсального передаточного документа или акта о приемке выполненных работ.

Предусмотренные спецификацией № 4 от 04.07.2022 работы по установке стеновых и кровельных сэндвич-панелей на каркас модульной сборной металлоконструкции 24x15 м выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 77 от 16.09.2022.

Предусмотренный спецификацией трехдневный срок оплаты работ истек 19.09.2022. Ответчик произвел частичную оплату работ на сумму 250 000 рублей платежным поручением № 191 от 06.09.2022.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 4 от 04.07.2022, составляет 400 738,31 рублей.

Также в соответствии со спецификацией № 5 от 04.07.2022 истец обязался своими силами с использованием давальческих материалов заказчика выполнить монтажные работы по установке стеновых и кровельных сэндвич-панелей на каркас модульной сборной металлоконструкции 11x12 м на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 5 от 04.07.2022 составила 270 134,34 рубля, в том числе 11ДС 20 % - 45 022,39 рубля.

Порядок оплаты работ предусмотрен пунктами 5.1-5.2 спецификации № 5 от 04.07.2022:

- аванс в сумме 190 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора и спецификации и выставления счета на оплату;

- оплата в размере 80 134,34 рубля оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания предусмотренных спецификацией работ и подписания универсального передаточного документа или акта о приемке выполненных работ.

Предусмотренные спецификацией № 5 от 04.07.2022 работы по установке стеновых и кровельных сэндвич-панелей па каркас модульной сборной металлоконструкции 11x12 м выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 82 от 03.10.2022.

Предусмотренный спецификацией трехдневный срок оплаты работ истек 06.10.2022. Ответчик не оплатил работы, выполненные истцом.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 5 от 04.07.2022, составляет 270 134,34 рублей.

 В соответствии со спецификацией № 6 от 04.07.2022 истец обязался своими силами с использованием давальческих материалов заказчика выполнить строительные работы по устройству цокольной бачки под каркас модульной сборной металлоконструкции 24x15 м на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 6 от 04.07.2022 составила 128 000 рублен, в том числе НДС 20 % - 21 333,33 рублей.

Порядок оплаты работ предусмотрен пунктами 5.1-5.2 спецификации № 6 от 04.07.2022:

- аванс в сумме 64 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора и спецификации и выставления счета на оплату:

- оплата в размере 64 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания предусмотренных спецификацией работ и подписания универсального передаточного документа или акта о приемке выполненных работ.

Предусмотренные спецификацией № 6 от 04.07.2022 работы по устройству цокольной балки под каркас модульной сборной металлоконструкции 24x15 м выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 46 от 11.07.2022.

Предусмотренный спецификацией трехдневный срок оплаты работ истек 14.07.2022. Ответчик не оплатил работы, выполненные истцом.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 6 от 04.07.2022, составляет 128 000 рублей.

 Кроме того, в соответствии со спецификацией № 7 от 04.07.2022 истец обязался своими силами с использованием давальческих материалов заказчика выполнить строительные работы по устройству цокольной балки под каркас модульной сборной металлоконструкции 11x12 м на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 7 от 04.07.2022 составила 84 000 рублей, в том числе IЩС 20 % - 14 000 рублей.

Порядок оплаты работ предусмотрен пунктами 5.1-5.2 спецификации № 6 от 04.07.2022:

- аванс в сумме 42 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора и спецификации и выставления счета на оплату:

- оплата в размере 42 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания предусмотренных спецификацией работ и подписания универсального передаточного документа или акта о приемке выполненных работ.

Предусмотренные спецификацией № 7 от 04.07.2022 работы по устройству цокольной балки под каркас модульной сборной металлоконструкции 11x12 м выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 47 от 11.07.2022.

Предусмотренный спецификацией трехдневный срок оплаты работ истек 14.07.2022. Ответчик не оплатил работы, выполненные истцом.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 7 от 04.07.2022, составляет 84 000 рублей.

 В соответствии со спецификацией № 8 от 15.07.2022 истец обязался своими силами с использованием давальческих материалов заказчика выполнить строительные работы по устройству металлических ступеней модульной сборной металлоконструкции 24x15 м на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 8 от 15.07.2022 составила 36 000 рублей, в том числе 11ДС 20 % - 6 000 рублей.

Согласно п.5 спецификацией № 8 от 15.07.2022 заказчик обязался произвести оплату стоимости работ, предусмотренных спецификацией, в следующем порядке: 100% предоплата стоимости работ в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора и спецификации и выставления счета на оплату.

Предусмотренные спецификацией № 8 от 15.07.2022 работы по устройству металлических ступеней модульной сборной металлоконструкции 24x15 м выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 68 от 01.09.2022.

Поскольку ответчик не произвел предусмотревнную спецификацией предоплату в размере 100% стоимости работ, то срок оплаты работ истек непосредственно после сдачи работ ответчику - 02.09.2022.

Ответчик не оплатил работы, выполненные истцом.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 8 от 15.07.2022, составляет 36 000 рублей.

 В соответствии со спецификацией № 9 от 31.08.2022 истец обязался своими силами с использованием давальческих материалов заказчика выполнить строительные работы по демонтажу и монтажу сэндвич-панелей и обрезке фахверка на объекте заказчика.

Общая стоимость работ, предусмотренных спецификацией № 9 от 31.08.2022 составила 96 500 рублей, в том числе НДС 20 % - 16 083,33 рублей.

Порядок оплаты работ предусмотрен пунктами 5.1-5.2 спецификации № 9 от 31.08.2022:

- аванс в сумме 70 000 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания спецификации и выставления счета на оплату:

- оплата в размере 26 500 рублей оплачивается заказчиком подрядчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания предусмотренных спецификацией работ и подписания универсального передаточного документа или акта о приемке выполненных работ.

Предусмотренные спецификацией № 9 от 31.08.2022 работы по демонтажу и монтажу сэндвич-панелей и обрезке фахверка выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается УПД № 70 от 05.09.2022.

Предусмотренный спецификацией трехдневный срок оплаты работ истек 08.09.2022. Ответчик не оплатил работы, выполненные истцом.

Задолженность ответчика перед истцом за работы, выполненные по спецификации № 9 от 31.08.2022, составляет 96 500 рублей.

Так, на момент подачи иска общая сумма задолженности ответчика перед истцом за выполненные работы по договору № 04/22-П от 22.04.2022 и спецификациям № 3 от 06.06.2022, №4 от 04.07.2022, № 5 от 04.07.2022, № 6 от 04.07.2022, № 7 от 04.07.2022, № 8 oт 15.07.2022, № 9 от 31.08.2022 к нему составляла: 1 067 372, 65 рублей (52 000 руб. + 400 738,31 руб. + 270 134,34 руб. + 128 000 руб. + 84 000 руб. + 36 000 руб. + 96 500 руб.).

В целях досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию исх.№ 10-10 от 10.10.2022, в которой предложил, в добровольном порядке оплатить задолженности и неустойку. Претензия вручена представителю ответчика 11.11.2022 за вх.№ 111 от 11.11.2022, о чем сделана отметка на претензии. Кроме того, 02.11.2022 претензия направлена ответчику почтой и получена им 12.11.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления Почты России.

Претензии осталась со стороны ответчика без финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ООО «ТАГСТРОЙМЕТАЛЛ» в Арбитражный суд Ростовской области с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Сложившиеся между сторонами отношения, возникшие в связи с заключением договора, по своей правовой природе, являются подрядными, регулируются, помимо общих норм об обязательствах, положениями главы 37 ГК РФ.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с частью 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статьям 711, 746 ГК РФ обязанность заказчика по оплате подрядчику обусловленной договором цены возникает с момента сдачи результатов выполненных работ.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается

В связи с неисполнением ответчиком обязанностей по оплате выполненных работ в установленные договором сроки, истцом предъявлена ответчику письменная претензия с требование оплаты.

Ответчик против исковых требований возражал, указывая в отзыве на тот факт, что 11.11.2022 после регистрации заказчиком полученной претензии за вх. № 111 и ее изучения, заказчик в договорный срок, а именно, 23.11.2022 направил почтой в адрес подрядчика письмо (исх. № 291 от 23.11.2022 г., получено подрядчиком 07.12.2022) в котором просил подрядчика в первую очередь выполнить все свои необходимые обязательства по договору надлежащим образом и устранить недостатки в работе, а именно:

- Произвести монтаж одной трехслойной стеновой сэндвич-панели СПМ 100/1170 RAL 7016/9003;

- Смонтировать лестницы на установочные места;

- Устранить допущенное нарушение по установке не прокрашенных элементов металлокаркаса;

- Предоставить лабораторные испытания по заливке фундаментной балки;

- Представить полный комплект документов паспортов качества на металлические конструкции и сертификатов качества на использованные материалы.

После проведения всех работ со стороны подрядчика, заказчик обязался вернуться к обсуждению взаиморасчётов по договору. Однако подрядчик нарушения не устранил.

Кроме того, с 06 по 08 февраля 2022 года на объекте размещения модульных конструкций по адресу: 

<

...> ветром повреждены модульные конструкции. В адрес ООО «СИД» от получателя модульных конструкций (НАП АОН) поступило письмо за исх. № 15 от 10.02.2023 (зарегистрировано вх. № 11 от 13.02.2022) о необходимости представителя ООО «СИД» присутствовать на объекте 16.02.2023 в 11:00 при осмотре и составлении акта о произошедшем. По результатам данного рассмотрения, ООО «СИД» направит соответствующее письменное извещение в адрес ООО «ТСМ».

В соответствии с пунктом 8.1. договора гарантийный срок нормальной эксплуатации возведенных конструкций и выполненных работ по договору устанавливается равным 1 (одному) году с даты подписания сторонами акта выполненных работ или универсального передаточного документа. Срок эксплуатации металлоконструкции не менее 15 лет.

Пункт 8.2. договора указывает, что если в период гарантийной эксплуатации будут обнаружены недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков производится подрядчиком в минимально короткие сроки и за свой счет.

С указанными доводами истец не согласился. 

Сторонами спора заявлено ходатайство о назначении экспертизы.

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, самостоятельно определяет круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза (статья 82 Кодекса).

Ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной инстанции до объявления председательствующим в судебном заседании исследования доказательств законченным (часть 1 статьи 164 АПК РФ), а при возобновлении их исследования - до объявления законченным дополнительного исследования доказательств (статья 165 Кодекса).

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не требует получения согласия от всех лиц, участвующих в деле, поэтому экспертиза может быть назначена при согласии хотя бы одного лица, участвующего в деле, которое вносит на депозитный счет суда денежные суммы, подлежащие выплате экспертам (пункт 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» от 04.04.2014 № 23).

Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, пришел к выводу о том, что для разрешения спора по существу необходимо назначить по делу проведение экспертизы. 

Сторонами на депозитный счет суда внесены денежные средства на проведение экспертизы.

Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, однако определение круга и содержания вопросов, которые будут поставлены перед экспертом, относится к исключительной компетенции арбитражного суда.

Пользуясь правом, предусмотренным частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение экспертов, следующим образом:

1. Соответствует ли условиям договора № 04/22-П от 22.04.2022 г. и спецификаций №№ 3,4,5,6,7,8,9 к нему, действующим строительным правилам и нормам качество строительномонтажных работ по установке Модульной сборной металлоконструкции 11х12 м на фундаменты, монтажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей на каркас Модульной сборной металлоконструкции 24х15 м, монтажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей на каркас Модульной сборной металлоконструкции 11х12 м, устройству цокольной балки под каркас Модульной сборной металлоконструкции 24х15 м, устройству цокольной балки под каркас Модульной сборной металлоконструкции 11х12 м, устройству металлических ступеней Модульной сборной металлоконструкции 24х15 м, обрезке фахверка, демонтажу и монтажу сэндвич-панелей, выполненных ООО "ТагСтройМеталл" на объекте по адресу 

<

...>?  Возможно ли устранение выявленных недостатков (дефектов)? 

2. Какова стоимость затрат на устранение выявленных недостатков (дефектов)? 

3. Какова причина повреждения зданий (строений) Модульной сборной металлоконструкции 24х15 м и Модульной сборной металлоконструкции 11х12 м произошедшего в период действия опасного природного явления (очень сильный ветер) с 06 по 08 февраля 2023 г. 

4. Могло ли непринятие мер по защите зданий (строений) Модульной сборной металлоконструкции 24х15 м и Модульной сборной металлоконструкции 11х12 м от неблагоприятных природных явлений (отсутствие защиты проемов ворот и дверей, отсутствие доборных (фасонных) элементов для сэндвич-панелей) повлиять на степень и характер повреждений данных зданий?

03.11.2023 в Арбитражный суд Ростовской области поступило заключение СЧУ «Ростовский Центр Судебных Экспертиз» от 31.10.2023, а также счет № 0311 от 03.11.2023 в размере 68 699, 52 руб. 

На первый вопрос эксперт ответил, что  качество строительно-монтажных работ по устройству цокольной балки под каркас Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м соответствует условиям договора № 04/22-П от 22.04.2022 г.,  рабочей документации, а также действующим строительным правилам и нормам; качество строительно-монтажных работ по монтажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей на каркас Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м соответствует условиям договора № 04/22-П от 22.04.2022 г.. а также Рабочей документации.

Экспертами обращается внимание, что нащельники, призванные скрыть стыки между сэндвич-панелями, возникающие в процессе монтажа, являются давальческим материалом. В спецификации №8 к Договору №04/22-П от 22.04.2022, а также в рабочей документации не выявлено указаний на обязательное применение нащельников при изготовлении и установке Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м. Таким образом, данные несоответствия не являются дефектами, возникшими в ходе строительно-монтажных работ по установке Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м.

Тем не менее, эксперт указал, что учитывая климатический район г. Геленджика, а именно повышенную влажность, в разрабатываемой Рабочей документации необходимо было предусмотреть устройство фасонных элементов (нащельников), одной из функций которых является защита от влаги и осадков.

            Относительно вопроса о качестве изготовления металлических ступеней Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м эксперт указал, что качество соответствует строительным правилам и нормам.

Однако, работы по устройству металлических ступеней Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м не соответствуют условиям договора № 04/22-П от 22.04.2022 г., а также спецификации №8 от 15.07.2022, в части отсутствия креплений лестниц к стеновым сэндвич-панелям, а также к фундаменту.

Качество строительно-монтажных работ по обрезке фахверка Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м соответствует условиям договора № 04/22-П от 22.04-2022, Рабочей документации, а также действующим строительным правилам и нормам.

В качестве особого мнения экспертами рассматривается качество строительно-монтажных работ по установке Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м на фундаменты, связи с выявленными на осмотре дефектами, указанными в фотоматериалах представленных стороной по делу.

Качество строительно-монтажных работ по установке Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м на фундаменты соответствует условиям договора № 04/22-П от 22.04.2022 г., Рабочей документации, а также действующим строительным правилам и нормам.

По второму вопросу эксперты указали, что стоимость затрат на устранение выявленных недостатков (дефектов), в части нарушений подрядчиком условий договора № 04/22-П от 22.04.2022, а также спецификации №8 от 15.07.2022 по устройству металлических ступеней Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м, представлен в Экспертном расчёте №1, в табличной форме в ПК РИК (вер. 1.3.231016) ресурсно-индексным методом с пересчетом в текущие цены, действующие на момент проведения исследования 3 квартал 2023г., и составляет 10 504,84 (десять тысяч пятьсот четыре рубля 84 копейки).

По третьему вопросу эксперты установили, что причиной образования дефектов и деформаций, являются:

1. Отсутствие ворот, что нарушило аэродинамические свойства Модульных сборных металлоконструкций;

2. Погодные условия, а именно порывы ветра, которые создали «воздушный парус» и разрушили здание за счет возникновения завихрения, которое привело к появлению мощной переменной боковой силы по направлению с северо-востока на юго-запад, согласно справке ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Таким образом, обтекание объектов исследования воздухом нарушилось и образовалось завихрение, при этом резко возросла нагрузка, появилась пульсация, раскачивание и прочие негативные эффекты, что послужило разрушающей силой для Модульных сборных металлоконструкций.

По четвертому поросу эксперты сделали вывод, что непринятие мер по защите здания (строения) Модульной сборной металлоконструкции 7.4x15 м и Модульной сборной металлоконструкции 11x12 м от неблагоприятных природных явлений (отсутствие доборных (фасонных) элементов для сэндвич-панелей) не повлияло на степень и характер повреждений данных зданий, так как в данном случае, отсутствие доборных (фасонных) элементов лишь косвенно могло повлиять на степень и характер повреждений данных зданий, так как порывами ветра, которые создали «воздушный парус», при отсутствии ворот в зданиях (строениях) Модульной сборной металлоконструкции 24x15 м и Модульной сборной металлоконструкции 11x12 м «сорвало» бы и крепления доборных элементов.

Однако, отсутствие защиты проемов ворот и дверей в большей степени повлияло на характер повреждений данных зданий.

На основании выводов эксперта, истец в порядке ст. 49 АПК РФ ходатайствовал об уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчика задолженность по договору от 22.04.2022 № 04/22-П в размере 1 056 867,81 руб., неустойку в сумме 107 103,39 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 583 руб. и расходы по оплате экспертизы в размере 38 699 руб.

Суд принимает уточненные требования к рассмотрению.

В соответствии с ч. 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (абз. 1 ч. 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выяснится, что оно соответствует действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

В силу  ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Заключение эксперта подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Требования к содержанию заключения эксперта содержатся в статье 86 АПК РФ. Нарушений положений указанной статьи судом не установлено.

Оценив представленное в дело экспертное заключение от 31.10.2023 по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  пришел к выводу, что оно соответствует требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является ясным и полным, в экспертном заключении содержатся ответы на поставленные судом вопросы, заключение достаточно мотивировано, выводы экспертов носят последовательный непротиворечивый характер.          Данных, свидетельствующих о наличии сомнений в обоснованности выводов экспертов, либо доказательств, опровергающих выводы экспертизы, не установлено.

Изучив материалы дела (в том числе акты выполненных работ, подписанные сторонами), заключения экспертизы, выслушав позиции сторон, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании с ответчика задолженности по договору от 22.04.2022 № 04/22-П в размере 1 056 867,81 рублей.

Доводы отзыва ответчика судом отклоняются, поскольку противоречат материалам дела.

Также истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 107 103,39 руб. (уточненная редакция).

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В силу пункта 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Пунктом 60 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Согласно пункту 7.3 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного договором, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от суммы, срок оплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы по договору.

Расчет истца судом проверен и признан арифметически верным.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки в размере 107 103,39 руб. обоснован и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Также истцом заявлено о взыскании с ответчика расходы по оплате экспертизы в размере 38 699 руб.

Рассмотрев вопрос о распределении судебных расходов, связанных с оплатой услуг экспертов, оказанных в рамках проведения судебной экспертизы, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Статьей 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.

Как усматривается из материалов дела, стоимость услуг эксперта по проведению судебной экспертизы, порученной экспертам СЧУ «Ростовский Центр Судебных Экспертиз» ФИО3, ФИО4 составила 68 699, 52 рублей, что подтверждается представленным в материалы дела счетом № 0311 от 03.11.2023, платежным поручением № 333 от 08.06.2023 года на сумму 48 699 руб., на основании которого истец перечислил на депозитный счет Арбитражного суда Ростовской области денежные средства в счет оплаты услуг эксперта.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что судебные расходы на проведение экспертизы в размере 38 699 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать  с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-Девелопмент» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТАГСТРОЙМЕТАЛЛ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 1 056 867,81 рублей, пени в размере 107 103,39 рублей,  расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 24 583 рубля  и 38 699 рублей в счет возмещения расходов по оплате судебной экспертизы.

            Взыскать  с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-Девелопмент» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 57 рублей. 

            Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

СудьяУкраинцева Ю. В.