АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-1757/2025

г. Магадан

22 октября 2025 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Скороходовой В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чепурной К.П., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление первого заместителя прокурора Магаданской области (прокуратура Магаданской области – ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>) в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публично-правового образования – субъекта Российской Федерации – Магаданской области в лице министерства культуры и туризма Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>)  

к государственному автономному учреждению культуры Магаданской области «Ресурсный центр развития культуры» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>),  

индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН ИП 316491000056184, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>)  

обществу с ограниченной ответственностью «Строй-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>)  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: управление Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>); автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию социально значимых объектов Магаданской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, г. Магадан, Набережная реки Магаданки, д. 15).  

о признании недействительным договоров, применении последствий недействительности сделок в виде возврата денежных средств, взыскании 922 108 руб. 79 коп.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

- признать недействительным договор от 24.01.2025 № 1 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МОГБУК «Сеймчанский краеведческий музей», включая разработку проектно-сметной и рабочей документации, получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости  

объекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, заключенный между ГАУК «Ресурсный центр развития культуры и ООО «Строй-М»;  

- признать недействительным договор от 24.01.2025 № 2 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МОГБУК «Сеймчанский краеведческий музей», включая разработку проектно-сметной и рабочей документации, получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, заключенный между ГАУК «Ресурсный центр развития культуры и индивидуальным предпринимателем ФИО1  

- применить последствия недействительности сделки, возложив на ООО «Строй-М» обязанность возвратить ГАУК «Ресурсный центр развития культуры» денежные средства в размере 12 447 622 руб. 50 коп.;  

- применить последствия недействительности сделки, возложив на индивидуального предпринимателя ФИО1 обязанность возвратить ГАУК «Ресурсный центр развития культуры» денежные средства в размере 2 858 502 руб. 50 коп.  

2. В остальной части исковых требований отказать. 

3. Взыскать с ответчика, государственного автономного учреждения культуры Магаданской области «Ресурсный центр развития культуры» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 230 115 руб. 50 коп.  

4. Взыскать с ответчика общества с ограниченной ответственностью «Строй-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 174 738 руб. 00 коп.  

5. Взыскать с ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН ИП 316491000056184, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 55 377 руб. 50 коп.  

6. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья В.В. Скороходова