АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-6438/2022

г. Ярославль

10 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена  30 августа 2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного казённого учреждения Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью "Северный поток" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о взыскании 307711.62 руб.,

при участии

от истца – ФИО2 по доверенности от 13.01.2022 б/н, диплом

от ответчика – не явились

установил:

Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Северный поток" о взыскании 307711.62 руб.

Ответчик направил письменный отзыв, заявил о применении срока исковой давности.

Истец в заседании требования поддержал в полном объеме.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между ГКУ ЯО «Ярдорслужба» (далее - Заказчик) и ООО «Северный поток» (далее - Подрядчик) был заключен государственный контракт от 03.06.2019 № 19-28/2 (далее - Контракт) по выполнению работ на Объекте: 1. Ремонт автомобильной дороги Углич-Ростов, км 34+716 км 37+213, в Угличском муниципальном районе Ярославской области.

Работы подрядчиком выполнены, заказчиком приняты и оплачены в полном объеме. Задолженность отсутствует.

Сторонами подписано соглашение от 31.01.2020 г. о расторжении контракта по соглашению сторон на сумму 1 562 427,60 руб. в соответствии с расчетом стоимости затрат, неиспользованных подрядчиком.

Согласно п. 9.46 Контракта Подрядчик обязан уплатить денежные средства за возврат материалов, предусмотренных локальными сметами (Приложение № 8 к Контракту). Указанные денежные средства подлежат перечислению Подрядчиком в бюджет Ярославской области в течение 15 дней со дня приемки Заказчиком соответствующих видов работ. При этом Подрядчик обязан в письменном виде уведомить Заказчика об осуществлении вышеуказанного платежа в течение 3 дней со дня его проведения с предоставлением подтверждающих документов (заверенной Подрядчиком копии платежного поручения с отметкой банка).

Денежные средства в установленные контрактом сроки перечисления не были, уведомление и копия платежного поручения в адрес Заказчика не поступали.

Общая сумма денежных средств за возврат материалов составляет 266 451,00 рублей с НДС.

В адрес ООО «Северный поток» была направлена претензия от 25.08.2020 № 02-06/5391, которая была оставлена без удовлетворения.

Указывая на неисполнение ответчиком обязанности по возврату денежных средств, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению  по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В  силу ч.1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Доводы ответчика судом оценены и отклонены.

В соответствии с п. 9.46. государственного контракта денежные средства за возврат материалов, предусмотренных локальными сметами подлежат перечислению Подрядчиком в бюджет Ярославской области в течение 15 дней со дня приемки Заказчиком соответствующих видов работ.

Общая сумма денежных средств неуплаченных за возврат материалов составляет 266 451,60 руб. с НДС, что подтверждается материалами дела.

В соответствии с п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

В силу ст. 714 Гражданского кодекса РФ подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 утверждена и введена в действие Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (далее - Методика), в которой раскрывается экономический смысл и механизм отражения возвратных сумм в бухгалтерском учете.

В соответствии с пунктом 4.100.1 Методики возвратные суммы учитывают стоимость: от реализации заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, определяемые расчетами по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования; материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету; мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шеф-монтаж оборудования; материалов, получаемых в порядке попутной добычи.

В пункте 4.99 Методики рекомендовано указывать возвратные суммы за итогом сводного сметного расчета стоимости строительства.

 Согласно п/п 1 п.1 ст. 146 Налогового кодекса РФ реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) являются объектом налогообложения. Соответственно возвратные материалы подлежат налогообложению по ставке 20%.

Таким образом, сумма возвратных материалов облагается налогом на добавленную стоимость и является правомерной.

Учитывая, что условиями контракта, подписанного между сторонами, согласовано условие о возврате денежных средств за материал, суд отклоняет доводы ответчика в указанной части.

Доводы ответчика судом не принимаются как необоснованные. в том числе в части заявления о применении срока исковой давности в связи с подписанием акта от 08.08.2019 и 30.08.2019 и обращением с иском в суд 25.04.2022.

При таких обстоятельствах, суд полагает требования, подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

При наличии установленного факта пользовании денежными средства без должного правомочия требование о взыскании процентов, продолжении начисления процентов является обоснованным, соответствует ст. 395 ГК РФ.

Проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию в указанном размере. 

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу искового заявления относится на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северный поток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казённого учреждения Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 266 451,60 руб. долга, 41 238,40 руб. процентов. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северный поток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 9 153,36 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Л.А. Шадринова