Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-70943/24-96-505

22 июля 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 28.06.2024

Полный текст решения изготовлен  22.07.2024

 

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ЮНИК-СТРОЙ" 129347, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРОСЛАВСКИЙ, УЛ РОТЕРТА, Д. 2, КОМ. 30ОГРН: 1155018000565, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 771601001 к ООО "ТРИ ЭС СТАНДАРТ СТРОЙ" 426006, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ КЛУБНАЯ, Д. 67А, ПОМЕЩ. 10ОГРН: 1227700265066, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2022, ИНН: 

<

***>, КПП: 180001001 о взыскании 4 905 582,8 руб.

при участии:

от истца: Дон И.А. по дов. от 20.10.23г.; диплом;

от ответчика: ФИО1 по дов. от 01.06.24г., диплом,

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЮНИК-СТРОЙ" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ТРИ ЭС СТАНДАРТ СТРОЙ" (далее по тексту – Ответчик) в котором просил суд:

1. Обязать ООО «Три Эс Стандарт Строй» принять, вывезти со склада ООО «ЮНИК-СТРОЙ», расположенного по адресу: 

<

...>, и оплатить стоимость 4 765 950 рублей за следующий товар:

Номер по пп

Номе р по смете

Наименование работ

Ед. изм.

Кол -во

Стоимость за ед. изм., руб.

Стоимость за единицу, в т.ч.с НДС

Итого стоимост ь по догвору, руб. (в т.ч.НДС)

 

 

 

 

 

 

Стоимость выполнени я работ., руб.

Стоимость материалов, руб.

 

1

2 3

4

5

6

7

8

9

 

Отделка 2 - 29 этаж ДВЕРИ секция №1

 

 

 

3

9

Т1. Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный RAL7016. Замок под трёхгранный ключ размер проёма 1200*2000.

шт

38

14140

2900

11240

537 320,00

4

10

Т2 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 900*2000.

шт

35

10160

2500

7660

355 600,00

5

11

Т3 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

шт

56

9960

2500

7460

557 760,00

6

12

RAL7016. Замок под трёхгранный ключ размер проёма 700*2000.

Т4 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 400*2000.

шт

5

7920

2200

5720

39 600,00

7

13

Т5 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2000.

шт

36

8420

2500

5920

303 120,00

8

14

Т6 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 500*2000.

шт

40

8020

2200

5820

320 800,00

9

15

Л1 прав. Люк металлический противопожарны й крашенный RAL7016. Замок под английский ключ размер проёма 400*400

шт

30

6000

1800

4200

180 000,00

 

Отделка 2 - 29 этаж ДВЕРИ секция №2

 

 

 

13

9

Т2 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 500*2000.

шт

2

8020

2200

5820

16 040,00

14

10

Т3 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2000.

шт

1

8420

2500

5920

8 420,00

17

13

Т6 Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1200*2000.

шт

5

14140

2900

11240

70 700,00

18

14

Т7 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 500*2000.

шт

19

8020

2200

5820

152 380,00

19

15

Т8 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 700*2000.

шт

1

9960

2500

7460

9 960,00

20

16

Т9 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 900*2000.

шт

2

10160

2500

7660

20 320,00

21

17

Л1 прав.,Люк металлический противопожарны й крашенный RAL7016. Замок под английский ключ размер проёма 400*400

шт

7

6000

1800

4200

42 000,00

 

Отделка 2 - 28 этаж ДВЕРИ секция №3

 

 

 

24

9

Т1. Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1300*2000.

шт

14

14240

2900

11340

199 360,00

25

10

Т2 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный

шт

5

10160

2500

7660

50 800,00

26

11

ключ размер проёма 900*2000.

Т3 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 900*2000.

шт

4

10160

2500

7660

40 640,00

27

12

Т4 прав. ЛЛюк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 700*2000.

шт

6

9960

2500

7460

59 760,00

28

13

Т5 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 700*2000.

шт

3

9960

2500

7460

29 880,00

29

14

Т6 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2000.

шт

11

8420

2500

5920

92 620,00

30

15

Т7 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 400*2000.

шт

24

7920

2200

5720

190 080,00

31

16

Л1 прав. Люк металлический противопожарны й крашенный RAL7016. Замок под английский ключ размер проёма 400*400

шт

5

6000

1800

4200

30 000,00

32

17

Л2 прав.Люк металлический противопожарны й крашенный RAL7016. Замок под английский ключ размер проёма 300*300

шт

1

6000

1800

4200

6 000,00

33

18

Л3 прав.Люк металлический противопожарны й крашенный RAL7016. Замок под английский ключ размер

проёма 300*300

шт

1

6000

1800

4200

6 000,00

ИТОГО с НДС

в том числе НДС 20 %

ИТОГО без НДС

3 319 160,00

553 193,33

2 765 966,67

 

Номер по пп

Номе р по смете

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость за ед. изм., руб-

Стоимость за единицу, в т.ч.с НДС

Итого стоимост

ь по догвору,

руб. (в т.ч.НДС)

 

 

 

Стоимость выполнения работ., руб.

Стоимость материалов, руб-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Подземная автостоянка

 

 

1

1

Д1 Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока

970*2070. RAL

7016. Ручка на планке чёрная.

шт

1

14200

2600

11600

14 200,00

2

2

Д2. Дверь металлическая одностворчатая противопожарн

ая EIS 60

остекление 300х600И, без эл магн замка, Размер блока 1070*2070.

RAL 7016.

Ручка на планке

чёрная.

Доводчик.

шт

2

19150

2900

16250

38 300,00

3

3

Д2. лев Дверь металлическая одностворчатая противопожарн

ая EIS 60

остекление 300х600И, без эл магн замка, Размер блока 1070*2070.

RAL 7016.

Ручка на планке

чёрная.

Доводчик.

шт

1

19150

2900

16250

19 150,00

4

4

Д3. Дверь

металлическая

одностворчатая

противопожарн

ая EIS 60

остекление

300х600И, без

замка, Размер

блока

1070*2070.

RAL 7016.

Ручка на планке

чёрная.

Доводчик.

шт

1

19150

2900

16250

19 150,00

5

5

Д3. лев Дверь металлическая одностворчатая противопожарн

ая EIS 60

остекление 300х600И, без амка, Размер блока 1070*2070.

RAL 7016.

Ручка на планке

чёрная.

Доводчик.

шт

1

19150

2900

16250

19 150,00

6

6

Д 4лев. Дверь металлическая двухстворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока

1370*2070. RAL 7016.

Ручка на планке чёрная.

шт

1

20800

3000

17800

20 800,00

7

7

Дт-1 Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока 770*1970. RAL 7016. Ручка на планке чёрная.

шт

2

13600

2600

11000

27 200,00

8

8

Дт-1лев Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока 770*1970. RAL 7016. Ручка на планке чёрная.

шт

2

13600

2600

11000

27 200,00

9

9

Дт-2 Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока 970*1970. RAL 7016. Ручка на планке чёрная.

шт

1

14200

2600

11600

14 200,00

10

10

Дт-2лев Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока 970*1970. RAL 7016. Ручка на планке чёрная.

шт

1

14200

2600

11600

14 200,00

11

11

Дт3. Дверь металлическая двухстворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока 1170*1970.

RAL 7016.

Ручка на планке чёрная.

 

1

17400

3000

14400

17 400,00

12

11

Дт4. Дверь металлическая двухстворчатая глухая

противопожарн ая EIS 60. Размер блока 1370*1970.

RAL 7016.

Ручка на планке чёрная.

шт

5

20000

3000

17000

100000,00

13

12

Л-1 .Люк металический противопожарн ый EI-60, крашенный RAL7016. Замок под английский ключ размер проёма

1100*1100

шт

3

11800

2600

9200

35 400,00

ИТОГО с НДС

в том числе НДС 20 %

ИТОГО без НДС

366 350,00

61 058,33

305 291,67

 

Номер по пп

Номе р по смете

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость за ед. изм., руб.

Стоимость за единицу,

в т.ч.с

НДС

Итого стоимость по договору, руб. (в т.ч.НДС)

 

 

 

Стоимость выполнени я работ., руб.

Стоимость материалов, руб.

 

1 2

3

4

5 6 | 7 | 8 1 9

 

Отделка подзземных этажей ДВЕРИ секция №1

 

14

14

Л-1 .Люк металический потолочный противопожарны

шт

1

13700

3500

10200

13 700,00

 

й EI-60, крашенный RAL7016 Замок под английский ключ размер

проёма 800*800

 

 

 

ИТОГО с НДС

в том числе НДС 20 %

ИТОГО без НДС

13700,00 2283,33 

11416,67

 

Номер по пп

Номер

по смете

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость за ед. изм.,

Стоимость за единицу, в т.ч.с НДС

Итого стоимость

по догвору, руб. (в т.ч.НДС)

 

 

 

Стоимость выполнения работ., руб.

Стоимость материалов,

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Отделка 1й этаж ДВЕРИ секция №1 с пристройкой

 

 

 

1

1

Д1 Дверь противопожарная BIS 60

металлическая одностворчатая остекление 900 х 1700 Полотно размер 1100*2050 Ручка на розетке МогеШ DIY MH-35 BL-S, цвет-черный, левая, с доводчиком. Цвет - RAL 7016.

шт

1

43850

4500

39350

43 850,00

2

2

Д2 Дверь противопожарная

BIS 60

металлическая одностворчатая остекление 900 х 1700 Полотно размер 1100*2050 Ручка на розетке МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный, правая, с доводчиком .

Цвет - RAL 7016.

(открывание на 180 град)

шт

1

43850

4500

39350

43 850,00

3

5

Д5 лев., Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарная BI 60. Со скрытой коробкой Полотно размер

700 *2050. Цвет -RAL 7016 Ручка

МогеШ DIY MH-

шт

1

17400

2600

14800

17400,00

 

35 BL-S, цвет-черный.)

 

 

 

4

6

Д6 лев., Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарная EI 60. Со скрытой коробкой Полотно размер 1050 *2050. Цвет - RAL 7016 Ручка МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный.) с доводчиком с задержкой 30 сек

шт

1

22500

2900

19600

22500,00

5

7

Т1 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 400*2100.

шт

1

8420

2200

6220

8420,00

6

8

Т2 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2100.

шт

1

8740

2200

6540

8740,00

7

9

Т3 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 800*2100.

шт

1

10700

2500

8200

10700,00

8

10

Т4 Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1100*2100.

шт

1

11700

2500

9200

11700,00

9

11

Т5 Люк

металический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

шт

2

15180

2900

12280

30 360,00

10

12

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1300*2100.

Л1 лев., Люк

металлический,

противопожарный

скрытого

монтажа,под

плитку Замок под

трёхгранный

ключ ,Петли

скрытые,

уплотнитель

резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 600*800

шт

1

11000

2200

8800

11000,00

11

13

Л2 прав., Люк металлический, противопожарный Замок под трёхгранный ключ ,Петли скрытые, уплотнитель резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 500*800

шт

1

10300

2200

8100

10300,00

12

14

Л3 прав., Люк металлический, противопожарный Замок под трёхгранный ключ ,Петли скрытые, уплотнитель резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 300*300

шт

2

6000

1800

4200

12000,00

 

Отделка 1й этаж ДВЕРИ секция №2

 

 

 

13

1

Д1 Дверь противопожарная BIS 60

металлическая одностворчатая остекление 900 х 1700 Полотно размер 1100*2050 Ручка на розетке МогеШ DIY MH-35 BL-S, цвет-черный, левая, с доводчиком. Цвет - RAL 7016., (открывание на 180 град)

шт

1

43850

4500

39350

43 850,00

14

2

Д2 Дверь противопожарная

BIS 60

металлическая одностворчатая остекление 900 х 1700 Полотно

размер 1100*2050

Ручка на розетке

шт

1

43850

4500

39350

43 850,00

 

МогеШ DIY MH-35 BL-S, цвет-черный, правая, с доводчиком, Цвет - RAL 7016.

 

 

 

15

4

Д4 лев., Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарная EI 60. Со скрытой коробкой Полотно размер

700 *2050. Цвет -RAL 7016 Ручка

МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный.)

шт

1

17400

2600

14800

17400,00

16

5

Д5 прав., Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарная EI 60. Со скрытой коробкой Полотно размер 1100 *2050. Цвет

- RAL 7016 Ручка

МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный.), с доводчиком с задержкой 30 сек

шт

1

22500

2900

19600

22500,00

17

7

Т1 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2100.

шт

2

8740

2200

6540

17480,00

18

8

Т2 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2100.

шт

2

8740

2200

6540

17480,00

19

9

Т3. Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1100*2100.

шт

1

11700

2500

9200

11700,00

20

10

Т4. Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1200*2100.

шт

2

14880

2900

11980

29 760,00

21

11

Л1 лев., Люк

металлический,

противопожарный

скрытого

монтажа,под

плитку Замок под

трёхгранный

ключ ,Петли

скрытые,

уплотнитель

резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 600*800

шт

1

10300

2200

8100

10300,00

22

12

Л2 лев., Люк металлический, противопожарный Замок под трёхгранный ключ ,Петли скрытые, уплотнитель резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 600*800

шт

1

11400

2200

9200

11400,00

23

13

Л3 прав., Люк металлический, противопожарный Замок под трёхгранный ключ ,Петли скрытые, уплотнитель резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 300*300

шт

2

6400

2200

4200

12800,00

 

Отделка 1й этаж ДВЕРИ секция №3 и

пристройки у секции №3

 

 

 

24

1

Д3 Дверь противопожарная

BIS 60

металлическая одностворчатая остекление 900 х 1700 Полотно размер 1100*2050 Ручка на розетке МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный, левая, с доводчиком. Цвет - RAL 7016., (открывание на 180 град)

шт

1

43850

4500

39350

43 850,00

25

2

Д4 Дверь

противопожарная

BIS 60

металлическая одностворчатая остекление 900 х 1700 Полотно размер 1100*2050 Ручка на розетке МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный, правая, с доводчиком . Цвет - RAL 7016.

шт

1

43850

4500

39350

43 850,00

26

5

Д5 лев., Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарная BI 60. Со скрытой коробкой Полотно размер

700 *2050. Цвет -RAL 7016 Ручка

МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный.)

шт

1

17400

2600

14800

17400,00

27

6

Д6 лев., Дверь металлическая одностворчатая глухая

противопожарная BI 60. Со скрытой коробкой Полотно размер 1050 *2050. Цвет

- RAL 7016 Ручка

МогеШ DIY MH-

35 BL-S, цвет-

черный.), с доводчиком с задержкой 30 сек

шт

1

22500

2900

19600

22500,00

28

7

Д7 Дверь техническая решетчатая. Полотно размер 950*2300. Покраска в белый цвет RAL 9010 ,

проём 1670*4050

мм

шт

1

20700

5200

15500

20 700,00

29

8

Т1 лев Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 600*2000.

шт

2

8740

2200

6540

17480,00

30

9

Т2 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 900*2000.

шт

1

10700

2500

8200

10700,00

31

10

Т3 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 850*2100.

шт

1

10700

2500

8200

10700,00

32

11

Т4 лев. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 500*2100.

шт

1

8740

2200

6540

8740,00

33

12

Т5. Люк

металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 1200*2100.

шт

1

14880

2900

11980

14880,00

34

13

Т6 прав. Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный

RAL7016. Замок

под трёхгранный ключ размер проёма 900*2100.

шт

1

10700

2500

8200

10700,00

35

14

Л1 лев., Люк металлический, противопожарный Замок под трёхгранный ключ ,Петли скрытые, уплотнитель резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 300*300

шт

2

6000

1800

4200

12000,00

36

15

Л2 прав., Люк металлический, противопожарный Замок под трёхгранный ключ ,Петли скрытые, уплотнитель резиновый, цвет

по RAL7016

размер блока 600*800

шт

1

10300

2200

8100

10300,00

 

Отделка 1й и 2 й этаж ДВЕРИ секция №4

 

 

 

40

4

Л-5 Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный RAL

9003. Замок с

магнитной защёлкой, размер проёма 600*800h,

шт

5

6500

2000

4500

32 500,00

41

5

Л-5л Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный RAL

9003. Замок с

магнитной защёлкой, размер проёма 600*800h,

шт

5

6500

2000

4500

32 500,00

42

6

Л-6 Люк металлический двупольный в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный RAL

9003. Замок с

магнитной защёлкой, размер проёма 1200*1000h,

шт

10

8900

2000

6900

89 000,00

43

7

Л-7 Люк

металлический ревизионный в полу , размер проёма 450*450h,

шт

1

22000

2000

20000

22000,00

44

8

Л-1 Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 170*400h,

шт

4

4000

1500

2500

16000,00

45

9

Л-1 л Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 170*400h,

шт

4

4000

1500

2500

16000,00

46

10

Л-2 Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 250*300h,

шт

5

4000

1500

2500

20 000,00

47

11

Л-2 л Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 250*300h,

шт

5

4000

1500

2500

20 000,00

48

12

Л-3 Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 300*400h,

шт

4

4000

1500

2500

16000,00

49

13

Л-3л Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 300*400h,

шт

4

4000

1500

2500

16000,00

50

14

Л-4Люк

металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 400*400h,

шт

1

4300

1500

2800

4300,00

51

15

Л-4л Люк металлический в 1 лист металла крашенный RAL 9003. Замок с магнитной защёлкой, размер проёма 400*400h,

шт

1

4300

1500

2800

4300,00

52

16

Л-5 Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный RAL

9003. Замок с

магнитной защёлкой, размер проёма 600*800h,

шт

5

6500

2000

4500

32 500,00

53

17

Л-5 Люк металлический в 1 лист металла с рёбрами жёсткости крашенный RAL

9003. Замок с

магнитной защёлкой, размер проёма

600*800h,

шт

5

6500

2000

4500

32 500,00

ИТОГО с НДС

в том числе НДС 20 %

1 066 740,00 177 790,00

 

2.         Взыскать с ООО «Три Эс Стандарт Строй» в пользу ООО «ЮНИК-СТРОЙ» проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 25.12.2023 г. по 29.02.2024 г. в размере 139 632,80 рублей.

3.         Взыскать с ООО «Три Эс Стандарт Строй» в пользу ООО «ЮНИК-СТРОЙ» проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 01.03.2024 г. по дату фактического исполнения судебного решения.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

В обоснование иска, истец указал на следующие обстоятельства.

Между ООО «ЮНИК-СТРОЙ» (далее -«Истец», «Подрядчик») и ООО «Три Эс Стандарт Строй» (далее - «Ответчик», «Заказчик») был заключен Договор подряда № 18/11-22 от 11.11.2022 г. (далее - «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик обязался выполнить следующие работы: по поставке и монтажу металлических дверей в МОП, паркинг и надстройку на строящемся объекте «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Открытое шоссе, вл. 14д.», (далее - «Объект»), в соответствии с условиями Договора, в объеме, предусмотренном Локальной сметой (Приложение №1 к Договору) и техническим заданием (если имеется) (далее - «Работы»), а Заказчик обязался принять результат Работ и оплатить его.

В соответствии с п. 2.1. Договора Цена Договора определена Сторонами на основании Локальной сметы (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 16 066 970 (шестнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 20% - 2 677 823 (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 33 копейки. Указанная цена остается окончательной до полного завершения Подрядчиком Работ.

В соответствии с п. 2.3.1. Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора Заказчик на основании оригинала счета Подрядчика оплачивает авансовый платеж в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек от стоимости на поставку металлических дверей в МОП, паркинг и надстройку, в т.ч. НДС 20% - 1 333 333 (один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Заказчик выполнил условие по перечислению аванса в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, что подтверждается Платежным поручением от 17.11.2022 г. № 1162.

В соответствии с п. 2.3.3. Договора оплата выполненных Подрядчиком в отчетном периоде Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня с даты принятия результата работ в порядке ст. 7 настоящего Договора и представления Подрядчиком документов, указанных в п.2.3.2 настоящего Договора.

Согласно п. 2.3.4. Договора при оплате Подрядчику стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ Заказчик осуществляет удержание части оплачиваемого платежа в размере 5 (пяти) % от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и отраженной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3) за отчетный период в качестве гарантийного удержания, а также производит 40% зачет авансового платежа, выплаченного Заказчиком согласно п. 2.3.1 настоящего Договора.

Также Стороны определили в п. 2.3.5. Договора, что неиспользованная сумма аванса подлежит зачету в следующем отчетном периоде до полного погашения.

Согласно п. 2.3.13. Договора в целях настоящего Договора Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии с п. 4.1.2. Договора Заказчик обязан принять результат работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения формы КС-2, КС-3 и оплатить его исходя из фактического объема выполненных Работ в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

При этом Подрядчик выполнил Работы в соответствии с Договором в надлежащем виде на общую стоимость 11 301 020 (Одиннадцать миллионов триста одна тысяча двадцать) рублей, что подтверждается соответствующими документами: КС-2 от 31.05.2023 г., КС-3 от 31.05.2023 г., которые были направлены Заказчику. При этом фактически работы приняты Заказчиком 13.06.2023 г.

Кроме того, Подрядчиком выполнено условие по изготовлению Товара, в соответствии с Перечнем товара, приложенным к настоящем исковому заявлению, на общую сумму 4 765 950 рублей, в том числе НДС, о чем Заказчик был уведомлен.

В соответствии с ч. 1 ст. 513 ГК РФ Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

На основании статьи 515 Кодекса, когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Согласно статье 484 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

В соответствии с п. 10.4.1. Договора Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору каждый раз более чем на 2 (два) месяца.

В соответствии с п. 10.5. Договора в случае одностороннего отказа от Договора Сторона, инициирующая расторжение, направляет уведомление об этом другой Стороне за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Договор.

Как указывает истец, в связи с грубым нарушением Ответчиком условий Договора со стороны Истца в адрес Ответчика 12.12.2023 г. было направлено уведомление об отказе от Договора подряда № 18/11-22 от 11.11.2022 г., в связи с чем на основании п. 10.5 Договора с 23.12.2023 г. Договор считается прекращенным.

При этом до настоящего времени Заказчиком не принят, не вывезен со склада Подрядчика и не оплачен Товар, перечисленный в Перечне товара, приложенном к настоящему исковому заявлению, на общую стоимость 4 765 950 рублей, в том числе НДС.

Данные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.

Между сторонами был заключен договор подряда. К спорным правоотношениям подлежат применению нормы, регулирующие договор подряда, а также нормы о неосновательном обогащении.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч. 1 ст. 702 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пунктом 10.3.2 Договора подряда Стороны согласовали право Заказчика на отказ от Договора в одностороннем несудебном порядке в случае невыполнения или нарушения более чем на 10 (десять) рабочих дней окончательного срока выполнения работ по Договору или промежуточных сроков выполнения этапов/подэтапов/разделов работ согласно приложению № 2 к Договору.

Систематическое нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору подряда привело к отказу Заказчика от исполнения Договора подряда. Несмотря на утверждения Подрядчика о его инициативе при расторжении Договора подряда, изложенные в исковом заявлении и вводящие в заблуждение суд, именно Заказчик произвел отказ от исполнения Договора подряда, что подтверждается письмом (досудебной претензией) № 30-2023(10) от 05.10.2023г. об отказе от Договора подряда с 16.10.2023г.

Таким образом, с 16.10.2023г. Договор является расторгнутым по инициативе Заказчика в связи с нарушениями Подрядчиком обязательств по Договору подряда. Последующий отказ от исполнения уже расторгнутого Договора, предпринятый Подрядчиком 12.12.2023г., не имеет правового значения.

Указанное обстоятельство в числе других подробно исследовалось Арбитражным судом города Москвы в ходе рассмотрения искового заявления Заказчика по делу № А40-245935/23-68-1747 о взыскании с Подрядчика неустойки по Договору подряда. Арбитражным судом города Москвы 03.05.2024 вынесено решение по делу № А40-245935/23-68-1747 о взыскании с ООО «ЮНИК-СТРОЙ» в пользу ООО «Три Эс Стандарт Строй» неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда и расходов по уплате государственной пошлины. В решении по указанному делу Арбитражный суд уже дал надлежащую правовую оценку письменным доказательствам, представленным Сторонами, в том числе основаниям для отказа Заказчика от исполнения Договора подряда, подтвердив их правомерность, и постановил взыскать с Подрядчика неустойку за нарушение сроков выполнения Работ по Договору подряда в сумме 1 100 934 рублей 45 копеек.

Расторжение договора подряда заказчиком по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 715, пунктом 3 статьи 723 ГК РФ (существенная просрочка или выполнение работ с недостатками), предоставляет заказчику право требовать от подрядчика возмещения убытков, чтобы компенсировать потери, причиненные заказчику, принужденному недобросовестностью подрядчика к «выходу» из договора. Как видно из вышеизложенного, в рассматриваемом случае Договор подряда был расторгнут Заказчиком в связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения Работ. В связи с чем у Истца отсутствует право требовать возмещения каких-либо убытков с связи с расторжением Договора подряда.

Как следует из текста Договора подряда (п. его предметом является именно выполнение Работ, а не поставка товара.

Так, согласно п. 1.2. Договора Работы подлежат выполнению в соответствии с проектной и сметной документацией, а надлежащим результатом выполнения Работ являются такие Работы, в отношении которых проведены испытания с участием Заказчика и уполномоченных органов власти, получены все документы, подтверждающие соответствие результатов Работ проектной документации, требованиям технических регламентов, нормативных документов в области строительства, которые пригодны как в целом, так и в каждой ее части для надлежащей и безопасной эксплуатации.

Согласно п. 6.4. Договора подряда работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика. То есть изготовленные Подрядчиком вещи, которые Подрядчик называет «товаром», в действительности представляют собой материалы и оборудование, предназначенные и необходимые для надлежащего выполнения Работ. При этом, документами, оформляющими и подтверждающими надлежащее выполнение Подрядчиком Работ, являются Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных Работ (Форма КС-3). Согласно п. 8.4. Договора Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ухудшение качества Работ, вызванное ненадлежащим качеством использованных при выполнении материалов и оборудования в соответствии со ст. 704, 716, 745 ГК РФ, регулирующими подрядные правоотношения.

Все содержание Договора направлено на детализацию Сторонами хода и процесса выполнения Работ, фиксируя в т.ч. порядок передачи фронта Работ, обязанность Подрядчика вести журналы производства Работ, в которых отражается весь ход производства Работ, а также обязанность Подрядчика осуществлять входной контроль качества материалов и конструкций и изделий, соблюдать требования охраны и техники безопасности труда, инструкций по охране труда, предоставление гарантии на результат выполненных Работ и т.д.

При заключении Договора правовой интерес Заказчика заключался не в приобретении партии люков и дверей, а в заказе Истцу Работ по изготовлению и монтажу металлических дверей в МОП, паркинг и надстройку на Объекте. То обстоятельство, что в Договоре единожды упомянуто слово «поставка» свидетельствует не о смешанном характере правоотношений, а лишь о сопутствующей обязанности Подрядчика поставить на площадку материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ. В свою очередь, включение в цену Работ стоимости материалов и оборудования свидетельствует как раз об отсутствии элементов договора поставки и возникновении исключительно подрядных правоотношений.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 29.12.2022 № 305-ЭС 17-7300(4) в ситуации, когда договором подряда на подрядчика возлагается обязанность по поставке материалов и оборудования в целях достижения предусмотренного таким договором результата работ (статья 704 ГК РФ), данная договорная обязанность не имеет самостоятельной правовой природы, выступает частью подрядных отношений и является встречной по отношению к обязанности заказчика принять и оплатить выполненные в согласованный срок работы.

Работы по монтажу указанного в исковом заявлении оборудования на сумму 4 765 950,00 рублей Подрядчиком не выполнялись, обязательство по оплате данного вида работ на стороне Ответчика не возникло.

В отсутствие волеизъявления Ответчика на приобретение оборудования (отдельно от выполнения работ по монтажу металлических дверей) действия Ответчика по отказу в принятии материалов и оборудования не могут быть квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязательств, поскольку самостоятельный договор на поставку товара Сторонами не был заключен, а по Договору подряда условия для оплаты каких либо иных работ, кроме уже оплаченных Заказчиком, не наступили.

Согласно п. 3.1 Договора подряда Сроки выполнения Работ определены Сторонами в Графике производства работ (Приложения №№ 2.1-2.5 к Договору подряда). Согласно подписанным приложениям Сторонами были установлены следующие сроки:

-           срок начала производства Работ по Договору подряда - 11 ноября 2022 г;

-           срок окончания производства Работ по Договору подряда - 15 февраля 2023г.

В соответствии с п. 2.3.3 Договора подряда оплата выполненных Подрядчиком в отчетном периоде Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня с даты принятия результата Работ в порядке ст. 7 Договора подряда и представления Подрядчиком документов, указанных в п. 2.3.2 Договора подряда.

Согласно п. 2.3.4. Договора подряда при оплате Подрядчику стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ Заказчик осуществляет удержание части оплачиваемого платежа в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и отраженной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период в качестве гарантийного удержания, а также производит зачет 40% авансового платежа, выплаченного Заказчиком.

При этом согласно п. 2.3.8 Договора подряда выплата суммы гарантийного удержания за вычетом суммы, использованной Заказчиком для покрытия своих расходов, осуществляется по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения сроков, установленных п. 7.8. Договора подряда.

Согласно п. 7.8. Договора подряда Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на результат выполненных Работ по Договору в течение года, начиная с более поздней из следующих дат: даты ввода Объекта в эксплуатацию либо даты подписания Сторонами последнего из Актов о приемке выполненных работ(форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), но не менее срока, установленного действующей нормативно-технической документацией РФ.

Как следует из материалов дела, Подрядчик предоставил документацию по исполнению части Работ на общую сумму 11 301 020,00 (Одиннадцать миллионов триста одна тысяча двадцать) рублей (в том числе НДС 20%), что подтверждается соответствующими документами: Актами о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.05.2023г., Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 31.05.2023г., подписанными Сторонами.

За вычетом аванса (8 000 000,00 руб.) и гарантийного удержания (565 051,00 руб.) Заказчиком были в полном объеме оплачены частично выполненные Подрядчиком Работы на сумму 2 735 969,00 (Два миллиона семьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей (в том числе НДС 20%), что подтверждается платежным поручением № 102 от 19.07.2023г. (Приложение № 1).

Таким образом, как видно из вышеизложенного, обязанность по оплате Заказчиком частично выполненных Подрядчиком Работ выполнена в полном объеме. В настоящее время у Заказчика отсутствует задолженность по оплате Работ по Договору подряда.

Денежные средства в сумме 565 051,00 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль, которые Подрядчик истребует у Заказчика в рамках рассматриваемого дела, были правомерно удержаны Заказчиком в качестве гарантийного удержания на основании п. 2.3.4. Договора подряда, что подтверждается КС-2 от 31.05.2023г., КС-3 от 31.05.2023г., подписанными Сторонами.

При этом, учитывая, что разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию получено 25.08.2023г. срок возврата гарантийного удержания согласно п.п. 2.3.8, 7.8. Договора подряда еще не наступил, в связи с чем сумма денежных средств в размере 565 051,00 рублей в настоящее время правомерно удерживается Заказчиком.

В силу ч. 1 ст. 64, ст. 71 и 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами ст. ст. 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, руководствуясь названными нормами права, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований об обзяании ООО «Три Эс Стандарт Строй» принять, вывезти со склада ООО «ЮНИК-СТРОЙ», расположенного по адресу: 

<

...>, и оплатить стоимость 4 765 950 рублей за следующий товар.

Как установлено п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу п. 48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Между тем, поскольку требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами является производным от основного долга, следовательно, при отказе в удовлетворении основного требования, не подлежит удовлетворению и заявленное требование о взыскании процентов.

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать.

Возвратить ООО "ЮНИК-СТРОЙ"  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 397 руб., уплаченную по платежному поручению № 51 от 05.02.2024 года.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                     П.С. Гутник