49/2023-43387(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-1731/2023

город Вологда

13 апреля 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 апреля 2023 года. Полный текст решения изготовлен 13 апреля 2023 года. 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корепина С.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Департамента лесного комплекса Вологодской области (ОГРН  

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа  компаний «УЛК» (ОГРН 

<

***>, ИН 

<

***>) о возложении  обязанности исполнить в срок до «01» октября 2023 года обязанность по  выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов за 2022 год по  договору аренды лесного участка № 04-01-11/16-2012 от 16.07.2012 в натуре,  а именно: прочистка квартальных просек протяженностью 23 км, подготовка  почвы под лесные культуры будущего года на площади 50,7 га, подготовка  почвы под лесные культуры текущего года на площади 29,4 га, подготовка  почвы под комбинированное лесовосстановление культуры будущего года на  площади 35,1 га, рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки) на  площади 285 га, о взыскании 9 143 руб. 37 коп.,  

при участии: от истца ФИО2 по доверенности от 16.11.2022,  

у с т а н о в и л:

Департамент лесного комплекса Вологодской области (далее –  Департамент, истец) обратился в арбитражный суд Вологодской области с  иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний  «УЛК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ответчик, ООО  «Группа компаний «УЛК») о возложении обязанности исполнить в срок до  «01» октября 2023 года обязанность по выполнению работ по охране, защите  и воспроизводству лесов за 2022 год по договору аренды лесного участка   № 04-01-11/16-2012 от 16.07.2012 в натуре, а именно: прочистка квартальных  просек протяженностью 23 км, подготовка почвы под лесные культуры  будущего года на площади 50,7 га, подготовка почвы под лесные культуры  Код для идентификации:  

текущего года на площади 29,4 га, подготовка почвы под комбинированное  лесовосстановление культуры будущего года на площади 35,1 га, рубки  ухода в молодняках (осветление, прочистки) на площади 285 га и о  взыскании неустойки в размере 9 143 руб. 37 коп.  

В обоснование исковых требований истец сослался на ненадлежащее  выполнение ответчиком договорных обязательств по выполнению работ по  охране, защите и воспроизводству лесов.  

В качестве правового обоснования иска истец указал статьи 309, 310  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные  требования по основаниям, изложенным в иске.  

Ответчик представителя в суд не направил, в письменном отзыве  возразил против удовлетворения иска, просил снизить неустойку на  основании статьи 333 ГК РФ.  

Дело рассмотрено судом в соответствии со статьей 156 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в  отсутствие представителя ответчика.  

Исследовав материалы дела, оценив доказательства по делу, заслушав  объяснения представителя истца, суд считает исковые требования  подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 16 июля 2012 года между Департаментом  лесного комплекса Вологодской области (Арендодатель) и ООО «Группа компаний  «УЛК» (Арендатор) заключён договор аренды лесного участка № 04-01-11/16-2012  (зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по Вологодской области 28.08.2012 за регистрационным  номером 35-35-17/006/2012-514) для осуществления заготовки древесины за плату,  сроком действия до 15 июля 2061 года.  

Арендатором ООО «Группа компаний «УЛК» разработан Проект освоения  лесов, который получил положительное заключение государственной экспертизы  (приказ Департамента от 13.12.2018 № 2019).  

Объемы и сроки выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов  содержатся в разделе 4 «Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов»  Проекта освоения лесов.  

Арендатор лесного участка ООО «Группа компаний «УЛК» в соответствии с  п.п. «ж», «з», »и» п. 12 раздела 3 договора аренды лесного участка № 04-01-11/16-2012  от 16.07.2012 года обязан осуществлять мероприятия по охране, защите и  воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством РФ и  Проектом освоения лесов. Объемы и сроки выполнения работ установлены Проектом  освоения лесов.  

Арендатор ООО «Группа компаний «УЛК» за 2022 год обязан был выполнить  работы по охране, защите и воспроизводству лесов:  

Прочистка квартальных просек протяженностью 53 км. Выполнено и сдано  Арендатором Департаменту работ протяженностью 30 км. Не выполнено работ  Арендатором протяженностью 23 км.  

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года на площади 50,7 га. Не  выполнено работ Арендатором на площади 50,7 га.  

Подготовка почвы под лесные культуры текущего года на площади 109,0 га.  Выполнено и сдано Арендатором Департаменту работ на площади 79,6 га. Не  выполнено работ Арендатором на площади 29,4 га.  

Подготовка почвы под комбинированное лесовосстановление культуры  будущего года на площади 35,1 га. Не выполнено работ Арендатором на площади 35,1  га.  

Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки) на площади 450,7 га.  Выполнено и сдано Арендатором Департаменту работ на площади 165,7 га. Не  выполнено работ Арендатором на площади 285 га.  

По окончании сроков выполнения работ по охране, защите и воспроизводству на  арендуемом лесном участке Арендатор обязан сдать указанные работы, на основании  акта выполненных работ, с подписанием данного акта уполномоченными  представителями сторон договора. При этом приемка выполненных работ  осуществляется в соответствии с графиком сдачи-приемки работ, ежегодно  устанавливаемым соглашением сторон договора.  

Как указывает истец, Арендатором не сданы Арендодателю по актам  выполненных работ следующие работы по охране, защите и воспроизводству лесов за  2022 год:  

Прочистка квартальных просек протяженностью 23 км.  Подготовка почвы под лесные культуры будущего года на площади 50,7 га.  

Подготовка почвы под лесные культуры текущего года на площади 29,4 га.  

Подготовка почвы под комбинированное лесовосстановление культуры  будущего года на площади 35,1 га.  

Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки) на площади 285 га. 

В соответствии с пунктом 15 договора аренды лесного участка № 04-01-11/162012 от 16.07.2012 за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение  договорных обязательств в части выполнения работ по охране, защите и  воспроизводству лесов на арендуемом участке, указанных в приложении № 6 договора,  Арендатор ООО «Группа компаний «УЛК» возмещает в бюджет Вологодской области  по реквизитам, установленным для внесения арендной платы, неустойку в размере  0,01% от размера годовой арендной платы. При этом указанная неустойка начисляется  отдельно за каждый неисполненный, несвоевременно или ненадлежащее исполненный  вид перечисленных работ, установленных договором аренды.  

Размер неустойки, подлежащий взысканию с ООО «Группа компаний «УЛК» в  соответствии с пунктом 15 договора аренды лесного участка № 04-01-11/16-2012 от  16.07.2012 составляет 9 143,37 руб.  

Оплата Арендатором неустойки не освобождает его от обязанности устранить  выявленные нарушения в текущем году, за исключением тех нарушений которые в  силу объективных причин не могут быть устранены в течение данного календарного  года.  

Департамент направил ООО «Группа компаний «УЛК» претензионное письмо с  требованием погасить неустойку в размере 9 143,37 руб. добровольно.  

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что  послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.  

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства  и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или  иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии со статьей 53 АПК РФ в случаях, предусмотренных  федеральным законом, государственные органы, органы местного  самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями  в арбитражный суд в защиту публичных интересов.  

Согласно статье 83 Лесного кодекса Российской Федерации органам  государственной власти субъектов Российской Федерации переданы  полномочия Российской Федерации в области лесных отношений но  предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в  постоянное бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное  пользование, а также заключению договоров купли-продажи лесных  насаждений, в том числе организации и проведению соответствующих  аукционов, а также осуществлению федерального государственного лесного  надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного  надзора в лесах.  

В соответствии с Положением о Департаменте лесного комплекса  Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства  Вологодской области от 24.09.2012 № 1108 Департамент является постоянно  действующим органом исполнительной государственной власти области в  сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и  воспроизводства лесов на землях лесного фонда, ведения государственного  лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного  надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора  в лесах, обеспечения инвестиционного и инновационного развития  лесопромышленного комплекса области.  

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Согласно статье 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими  процессуальных действий.  

Обязанность ответчика по выполнению работ по охране, защите и  воспроизводству лесов предусмотрена договором.  

Доказательств выполнения указанных работ, а равно доказательств  невозможности их выполнения ответчиком не представлено.  

Ссылка ответчика на судебные акты по делам № А10-990/2020, № А7010453/2021 в обоснование довода о недопустимости принудительного  обеспечения исполнения обязанности по выполнению работ по охране, защите и  

воспроизводству лесов отклоняется судом, поскольку указанные акты приняты по  иным фактическим обстоятельствам, в отсутствие согласованных сторонами перечня и  сроков выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.  

При таких обстоятельствах требование о возложении обязанности  исполнить обязательство в натуре подлежит удовлетворению в соответствии  со статьей 309 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не  несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательства.  

Факт просрочки исполнения обязательства подтвержден материалами  дела.  

Доказательств того, что просрочка исполнения обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств,  исключающих ответственность за неисполнение обязательства, ответчиком  не представлено.  

Неустойка предусмотрена договором, расчет неустойки проверен судом  и признан не противоречащим закону.  

При таких обстоятельствах требование о взыскании неустойки  признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению в  соответствии со статьей 333 ГК РФ.  

В соответствии с пунктом 69 постановления Пленума Верховного Суда  РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» (далее – Постановление) подлежащая уплате  неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной  несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть  уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

В силу пункта 71 Постановления если должником является  коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно  некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, снижение неустойки судом допускается только по  обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в  любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

Согласно пункту 73 Постановления бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора  возлагается на ответчика.  

Ответчик, заявив о несоразмерности размера неустойки последствиям  нарушения обязательства, доказательств такой несоразмерности не  

представил, в связи с чем, оснований для снижения неустойки у суда не  имеется.  

Поскольку истец при подаче иска освобожден от уплаты  государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ  государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход  федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

обязать Общество с ограниченной ответственностью «Группа  компаний «УЛК» (ОГРН 

<

***>, ИН 

<

***>) исполнить в срок  до «01» октября 2023 года обязанность по выполнению работ по охране,  защите и воспроизводству лесов за 2022 год по договору аренды лесного  участка № 04-01-11/16-2012 от 16.07.2012 в натуре, а именно: прочистка  квартальных просек протяженностью 23 км, подготовка почвы под лесные  культуры будущего года на площади 50,7 га, подготовка почвы под лесные  культуры текущего года на площади 29,4 га, подготовка почвы под  комбинированное лесовосстановление культуры будущего года на площади  35,1 га, рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки) на площади 285  га.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа  компаний «УЛК» (ОГРН 

<

***>, ИН 

<

***>) в пользу  Департамента лесного комплекса Вологодской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 9 143 руб. 37 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа  компаний «УЛК» (ОГРН 

<

***>, ИН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его  принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья С.В. Корепин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.04.2022 8:08:00

 Кому выдана Корепин Сергей Владимирович