АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-24896/2019

г. Нижний Новгород         «08» августа 2019 года

резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2019 года

полный текст решения изготовлен 08 августа 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Трясковой Надежды Викторовны (шифр 9-759),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Нижотделстрой»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна-НН»                            (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 389 388 руб. 20 коп., 

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 по доверенности от 05.06.2019,

от ответчика: не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Нижотделстрой» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна-НН» о взыскании 2 389 388 руб. 20 коп. долга, в том числе 1 593 096 руб. 70 коп. – по договору от 25.06.2017 №017310001440001070/25-07-2017, 696 645 руб. – по договору от 27.07.2017 №017310001440001070/27-07-2017/1, 99 646 руб. 50 коп. – по договору от 01.08.2017 №017310001440001070/01-87-2017.

Исковые требования заявлены на основании статей 309, 310, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением обязанности по оплате выполненных работ.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в суд не явился, письменный мотивированный отзыв на иск с документальным обоснованием позиции по делу не представил. Копия судебного акта, направленная по адресу места нахождения ответчика, подтвержденному выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, возвращена органами почтовой связи за истечением срока хранения. При данных обстоятельствах, в силу пункта 2 части  4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик является надлежаще извещенным о времени и месте рассмотрения дела. По правилам части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание проводится его в отсутствие.

После проведения предварительного судебного заседания суд учитывая, что имеющихся в деле материалов достаточно для рассмотрения дела по существу, открыл судебное заседание в первой инстанции в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом представитель истца не возражает против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании, а ответчик определением о принятии искового заявления к производству от 24.06.2019 уведомлен о дате открытия судебного заседания в первой инстанции в случае отсутствия возражений против рассмотрения дела в его отсутствие, которые в суд не поступали.

В связи с изложенным спор в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрен в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из исковых материалов, между ООО «Фортуна-НН» (субподрядчик) и ООО «Нижотделстрой» (субсубподрядчик) заключен договор от 25.07.2017 №017310001440001070/25-07-2017 (в редакции дополнительного соглашения от 11.04.2018), по условиям которого субсубподрядчик обязуется выполнить по заданию субподрядчика работы по наружному утеплению и отделке поверхности стен в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская», в соответствии с требования субподрядчика, согласно проектной документации, а также условиям договора, определяющим объем, содержание работ и другим предъявленные к ним требования, срокам, предусмотренным договором (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.04.2018) цена работ составляет 450 руб. за 1 м2, в том числе НДС 18%. Единичная расценка является твердой и неизменной до окончания работ по договору, включает в себя все без исключения статьи расходов, которые необходимы для выполнения работ, кроме материалов. Материал для выполнения работ предоставляет субподрядчик. 

В силу пункта 4.2 (в редакции дополнительного соглашения от 11.04.2018) окончательная стоимость работ по договору определяется как общая стоимость фактически выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ и не может превышать 3 610 125 руб.

В соответствии с пунктом 4.3 договора оплата выполненных работ производится поэтапно по факту выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в размере стоимости выполненного субсубподрядчиком и принятого субподрядчиком объема работ. Отчетный период составляет 20 дней. При этом после выполнения и принятия субподрядчиком отчетного объема работ субподрядчик оплачивает субсубподрядчику 70% от стоимости выполненных и принятых работ, оставшиеся 30% от стоимости выполненных и принятых работ субподрядчик оплачивает еще через 20 дней. Окончательный расчет субподрядчик осуществляет в течение 20 календарных дней с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.

В пункте 8.3 договора стороны согласовали подсудность споров Арбитражному суду Нижегородской области.

Дополнительным соглашением от 05.09.2017 предусмотрена выплата аванса в размере 1 000 000 руб.

Между ООО «Фортуна-НН» (субподрядчик) и ООО «Нижотделстрой» (субсубподрядчик) подписан договор от 11.04.2018 №01731000144140001070/25-07-2017, по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить по заданию субподрядчика комплект внутренних отделочных работ в границах сектора А в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест г. Нижний Новгород в квартале ул. Бетанкура набережная р. Волги ул. Должанская, ул. Самаркандская», в соответствии с требования субподрядчика, согласно проектной документации, а также условиям договора, определяющим объем, содержание работ и другие предъявленные к ним требования, срокам, предусмотренным договором (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 4.2 дополнительного соглашения от 10.05.2018 к договору № 017310001440001070/27-07-2017/1 27.07.2017 окончательная (предельная) стоимость работ по договору определяется как общая стоимость фактически выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ и не может превышать                     696 645 руб.

Стоимость фактически выполненных Субсубподрядчиком работ формируется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании единичной расценки. 

Согласно пункту 4.3 договора оплата за выполненные работы производится поэтапно по факту выполнения работ, в течении 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, по форме КС-2, КС-3, в размере стоимости выполненного субсубподрядчиком и принятого субподрядчика объема работ.

В пункте 8.3 договора стороны предусмотрели подсудность споров Арбитражному суду Нижегородской области.

Между ООО «Фортуна-НН» (субподрядчик) и ООО «Нижеотделстрой» (субсубподрядчик) заключен договор от 01.08.2017 №017310001440001070/01-87-2017, по условиям которого субсубподрядчик обязуется выполнить по заданию субподрядчика комплекс отделочных работ (оштукатуривание вертикальных поверхностей) на стадионе, сектора A, D, на объекте: в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 4500 зрительских мест, г.Нижний Новгород, в квартале ул.Бетанкура, набережная р.Волги, ул.Должанская, ул.Самаркандская» в соответствии с требованиями «Субподрядчика», согласно проектной документации, а также условиям настоящего договора, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, срокам, предусмотренным договором.

В соответствии с пунктом 4.2 договора окончательная (предельная) стоимость работ по договору определяется как общая стоимость фактически выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ.

Стоимость фактически выполненных субсубподрядчиком работ формируется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании единичной расценки.

Согласно пункту 4.3 договора оплата за выполненные работы производится поэтапно по факту выполнения работ, в течении 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, по форме КС-2, КС-3, в размере стоимости выполненного субсубподрядчиком и принятого субподрядчика объема работ.

В рамках исполнения договора от 25.07.2017 №017310001440001070/25-07-2017 истцом выполнены, а ответчиком приняты работы на сумму 3 610 125 руб. по акту от 25.04.2018 №017310001440001070/1, подписанному субподрядчиком без возражений и замечаний по объему и качеству работ. Стоимость работ дополнительно подтверждена справкой о стоимости выполненных работ и затрат 25.04.2018 №017310001440001070/1.

Оплата выполненных работ ответчиком произведена частично, согласно представленному истцом расчету сумма задолженности ответчика по договору от 25.07.2017 №017310001440001070/25-07-2017 составила 1 593 096 руб. 70 коп.

Во исполнение условий договора от 27.07.2017 №017310001440001070/27-07-2017/1 подрядчик выполнил работы по актам от 21.09.2017 №017310001440001070/1 на сумму 74 205 руб., от 09.10.2017 №017310001440001070/2 на сумму 161 990 руб., от 11.12.2017 №017310001440001070/3 на сумму 429 500 руб., от 11.05.2018 №017310001440001070/4 на сумму 30 950 руб., стоимость которых дополнительно подтверждена соответствующими справками о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные документы подписаны сторонами без возражений и замечаний по объему и качеству выполненных работ.

Выполненные работы не оплачены, по расчетам истца у ответчика образовалась задолженность по договору от 27.07.2017 №017310001440001070/27-07-2017/1 в размере 696 645 руб.

По договору от 01.08.2017 №017310001440001070/01-87-2017 истец выполнил работы согласно подписанному сторонами актам от 09.10.2017 №017310001440001070/1 на сумму 175 028 руб., от 11.12.2017 №017310001440001070/2 на сумму 524 618 руб. 50 коп.

Оплата выполненных работ ответчиком произведена частично, в связи с чем, согласно расчету истца за ним числится задолженность по договору от 27.07.2017 №017310001440001070/27-07-2017/1 в размере 99 646 руб. 50 коп.

Согласно подписанному ответчиком акту сверки взаимных расчетов по состоянию на  30.09.2018 общая задолженность ООО «Фортуна-НН» по указанным договорам составила 2 389 388 руб. 20 коп.

Поскольку до настоящего времени указанная задолженность ответчиком за выполненные работы не погашена в полном объеме, ООО «Нижотделстрой» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим иском.

Оценив обстоятельства дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в силу следующего.

На основании статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями  обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения  обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

Факт надлежащего исполнения обязательств истцом по договорам от 25.06.2017 №017310001440001070/25-07-2017, от 27.07.2017 №017310001440001070/27-07-2017/1, от 01.08.2017 №017310001440001070/01-87-2017 стоимостью 2 389 388 руб. 20 коп. подтвержден представленными в материалы дела документами, в том числе актами о приемке выполненных работ, содержащим подпись субподрядчика, и ответчиком не оспорен. 

Ответчик в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированных возражений по существу иска, доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме не представил.

Поскольку обязательство по оплате выполненных работ в добровольном порядке не исполнено, требование истца о взыскании долга в размере 2 389 388 руб. 20 коп. является правомерным и подлежит удовлетворению на основании статей 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Расходы по государственной пошлине составляют 34 946 руб. 94 коп., которые в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фортуна-НН"(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью   "Нижотделстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)2 389 388 рублей 20 копеек долга и 34 946 рублей 94 копейки расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья                          Н.В. Тряскова