АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-41414/24

25 декабря 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулиной С.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Гриценко Н.А.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление-61» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании  

 Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное  

строительное управление-61» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в месячный срок  

с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки работ по  

муниципальному контракту от 18.02.2022 № ЭА-02-2022, а именно: 

- ул. Рождественская в районе дома 32 просадка асфальтобетона; - ул. Рождественская и районе дома 11 отсутствие асфальтобетонного покрытия;  

- перекресток ул. Рождественская и ул. Майская разрушение покрытия  

асфальтобетона на тротуаре; 

- перекресток ул. Ростовская и ул. Майская с левой стороны необходима отсыпка  

обочины: 

- пер. 3-й ФИО1/ул. Садовая просадка асфальтобетона;  

- ул. Экспериментальная, ул. Молодежная, ул. Луговая необходимо выполнить  

проливку битумом стыковочных швов; - ул. Луговая наличие сетки трещин; 

- на всех автомобильных дорогах в рамках указанного МК необходимо  

восстановление дорожного покрытия в части устранения технологических отверстий  

после выемки асфальтобетона для проведения лабораторных исследований; 

- ул. Восточная ПК 2+01 дефект в виде сетки трещин на площади 2 м2; ПК 5+95  

дефект в виде сетки трещин на площади 9 м2; 

- ул. Рождественская ПК 6+56 дефект в виде разрушения кромки проезжей части протяженностью 6 п.м; ПК 6+60 дефект разрушения кромки проезжей части 6 п.м;  

- пер. Азовский ПК 0+00 дефект сетки трещин площадью 2 м2; места отбора кернов не заполнены а/б смесью;  

- пер. Виноградный 11К 0+38 дефект в виде поперечной трещины 4п.м; 

- пер. 3-й ФИО1 0+00 дефект в виде раскрытия поперечного стыка 7 п.м; ПК 0+02 дефект в виде сетки трещин на площади 72 м2;ПК 0+02 - 0+68 дефекты в виде сетки трещин, выкрашивания и раскрытия продольного стыка между полосами движения на общей площади 136 м2; ПК 0+70 места отбора кернов не заполнены а/б смесью; ПК 0+98 дефект в виде выкрашивания а/б покрытия на площади 13 м2;  

- ул. Светлая 2 - ул. Светлая 24/1-6 места отбора кернов не заполнены а/б смесью; 

- ул. Экспериментальная 1г-56: ПК 0+07дефект сетки трещин площадью 21 м2; ПК 0+58 дефект сетки трещин площадью 9 м2; ПК 0+78 дефект в виде поперечной трещины протяженностью 7 п.м; ПК 1+30 дефект в виде выкрашивания а/б покрытия на площади 12 м2; ПК 1+90 дефект в виде выкрашивания а/б покрытия на площади 15 м2;  

- ул. Экспериментальная 62-65 ПК 0+05 места отбора кернов не заполнены а/б смесью;  

- ул. Молодежная (от Экспериментальной 65/1 до ул. Молодежная 1) ПК 0+90 дефект в виде выкрашивания а/б покрытия на площади 72 м2; на протяжении всего участка ремонта выявлены дефекты в виде выкрашивания и раскрытия продольного стыка между полосами движения;  

- ул. Луговая 2-20 на участке от ПК 1+380 до ПК 2+61 дефект в виде сетки трещим на общей площади 381 м2 ПК 1+77 дефект в виде раскрытия продольного стыка между полосами движения протяженностью 7 п.м;  

- в районе дома № 1А по ул. Зеленая дефект в виде сетки трещин на площади 20 м2; в районе дома № 5 по ул. Зеленая дефект в виде поперечной трещины протяженностью 5 п. м; в районе дома № 28 по ул. Зеленая дефект в виде поперечной трещины протяженностью 5 п. м; в районе дома № 33 по ул. Зеленая дефект в виде разрушения кромки проезжей части 4 п. м; в районе дома № 45 по ул. Зеленая дефект в виде сетки трещин на площади 22,5 м2;  

- в районе дома № 2 по ул. Мира дефект в виде сетки трещин на площади 5 м2; в районе дома № 10А по ул. Мира дефект в виде продольной трещины протяженностью 18 п. м; в районе дома № 14 по ул. Мира дефект в виде продольной трещины 15 п.м; в районе дома № 16 по ул. Мира дефект в виде продольной трещины 15 п.м; в районе дома № 18 по ул. Мира дефект в виде сетки трещин на площади 2 м2, продольной трещины протяженностью 8 п.м; в районе дома № 19 по ул. Мира дефект в виде сетки трещин на площади 20 м2; в районе дома № 22 по ул. Мира дефект в виде сетки трещин на площади 1 м2; на участке ремонта по ул. Мира дефект в виде просадки а/б покрытия глубиной до 0,1 м на общей площади 363 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление-61» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 50000 руб. государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Абдулина С. В.