2023/2019-198931(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-38115/2018

г. Казань

29 августа 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником  судьи Гайнуллиной И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с  ограниченной ответственностью "Фортэкс", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер", г.Набережные  Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании ответчика безвозмездно  устранить недостатки работ, выполненных по договору субподряда № 783-Ф от 25.02.2016 г.,  

с участием третьих лиц ГБОУ Икшурминская кадетская школа-интернат имени  Байкиева К.С., (далее по текст третье лицо – 1) ГКУ "Главное инвестиционно-строительное  управление РТ", ООО "Инвестхолдингстрой" (третье лицо – 2),  

при участии: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 19.12.2016 г.; от ответчика – не явился, извещен; от третьих лиц 1,2 – не явились, извещены. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

Уточнение исковых требований принять.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер", г.Набережные  

Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течении 2 месяцев с момента вступления в  

законную силу решения суда безвозмездно устранить гарантийные недостатки на объекте:  

«Икшурминская кадетская школа-интернат им. Байкиева К.С.» (по договору субподряда   № 783-Ф от 25.02.2016), а именно:  

1. выполнить герметизацию оконных проемов, расположенных в осях 3-8/А, 8-4/Г на отм.  (+4.875 до +5.875 м; l/Г-А на отм. +5.450 до +8.150 м.;  

2. произвести замену стеклопакетов в осях 1/Г-В на отм + 5.450 до 6.825 м (1 стеклопакет  

слева); 4-5/А на отм. +4.875 до +5,875 (1 стеклопакет справа); 6-5/Г на отм. +4.875 до +5,875 (1  стеклопакет слева); 5-4/Г на отм. +4.875 до +5,875;  

3. устранить недостатки основания пола в осях 3-9/А-1 па отм 0.000м. путем сверления и  заливки пустот химическим раствором;  

4. устранить отклонение осей колонн на отметке +9,5метров oт вертикали 10-ти несущих  колонн;  

5. установить отсутствующие в верхней части вертикальные связей по оси 9 (со стороны  запасного выхода, рабочие чертежи марки 15,05 - 3 1 - КМД);  

6. выполнить работы по установке каждой колонны в оси 9 на отдельной монолитной тумбе.  В удовлетворении остальной части отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 31.03.2014г.) пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Фортэкс", юридический адрес: Республика  Татарстан, 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата государственной регистрации 09.03.2004г.) возмещение расходов по оплате  госпошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение

 может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья А.Э. Шарипова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.04.2019 15:20:44Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна