Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«23» марта 2021 года

                                  Дело № А12-26895/2020

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен 23 марта 2021 года

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Бударина Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Полистрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фабер-Ф» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, генеральный директор, приказ № 1 от 14.03.2012;

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 11.01.2021;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Полистрой» (далее – истец, ООО «Полистрой») обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Фабер-Ф» (далее – ответчик, ООО «Фабер-Ф») о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактур за март 2018 года в размере 76 209 руб. 30 коп., неустойки за нарушение сроков передачи актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактур за апрель 2018 года в размере 218 736 руб. 08 коп., судебных расходов по оплате почтовых услуг  по направлению претензии от 09.07.2020 в размере 204 руб. 04 коп., копии искового заявления в размере 98 руб., ходатайства об уточнении размера исковых требований от 17.11.2020 в размере 145 руб., ходатайства об изменении основания иска от 03.03.2021 в размере 95 руб. 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска.

Представитель ответчика поддержал позицию, изложенную в отзыве, в удовлетворении иска просил отказать. В случае признания требований истца обоснованными просит применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Между ООО «Фабер-Ф» (Субподрядчик) и ООО «Полистрой» (Подрядчик) 01.12.2017 заключен договор субподряда № 0112-2017/СП на выполнение комплекса строительных н отделочных работ на JIKK объект Генподрядчика «Завод гибких насосно-компрессорных труб, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район Индустриальный парк «Узловский» (далее – Договор).

Согласно пункту 1.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить своими силами, используя средства и материалы Генподрядчика, строительные и отделочные работы, а Подрядчик - произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком.

В соответствии с пунктом 1 протокола согласования договорной цены, являющегося приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от 01.02.2018, общая стоимость работ по Договору субподряда  составляет 2 333 321 руб. 97 коп.

Как установлено материалами дела, сторонами было запланировано работ на общую сумму в размере 10 410 430 руб. 22 коп., из которых:

по дополнительному соглашению №1 от 10.12.2017 – 838 318 руб. 84 коп.

по дополнительному соглашению №2 от 28.12.2017 – 1 203 095 руб. 39 коп.

по дополнительному соглашению №3 от 01.02.2018 – 2 333 321 руб. 97 коп.

по дополнительному соглашению №4 от 01.03.2018 – 2 997 175 руб. 40 коп.

по дополнительному соглашению №5 от 01.04.2018 – 3 585 837 руб. 46 коп.

Фактически Истцом выполнено работ на общую сумму 3 678 565 руб. 47 коп. (акты по форме КС-3 №1 от 31.01.2018 на сумму 267 000 руб., №2 от 31.01.2018 на сумму 571 318,84 руб., №3 от 31.01.2018 на сумму 364 776,55 руб., №4 от 28.02.2018 на сумму 1 130 226,59 руб., №5 от 31.03.2018 на сумму 640 930,97 руб., №6 от 11.04.2018 на сумму 412 709,99 руб., №7 от 30.04.2018 на сумму 291 602,53 руб.), что также подтверждается вступившим в законную силу постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2019 по делу №А12-26645/2018 в части взыскания с ООО «Полистрой» задолженности за выполненные работы по актам форме КС-3 за период с января по апрель 2018 года.

Согласно пункту 5.1 Договора Субподрядчик не позднее 21 числа отчетного месяца предоставляет Генподрядчику в двух экземплярах акт о приемке выполненных работ за отчетный период (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (КС-3), счет-фактуру.

В соответствии с пунктом 6.3 Договора за нарушение сроков, установленных пунктом 5.1 Договора Субподрядчик выплачивает подрядчику 0,5% стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического устранения недостатков.

 Ссылаясь на несвоевременное предоставление Субподрядчиком документов, указанных в пункте 5.1 Договора, истец произвел начисление неустойки в соответствии с пунктом 6.3 Договора.

Отказ ответчика в добровольном порядке исполнить требование истца об уплате неустойки, в том числе на основании досудебной претензии истца, послужил основанием для обращения последнего в суд с рассматриваемым иском.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Данный договор является договором подряда, соответственно, отношения сторон по договору регулируются нормами главы 37 ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. 

В силу пункта 2 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность как за нарушение начального и конечного срока выполнения работ, так и за нарушение промежуточных сроков выполнения работ.

На основании части 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

В силу статей 330 - 332 ГК РФ взыскание неустойки как способа защиты применяется тогда, когда такая возможность предусмотрена законом (законная неустойка) либо договором (договорная неустойка). 

Согласно предоставленной ответчиком нотариально заверенной электронной переписки сторон Субподрядчиком 11.04.2018 в адрес ООО «Полистрой» направлены электронным письмом сканкопии акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 №5 от 31.03.2018 на сумму 640 930 руб. 97 коп., а также справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на аналогичную сумму. Счет-фактуру № 14 от 31.03.2018 на указанные акты по форме КС-2 и КС-3 за март 2018 года, ответчик направил в виде сканкопии по электронной почте в адрес ООО «Полистрой» только 16.04.2018.

Согласно пункту 5.1 Договора Субподрядчик не позднее 21 числа отчетного месяца предоставляет Генподрядчику в двух экземплярах акт о приемке выполненных работ за отчетный период (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (КС-3), счет-фактуру.

Ответственность за нарушение обязательства по своевременному предоставлению актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период, и счет-фактуры до 21 числа отчетного месяца, предусмотрена пунктом 6.3. Договора в виде оплаты неустойки в размере 0.5% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического устранения недостатков.

С учетом вступившего в законную силу Постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А12-18586/2019 от 19.06.2020, снизившего на основании ходатайства ООО «Фабер-Ф» размер неустойки, указанный в пункте 6.3. Договора за нарушение предусмотренного пунктом 5.1. Договора срока направления в адрес ООО «Полистрой» актов о приемке работ и справок о стоимости выполненных работ за отчетный период с 0,5% до 0,1% за каждый день просрочки, а также то, что в указанном исковом заявлении рассматривается факт нарушения со стороны ответчика обязанностей, вытекающих из этого же договора, но в иной временной период, ООО «Полистрой» в добровольном порядке снизил размер неустойки, предусмотренной пунктом 6.3. Договора с 0,5 % до 0,1 %.

Согласно имеющемуся в материалах дела дополнительному соглашению № 4 от 01.03.2018 и приложению № 1 к дополнительному соглашению № 4 от 01.03.2018 к Договору № 0112-2017/СП от 01.12.2017, стороны согласовали увеличение объемов работ и увеличение стоимости договора до 2 997 175 руб. 

ООО «Фабер-Ф» в марте 2018 года не направило в адрес ООО «Полистрой» в срок до 21 числа отчетного месяца акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также счет-фактуру за март 2018 года.

Указанные документы направлены в адрес ООО «Полистрой» 11.04.2018 и 16.04.2018. Полное исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 5.1. Договора со стороны ответчика произошло 16.04.2018 после направления в адрес ООО «Полистрой», посредством электронного письма счет-фактуры № 14 от 31.03.2018.

Иных документов, подтверждающих факт более раннего направления в адрес ООО «Полистрой» актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018 года, составленных в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанным документам, содержащих оттиск печати ООО «Фабер-Ф», подпись руководителя, наименование объекта строительства, номер договора подряда, в материалах дела не имеется.

Срок нарушения обязанностей по предоставлению в марте 2018 года актов сдачи приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за текущий месяц, а также счет-фактуры с 22.03.2018 по 15.04.2018 составляет 25 дней.

Однако, в указанный период изменялась стоимость работ по договору, поэтому расчет будет производиться с учетом периодов увеличения стоимости работ.

Согласно подписанному сторонами 01.03.2018 дополнительному соглашению № 4 к договору №0112-2017/СП от 01.12.2017, и приложению № 1 к дополнительному соглашению №4 от 01.03.2018, стороны согласовали увеличение объемов работ и увеличение стоимости договора до 2 997 175 руб.  Стоимость договора оставалась таковой до 11.04.2018.

После выполнения ООО «Фабер-Ф» объема работ, указанного в составленном ответчиком акте сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 № 6 от 11.04.2018 на сумму 319 981 руб. 99 коп., стоимость работ по договору увеличилась до 3 317 156 руб. 99 коп. и оставалась такой до 30.04.2018.

Таким образом, размер неустойки за нарушение ООО «Фабер-Ф» сроков направления в адрес ООО «Полистрой» предусмотренных пунктом 5.1 Договора документов за март 2018 года согласно расчету истца составляет 76 209 руб. 30 коп.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А12-18586/2019 от 19.06.2020, установлено, что материалы дела не содержат доказательств направления в адрес ООО «Полистрой» акта о приемке выполненных работ № 6 от 11.04.2018 на сумму 412 709 руб. 99 коп., равно как и акта выполненных работ № 7 от 30.04.2018 на сумму 198 874 руб. 53 коп., а также справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на указанные суммы. Отсутствуют и иные доказательства согласования сторонами иной стоимости работ по актам № 6 и № 7.

Материалами дела №А 12-26645/2018 (перепиской сторон, в том числе полученной по электронной почте) и вступившим в законную силу решением по указанному делу установлено, что в адрес ООО «Полистрой» 19.06.2018 и 22.06.2018 посредством электронной почты и путем направления почтового отправления с описью вложения направлены акты выполненных работ №6 от 11.04.2018 на сумму 319 981 руб. 99 коп., справка по форме КС-3 от 11.04.2018 на сумму 319 981 руб. 99 коп., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №7 от 30.04.2018 на сумму 291 602 руб.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица

В связи с чем, доводы ответчика о направлении им 11.04.2018 по электронной почте в адрес ООО «Полистрой» акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 № 6 от 11.04.2018 на сумму 412 709,99 рублей и справки о стоимости выполненных работ и услуг №6 от 11.04.2018 на указанную сумму опровергаются вступившими в законную силу решениями арбитражных судов.

Электронным письмом от 19.06.2018 ответчик направил в адрес истца сканкопии актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 №5 от 31.03.2018, № 6 от 11.04.2018 на сумму 319 981,99 руб., № 7 от 30.04.2018 на сумму 291 602, 53 руб.. Однако  справки по форме КС-3 за апрель 2018 года указанным письмом в адрес истца ответчиком не направлялись.

Полное исполнение обязанности по предоставлению в адрес ООО «Полистрой» актов сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также счет-фактуру за апрель 2018 года произведено 22.06.2018 путем направления в адрес Истца указанных документов посредством электронной почты и ценным письмом с описью вложения.

На основании вышеизложенного, размер неустойки за нарушение ООО «Фабер-Ф» сроков направления в адрес ООО «Полистрой» предусмотренных пунктом 5.1 Договора документов за апрель 2018 года, с учетом Постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А12-18586/2019 от 19.06.2020, снизившего размер неустойки до 0,1% за каждый день нарушения срока исполнения обязательства, составляет 218 736 руб. 08 коп.

Расчет начисленной истцом неустойки судом проверен и признан обоснованным. 

Ответчик контррасчет взыскиваемой неустойки суду не представил, равно как и не представил иных возражений относительно методики и периода ее начисления. 

Согласно п. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Вместе с тем, ответчиком было заявлено ходатайство о применении к заявленному истцом требованию о взыскании неустойки положений статьи 333 ГК РФ, в связи с чрезмерностью ее размера.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

С учетом позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Доказательства несоразмерности неустойки ответчиком не представлены.

Необоснованное уменьшение неустойки судом с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требует статья 71 АПК РФ. Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

Учитывая, что истцом добровольно снижен размер неустойки с 0,5% до 0,1%, суд не усматривает оснований для применения статьи 333 ГК РФ.

Согласно статье 168 АПК РФ при принятии решения суд решает вопросы о распределении судебных расходов. 

Истцу при обращении в суд предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно части 3 названной нормы, государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с разъяснениями пункта 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», в случае удовлетворения заявленных требований, государственная пошлина по которым не была уплачена в виду действия отсрочки по уплате государственной пошлины, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.

Почтовые расходы документально подтверждены истцом и подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фабер-Ф» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Полистрой» неустойку за нарушение сроков передачи актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры за март 2018 года в размере 76 209 руб. 30 коп., неустойку за нарушение сроков передачи актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры за апрель 2018 года в размере  218 736 руб. 08 коп., а всего – 294 945 руб. 38 коп., а также почтовые расходы в размере 542 руб. 04 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фабер-Ф» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 899 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                          Е.С. Бударина