АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

05 марта 2026 года

Дело № А33-33832/2023

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 19 февраля 2026 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 марта 2026 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Курбатовой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дистанция пути 17» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Москва

к обществу с ограниченной ответственностью «Шанском» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Улан-Удэ

о взыскании долга, неустойки,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Стряпуниным М.С.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Дистанция пути 17» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Шанском» (далее – ответчик) о взыскании:

- 12 249 800 руб. долга по договору № 63-06/2021 от 30.06.2021;

- 4 185 755,10 руб. неустойки по договору № 63-06/2021 от 30.06.2021.

Определением суда от 24.11.2023 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу.

Представители лиц, участвующих в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

До начала судебного заседания лицами, участвующими в деле, ходатайств об отложении судебного заседания не заявлено, в том числе в целях совершения процессуальных действий для рассмотрения настоящего спора, не представлены и возражения относительно рассмотрения настоящего дела в отсутствие лиц, участвующих в деле.

В абзаце 4 пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» разъяснено, в случае непредставления стороной доказательств, необходимых для правильного рассмотрения дела, в том числе если предложение об их представлении было указано в определении суда, арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам с учетом установленного частью 1 статьи 65 АПК РФ распределения бремени доказывания (часть 1 статьи 156 АПК РФ).

При указанных обстоятельствах, на основании положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается по имеющимся в материалах дела доказательствам.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Дистанция пути 17» (далее - исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Шанском» (далее - заказчик) заключен договор на коммерческую эксплуатацию строительных машин с повременной оплатой от 30.06.2021 №63-06/2021 (далее - договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого исполнитель предоставляет заказчику строительную технику (далее - техника) во временное пользование для коммерческой эксплуатации на объекте, а заказчик обязуется оплатить исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 2.1 договора цена за пользование техникой определяется утвержденным прайс – листом на коммерческую эксплуатацию техники с оператором без ГСМ. Общая сумма договора складывается из расчета стоимости фактически оказанных исполнителем и принятых заказчиком услуг, согласно подписанным между сторонами актов за период действия договора, в том числе с НДС.

Стороны договора установили, что стоимость пользования техникой определяется в соответствии с прайс-листом на коммерческую эксплуатацию техники с оператором без ГСМ. Расходы по заправке техники несет заказчик (пункт 2.2 договора).

В силу пункта 2.3 договора расчет за коммерческую эксплуатацию техники заказчик производит на основании документов, подтверждающих работу техники на объекте (оформленные надлежащим образом справки учета отработанных часов, заверенные подписью уполномоченного лица со стороны заказчика), выставленного исполнителем счета и подписанного сторонами акта выполненных работ за определенный период в течение 5 дней. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены исполнителем заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Пунктом 4.5 договора предусмотрено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком своей обязанности по оплате оказанных надлежащим образом услуг исполнитель имеет право требовать уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период, от стоимости неоплаченных в срок услуг.

В приложении №1 к договору согласован прайс – лист на коммерческую эксплуатацию техники с оператором, без ГСМ:

Наименование техники

Марка

Стоимость одного часа работы техники, рублей (без НДС)

НДС 20%

Стоимость одного часа работы техники, рублей (с НДС)

Экскаватор, объем ковша 2,2 м3

LiuGong

2916,67

583,33

3500

Фронтальный погрузчик, объем ковша 3м3

ZL50F

3083,33

616,67

3700

Виброкаток 18тн

XS1631

1833,33

366,67

2200

Согласно прайс-листу к договору стоимость перебазировки 1 единицы техники тралом составляет 180 руб. (с НДС) за 1 км. пути.

Истцом в рамках договора оказаны услуги, согласно актам, а также ведомостям учета работы транспортных средств:

- акт от 25.08.2021 №БП-106 на сумму 1 681 333,33 руб.

- ведомость от 01.07.2021 №1, количество отработанного времени 6 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 02.07.2021 №2, количество отработанного времени 7 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 03.07.2021 №3, количество отработанного времени 6 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 04.07.2021 №4, количество отработанного времени 5 дней, 8 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 05.07.2021 №5, количество отработанного времени 5 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 06.07.2021 №6, количество отработанного времени 6 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 07.07.2021 №7, количество отработанного времени 6 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 08.07.2021 №8, количество отработанного времени 5 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 09.07.2021 №9, количество отработанного времени 7 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 10.07.2021 №10, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 11.07.2021 №11, количество отработанного времени 6 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 12.07.2021 №12, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 13.07.2021 №13, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 14.07.2021 №14, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 15.07.2021 №15, количество отработанного времени 5 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 16.07.2021 №16, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 17.07.2021 №17, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 18.07.2021 №18, количество отработанного времени 6 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня экскаватором LiuGong;

- ведомость от 19.07.2021 №19, количество отработанного времени 7 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня экскаватором LiuGong;

- ведомость от 20.07.2021 №20, количество отработанного времени 5 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 21.07.2021 №21, количество отработанного времени 5 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 22.07.2021 №22, количество отработанного времени 6 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 23.07.2021 №23, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня экскаватором LiuGong;

- ведомость от 24.07.2021 №24, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 25.07.2021 №25, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 26.07.2021 №26, количество отработанного времени 7 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 27.07.2021 №27, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 28.07.2021 №28, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 29.07.2021 №29, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 9 дней, 5 ночей виброкатком;

- ведомость от 30.07.2021 №30, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 4 дня, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 31.07.2021 №31, количество отработанного времени 7 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 8 дней, 8 ночей виброкатком;

- акт от 15.11.2021 №БП-152 на сумму 1 224 166,66 руб.;

- ведомость от 01.09.2021, количество отработанного времени 5 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 ночи экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 8 дней, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 02.09.2021, количество отработанного времени 6 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 3 дня виброкатком;

- ведомость от 03.09.2021, количество отработанного времени 6 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 5 дней, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 04.09.2021, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 05.09.2021, количество отработанного времени 8 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 5 дней, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 06.09.2021, количество отработанного времени 5 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 6 дней, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 07.09.2021, количество отработанного времени 6 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 5 дней виброкатком;

- ведомость, количество отработанного времени 1 день фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 09.09.2021, количество отработанного времени 3 дня фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 9 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 10.09.2021, количество отработанного времени 5 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня экскаватором LiuGong;

- ведомость от 11.09.2021, количество отработанного времени 5 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 3 дня виброкатком;

- ведомость от 10.09.2021, количество отработанного времени 5 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 ночи экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 8 дней, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 12.09.2021, количество отработанного времени 7 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней виброкатком;

- ведомость от 13.09.2021, количество отработанного времени 4 дня экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 5 дней, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 15.09.2021, количество отработанного времени 5 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 16.09.2021, количество отработанного времени 4 дня, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 5 ночей виброкатком;

- ведомость от 17.09.2021, количество отработанного времени 2 дня, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 18.09.2021, количество отработанного времени 1 день, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 18.09.2021, количество отработанного времени 6 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 5 дней FAW 747, количество отработанного времени 5 дней FAW 743;

- ведомость от 19.09.2021, количество отработанного времени 2 дня фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня экскаватором LiuGong;

- ведомость от 19.09.2021, количество отработанного времени 4 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 20.09.2021, количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 20.09.2021, количество отработанного времени 1 день фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 7 дней экскаватором LiuGong;

- ведомость от 21.09.2021, количество отработанного времени 2 дня фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 4 дня, 5 ночей виброкатком;

- ведомость от 22.09.2021, количество отработанного времени 5 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 4 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 23.09.2021, количество отработанного времени 6 дней фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней, 2 ночи экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 2 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 24.09.2021, количество отработанного времени 1 день фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 3 ночи экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 5 дней, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 25.09.2021, количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 25.09.2021, количество отработанного времени 2 дня, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 8 дней, 6 ночи экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 8 дней FAW 747, количество отработанного времени 8 дней FAW 743, количество отработанного времени 4 дня Шакманом;

- ведомость от 26.09.2021, количество отработанного времени 4 дня, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей FAW 747, количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей FAW 743;

- ведомость от 26.09.2021, количество отработанного времени 5 дней, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 27.09.2021, количество отработанного времени 3 дня, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 4 ночи экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 2 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 28.09.2021, количество отработанного времени 4 дня фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня экскаватором LiuGong;

- акт от 23.11.2021 №БП-159 на сумму 509 583,34 руб.;

- ведомость от 18.10.2021, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 19.10.2021, количество отработанного времени 10 дней фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 21.10.2021, количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 23.10.2021, количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 24.10.2021, количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 25.10.2021, количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 26.10.2021, количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 27.10.2021, количество отработанного времени 2 дня, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 28.10.2021, количество отработанного времени 10 дней, 10 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 29.10.2021, количество отработанного времени 10 дней, 10 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 30.10.2021, количество отработанного времени 10 дней, 10 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 31.10.2021, количество отработанного времени 10 дней, 10 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 10 дней экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи виброкатком;

- акт от 30.11.2021 №БП-167 на сумму 1 862 833,33 руб.;

- ведомость от 01.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 02.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 03.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 04.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей виброкатком;

- ведомость от 05.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей виброкатком;

- ведомость от 06.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей виброкатком;

- ведомость от 07.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 5 дней, 5 ночей виброкатком;

- ведомость от 08.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 09.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 10.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 11.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 12.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 13.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 14.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 15.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 16.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 17.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 18.11.2021, количество отработанного времени 8 дней, 8 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 19.11.2021, количество отработанного времени 8 дней, 8 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 20.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 21.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 22.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня, 4 ночи виброкатком;

- ведомость от 25.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня, 2 ночи виброкатком;

- ведомость от 26.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 1 день, 1 ночь виброкатком;

- ведомость от 27.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 28.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня, 3 ночи виброкатком;

- ведомость от 29.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 1 день, 1 ночь виброкатком;

- ведомость от 30.11.2021, количество отработанного времени 9 дней, 9 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 1 день, 1 ночь виброкатком;

- акт от 31.12.2021 №БП-191 на сумму 1 179 249,99 руб.;

- ведомость от 01.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 8 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 02.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 03.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 04.12.2021, количество отработанного времени 8 дней фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 05.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 06.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 07.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 08.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 7 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 09.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 10.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 8 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 11.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 12.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 13.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 14.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 15.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 16.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 17.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 6 ночей фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 18.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 19.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3;

- ведомость от 20.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 21.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 22.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 4 дня виброкатком;

- ведомость от 23.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 3 дня виброкатком;

- ведомость от 24.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 25.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 2 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 26.12.2021, количество отработанного времени 5 дней, 2 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 27.12.2021, количество отработанного времени 6 дней, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 28.12.2021, количество отработанного времени 7 дней, 4 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 29.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 7 дней, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- ведомость от 30.12.2021, количество отработанного времени 8 дней, 5 ночей экскаватором LiuGong, количество отработанного времени 7 дней, 3 ночи фронтальным погрузчиком, 3м3; количество отработанного времени 2 дня виброкатком;

- акт от 31.01.2022 №БП-10 на сумму 728 250 руб.;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 17 дней экскаватором 945Е;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 17 дней фронтальным погрузчиком;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 17 дней виброкатком;

- акт от 28.02.2022 №БП-32 на сумму 1 219 583,33 руб.;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 11 дней виброкатком;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 10 дней фронтальным погрузчиком;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 10 дней экскаватором;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 11 дней виброкатком;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 4 дня экскаватором;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 6 дней фронтальным погрузчиком;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 8 дней фронтальным погрузчиком;

- ведомость учета от 31.01.2022, количество отработанного времени 9 дней виброкатком.

В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате, задолженность ответчика перед истцом составляет 12 249 800 руб.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает на незаключенность договора, выражает сомнения относительно полномочий лица, подписавшего акты и ведомости учета времени, кроме того, указывает на несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Заключенный между сторонами договор на коммерческую эксплуатацию строительных машин с повременной оплатой от 30.06.2021 №63-06/2021 является договором аренды, отношения по которым регулируются параграфами 1, 3 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии со статьями 606, 614 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), порядок, условия и сроки внесения которой определяются договором аренды.

Согласно положениям статьи 632 ГК РФ договор аренды транспортного средства с экипажем представляет собой гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (арендодатель) предоставляет второй стороне (арендатору) транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает (своими силами) услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Договор аренды транспортного средства с экипажем – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (арендодатель) предоставляет второй стороне (арендатору) транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает (своими силами) услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. Таким образом, по договору аренды с экипажем предметом договора является транспортное средство любого вида, которое передается во временное владение и пользование арендатору.

Согласно статьям 634, 635 ГК РФ арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Обязанности по управлению и технической эксплуатации транспортного средства переданного в аренду с экипажем возлагается на арендодателя.

В соответствии со статьей 625 ГК РФ к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества, в том числе договорам аренды транспортных средств, применяются общие положения об аренде, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этом договоре.

Из содержания пункта 1 статьи 642 ГК РФ следует, что плата в данном случае взимается за аренду самого транспортного средства.

Положениями пункта 1 статьи 632 ГК РФ предусмотрено, что в договоре аренды транспортного средства с экипажем объединены два вида обязательств:

1) непосредственно связанных с предоставлением транспортного средства в аренду - во временное владение и пользование за плату;

2) связанных с оказанием арендатору услуг по управлению и его технической эксплуатации.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», по договору аренды имеет место встречное исполнение обязательств: обязанность арендодателя по отношению к арендатору состоит в предоставлении последнему имущества в пользование, а обязанность арендатора - во внесении платежей за пользование этим имуществом.

Вместе с тем возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает на незаключенность спорного договора.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, признаются сделками.

В силу пункта 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации, для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Оферта связывает оферента (становится для него обязательной) в момент ее получения адресатом оферты (пункт 2 статьи 435 ГК РФ). До этого момента она может быть отозвана оферентом, если сообщение об отзыве получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или одновременно с ней (пункт 2 статьи 435 ГК РФ) (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее - постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49).

В пункте 6 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 разъяснено, если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

В качестве доказательств встречного предоставления в рамках спорного договора от 30.06.2021 №63-06/2021 в материалы дела истцом представлены как акты, так и ведомости учета работы транспортных средств со ссылкой на договор.

Кроме того, ответчик указывает на отсутствие полномочий у лица на подписание со стороны ответчика документов.

Вместе с тем, на основании статьи 402 Гражданского кодекса Российской Федерации действия работников должника по исполнению его обязательств считаются действиями самого должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку.

Пунктом 2 названной нормы предусмотрено, что последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

Под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься реализация прав и обязанностей по сделке.

Из абзаца второго пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что полномочие лица на совершение действий, свидетельствующих о признании долга, может явствовать из обстановки, в которой действует соответствующий работник организации.

Согласно абзацу третьему пункта 5 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» действия работников представляемого по исполнению обязательства исходя из конкретных обстоятельств дела могут свидетельствовать об одобрении при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей или основывались на доверенности либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали (абзац второй пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Аналогичные разъяснения по вопросу полномочий, явствующих из обстановки, в которой действует представитель, приведены в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».

Вопреки доводам ответчика, в материалы дел не представлены доказательства об отсутствии полномочий у лиц, подписавших первичные документы о предоставлении истцом спец.техники, в том числе отсутствие трудовых и гражданско-правовых отношений, не заявлено и о фальсификации доказательств, равно как и отсутствие необходимости в предоставлении спорной техники, не предоставление техники, а также предоставлении техники иными лицами.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывает на несоблюдение истцом претензионного порядка.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской под досудебным порядком урегулирования споров понимается закрепление в законе или договоре условий о направлении требования (претензии) или иного письменного уведомления одной из спорящих сторон другой стороне, а также установление сроков для ответа и других условий, позволяющих разрешить спор без обращения в судебные инстанции.

Досудебный претензионный порядок считается специальным условием реализации права на иск в гражданском судопроизводстве, который, исходя из системного толкования положений статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Досудебный порядок урегулирования экономических споров представляет собой взаимные действия сторон материального правоотношения, направленные на самостоятельное разрешение возникших разногласий. Лицо, считающее, что его права нарушены действиями другой стороны, обращается к нарушителю с требованием об устранении нарушения. Если получатель претензии находит ее доводы обоснованными, то он предпринимает необходимые меры к устранению допущенных нарушений, исключив тем самым необходимость судебного вмешательства. Такой порядок ведет к более быстрому и взаимовыгодному разрешению возникших разногласий и споров.

Кроме того, в пункте 4 раздела II «Процессуальные вопросы «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015)», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, изложена правовая позиция, согласно которой, если из обстоятельств дела следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора, суд на основании ч. 5 ст. 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении.

В качестве доказательств соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора в материалы дела представлена претензия от 27.05.2022 №ПЧ-ИСХ-2362. Заявляя возражения относительно настоящего иска, ответчиком не представлено доказательств намерения урегулировать настоящий спор.

При указанных обстоятельствах, отклоняются доводы ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Истец, обращаясь в суд, должен представить совокупность доказательств, которая будет непротиворечива и достаточна для разрешения спора по существу, после чего к ответчику, возражающему против удовлетворения иска, переходит бремя опровержения обстоятельств, на которые ссылается истец.

В общеисковом процессе с равными возможностями спорящих лиц по сбору доказательств, применим обычный стандарт доказывания, который может быть поименован как «разумная степень достоверности» или «баланс вероятностей».

Стороны, наделенные равными процессуальными правами и обязанностями, установленными статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должны добросовестно ими пользоваться.

Таким образом, права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае, нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий.

Исходя из содержания и смысла положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторона процесса вправе и обязана представить в подтверждение своих требований или возражений определенные доказательства, которые могут быть признаны судом минимально достаточными для подтверждения обстоятельств, на которые ссылается такая сторона, при отсутствии их опровержения другой стороной спора.

Ответчик по существу исковые требования, размер задолженности не оспорил, не представлено и доказательств оплаты задолженности в размере 12 249 800 руб. долга.

На основании изложенного, арбитражный суд признает доказанным факт исполнения истцом обязательств по договору и факт образования задолженности.

Доказательства оплаты задолженности ответчик в материалы дела не представил, в связи с чем требования истца являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 4 185 755,10 руб. неустойки по договору № 63-06/2021 от 30.06.2021.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Соглашение о неустойке, как и любое другое соглашение в рамках гражданского законодательства, совершается его участниками своей волей и в своем интересе (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации); условия соглашения о неустойке, в частности размер такой неустойки и порядок начисления, определяется сторонами договора самостоятельно по своему усмотрению и с учетом требований ст. 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проверив расчет неустойки суд приходит к следующему.

Положениями статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Кроме того, согласно положениям статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (далее – постановление Правительства Российской Федерации №497) с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

При этом суд исходит из того, что правила о моратории, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Применение указанного моратория избирательно, не ко всем участникам экономических правоотношений нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, закрепленный в статье 19 Конституции Российской Федерации, статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, освобождение должника от уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение им денежных обязательств и обязательных платежей производится по требованиям, возникшим до 01.04.2022.

С учетом вышеизложенного, исходя из дат подписания актов с учетом ведомостей учета работы транспортных средств, правил исчисления сроков в соответствии со ст. 193 ГК РФ, судом произведен следующий расчет неустойки:

2 017 600 руб. ? 213 дней (с 31.08.2021 по 31.03.2022) ?0,1% = 429 748,80 руб.

2 163 800 руб. ? 206 дней (с 07.09.2021 по 31.03.2022) ?0,1% = 445 742,80 руб.

1 469 000 руб. ? 129 дней (с 23.11.2021 по 31.03.2022) ?0,1% = 189 501 руб.

611 500 руб. ? 122 дня (с 30.11.2021 по 31.03.2022) ?0,1% = 74 603 руб.

2 235 400 руб. ? 115 дней (с 07.12.2021 по 31.03.2022) ?0,1% = 257 071 руб.

1 415 100 руб. ? 80 дней (с 11.01.2022 по 31.03.2022) ?0,1% = 113 208 руб.

873 900 руб. ? 52 дня (с 08.02.2022 по 31.03.2022) ?0,1% = 45 442,80 руб.

1 463 500 руб. ? 26 дней (с 06.03.2022 по 31.03.2022) ?0,1% = 38 051 руб.

12 249 800 руб. ? 26 дней (с 02.10.2022 по 27.10.2022) ?0,1% = 318 494,80 руб.

Итого: 1 911 863,20 руб.

Ответчиком доказательства оплаты неустойки в материалы дела не представлены.

При указанных обстоятельствах, требование истца о взыскании неустойки подлежит частичному удовлетворению в размере 1 911 863,20 руб., в удовлетворении остальной части требования суд отказывает.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 105 178 руб.

Истцом за рассмотрение настоящего иска уплачена государственная пошлина в размере 105 178 руб. по платежному поручению от 17.11.2023 №102.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторон пропорционально обоснованно заявленным (удовлетворенным) требованиям, в связи с чем на ответчика относятся судебные расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 90 626,41 руб. (14 161 663,20 руб./ 16 435 555,10 руб. * 105 178 руб.) и подлежат взысканию в пользу истца в указанном размере.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Шанском» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дистанция пути 17» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 14 161 663,20 руб., в том числе 12 249 800 руб. долга, 1 911 863,20 руб. неустойки (пени); 90 626,41 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.В. Курбатова