Арбитражный суд Хабаровского края 

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-22247/2024

г. Хабаровск

17 апреля 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лунау И.А.,  

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Бруслит Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680030, 

<

...>)  

об устранении недостатков выполненных работ,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Стройтех-27» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>), конкурсный управляющий ООО «Стройтех-27» ФИО1 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, адрес: 680007 г. Хабаровск, а/я 522).  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать некоммерческую организацию «Региональный оператор – фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>) в срок 60 календарных дней с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки работ, выполненных в рамках договора от 12.11.2019 № 2202250000011900270 при проведении капитального ремонта крыши МКД по ул. Краснодарской, д. 19 в г.  

Хабаровске, а именно – выполнить устройство армирования (устройство  

стальной арматурной сетки) над подъездами № 1 и № 2 путем: 

- демонтажа двухслойного кровельного ковра и примыканий к стенам и  

парапетам, - демонтажа цементно-песчаной стяжки, - очистки и грунтование поверхности плит покрытия, - устройства армирования, - устройства цементно-песчаной стяжки, 

- грунтования поверхности стяжки битумным праймером,  

-устройства двухслойного кровельного полотна из направляемых  

рулонных кровельных материалов, - устройства примыканий к стенам и парапетам, 

- устранить отслоение примыкания кровельного полотна к стенам и  

парапетам над подъездом № 3. 

Произвести ремонтно-восстановительные работы 10 этажа подъездов  

 № 1 и № 2 путем: - расчистки мест намокания с помощью щеток, 

- обработки мест намокания антигрибковыми средствами, - шпатлевания разрушенных мест после намокания,  

- окраски мест намокания на 2 раза, - расчистки от старой краски, огрунтовка поверхности, - покраски на 2 раза водоэмульсионной краской. 

Взыскать с некоммерческой организации «Региональный оператор –  

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Бруслит Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 000  

руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья С.М. Курносова