ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 672000, Чита, ул. Ленина 100б http://4aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А58-6194/2016

г. Чита

28 июня 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20.06.2019. Полный текст постановления изготовлен 28.06.2019 Четвёртый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Скажутиной Е.Н., судей Макарцева А.В., Капустиной Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Юнусовой К.О., 

рассматривая в открытом судебном заседании общества с ограниченной  ответственностью «СюльдюкарНефтеГаз» на решение Арбитражного суда Республики  Саха (Якутия) от 5 апреля 2019 года по делу № А58-6194/2016 по иску акционерного  общества «Якутскгеофизика» (ИНН 1435078075, ОГРН 1021401073407) к обществу с  ограниченной ответственностью «СюльдюкарНефтеГаз» (ИНН 7702812630, ОГРН  1137746302462, г. Москва, пер. Троицкий, 1-й, 12, 5) о взыскании 50 896 000 руб.  основного долга, 91 562 517,74 руб. процентов,  

(суд первой инстанции: Терских В. С), при участии в судебном заседании: от истца: Соколов Я.Н., представитель по доверенности от 16.10.2018, от ответчика: Ружникова Ю.Ю., представитель по доверенности от 13.06.2019,  установил: 

 Акционерное общество «Якутскгеофизика» обратилось в Арбитражный суд  Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «Сюльдюкарнефтегаз» о взыскании задолженности по оплате выполненных работ (7  этап) по договору № СНГ-2013/12-1 от 20.12.2013 в размере 50 896 000 руб., процентов  за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты выполненных в  рамках 5-6 этапа работ по договору за период с 01.08.2015 по 22.01.2019 в размере 91  562 517,74 руб., с 23.01.2019 по 26.03.2019 в размере 4 094 098,44 руб., и далее с  27.03.2019 по день фактического исполнения обязанности по оплате выполненных в  

рамках 5-6 этапа работ по договору № СНГ-2013/12-1 от 20.12.2013, исходя из  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды  

 Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2019 года  исковые требования удовлетворены.  

 Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции,  ответчик обратился с апелляционной жалобой.  

 В материалы дела № А58-6194/2016 акционерное общество «Якутскгеофизика» к  обществу с ограниченной ответственностью «СюльдюкарНефтеГаз» представили  мировое соглашение, согласно условиям которого:  

 1. ООО «СюльдюкарНефтеГаз» признает частично обоснованными требования  АО «Якутскгеофизика» о взыскании суммы основного долга (стоимости работ по 7  этапу календарного плана к договору) в размере 40 000 000 рублей и обязуется  выплатить указанную сумму в соответствии с п. 2 настоящего мирового соглашения.  

 2. оплата производится с покрытого безотзывного аккредитива, который будет  открыт по поручению и за счет ООО «СюльдюкарНефтеГаз» в ПАО «Сбербанк» (банк-  эмитент и исполняющий банк) в пользу АО «Якутскгеофизика». Условием исполнения  аккредитива является представление АО «Якутскгеофизика» банку-эмитенту  (исполняющему банку) одной копии постановления Четвертого арбитражного  апелляционного суда об утверждении мирового соглашения по делу № А58-6194/2016  

и одного оригинала счета на оплату суммы аккредитива, выставленного получателем  средств по аккредитиву (АО «Якутскгеофизика») и содержащего ссылку на мировое  соглашение по делу № А58-6194/2016, договор и соглашение от 29.05.2019 об  урегулировании взаимных претензий по договору № СНГ-2013/12-1 от 20.12.2013.  

 Документы для исполнения аккредитива могут быть предоставлены в ПАО  «Сбербанк» в виде цветных скан-копий по АС «Сбербанк Бизнес Онлайн».  

 Расходы на исполнение аккредитива несет получатель средств по аккредитиву.  

 3. АО «Якутскгеофизика» подтверждает отказ от остальной части требований к  ООО «СюльдюкарНефтеГаз», в том числе от требований:  

 - о взыскании суммы основного долга в размере 10 896 000 руб.; 

 - о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за  просрочку оплаты выполненных в рамках 5-6 этапа работ за период с 01.08.2015 по  22.01.2019 в размере 91 562 517,74 руб., с 23.01.2019 по 26.03.2019 в размере  4094098,44 руб., и далее с 27.03.2019 по день фактического исполнения обязанности по  оплате выполненных в рамках 5-6 этапа работ.  

 4. АО «Якутскгеофизика» передает ООО «СюльдюкарНефтеГаз» результаты  работ на электронном и бумажном носителе согласно Геологического (Технического)  задания к Договору, в том числе: первичные сейсмические материалы; временные  разрезы - результаты обработки и переобработки; результаты их комплексной  интерпретации (карты изохрон, структурные карты, карты амплитуд и временные  разрезы с зарамочным оформлением согласно перечней, приведенных в геологическом  отчете); окончательный геологический отчет.  

 Материалы, носители и документы передаются в том виде, в котором они  имеются в распоряжении АО «Якутскгеофизика» к моменту заключения настоящего  мирового соглашения (в том числе как они были представлены в материалы дела), ООО  «СюльдюкарНефтеГаз» признает отсутствие у него претензий и замечаний к  получаемым материалам, документам и носителям, обязуется не заявлять какие-либо  дополнительные требования, связанные с осуществлением  переработки/изменения/доработки АО «Якутскгеофизика» получаемых от него  материалов, носителей и документов, а также обязуется при использовании отчетных  материалов давать ссылку на АО «Якутскгеофизика».  

 С момента вступления в силу мирового соглашения по делу № А58-6194/2016 все  права на результаты работ по Договору переходят от АО «Якутскгеофизика» к ООО  «СюльдюкарНефтеГаз».  

 5. Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, в том  числе по оплате государственных пошлин, по оплате услуг представителей сторон,  сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая  их понесла.  

 Представители сторон просили суд апелляционной инстанции утвердить  заключенное ими мировое соглашение на приведенных условиях.  

 В силу части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке,  предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.  

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии  арбитражного процесса и при исполнении судебного акта (часть 1 статьи 139  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Полномочия на подписание мирового соглашения представителями сторон судом  проверены и признаны надлежащими.  

По правилам части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон,  

если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд  рассматривает дело по существу.  

Названные обстоятельства не установлены, поэтому суд считает возможным  утвердить мировое соглашение на основании статьи 141 данного Кодекса.  

В части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации установлено, что в случае утверждения мирового соглашения арбитражный  суд прекращает производство по делу.  

При прекращении производства по делу повторное обращение в арбитражный суд  по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не  допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

 Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса  Российской Федерации при заключении мирового соглашения истцу возвращается из  федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины. Данная  норма носит императивный характер и применяется также при распределении  судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение  апелляционной жалобы.  

 Истцу следует возвратить из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 100 000 рублей, уплаченную при подаче иска платежным поручением № 139 от  02.11.2016, ответчику следует возвратить из федерального бюджета государственную  пошлину в размере - 1500 руб., уплаченную при подаче апелляционной жалобы  платежным поручением № 8040 от 30.05.2019.  

 На основании изложенного и руководствуясь статьями 140, 141, пунктом 2 части  150, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2019 года по  делу № А58-6194/2016 отменить.  

 Утвердить мировое соглашение, заключенное акционерным обществом  «Якутскгеофизика», с одной стороны, и обществом с ограниченной ответственностью  «СюльдюкарНефтеГаз», с другой стороны, по условиям которого:  

 1. ООО «СюльдюкарНефтеГаз» признает частично обоснованными требования  АО «Якутскгеофизика» о взыскании суммы основного долга (стоимости работ по 7  

этапу календарного плана к договору) в размере 40 000 000 рублей и обязуется  выплатить указанную сумму в соответствии с п. 2 настоящего мирового соглашения.  

 2. оплата производится с покрытого безотзывного аккредитива, который будет  открыт по поручению и за счет ООО «СюльдюкарНефтеГаз» в ПАО «Сбербанк» (банк-  эмитент и исполняющий банк) в пользу АО «Якутскгеофизика». Условием исполнения  аккредитива является представление АО «Якутскгеофизика» банку-эмитенту  (исполняющему банку) одной копии постановления Четвертого арбитражного  апелляционного суда об утверждении мирового соглашения по делу № А58-6194/2016  

и одного оригинала счета на оплату суммы аккредитива, выставленного получателем  средств по аккредитиву (АО «Якутскгеофизика») и содержащего ссылку на мировое  соглашение по делу № А58-6194/2016, договор и соглашение от 29.05.2019 об  урегулировании взаимных претензий по договору № СНГ-2013/12-1 от 20.12.2013.  

 Документы для исполнения аккредитива могут быть предоставлены в ПАО  «Сбербанк» в виде цветных скан-копий по АС «Сбербанк Бизнес Онлайн».  

 Расходы на исполнение аккредитива несет получатель средств по аккредитиву.  

 3. АО «Якутскгеофизика» подтверждает отказ от остальной части требований к  ООО «СюльдюкарНефтеГаз», в том числе от требований:  

 - о взыскании суммы основного долга в размере 10 896 000 руб.; 

 - о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за  просрочку оплаты выполненных в рамках 5-6 этапа работ за период с 01.08.2015 по  22.01.2019 в размере 91 562 517,74 руб., с 23.01.2019 по 26.03.2019 в размере 4 094  098,44 руб., и далее с 27.03.2019 по день фактического исполнения обязанности по  оплате выполненных в рамках 5-6 этапа работ.  

 4. АО «Якутскгеофизика» передает ООО «СюльдюкарНефтеГаз» результаты  работ на электронном и бумажном носителе согласно Геологического (Технического)  задания к Договору, в том числе: первичные сейсмические материалы; временные  разрезы - результаты обработки и переобработки; результаты их комплексной  интерпретации (карты изохрон, структурные карты, карты амплитуд и временные  разрезы с зарамочным оформлением согласно перечней, приведенных в геологическом  отчете); окончательный геологический отчет.  

 Материалы, носители и документы передаются в том виде, в котором они  имеются в распоряжении АО «Якутскгеофизика» к моменту заключения настоящего  мирового соглашения (в том числе как они были представлены в материалы дела), ООО  «СюльдюкарНефтеГаз» признает отсутствие у него претензий и замечаний к  получаемым материалам, документам и носителям, обязуется не заявлять какие-либо  

дополнительные требования, связанные с осуществлением  переработки/изменения/доработки АО «Якутскгеофизика» получаемых от него  материалов, носителей и документов, а также обязуется при использовании отчетных  материалов давать ссылку на АО «Якутскгеофизика».  

 С момента вступления в силу мирового соглашения по делу № А58-6194/2016 все  права на результаты работ по Договору переходят от АО «Якутскгеофизика» к ООО  «СюльдюкарНефтеГаз».  

 5. Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, в том  числе по оплате государственных пошлин, по оплате услуг представителей сторон,  сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая  их понесла.  

 Производство по делу № А58-6194/2016 прекратить. 

 Возвратить акционерному обществу «Якутскгеофизика» из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 100 000 рублей, уплаченную  платежным поручением № 139 от 02.11.2016  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СюльдюкарНефтеГаз»  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 рублей,  уплаченную платежным поручением № 8040 от 30.05.2019.  

 Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев  со дня принятия.  

 Председательствующий: Скажутина Е.Н.  

 Судьи: Капустина Л.В.  

 ФИО1