﻿

/

/ 

 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-21358/2021

г. Новосибирск

22 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2021 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ТрастЪ" (ОГРН1075404010330), г. Новосибирск 

к обществу с ограниченной ответственностью "Электрокомплекс" (ОГРН1065404083997), г. Новосибирск,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Вип Климат» (ОГРН 1175476067910), 

об истребовании исполнительной документации,

при участии:

от истца: Гутова Я.В. (доверенность № 06-21 от 05.07.2021, паспорт);

от ответчика: Косовец И.Б. (доверенность от 01.06.2021, паспорт), Савченко В.А. (доверенность от 14.09.2021, паспорт); Барсукова А.Н., (доверенность от 24.08.2021, паспорт, диплом);

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТрастЪ" (далее – истец, ООО «ТрастЪ») обратилось в суд с  исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью "Электрокомплекс" (далее – ответчик, ООО "Электрокомплекс") об обязании передать исполнительную документацию в отношении произведённых работ по  реконструкции тепловых сетей котельной ЧЗСМ г. Черепаново в рамках заключенного договора субподряда № ТС-ЧЗС-01-Э от 17.06.2020.

В дальнейшем истец уточнил исковые требования и просил обязать ООО "Электрокомплекс" передать исполнительную документацию:

№ п/п

Вид работ

Исполнительная документация

1.

Демонтаж трубопровода

Акт освидетельствования скрытых работ

2.

Устройство бетонной подготовки под тепловую камеру (ТК) (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

3.

Изготовление и монтаж армокаркаса под плиту ПД1 ТК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

4.

Бетонирование монолитной плиты ПД1, вход ТК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

5.

Монтаж тепловых камер ТК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Приложение к Акту освидетельствования скрытых работ (ведомость материалов, сертификаты, паспорта)

 

Исполнительная схема Металлический щит СЩ 1 (с разбивкой по типам); Решетка Р1 (с разбивкой по типам)

6.

Устройство выравнивающего слоя стен и покрытий тепловых камер ТК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

7.

Устройство оклеенной гидроизоляции стен тепловых камер (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

 

Устройство бетонной подготовки под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

9.

Изготовление и монтаж армокаркаса под плиту ПД2ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

10.

Бетонирование монолитной плиты ПД2, под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

11.

Монтаж тепловых камер ТК из бетонных блоков

Акт освидетельствования скрытых работ Приложение к Акту освидетельствования скрытых работ (ведомость материалов, сертификаты, паспорта) Исполнительная схема

12.

Устройство выравнивающего слоя плиты покрытия ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

13.

Устройство оклеенной гидроизоляции ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

14.

Устройство бетонной подготовки под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

15.

Изготовление и монтаж армокаркаса под плиту ПД3 ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

16.

Бетонирование монолитной плиты ПДЗ, под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

17.

Монтаж тепловых камер ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Приложение к Акту освидетельствования скрытых работ (ведомость материалов, сертификаты, паспорта) Исполнительная схема

18.

Устройство выравнивающего слоя стен и покрытий тепловых камер ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

19.

Устройство оклеенной гидроизоляции тепловых камер

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

20.

Разработка грунта для устройства основания под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

21.

Устройство песчаного основания под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

22.

Устройство бетонной подготовки под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

23.

Изготовление и монтаж армокаркаса ж/б плит под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

24.

Бетонирование ж/б плит под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

25.

Устройство гидроизоляции ж/б плит под ТК

Акт освидетельствования скрытых работ

26.

Изготовление и монтаж тепловых камер ТК

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

27.

Огрунтовка тепловых камер ТК

Акт освидетельствования скрытых работ

28.

Устройство песчаного основания под дренажные колодцы (ДК) (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

29.

Монтаж дренажных колодцев ДК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

30.

Устройство стяжки плит покрытия дренажных колодцев ДК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

31.

Устройство оклеечной гидроизоляции ДК (с разбивкой по типам)

Акт освидетельствования скрытых работ   Исполнительная схема

32.

Устройство бетоной подготовки под канал К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

33.

Устройство выравнивающего слоя под канал К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

34.

Устройство оклеенной гидоизоляции бетонной подготовки под канал К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

35.

Устройство защитного слоя из ЦПР под канал К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

36.

Монтаж ж/б лотков и опорных подушек, канал К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

37.

Армирование монолитного лотка Лм3 на канале К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

38.

Бетонирование монолитного лотка Лм3

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

39.

Монтаж плит перекрытия на канал К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

40.

Устройство выравнивающего слоя плит перекрытия канала К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

41.

Устройство гидроизоляции плит перекрытия и стен канала К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

42.

Устройство песчаного основания под канал КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

43.

Монтаж ж/б лотков и опорных подушек, канал К3

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

44.

Армирование узла трубопровода Ут1 на канале КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

45.

Бетонирование узла трубопровода Ут1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

46.

Монтаж плит перекрытия на канал КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

47.

Устройство выравнивающего слоя плит перекрытия канала КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

48.

Устройство гидроизоляции плит перекрытия и стен канала КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

49.

Устройство защитного слоя плит перекрытия канала КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

50.

Устройство песчаного основания под канал 1К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

51.

Монтаж ж/б лотков и опорных подушек, канал К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

52.

Армирование монолитного лотка на канале К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

53.

Бетонирование монолитного лотка Лм3

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

54.

Монтаж плит перекрытия на канал К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

55.

Устройство выравнивающего слоя плит перекрытия канала К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

56.

Устройство гидроизоляции плит перекрытия и стен канала К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

57.

Устройство защитного слоя плит перекрытия канала К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

58

Устройство песчаного основания под канал Кб, с уплотнением

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

59.

Устройство бетонной подготовки под канал Лм3

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

60.

Монтаж ж/б лотков и  опорных подушек, канал К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

61.

Армирование монолитного лотка Лм3 и торцов канала К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

62.

Бетонирование монолитного лотка Лм3 и торцов канала К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

63.

Монтаж плит перекрытия на канал К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

64.

Устройство выравнивающего слоя плит перекрытия канала К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

65

Устройство гидроизоляции плит перекрытия и стен канала К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

66.

Устройство защитного слоя плит перекрытия канала К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

67.

Устройство бетонной подготовки под канал К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

68.

Устройство выравнивающего слоя под канал К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

69.

Устройство оклеенной гидроизоляции в 2 слоя бетонной подготовки под канал К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

70.

Устройство защитного слоя из цементно-песчаного раствора (ЦПР) под канал К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

71.

Монтаж ж/б лотков и опорных подушек, канал К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

72.

Армирование монолитного лотка Лм3 на канале К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

73.

Бетонирование монолитного лотка Лм3 и ' торцов

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

74.

Монтаж плит перекрытий на канал К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

75.

Устройство выравнивающего слоя плит перекрытия канала К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

76.

Устройство гидроизоляции плит перекрытия и стен канала К7

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

77.

Устройство бетонной подготовки под неподвижные опоры

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

78.

Устройство армокаркаса под неподвижные опоры

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

79.

Бетонирование неподвижных опор

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

80.

Устройство обмазочной гидроизоляции .неподвижных

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

81.

Разработка котлованов под опоры

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

82.

Устройство щебеночного основания под опоры

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

83.

Монтаж опор

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

84.

Монтаж надземного участка трубопровода от сущ.сетей до ТК50

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

85.

Сварка стыков от ТК50 до сущ.сетей (надземная прокладка)

Схема сварных стыков

86.

Монтаж муфт КЗС на участке от сущ.сетей до ТК50

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема Акт о проведении испытаний муфт

87.

 

, Разработка котлованов под дренажные клодцы, тепловые камеры, неподвижные опоры, каналы, разработка траншеи под трубопроводы.

Акт освидетельствования скрытых работ

88.

Разработка траншеи от УП 48 до ТК 38

Исполнительная схема

89.

Разработка траншеи от ТКЗ до ТК 14

Исполнительная схема

90.

Разработка траншеи от TK22 до ТК 24, от Н21 до опуска

Исполнительная схема

91.

Разработка траншеи от ТК34 до ТК 28

Исполнительная схема

92.

Устройство песчаного основания под трубопроводы бесканальной прокладки

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

93.

ИС Устройство песчаного основания от УП48доТК38

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

94.

Устройство песчаного основания ТКЗ до ТК14

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

95.

Устройство песчаного основания от ТК22 до ТК 24, от Н21 до опуска

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

96.

Устройство песчаного основания от ТК34 доТК28

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

97.

Нанесение антикоррозионной изоляции на футляры

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

98.

Монтаж футляров

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

99.

Сварка и монтаж трубопроводов бесканальной прокладки

Акт освидетельствования скрытых работ Приложение к Акту освидетельствования скрытых работ (ведомость материалов, сертификаты, паспорта) Исполнительная схема от ТК2 до ТКЗ, от ТК1 до ТК2, отТК2доТК4 Схема, сварных стыков от ТК2 до ТКЗ Схема сварных стыков от ТК4 до ТК2 Схема сварных стыков от ТК2 до ТК1 Схема сварных стыков ТК1 Исполнительная схема от ТК23 до ТК24 Схема сварных стыков ТК23 до ул. Восточная

Схема сварных стыков от ТК23 до ТК24 Исполнительная схема от ТК21 до Трудовой 18,

Строителей 2 Схема сварных стыков от ТК21 до Трудовой 18,

Строителей 2 Схема сварных стыков Границы монтажа до ТК21 Исполнительная схема от ТКЗ8 до ТК39, от ТК39 до ТК40, от ТК40 до ТК41 or ТК41 до ТК41/1 Схема сварных стыков от ТКЗ8 до ТК39 Схема сварных стыков от ТК39 до ТК40 Схема сварных стыков от ТК40 до ТК41 Схема сварных стыков от ТК41 до ТК41/1 Исполнительная схема от ТК41/1 до ТК42, от ТК42 до ТК43,отТК43 доТК44 Схема сварных стыков от ТК41/1 до ТК42 Схема сварных стыков от ТК42 до ТК43 Схема сварных стыков от ТК44 до сущ.сетей Схема сварных стыков от ТК44 (бесканальная прокладка) Исполнительная схема от ТК39 до ТК45 Схема сварных стыков от ТК39 до ТК45 Исполнительная схема от ТК10 до ТК14 Схема сварных стыков от ТК10 до ж/д, от ТК10 до ТК11, от ТК11 до ж/д, от ТК10 до ТК12, от ТК12 до

ж/д

Схема сварных стыков от ТК12 до ТК14 Исполнительная схема Исполнительная схема от ТК32до ТК34, от ТК32 до Микрорайона, 10, от ТК34 до Микрорайона, 15, от ТК34 до Микрорайона, 12 Исполнительная схема от ТК28 до ТК29, от ТК30 до ТКЗ 1, от ТКЗ 1 до ТК32, от ТКЗ 1 до Микрорайона, 5,

 

от ТКЗ1 до Микрорайона,8, от Микрорайона, 8 до Микрорайона, 6 Исполнительная схема Спецификация Исполнительная схема ТК6-ТК7-сущ.сети. Схема сварных стыков от ТК10 до ж/д, от ТК10 до ТК11, от ТК11 до ж/д, от ТК10 до ТК12, от ТК12 до

ж/д

Схема сварных стыков от ТК7 доТК9, от ТК9 до ТК8, от ТК8 до ТК11, от ТК9 до ул.Тельмана,23., от ТК8 до Тельмана, 25а Заключение ультразвукового контроля (УЗК) Заключение визуально-измерительного контроля (ВИК)

100.

Монтаж муфт КЗС (комплект заделки стыков)

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема АКТ о проведении испытаний муфт КЗС на герметичность

101.

Монтаж компенсационных матов на углах поворота,

Акт освидетельствования скрытых работ

102.

Обратная засыпка траншей и котлованов

Акт освидетельствования скрытых работ

103.

Монтаж и сварка трубопроводов в канале К1

Акт освидетельствования скрытых работ Схема сварных стыков от ТК1 до школы (канал К1)

104.

Огрунтовка поверхности трубопроводов, в канале К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

105.

Окраска поверхности трубопроводов, в канале К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

106.

Изоляция поверхностей трубопроводов, в канале К1

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

107.

Монтаж и сварка трубопроводов в канале КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Схема сварных стыков по ул. Тельмана (канал К3)

108.

Огрунтовка поверхности трубопроводов, в канале КЗ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

109.

Окраска поверхности трубопроводов, в канале К3

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

110.

Изоляция поверхностей трубопроводов, в канале К3, покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

111.

Монтаж и сварка трубопроводов в канале

Акт освидетельствования скрытых работ Схема сварных стыков от ТК39 (канал К5) схема сварных стыков до ТК45 (канал К5)

112.

Огрунтовка поверхности трубопроводов, в канале К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

113.

Окраска поверхности трубопроводов, в канале К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

114.

Изоляция поверхностей трубопроводов, в канале К5

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

115.

Монтаж и сварка трубопроводов в канале К6

Акт освидетельствования скрытых работ Схема сварных стыков от ТК43 до ТК44 Схема сварных стыков от ТК44 канальная прокладка

116.

Огрунтовка поверхности трубопроводов, в канале К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

117.

Окраска поверхности трубопроводов, в канале К6

 

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

118.

Изоляция поверхностей трубопроводов, в канале К6

Акт освидетельствования скрытых работ Исполнительная схема

119.

Монтаж и сварка трубопроводов в канале К7

Акт освидетельствования скрытых работ Схема сварных стыков от ТК50 до ДС (канальная прокладка)

 

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял к рассмотрению уточенные исковые требования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Вип Климат»   (далее  - третье лицо, ООО «Вип Климат»), которое представило письменные пояснения по делу.

Исковые требования мотивированы тем, что  между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен договор № ТС-ЧЗС-01-Э от 17.06.2020, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательство по заданию подрядчика выполнить с надлежащим качеством и своевременно реконструкцию тепловых сетей котельной ЧЗСМ г. Черепаново (Объект) в соответствии с условиями договора, проектом и локальным сметным расчетом, а подрядчик обязался создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

Как указывает истец в исковом заявлении, ведение вышеуказанных работ завершено. 

В соответствии с пунктом 5.2. договора субподрядчик до 25-го числа текущего месяца предоставляет с сопроводительным письмом письмо подрядчику для согласования: исполнительную документацию; акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (форм КС-2, КС-3) и счет-фактуру.

Как указывает истец, за время выполнения работ по договору ответчиком исполнительная документация не представлялась ни по окончании этапа работ, ни после завершения.

02.11.2020 истцом в адрес ответчика было направлено письмо с требованием представить исполнительную документацию по выполненным работам, в ответ на которое, ответчиком было представлено гарантийное письмо (№ 149 от 06.11.2020), согласно которому ответчик обязался в срок до 25.11.2020 представить полный комплект исполнительной документации.

26.11.2020  в связи с неисполнением ответчика принятых обязательств, истцом было направлено повторное требование о представлении исполнительной документации в срок не позднее 01.12.2020, ответа на которое, как и исполнительной документации, от ответчика не поступило, что послужило поводом обращения с настоящим иском. 

В соответствии с абзацем 7 статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно части 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства, кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав заключается в понуждении должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства (договора).

При этом, требование о понуждении к исполнению обязанности в натуре может быть удовлетворено при условии, что данная обязанность предусмотрена законом либо договором.

Таким образом, суд удовлетворяет требования кредитора о возложении на должника обязанности по исполнению обязательства в натуре при установлении следующих обстоятельств: наличие согласованных сторонами соответствующих условий договора, представление истцом достаточной совокупности доказательств, подтверждающих нарушение его прав действиями ответчика, установление факта наличия неисполненной обязанности ответчика.

В силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать, в том числе ведение исполнительной документации.

Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 9 статьи 52 ГрК РФ).

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

В силу пункта 5 вышеназванных Требований исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.

В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в главе II Порядок ведения исполнительной документации.

Императивных норм, устанавливающих обязанность подрядчика/исполнителя передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации, подлежащей передаче заказчику, нормы действующего законодательства не содержат.

В этой связи, в случае закрепления в договоре подряда обязанности подрядчика/исполнителя по передаче исполнительной документации сторонами должны быть согласованы условия о составе исполнительной документации подлежащей передаче подрядчиком/исполнителем, позволяющие определить перечень такой документации. 

Вместе с тем, заключенный сторонами договор субподряда не регулируют отношения по ведению исполнительной документации субподрядчиком. Сам перечень исполнительной документации, подлежащий передаче подрядчику, ни договором, ни иными соглашениями сторон, не определен. Условиями договора не предусмотрена обязанность субподрядчика передать подрядчику именно тот перечень исполнительной документации, который запрашивает истец.

В силу пунктов 5.1, 5.2, 5.3 спорного договора подрядчик  обязан в течение 5 рабочих дней принять работы и подписать акты со своей стороны и передать один экземпляр акта субподрядчику. При обнаружении недостатков и дефектов в работе заявить об этом субподрядчику. Работы считаются принятыми с момента подписания акта выполненных работ (КС-2).

Так, судом установлено и материалами дела, что истец принял работы по спорному договору по актам формы КС-2 от 30.09.2020, 23.10.2020, 29.10.2020, подписав соответствующие документы.  

Ответчиком также представлен ответ  Межрайонной ИФНС России № 21 по Новосибирской области с приложением выписок из книг покупок деклараций по НДС за 3,4 квартал 2020 года, в которых отражены данные операции ООО «ТрастЪ» по контрагенту – ООО "Электрокомплекс".

Таким образом, истец посредством подписания актов о приемке выполненных работ, составленных по унифицированной форме КС-2, без замечаний и возражений, принял выполненные ответчиком работы, что, исходя из буквального значения содержащихся в пунктах 5.1, 5.2, 5.3 договора слов и выражений и принципа добросовестности участников гражданских правоотношений, свидетельствует о том, что исполнительная документация была передана подрядчику при передаче результатов работ по договору.

Кроме того, ответчиком представлен реестр передачи документов от 19.08.2020 представителю истца Марковину П.С., а также реестр передачи документов от 09.12.2020, реестр передачи исполнительной документации б/н б/д представителю ООО «Вип Климат» Ковалеву Г.В. (заказчик работ).

Истец подтвердил, что заказчиком работ являлся ООО «Вип Климат», представлены договоры подряда от 15.06.2020, от 06.08.2020.

На запрос суда о предоставлении актов выполненных работ на спорные объемы работ, истец указал на отсутствие оформления данных документов между ним и третьим лицом, ООО «Вип Климат» сослалось на коммерческую тайну и предоставить данные документы отказалось, при этом, указав, что спорные объемы работ выполнены, сданы ответчиком и приняты истцом.  

ООО «Вип Климат» факт получения исполнительной документации от ООО "Электрокомплекс" не отрицал, однако указал, что документация была оформлена ненадлежащим образом. Также третье лицо указало, что для подготовки исполнительной документации для ввода объекта в эксплуатацию было привлечен ИП Пастушонок М.В. Подготовленный ИП Пастушонок М.В. пакет исполнительной документации был достаточен для  ввода объекта в эксплуатацию.

Вместе с тем, оценив представленные третьим лицом документы в подтверждении факта изготовления спорной исполнительной документации иным лицом, суд приходит к выводу, что данные документы не подтверждают доводы третьего лица в указанной части, поскольку из буквального содержания предмета договора с ИП Пастушонок М.В. не следует факт поручения исполнителю изготовить исполнительную документацию по спорному объекту, как и сам факт оказания ИП Пастушонок М.В. данных услуг.  

 Таким образом, судом установлено и материалами дела подтверждается, что работы, по которым требует истец исполнительную документацию, ответчиком сданы, приняты истцом, отражены последним в   бухгалтерской отчётности; объект введен в эксплуатацию, что также подтверждается отчетом о результатах дистанционного контрольного мероприятия от 05.04.2021 и не оспаривается сторонами.

При этом истцом не представлено доказательств того, что без истребуемой исполнительной документации невозможно использовать результата работ для целей, указанных в договоре.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства по делу ответчиком осуществлена передача истцу исполнительной документации, отраженной в реестре от 19.08.2020, от 09.12.2020, в реестре б/н и б/д. 

Ссылка истца о наличии дефектов в оформлении и содержании переданной ответчиком документации несостоятельна, поскольку несоблюдение формальных требований к порядку оформления документации не опровергает факта их объективного наличия и передачи, а также, что наличие некоторых недостатков в форме документов влекут их порочность.

При этом, судом признается обоснованным довод ответчика в части порядка оформления актов освидетельствования скрытых работ.

В соответствии с п. 5.3 Требований (Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128) освидетельствование работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее -скрытые работы), оформляется актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении № 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

В соответствии с проектной документацией 01-01-2017Л ОС-ЭНП-КЖ «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения г. Черепаново» Строительство и реконструкция Западного района сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Черепаново протяженностью не менее 8,9 км. в пункте 10 содержится перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ. В соответствии с указанным перечнем проектом требуются акты освидетельствования скрытых работ на арматурные работы, бетонные работы, устройство гидроизоляции, устройство бетонной подготовки.

Другие работы в соответствии с проектом не требуют составления актов освидетельствования скрытых работ. 

Проект 01-02-2017.10С.05-ЭНП-ТС «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения г. Черепаново» Строительство и реконструкция Восточного района сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Черепаново протяженностью не менее 5,6 км. Тепловые сети котельной «ЧЗСМ» не содержит перечня требуемых актов освидетельствования скрытых работ.

Кроме того, как указывает ответчик и не опровергает истец, ООО «Электрокомплекс» не обладал всей необходимой информацией для оформления актов скрытых работ. В частности, у ООО «Электрокомплекс» отсутствовала информация об ответственных лицах от заказчика, о том кто осуществляет строительный контроль, ответственные лица, осуществляющие строительный контроль, реквизиты приказов о назначении ответственных лиц, отсутствовала информация о представителях лица, осуществляющего подготовку проектной документацией. Копий приказов о назначении указанных ответственных лиц ООО «Электрокомплекс» не предоставлялось. 

В подтверждение факта выполнения скрытых работ ООО «Электрокомплекс» представило Технические акты о подтверждении выполненных объемов, составленные совместно с представителем ООО «ТрастЪ». 

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  приходит к выводу о том, что у ответчика на момент рассмотрения спора по существу отсутствует обязанность по представлению в адрес истца истребуемой исполнительной документации, в связи с чем отказывает в удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску суд распределяет в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

О.В. Суворова