РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 25 февраля 2025 года      

по делу А33-11030/2024 Красноярск  

25 февраля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 173, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Изменить договор аренды на совокупность имущества казны г. Красноярска от 05.07.2006 № 9973, заключенный между Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска, Департаментом городского хозяйства и транспорта администрации г. Красноярска и общества с ограниченной ответственностью «Красноярский Жилищно-Коммунальный Комплекс»,  

- изложить предложение 1 пункта 3 раздела V «Порядок реализации Инвестиционного проекта» в следующей редакции: «Общая сумма инвестиций, осуществляемых Арендатором за период с 2024-2055 гг. составляет 32 166,003 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору»;  

- изложить Приложение № 2 к договору «Сроки и объемы планируемых инвестиций» в следующей редакции: Приложение № 2 к договору аренды на совокупность имущества казны от 05.07.2006 № 9973  

Сроки и объемы планируемых инвестиций 

1. Стороны пришли к соглашению о выполнении ООО «КрасКом» обязательств по реализации Инвестиционного проекта по договору аренды № 9973 на совокупность имущества казны города Красноярска от 05.07.2006 г., по показателю «общая сумма» нарастающим итогом с начала действия договоров аренды на совокупность имущества казны от 05.07.2006 №№ 9973, 10014 на общую сумму 10 033,026 млн. руб. без НДС, в том числе:  

По водоснабжению и водоотведению: 

Период реализации инвестиционного  

проекта 

Плановая стоимостная  

оценка 

мероприятия, млн. руб., без  

НДС 

Общая сумма плановой 

стоимостной оценки  

мероприятия  

нарастающим итогом, млн.  

руб., без НДС  

Фактическ 

ая стоимостная оценка  

мероприятия,  

млн. руб., без НДС  

Общая сумма  

фактической стоимостной оценки  

мероприятия нарастающим  

итогом, млн. руб., без НДС.  

1 

2 

3 

4 

5 

2 полугодие 2006 

7,5 

7,5 

198,113  

198,113 

2007 

65,4 

72,9 

171,221  

369,334 

2008 

82,5 

155,4 

206,347  

575,681 

2009 

97,2 

252,6 

126,795  

702,476 

2010 

104,8 

357,4 

191,916  

894,392 

2011 

- 

- 

163,013  

1057,405 

2012 

- 

- 

289,609  

1 347,014 

2013 

- 

- 

200,605  

1 547,619 

2014 

- 

- 

8,423 

1 556,042 

2015 

- 

- 

77,087  

1 633,129 

2016 

- 

- 

64,595  

1 697,724 

2017 

- 

- 

530,685  

2 228,409 

2018 

- 

- 

629,017  

2 857,426 

2019 

- 

- 

571,372  

3 428,798 

2020 

- 

- 

452,146  

3 880,944 

2021 

- 

- 

514,470  

4 395,414 

2022 

- 

- 

1 346,792  

5 742,206 

2023 

2 007,591  

7 749,797 

По тепло- и электроснабжению: 

1 

2 

3 

4 

5 

Период реализации инвестиционного  

проекта 

Плановая стоимостная  

оценка 

мероприятия, млн. руб., без  

НДС 

Общая сумма плановой 

стоимостной оценки  

мероприятия  

нарастающим итогом, млн.  

руб., без НДС  

Фактическ 

ая стоимостная оценка  

мероприятия,  

млн. руб., без НДС  

Общая сумма  

фактической стоимостной оценки  

мероприятия нарастающим  

итогом, млн. руб., без НДС.  

2 полугодие 2006 

9,4 

9,4 

24,672  

24,672 

2007 

22,5 

31,9 

43,649  

68,321 

2008 

24,5 

56,4 

41,170  

109,491 

2009 

26,6 

83,00 

97,796  

207,287 

2010 

28,9 

111,9 

70,554  

277,841 

2011 

- 

- 

152,692  

430,533 

2012 

- 

- 

172,081  

602,614 

2013 

- 

- 

219,191  

821,805 

2014 

- 

- 

218,252  

1 040,057 

2015 

- 

- 

111,931  

1 151,988 

2016 

- 

- 

59,408  

1211,396 

2017 

- 

- 

103,637  

1 315,033 

2018 

- 

- 

193,245  

1 508,278 

2019 

- 

- 

101,484  

1 609,762 

2020 

- 

- 

100,262  

1 710,024 

2021 

- 

- 

90,820  

1800,844 

2022 

- 

- 

170,626  

1971,47 

2023 

311,177  

2 282,647 

2. Согласно пункту 5.2 «Регламента взаимодействия органов администрации города  

Красноярска и арендаторов, заключивших договор аренды на совокупность имущества казны города Красноярска, по вопросам реализации инвестиционного проекта», утвержденному распоряжением администрации города Красноярска от 19.11.2010 № 1339-ж и договоров безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность от 20.08.2021, 28.12.2021, 26.04.2022, 30.11.2022 гг., сумма доначисленного НДС засчитывается в счет  

исполнения обязательств Арендатора по выполнению Инвестиционного проекта по показателю «общая сумма» на 0,582 млн. руб. (по тепло- и электроснабжению).  

3. С учетом подписания акта сверки от 07.08.2024 г. оставшаяся сумма инвестиционных  

обязательств по реализации Инвестиционного проекта составляет: - по водоснабжению и водоотведению 32 166,003 млн. руб. 

4. Общая сумма оставшихся инвестиционных обязательств по реализации Инвестиционного проекта на дату возврата имущества будет известна по итогам финансового года на основании утвержденных Департаментом городского хозяйства и транспорта и согласованных Арендодателем отчетов Арендатора в срок до 15 августа года, следующего за отчетным.».  

Взыскать с Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Департамента городского хозяйства и транспорта администрации г. Красноярска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 432 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 15.08.2024 № 10926.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.В. Курбатова