АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-20995/2022

г. Казань

25 марта 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения  "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "СМП- 3000", г.Волжск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании ответчика в течение  двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные  обязательства путем устранения недостатков выявленных в ходе проведения судебно-строительной экспертизы на объекте «Строительство дошкольной образовательной  организации на 260 мест в 

<

...> жилого района «Салават Купере», а именно:  1. Кровля: - Узел примыкания кровли к вентфасаду (нарушение технологии монтажа)78,8м.п. - замена элементов облицовки вентелируемого фасада без замены каркаса (фасадная  плитка, металлический лист парапета); - Примыкание кровли к узлам прохода инженерных  коммуникаций (нарушение технологии монтажа) - 1,2м2 - провести ремонт в отдельных  местах рулонного покрытия с промазкой, используя битумный состав с заменой двух слоев; -  Разуклонка (контруклон кровли блока А в осях 5-7/У/И1) - 22м2 - произвести разборку кровли  из рулонного материала, и выполнить восстановление уклона путем выравнивания стяжки и  утепления ; 2. Отделочные работы. Блок А: -Плитка стеновая керамическая 200*200мм  (нарушение технологии монтажа в пищеблоках и сан узлах) - 12,04м2 - произвести демонтаж  существующей плитки и выполнить укладку новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017;  - Плитка стеновая керамическая 200-300мм (нарушение технологии монтажа в пищеблоках и  сан узлах) - 43,08м2 - произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку  

новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017; - Штукатурные работы (дефекты) - 0,15м2 -  произвести ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым  раствором соответствии с СП 71.13330.2017; - Малярные работы (дефекты) - 0,15м2 -  провести окраску воднодисперсионными акриловыми составами по сборным конструкциям  соответствии с СП 71.13330.2017; - Потолки (следы протечек) - 7,2м2 - осуществить замену  потолочных плит; - Потолки (крепление подвесной системы к шахте дымоудаления) - 2,5м2 -  осуществить крепление подвесной сие темы к плите перекрытия в соответствии с СП  71.13330.2017; 3. Отделочные работы. Блок Б: - Плитка стеновая керамическая 200*200мм  (нарушение технологии монтажа) - 9,56м2 - произвести демонтаж существующей плитки и  выполнить укладку новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017, - Плитка стеновая  керамическая 200-300мм (нарушение технологии монтажа) - 70,68м2 - произвести демонтаж  существующей плитки и выполнить укладку новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017;  - Штукатурные работы (дефекты) - 16,75м2 - произвести ремонт штукатурки внутренних стен  по камню и бетону цементно-известковым раствором соответствии с СП 71.13330.2017; -  Малярные работы (дефекты) - 45,93м2 - провести окраску воднодисперсионными акриловыми  составами по сборным конструкциям соответствии с СП 71.13330.2017; - Потолки (следы  протечек) - 93,1 м2 - осуществить замену потолочных плит; 4. Полы. Блок А: - Плитка  напольная ( керамогранит) 600мм* 1200мм - 7,62м2 - произвести демонтаж существующей  плитки и выполнить укладку новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017 ; - Плитка  напольная (керамогранит) 300мм*300мм - 103,7м2 - произвести демонтаж существующей  плитки и выполнить укладку новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017; 5. Полы. Блок  Б: - Плитка напольная (керамогранит) 300мм*300мм - 41,32м2 - произвести демонтаж  существующей плитки и выполнить укладку новой плитки в соответствии с СП 71.13330.2017;  6. Окна (оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом): - Пластиковые (технология  устройств монтажного шва) - 16,45м2 - осуществить демонтаж и монтаж оконных коробок из  ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2;  - Алюминиевые противопожарные с двухкамерным стеклопакетом (технология устройств  монтажного шва) - 22,67м2 - осуществить демонтаж и монтаж оконных коробок из  алюминиевых многокамерных профилей с герметичным стеклопакетом; - разрушен  стеклопакет противопожарный 1675мм* 1275мм - 2,14м2 - произвести замену стеклопакетов в  пластиковых окнах; 7. Ограждения: - Конструкция ограждения лестничных маршей 46,5п.м.  (конструкция не соответствует нормам по высоте - 1200мм) - 56,5п.м - осуществить демонтаж  имеющихся ограждений лестничных маршей и произвести монтаж с поручнями из  поливинилхлорида в соответствии с СП 118.13330.2012 8. Вентиляция: - ПНР 6 вытяжных  вентиляторов. Не запускаются - 6 вент систем - произвести ПНР и запуск вентеляционных  систем; - Комплексное опробование систем общеобменной вентиляции (47 вытяжных, 2  приточные) - сдать на обслуживание эксплуатирующей организации; 9. Внутренний  водопровод - ГВС, Блок Б - резервный водонагреватель: - Протечка резьбового соединения  

стальной трубы (Ф32мм) - 1 резьба Ф32мм - устранить протечку резьбового соединения  стальной трубы - Замена тэна (15 кВт) резервного водонагревателя (необходима техническая  экспертиза всего изделия резервного водонагревателя на предмет безопасности (в комплекте  поставки отсутствует защита от коррозии и защита по току утечки) - 1 шт (15кВт); 10.  Внутренняя канализация ливлев.): - Горизонтальный участок стальной трубы Ф 159мм без  уклона, негерметична теплоизоляция, негерметичны фланцевые соединения ревизий - 12,5м -  выполнить уклон стальной трубы в соответствии с СП 30,13330.2020; восстановить  герметичность теплоизоляция и фланцевых соединений ревизий; 11.СОУЭ.: - Блокировка  эвакуационных выходов (подключение световых табло «Выход») - 1 система - привести  световые табло «Выход» в рабочее состояние; 12. Слаботочные устройства: - Внутренняя  телефонизация (ПНР) - 1 система - произвести ПНР и запуск; 13. Система контроля и  управления доступом: - Блокировка дверей (ПНР) - 1 система - произвести ПНР и запуск; 14.  Автоматизация систем водопровода и канализации: - Отсутствует щит управления  электрифицированной задвижкой пожарного байпаса - ШУЗ (монтаж, ПНР) - 1 шит -  установить щит управления электрифицированной задвижкой пожарного байпаса и  произвести ПНР и запуск; 15. ПНР системы автоматизации: - Автомати (в редакции уточнения  исковых требований, принятого определением от 22.02.2024г.),  

с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования  относительно предмета спора Муниципальное бюджетное учреждение «Департамент по  содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани» (ИНН  

<

***>) (далее по тексту третье лицо – 1), Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 45 комбинированного вида» Кировского района  г. Казани (ИНН: 

<

***>) (третье лицо – 2), Государственное унитарное предприятие  Республики Татарстан "Головная территориальная проектно-изыскательская  научнопроизводственная фирма "Татинвестгражданпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) (третье лицо 3),  

при участии: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2023 г., диплом  101604 0041126,  

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 01.12.2023г., диплом  КА № 28179 (после перерыва не явился), ФИО4, представитель по доверенности от  25.12.2023г., удостоверение адвоката № 414, рег.номер № 16/406, ФИО5,  представитель по доверенности от 14.02.2024 г., удостоверение адвоката № 589, рег. номер  16/591, ФИО6, представитель по доверенности от 17.08.2023г., диплом КП 98944,  

от третьего лица 2 – не явился, извещен ( до перерыва), ФИО7, представитель  по доверенности от 10.01.2024 г., диплом ИВС 0359184 ( после перерыва),  

от третьего лица 3 – ФИО8, представитель по доверенности от 09.01.2024 г.,  диплом 1077245176624  

от третьего лица 1 – не явился, извещен. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении соответчика Муниципальное  бюджетное учреждение «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений  социальной сферы города Казани» (ИНН 

<

***>) отказать.  

Уточнение исковых требований принять. Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «СМП-3000» в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу  решения суда исполнить гарантийные обязательства путем устранения недостатков  выявленных в ходе проведения судебно-строительной экспертизы на объекте «Строительство  дошкольной образовательной организации на 260 мест в 

<

...> жилого района  «Салават Купере», а именно:  

1. Кровля: 

- произвести замену элементов облицовки вентелируемого фасада без замены каркаса  (фасадная плитка, металлический лист парапета) на узле примыкания кровли к вентфасаду  (нарушение технологии монтажа) площадью 78,8м.п.  

- провести ремонт в отдельных местах рулонного покрытия с промазкой, используя  битумный состав с заменой двух слоев, на узле примыкания кровли к узлам прохода  инженерных коммуникаций (нарушение технологии монтажа площадью 1,2 кв.м.)  

- произвести разборку кровли из рулонного материала, и выполнить восстановление  уклона путем выравнивания стяжки и утепления кровли блока А в осях 5-7/У/И1 площадью  22 кв.м..  

2. Отделочные работы. Блок А: 

- произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку новой плитки  стеновой ( керамической) 200-200 мм. в соответствии с СП 71.13330.2017 в группе № 10.  

- произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку новой плитки  стеновой ( керамической) 200-300 мм. в соответствии с СП 71.13330.2017 в кухонном блоке -  кабинет моечной посуды площадью 7,26 кв.м.  

- осуществить замену потолочных плит площадью 7,2 кв.м.. 

- осуществить крепление подвесной системы к плите перекрытия в соответствии с СП  71.13330.2017 (крепление подвесной системы к шахте дымоудаления) площадью 2,5 кв.м..  

3. Отделочные работы. Блок Б: 

- произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку новой плитки  

стеновой ( керамической) 200-300 мм. в соответствии с СП 71.13330.2017 в группах №№ 12,  

13, в мед блоке. - осуществить замену потолочных плит площадью 93,1 кв.м.. 4. Полы входных и аварийных групп. Блок А: 

- произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку новой плитки  

напольной (керамогранит) 600мм* 1200мм в соответствии с СП 71.13330.2017 площадью 7,62  

кв.м.. 

- произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку новой плитки  

напольной (керамогранит) 300мм*300мм в соответствии с СП 71.13330.2017 площадью 103,7  

кв.м.. 5. Полы входных и аварийных групп. Блок Б: 

- произвести демонтаж существующей плитки и выполнить укладку новой плитки  

напольной (керамогранит) 300мм*300мм в соответствии с СП 71.13330.2017 площадью 41,32  

кв.м. 7. Ограждения: 

- осуществить демонтаж имеющихся ограждений 2 этажа и произвести монтаж  

ограждения лестничных маршей 46,5п.м. с поручнями из поливинилхлорида в соответствии с  

СП 118.13330.2012 площадь. 56,5п.м. 8. Вентиляция: 

- произвести ПНР и запуск вентиляционных систем в количестве 6 шт..  

- сдать на обслуживание эксплуатирующей организации систему общеобменной  

вентиляции (47 вытяжных, 2 приточные) 

9. Внутренний водопровод - ГВС, Блок Б - резервный водонагреватель:  

- устранить протечку резьбового соединения стальной трубы (Ф32мм) - 1 резьба  

Ф32мм.. 

- заменить тэн (15кВт) резервного водонагревателя - 1 шт (15кВт);  10. Внутренняя канализация ливлев.) :  

- выполнить уклон стальной трубы в соответствии с СП 30.13330.2020; восстановить  

герметичность теплоизоляция и фланцевых соединений ревизий на участке стальной трубы  

площадью 12,5м.. 11.СОУЭ.: 

- - привести световые табло «Выход» в рабочее состояние ( 1 шт.).  12. Слаботочные устройства:  

- произвести ПНР и запуск внутренней телефонизации. ( 1 шт.)  13. Система контроля и управления доступом:  

- произвести ПНР и запуск блокировки дверей (ПНР) ( 1 шт.).  14. Автоматизация систем водопровода и канализации:  

- установить щит управления электрифицированной задвижкой пожарного байпаса и  произвести ПНР и запуск. (1 шт.)  

15. ПНР системы автоматизации: - произвести ПНР и запуск Автоматики управления дренажными насосами.( 1 шт.) 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМП-3000", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 05.05.2014г.) в пользу Государственного  казенного учреждения "Главное инвестиционно-строительное управление Республики  Татарстан", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 14.11.2002г.)  возмещение расходов по оплате судебной экспертизы в размере 221 400 руб..  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМП-3000", юридический  адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 05.05.2014г.) в доход федерального  бюджета госпошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья А.Э. Шарипова