017/2023-19778(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-7755/2022

г. Курган

22 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2023 года. 

В полном объёме текст решения изготовлен 22 февраля 2023 года.  

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания в письменном виде с использованием  средств аудиозаписи помощником судьи Жилиной Н.В., рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения  «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис +» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании денежных средств, 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Сервис +» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании денежных средств, 

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛПК  СИБИРЬ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца (ответчика по встречному иску): явки нет, извещен надлежащим образом, 

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО1, доверенность от 10.01.2023,  паспорт, диплом,  

от третьего лица: явки нет, извещено надлежащим образом, 

у с т а н о в и л:

муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд  Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Сервис +» (далее – ответчик) о взыскании неустойки по  муниципальному контракту № 316 от 21.09.2021 в размере 13 214 руб. 25 коп.  

Определением от 28.06.2022 в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации судом удовлетворено ходатайство  истца об уточнении иска.  

Суд перешел к рассмотрению требований о взыскании неустойки по  муниципальному контракту № 316 от 21.09.2021 за период с 01.11.2021 по 30.11.2021 в  

размере 13 214 руб. 25 коп. Этим же определением суд назначил дело к рассмотрению в  предварительном судебном заседании на 22 августа 2022 года на 10 часов 00 минут в  помещении Арбитражного суда Курганской области по адресу: 

<

...> зал 602.  

До принятия арбитражным судом первой инстанции решения по данному делу  общество с ограниченной ответственностью «Сервис +» (далее – истец по встречному  иску) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к  муниципальному казенному учреждению «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» (далее - ответчик по встречному иску) о взыскании  задолженности по муниципальному контракту № 316 от 21.09.2021 в размере 194 470  руб. 43 коп., пени за период с 21.01.2022 по 31.03.2022 в размере 4 310 руб. 76 коп.,  расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 963 руб., уплаченной  платежным поручением № 522 от 24.06.2022.  

Определением суда от 29.06.2022 встречное исковое заявление принято судом к  производству.  

Определением суда от 08.11.2022 на основании части 4 статьи 18 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена  председательствующего судьи Скиндеревой В.В. на судью Желейко Т.Ю.  

Определением суда от 09.11.2022 принято уточнение встречных исковых  требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Рассматриваются встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Сервис +» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  муниципальному казенному учреждению «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании неустойки (пени) за период с 23.12.2021 по 19.05.2022 за просрочку  исполнения обязательств по оплате работ по муниципальному контракту № 316 от  21.09.2021 в размере 15 383 руб. 93 коп., расходов по уплате государственной пошлины  за рассмотрение судом встречного искового заявления.  

Истец и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не  обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии со  статьёй 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

До судебного заседания от истца (ответчика по встречному иску) поступила  телефонограмма о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя в связи с  невозможностью обеспечить явку в судебное заседание.  

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей  истца и третьего лица.  

Представитель ответчика (истца по встречному иску) в судебном заседании  возражал против удовлетворения исковых требований по доводам письменного отзыва.  Поддержал ходатайство об уточнении встречных исковых требований, просил взыскать  с муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» неустойку (пени) за период с 23.12.2021 по  31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по оплате работ по муниципальному  контракту № 316 от 21.09.2021 в размере 5392 руб. 32 коп., а также расходы по уплате  государственной пошлины за рассмотрение судом встречного искового заявления.  

В соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации уточнение исковых требований судом принято.  

Исследовав письменные материалы дела, и оценив имеющиеся доказательства в  соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в их совокупности и взаимосвязи, суд установил следующее.  

21.09.2021 между муниципальным казенным учреждением «Управление  дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» (заказчик) и обществом с  ограниченной ответственностью «Сервис +» (подрядчик) подписан муниципальный  контракт № 316 (далее также – муниципальный контракт, контракт), по условиям  которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на  выполнение работ по благоустройству Городского сада в городе Кургане (устройство  деревянного тротуара – настила) в соответствии с техническим заданием (приложение   № 1 к контракту), ведомостью объемов работ (приложение № 2 к контракту), сметным  расчетом (приложение № 3 к контракту), проектной документации (при наличии) и  условиями настоящего контракта (пункт 1.1. контракта).  

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего  контракта и сдать результат работ заказчику (пункт 1.2. контракта).  

Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта принять у  подрядчика результат работ и оплатить обусловленную контрактом цену (пункт 1.3.  контракта).  

В соответствии с пунктом 2.1. контракта цена контракта составляет  2842656 руб. 00 коп.  

Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 30.10.2021 (пункт 3.1.  контракта).  

Права и обязанности заказчика и подрядчика установлены разделами 5 и 6  соответственно.  

В частности, пунктом 6.2.2 контракта установлено, что подрядчик обязан сдать  выполненные работы заказчику в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего  контракта.  

Ответственность сторон установлена разделом 11 контракта.  

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате  неустоек (штрафов, пеней) (пункт 11.3.1 контракта).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты  пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,  (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным  этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком за  исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен  иной порядок начисления пени (пункт 12.3.2 контракта).  

В материалы дела представлены подписанные заказчиком и подрядчиком и  скрепленные печатями организаций акты о приемке выполненных работ по форме  КС-2 № 1 от 24.11.2021, № 2 от 30.11.2021, № 3 от 23.12.2021.  

Истец указывает, что в связи с нарушением срока выполнения работ по  муниципальному контракту 28.12.2021 за исх. № 954 в адрес подрядчика направлялось  требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному  контракту. Ответа на претензию, доказательств исполнения ответчиком данных  требований материалы дела не содержат.  

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по контракту,  истец с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора обратился в суд с  настоящим иском, за защитой нарушенного права (статья 4 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, статья 12 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении  первоначального иска в связи со следующим.  

Правовое регулирование правоотношений сторон по данному спору определено  главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также –  Федеральный закон № 44-ФЗ).  

В силу пункта 1 и пункта 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской  Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в  подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям  договора, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые  названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для  договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению  одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые  названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для  договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению  одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

В муниципальном контракте стороны согласовали все существенные условия, в  частности их предмет, сроки, стоимость работ, порядок принятия выполненных работ и  порядок их оплаты, что позволяет сделать вывод о заключённости муниципального  контракта (пункт 1.1 и пункт 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Сторонами не заявлялось о несогласованности предмета муниципального  контракта, о различном понимании сроков выполнения работ.  

В соответствии со статьями 309, 314 Гражданского кодекса Российской  Федерации стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в  соответствии с условиями договора и закона, в соответствующий день его исполнения  или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено. Односторонний  отказ от исполнения обязательств недопустим (статья 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное  не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В соответствии с положениями статьи 763 Гражданского кодекса Российской  Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее -  государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

В соответствии со статьей 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  

случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф,  пени), определенную законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать  причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет  поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов,  пеней).  

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически  исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев,  если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления  пени.  

Материалами дела подтверждается нарушение сроков выполнения работ по  муниципальному контракту № 316 от 21.09.2021.  

По условиям муниципального контракта срок выполнения работ по 30.10.2021,  представленные в материалы дела акты о приемке выполненных работ по форме  КС-2 № 1 от 24.11.2021, № 2 от 30.11.2021, № 3 от 23.12.2021 подписаны за пределами  установленного срока.  

Вместе с тем, в силу пункта 42.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ  начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком  суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим  исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных  контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены  Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783  «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных  заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» утверждены  Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (далее также  – Правила списания сумм неустоек).  

Согласно Правилам списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены  в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке  исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы,  услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных  контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с  возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя)  обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в  связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,  повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком,  исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения  при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих  невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением  политических или экономических санкций иностранными государствами,  совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации,  граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и  (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и  (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями  иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер  ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).  

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил если общая сумма начисленных и  неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта,  заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д»  настоящего пункта.  

Пунктом 4 Правил установлено, что списание начисленных и неуплаченных  сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных  заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку  расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и  неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).  

По смыслу вышеприведенных положений, государственный (муниципальный)  заказчик обязан произвести списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с  ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта по  контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, если общая сумма  начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов  цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней).  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по  государственному (муниципальному) контракту суд вправе самостоятельно  устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки  (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2018   № 305-ЭС17- 23242).  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 40 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  28.06.2017, списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)  сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением  государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является  именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку  данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по  государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск  заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных  

санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного  законодательства.  

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от  14.08.2018 № 305-ЭС18-5712 по делу № А40-179525/2017, указанный порядок списания  начисленных сумм неустоек направлен на установление действительного размера  задолженности и урегулирование споров между сторонами.  

Необходимость обращения подрядчика (поставщика, исполнителя) к заказчику с  соответствующим заявлением о списании неустойки вышеприведенными  нормативными правовыми актами не установлена, неисправность подрядчика при  выполнении работ по спорному контракту судом не установлена, соответствующих  доказательств в материалы дела не представлено.  

Как следует из материалов дела, обязательства по контракту и договору  выполнены подрядчиком, приняты заказчиком в 2021 году (акты сдачи-приемки  выполненных работ были подписаны сторонами в 2021 году), размер начисленной  неустойки за нарушения условий контракта не превышает 5% от цены контракта.  

С учетом вышеприведенной правовой позиции Верховного Суда Российской  Федерации, само по себе отсутствие в материалах дела подписанного сторонами акта  сверки задолженности с отражением в нем спорной суммы неустойки не  свидетельствует об отсутствии у истца обязанности по списанию неустойки.  

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что спорная неустойка подлежит  списанию на основании постановления Правительства Российской Федерации № 783, а  не взысканию в судебном порядке.  

В соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений; каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед  другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах  срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи  и совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что исковые  требования муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства  и благоустройства города Кургана» удовлетворению не подлежат.  

Согласно статье 333.22, 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации  муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» освобождено от уплаты государственной пошлины, в  связи с чем, вопрос о распределении судебных расходов судом не рассматривается.  

Нарушение муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного  хозяйства и благоустройства города Кургана» сроков оплаты работ по Контракту  послужило основанием для предъявления встречного искового заявления о взыскании  пеней за просрочку исполнения обязательств по Контракту в размере в размере 5392  руб. 32 коп. за период с 23.12.2021 по 31.03.2022.  

В соответствии с пунктом 2.1. контракта цена контракта составляет  2842656 руб. 00 коп.  

Фактически работы были выполнены на сумму 2821060 руб. 06 коп. 

Как следует из материалов дела, ответчик по встречному иску оплатил  выполненные работы, что подтверждается соответствующими платежными  поручениями - № 001709 от 30.11.2021 (2007673 руб. 82 коп.), № 1723 от 30.11.2021  

(584337 руб. 77 коп.), № 001769 от 14.12.2021 (0 руб. 04 коп.), № 502 от 19.05.2022  (229048 руб. 43 коп.).  

Пунктом 7.8. Контракта установлено, что расчет Заказчика с Подрядчиком  производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 согласно бюджетной смете.  

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 11.2.1 контракта).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок  суммы (пункт 11.2.3 контракта).  

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд", в контракт включается обязательное  условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных  контрактом. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,  пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня  устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не  уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки  исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа  устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации.  

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (пункт 1 статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

Согласно разъяснениям, указанным в пункте 2 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах  применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" при  рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика  на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судам следует  исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником  денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими  денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными  для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми  участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).  

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 №  683-О-О указано, что пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает  

суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности  и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного  правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции  Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод  человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации, изложенной в постановлении от 13.01.2011 № 11680/10, необоснованное  уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику  получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что  в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать  крайне негативные макроэкономические последствия. Неисполнение должником  обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Между тем  никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

Применение такой меры как взыскание договорной неустойки носит  компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить лицу  убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать  контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем.  

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 73 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности  неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.  Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том,  что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56  ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

Из пункта 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей  уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно  некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она  явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение  кредитором необоснованной выгоды.  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации). Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в  частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на  пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам,  осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным  кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период  нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий  период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму  неустойки (пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 24.03.2016 № 7).  

Применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации является  правом, а не обязанностью суда, разрешающего спор. При решении вопроса о  снижении неустойки суд учитывает конкретные фактические обстоятельства дела,  принцип свободы договора, размер заявленной по иску неустойки. Неустойка  устанавливалась с целью стимулирования ответчика к недопущению нарушения  

условий контракта, и ответчик, заключая договор, знал о возможных неблагоприятных  последствиях для него в случае нарушения принятого на себя обязательства.  

Вместе с тем, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства ответчиком по встречному иску не представлено.  

Размер пеней был согласован сторонами в Контракте, заключая который, ответчик  по встречному иску действовал по своей воле и в своем интересе, руководствуясь  принципом свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации), в связи с чем должен исполняться обеими сторонами, в том числе и в  части уплаты неустойки.  

Таким образом, суд приходит к выводу о правомерности требования истца по  встречному иску о взыскании неустойки по контракту.  

Период начисления пеней, представленный в расчете истца по встречному иску,  признан судом верным и соответствующей условиям Контракта.  

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные доказательства (статья  71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к  выводу, что требование истца (по встречному иску) о взыскании с ответчика неустойки  в размере 5392 руб. 32 коп. подлежит удовлетворению.  

В соответствии частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,  в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в  соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской  Федерации освобождено от уплаты государственной пошлины.  

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового  кодекса Российской при заключении мирового соглашения (соглашения о  примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного  иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска  (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных  процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу  (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им  государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной  инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной  инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.  

На основании абзаца 3 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса  Российской Федерации не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина  при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения  последнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового  заявления к производству.  

Из системного толкования положений действующего законодательства,  принимая во внимание абзац 2 пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения  законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» отказ от  иска является правом, а не обязанностью истца, поэтому возмещение судебных  издержек истцу при указанных обстоятельствах не может быть поставлено в  зависимость от заявления им отказа от иска.  

Как разъяснено в абзаце втором пункта 11 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении  законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных  судах», при прекращении производства по делу в связи с отказом истца (заявителя) от  иска (заявления) следует учитывать, что государственная пошлина не возвращается,  если установлено, что отказ связан с добровольным удовлетворением ответчиком  (заинтересованным лицом) заявленных требований после подачи искового заявления  

(заявления) в арбитражный суд (абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40  Налогового кодекса Российской Федерации). В этом случае арбитражный суд должен  рассмотреть вопрос об отнесении на ответчика (заинтересованное лицо) расходов по  уплате государственной пошлины исходя из положений статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации с учетом того, что заявленные в суд  требования фактически удовлетворены.  

Учитывая изложенное, в случае отказа истца от иска в связи с добровольным  удовлетворением ответчиком требований истцу из бюджета ничего не возвращается,  судебные расходы по уплате истцом государственной пошлины в полном объеме  относятся на ответчика с учетом того, что заявленные в суд требования фактически  удовлетворены.  

Поскольку факт добровольного удовлетворения требования ответчиком по  встречному иску произведен после обращения истца по встречному иску в  арбитражный суд с настоящим иском, принимая во внимание нормы части 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснения,  содержащиеся в постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 11.07.2014 N 46 и от 21.01.2016 № 1, с ответчика подлежат взысканию  судебные расходы по уплате государственной пошлины  

При подаче встречного искового заявления ООО «Сервис+» уплачена  государственная пошлина в размере 6963 руб. 00 коп. (платежное поручение № 522 от  24.06.2022), которая подлежит взысканию с МКУ «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства города Кургана» в пользу ООО ООО «Сервис+» как судебные расходы  по уплате государственной пошлины, от уплаты оставшейся части государственной  пошлины, подлежащей уплате в федеральный бюджет, суд считает возможным  освободить ответчика по встречному иску.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

в удовлетворении искового заявления отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление дорожного  хозяйства и благоустройства города Кургана» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервис +» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>):  

5 392 руб. 32 коп.. пеней; 6 963 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления решения в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья Т.Ю. Желейко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 8:22:12

Кому выдана Желейко Татьяна Юрьевна