1111111125_3721702  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,  

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-434/16 26.09.2019 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Поляковой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ  КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес регистрации: 664007, 

<

...>)  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОРОЖНИК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, адрес регистрации: 665902, 

<

...>)  

третьи лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ  ТРАКТ» (666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел база  стройиндустрии квартал 28А), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» (ОГРН: 

<

***>, адрес регистрации: 664007, 

<

...>), ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 101000,  МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ФУРКАСОВСКИЙ, ДОМ 6,); ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ДОРОЖНОЕ АГЕНСТВО (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>, 129085 МОСКВА  ГОРОД УЛИЦА БОЧКОВА 4)  

об обязании выполнить работы по безвозмездному устранению дефектов 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК" в течение 3-х месяцев после  вступления настоящего решения в законную силу безвозмездно устранить дефекты,  выявленные по государственному контракту № 12/С от 30.11.2007г. на следующих объектах:  

Путепровод (км 1464+000): - трещины в покрытии - 28.84 м2; 

- нарушение гидроизоляции, протечки в местах установок стоек барьерного ограждения  - 30 м2;  

- деформационный шов № 1, закрытый, протечки через конструкции шва - 14,42 м;  - деформационный шов № 2, закрытый, протечки через конструкции шва - 14,42 м;  

- пролетное строение № 2, главные несущие конструкции. Железобетонные  сплошностенчатые. Консольные свесы крайних балок. Выщелачивание цементного камня с  отложением солей на поверхности -10м2;  

- пролетное строение № 3, главные несущие конструкции. Железобетонные  сплошностенчатые. Консольные свесы крайних балок. Выщелачивание цементного камня с  отложением солей на поверхности -10 м2  

- опора № 1, шкафной блок концевой опоры, трещина сквозная, расчленяющая  конструкцию - 1 м2;  

Дорога (подходы к путепроводу на км 1464+000): - просадка земляного полотна - 65 м2; - размыв откосов насыпи - 30 м2. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОРОЖНИК" в пользу  ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ  МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА" судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  00 коп.  

Признать исполнительный лист серия ФС № 011393717, выданный арбитражным  судом Иркутской области 08.06.2017г. не подлежащим исполнению.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.  

Судья Е.Г. Полякова