96/2019-59789(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-2347/2017

г. Хабаровск

23 апреля 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  

судьи Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального казенного  учреждения «Дирекция космодрома Восточный» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, место нахождения: 107996, 

<

...>)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное  военно - строительное управление № 6» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 680000, 

<

...>)  

о взыскании 272 466 165 руб. 41 коп., об обязании передать документацию  

и по встречному исковому заявлению Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680000,  

<

...>)  

к Федеральному казенному учреждению «Дирекция космодрома Восточный»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 107996, 

<

...>)  

о взыскании 710 798 857 руб. 24 коп. 

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, Государственная корпорация по космической деятельности  «Роскосмос», Акционерное общество «Ланит-Партнер», Федеральное  казначейство РФ, Министерство финансов РФ  

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно - строительное управление № 6» в пользу Федерального  казенного учреждения «Дирекция космодрома Восточный» долг в сумме  272 466 165 руб. 41 коп.  

 Обязать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное  военно - строительное управление № 6» передать Федеральному казенному  учреждению «Дирекция космодрома Восточный» в тридцатидневный срок со  дня вступления в законную силу решения суда следующие документы:  

 - перечень организаций, участвующих в производстве строительно- монтажных работ, с указанием контрактов, видов выполняемых ими работ,  фамилий инженерно-технических работников, непосредственно  ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций  свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;  

- копии приказов по закреплению должностных лиц ответственными за  производство инженерно-технических работ в 1 экз. на бумажном носителе;  

- заверенные копии свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;  

- комплект оригиналов рабочих чертежей на строительство предъявляемого к  приемке объекта с надписями о соответствии выполненных работ этим  чертежам или внесенным в них изменениям, выполненным лицами,  ответственными за производство строительно-монтажных работ в 1 экз. на  бумажном носителе;  

- исполнительную документацию в составе, установленном требованиями  строительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения и  конструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а также  условиями контракта в 1 экз. на бумажном носителе;  

- оригиналы исполнительных схем, сформированных в установленном  порядке по всем инженерным системам в 1 экз. на бумажном носителе;  

- оригиналы сертификатов, технических паспортов и других документов,  удостоверяющих качество и свойства материалов, конструкций и изделий,  примененных при производстве работ в 1 экз. на бумажном носителе;  

- оригиналы актов освидетельствования скрытых работ в 1 экз. на бумажном  носителе;  

- оригиналы актов освидетельствования ответственных конструкций в 1 экз.  на бумажном носителе;  

- оригиналы актов испытаний на все выполненные работы по конструктивам  и инженерным системам с приложением реестра на указанные акты в 1 экз.  на бумажном носителе;  

- копии договоров и актов сверок по взаиморасчетам с поставщиками  электроснабжения, тепло – водоснабжения в 1 экз. на бумажном носителе;  

- копии контрактов с подрядчиками и поставщиками, заключенных  для исполнения условий контракта, а также копии актов сверки  взаиморасчетов с подрядчиками и поставщиками в 1 экз. на бумажном  носителе;  

- копии подтверждающих первичных документов на передаваемые  материалы и оборудование (договоров, счетов-фактур, платежных  поручений, паспортов материалов и оборудования) в 1 экз. на бумажном  носителе;  

- оригиналы паспортов на передаваемое и смонтированное оборудование в 1  экз. на бумажном носителе;  

- оригиналы заполненных общих журналов производства работ за период  выполнения работ в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном  носителе;  

- оригиналы заполненных специальных журналов работ и входного контроля  за период выполнения строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном  носителе;  

- оригиналы заполненных журналов учета выполненных работ (форма КС-6а)  в 1 экз. на бумажном носителе;  

- заверенные копии актов и протоколов по результатам проверок,  проведенных в процессе строительства федеральными органами  исполнительной власти Российской Федерации, в том числе ГАСН, а также  уведомлений об их исполнении в 1 экз. на бумажном носителе;  

- оригиналы актов об устранении замечаний, выданных в процессе  строительства ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и представителями  авторского надзора в 1 экз. на бумажном носителе.  

 Взыскать Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно - строительное управление № 6» в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 206 000 руб. 00 коп.   

 В удовлетворении встречного иска отказать. 

 Взыскать Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно - строительное управление № 6» в доход федерального  бюджета государственную пошлину по встречному иску в сумме 200 000  руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.И. Дюкова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.04.2019 8:26:56

Кому выдана Дюкова Светлана Ивановна