АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-11305/2021

25 января 2022 года

город Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 25 января 2022 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы искового заявления:

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Палладиум Энерго»

о взыскании 1 036 852,72 рублей.

При участии третьих лиц Службы капитального строительства Республики Крым, ПАО «РНКБ».

При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности;

от ответчика – не явились.

УСТАНОВИЛ:

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Палладиум Энерго» о взыскании неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 15.05.2018 №0175200002318000019_315134, в размере                 1 036 852,72 рублей.

Определением суда от 17.05.2021 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда от 29.06.2021 привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора: Служба капитального строительства Республики Крым (295001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2014, ИНН: 

<

***>); ПАО «РНКБ» (295000, Крым Республика, Симферополь город, Набережная имени 60-летия СССР улица, дом 34, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2002, ИНН: 

<

***>).

05.08.2021 через канцелярию суда от Службы капитального строительства Республики Крым поступили письменные пояснения.

09.09.2021 через канцелярию суда от истца поступили письменные пояснения.

В судебное заседание, назначенное на 18.01.2022, явился уполномоченный представитель истца, который высказал свою позицию относительно исковых требований и исследуемых судом документов, ответил на вопросы, поставленные судом в ходе судебного заседания.

В ходе судебного разбирательства, ответчик извещался о рассмотрении Арбитражным судом Республики Крым дела №А83-11305/2021  по адресу регистрации.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, времени слушания дела уведомлен надлежащим образом и своевременно (почтовое уведомление №2950059313021 получено ответчиком – 28.05.2021).

Ответчик правом, предусмотренным статьей 131 процессуального закона, не воспользовался, письменный отзыв суду не представил.

Кроме того, информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания по делу.

Учитывая надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания путем направления копий определения о принятии искового заявления к производству, а также размещения текста указанного определения и определения об отложении судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет (http://crimea.arbitr.ru), в соответствии с частью                1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие участников процесса.

Исследовав обстоятельства дела, имеющиеся в материалах дела доказательства, пояснения сторон судом установлено следующее.

15.05.2018 Служба капитального строительства Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной Стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее – ООО «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), по результатам электронного аукциона, Протокол от «04» апреля 2018г. №0175200002318000019, заключили государственный контракт НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ по объекту: «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул. Беспалова в г. Симферополе» № 0175200002318000019_315134 (далее - Контракт).

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 24.06.2015 № 350 «О вопросах обеспечения реализации федеральной целевой программы «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 25.01.2019 № 46), на основании соглашения от 01.02.2019 права и обязанности Государственного заказчика по Контракту переданы Государственному казенному учреждению Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (далее - Учреждение, Государственный заказчик).

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе                     ул. Беспалова в г. Симферополе» (далее - Работ), в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной Государственным заказчиком Подрядчику в порядке, установленном п. 5.2.1 настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение №2 к Контракту) в срок, установленный п. 4.1 настоящего Контракта и Графиком производства работ, по цене указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (пункт 1.2 контракта).

Результатом выполненной работы по контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (пункт 1.5 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 196 572 245 (Сто девяносто шесть миллионов пятьсот семьдесят две тысячи двести сорок пять) рублей,                   64 коп., в том числе НДС 18 % - 29 985 596 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, 69 коп.

В силу пункта 2.4 контракта Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3.

Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта в сумме  58 971 673 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят три) рублей, 69 коп., но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год и объемов финансирования. Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счета, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления счета. Размер суммы авансового платежа на текущий финансовый год уточняется дополнительным соглашением к Контракту (пункт 3.1 контракта).

В соответствии с пунктом 4.1 контракта работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ. Начало работ – со дня заключения Контракта;  окончание работ – 25.12.2018 года.

Права и обязанности сторон оговорены в разделе 5 контракта. Порядок сдачи и приемки выполненных работ – в разделе 7 контракта.

В соответствии с пунктами 15.1-15.3 контракта контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.   Настоящий Контракт действует до 31.12.2018   Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.  Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в случае, оговоренном в пункте 9.2. настоящего Контракта.

17.05.2018 сторонами контракта заключено дополнительное соглашение №1. Внесены дополнения в разделы 2, 5, 23 контракта.

Дополнительным соглашением №2 от 23.05.2018 внесены дополнения в контракт: график производства работ, перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно.

Дополнительным соглашением №3 от 26.07.2018 и №4 от 28.08.2018 внесены изменения в раздел реквизиты сторон.

26.10.2018 сторонами контракта заключено дополнительное соглашение №5. Подпункт 2.1.1. Статьи 2 Контракта изложить в следующей редакции: «2.1.1. Планируемый объем финансирования работ по годам составляет: За счет Федерального бюджета: 2018г.-7 5 622 738,73 руб., 2019г.- 111 120 811,76 руб. За счет бюджета Республики Крым: г. Симферополь 2018г.- 3 980 179,47 руб., 2019г.- 5 848 515,68 руб.». В пункте 4.1. Статьи 4 Контракта слова и цифры «окончание работ - 25.12.2018г.» заменены на «окончание работ - 25.12.2019г.».

В п.15.2. Статьи 15 Контракта цифры «31.12.2018г.» заменить на «31.12.2019г.». Подрядчик корректирует График производства работ - «Приложение №3.» к контакту после утверждения Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на следующий финансовый год. График производства работ оформляется дополнительным соглашением (пункты 4, 5 дополнительного соглашения №5).

Дополнительным соглашением №6 от 05.12.2018 подпункт 2.1.1. Статьи 2 Контракта изложен в следующей редакции: «2.1.1. Планируемый объем финансирования работ по годам составляет: 2018г.- 119 279 055,55 руб., 2019г.- 77 293 190,09 руб.».

Дополнительным соглашением №7 от 03.12.2019 внесены изменения в п. 1.2.1, 2.1.1, 9.19, 14.1, 14.2, 14.6, 15.2, 23 внесены изменения.

 Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Контракта с учетом срока, указанного в пункте 7 Дополнительного соглашения. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать положениям статьи 45 Закона № 44-ФЗ с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013                    № 1005. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; обязательства уплатить суммы убытков; обязательства по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса), гарантийные обязательства. В банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение контракта должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Дополнительного соглашения, Подрядчик несет ответственность, установленную пунктом 11.10 Контракта. В случае непредоставления обеспечения в соответствии с настоящим пунктом Дополнительного соглашения Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму аванса, не погашенную выполненными Подрядчиком и принятыми Государственным заказчиком объемами работ в соответствии с пунктами 3.2, 3.2.1 Контракта в срок, установленный в требовании Государственного заказчика. В случае, если нарушение Подрядчиком срока исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Дополнительного соглашения, составит более чем 10 (десять) календарных дней, такое нарушение признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме (пункт 9 дополнительного соглашения №7).

14.05.2020 заключено дополнительное соглашение №8. Пункты 2.1, 2.1.1, Приложение №1.1 изложены в новой редакции.

29.07.2020 заключено дополнительное соглашение №9. Пункты 2.1, 2.1.1, 3.2 изложены в новой редакции.

27.08.2020 заключено дополнительное соглашение №10. Пункты 2.1, 2.1.1 изложены в новой редакции.

Исполнение обязательств по контракту с нарушением срока послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно нормам статей 420, 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор вступает в силу, и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

По своей правовой природе спорный контракт представляет собой контракт на выполнение работ для государственных нужд, правоотношения по которому регулируются главой 37 ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ, Закон о контрактной системе). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

В силу статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Как указано в статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

В соответствии с п. 3.1 Контракта Подрядчику произведена выплата аванса в размере 58 971 673, 69 руб. (платежное поручение от 04.06.2018 № 42911).

Согласно п. 4.1 Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 26.10.2019 № 5 к Контракту) начало работ - с момента подписания Контракта, окончание работ - 25.12.2019.

Результатом выполненной работы по контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (пункт 1.5 контракта).

07.04.2020 Подрядчиком предоставлено заявление о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

08.04.2020 Государственным заказчиком подано извещение в Службу государственного строительного надзора Республики Крым (далее - Служба) об окончании строительства Объекта.

В период с 18.05.2020 по 22.05.2020 Службой проведена проверка законченного строительством Объекта, по итогам которой составлен Акт проверки от 22.05.2020 № 227, согласно которому выходом на Объект установлено, что не завершены работы в полном объеме, а именно: не завершены работы по устройству кровли здания; не выполнены работы по монтажу системы молниезащиты; не завершены работы по внутренней и наружной отделке здания; не завершены работы по благоустройству, монтажу (установке) малых архитектурных форм, устройству ограждения территории; не завершены работы по монтажу системы водоотведения с территории; не выполнены работы по монтажу оборудования, установке мебели; не выполнены пуско-наладочные работы инженерных систем; не завершены работы по монтажу систем приточно-вытяжной вентиляционной системы; не выполнены работы по организации мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

По итогам проведенной проверки Службой выдано предписание от 22.05.2020                                  № 227 об устранении нарушений при строительстве Объекта, указанных в Акте проверки от 22.05.2020 № 227, в срок до 26.08.2020.

19.08.2020 Государственным заказчиком повторно подано извещение в Службу об окончании строительства Объекта.

В период с 26.08.2020 по 01.09.2020 Службой проведена проверка законченного строительством Объекта, по итогам которой составлен Акт проверки от 01.09.2020             № 487-и, согласно которому выходом на Объект установлено, что работы в полном объеме не завершены, выявлено 47 замечаний, Службой выдано предписание от 01.09.2020 № 487-и об устранении нарушений при строительстве Объекта, указанных в Акте проверки от 01.09.2020 № 487-и, в срок до 02.11.2020.

Государственным заказчиком подано извещение в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым (далее - Министерство) об окончании строительства Объекта.

В период с 29.09.2020 по 05.10.2020 Министерством проведена проверка законченного строительством Объекта, по итогам которой составлен Акт проверки от 05.10.2020 № 3-и, согласно которому работы на Объекте завершены.

получено заключение Министерства о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (утверждено приказом Министерства от 06.10.2020 № 00003-ОГРСН1) (далее - ЗОС).

Министерством выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию              № 91-2493308000-11503-2020.

Сторонами подписано Соглашение о прекращении обязательств по Контракту (далее - Соглашение), согласно п. 1 которого Стороны подтверждают, что на дату заключения Соглашения Подрядчик выполнил, а Государственный заказчик принял и оплатил работы по Контракту на сумму 191 485 580, 54 руб. Остаток цены Контракта составляет 1 496 730, 71 руб. и остается в распоряжении Государственного заказчика.

Согласно п. 2 Соглашения с даты подписания Соглашения обязательства Сторон по Контракту в части выполнения и оплаты работ прекращаются.

Прекращение обязательств Сторон по настоящему соглашению не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ при исполнении Контракта и за нарушение обязательств, не исключая просрочку выполнения работ, установленных Контрактом, в том числе, если такие нарушения имели место до подписания настоящего соглашения. Прекращение обязательств Сторон по настоящему соглашению не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств, установленных Контрактом (пункты 3 - 4 соглашения).

Согласно ч. 4 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 5 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

По состоянию на 25.12.2019 Подрядчиком были выполнены, а Государственным заказчиком приняты работы на общую сумму 172 880 349, 59 руб. (справка о стоимости работ и затрат от 23.12.2019 № 20).

В период с 26.12.2019 по 15.04.2020 Подрядчиком выполнены работы по Контракту на сумму 1 903 256, 62 руб., в том числе в счет погашения аванса 570 976, 99 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 15.04.2020 № 73, справкой о стоимости работ и затрат от 15.04.2020 № 21.

Сторонами заключено дополнительное соглашение № 8 к Контракту, утвержден сводный сметный расчет стоимости строительства.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 14.05.2020 № 74-82, справкой о стоимости работ и затрат от 14.05.2020 № 22 в период с 16.04.2020 по 14.05.2020 Подрядчиком выполнены работы по Контракту (в том числе дополнительные работы) на сумму 10 978 479,36 руб., в том числе в счет погашения аванса 3 293 543, 81 руб.

В период с 15.05.2020 по 30.07.2020 Подрядчиком выполнены, а Государственным заказчиком приняты работы по Контракту (в том числе дополнительные работы) на сумму 1 990 867, 38 руб., в том числе в счет погашения аванса 1 747 981, 56 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 12.08.2020 № 84-87, справкой о стоимости работ и затрат от 30.07.2020 №23.

В период с 31.07.2020 по 12.08.2020 Подрядчиком выполнены, а Государственным заказчиком приняты работы по Контракту (в том числе дополнительные работы) на сумму 787 231,22 руб., в том числе в счет погашения аванса 246, 15 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 12.08.2020 № 88, 89, справкой о стоимости работ и затрат от 12.08.2020 №24.

В период с 13.08.2020 по 27.08.2020 Подрядчиком выполнены, а Государственным заказчиком приняты работы по Контракту на сумму 315 060, 40 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 27.08.2020 № 91, справкой о стоимости работ и затрат от 28.08.2020 №25.

Сторонами заключено дополнительное соглашение № 10 к Контракту, утвержден сводный сметный расчет стоимости строительства.

Согласно акту о приемке выполненных работ от 30.10.2020 № 92 Подрядчиком выполнены, а Государственным заказчиком приняты работы по Контракту на сумму                      2 630 335,97 руб. (справка о стоимости работ и затрат от 30.10.2020 № 26).

Акт сдачи-приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 подписан Сторонами 17.08.2020, ЗОС получен 06.10.2020, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - 15.10.2020.

Таким образом, результат работ по Контракту в срок, установленный в п. 4.1 Контракта (25.12.2019), не достигнут, ЗОС получено 06.10.2020, что свидетельствует о просрочке исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

В соответствии с положениями главы 25 Гражданского кодекса РФ взыскание неустойки является мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Согласно пункту 11.1 контракта за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11.10 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункты 11.11-11.12 контракта).

В соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком в соответствии с настоящей статьей требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом в размере от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения контракта в виде денежных средств установлены в п. 14.2 Контракта, требования к обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии установлены в ст. 45 Закона № 44-ФЗ, п. 14.3 Контракта.

Согласно ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В п. 14.4 Контракта установлено, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на один месяц.

В обеспечение исполнения Контракта Подрядчиком предоставлена банковская гарантия от 16.04.2018 № 180А/04/018Р0084, выданная ПАО «РНКБ» сроком действия до 31.01.2019.

03.12.2019 Сторонами заключено дополнительное соглашение № 7 (в редакции протокола разногласий к дополнительному соглашению) (далее - дополнительное соглашение № 7) к Контракту, согласно абз. 1 п. 9 дополнительного соглашения № 7 установлена обязанность Подрядчика предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 30 календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения № 7 в размере 11 906 380, 92 руб. с учетом срока, указанного в п. 7 дополнительного соглашения, Таким образом, новое обеспечение исполнения Контракта Подрядчик обязан предоставить до 02.01.2020, с учетом положений ст. ст. 191, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации - 09.01.2020.

Согласно ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, п. 14.1 Контракта исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Требования к обеспечению исполнения контракта в виде денежных средств установлены в п. 14.2 Контракта, требования к обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии установлены в ст. 45 Закона № 44-ФЗ, п. 14.3 Контракта.

Таким образом, Подрядчик имел возможность предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения Контракта или внести обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств.

Государственным заказчиком в адрес Подрядчика направлены письма от 25.12.2019 № 009-05/11556, от 10.01.2020 № 009-05/30 о необходимости предоставления обеспечения исполнения Контракта, однако Подрядчиком обеспечение исполнения Контракта не предоставлено.

Законом № 44-ФЗ, условиями Контракта не предусмотрена обязанность Государственного заказчика направлять письма в банковские учреждения, Подрядчик, избирая способ обеспечения исполнения Контракта, самостоятельно принимает необходимые меры, направленные на предоставление обеспечения Контракта.

Согласно абз. 5 п. 9 Дополнительного соглашения № 7 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного                                  п. 9 Дополнительного соглашения. Подрядчик несет ответственность, установленную                   п. 11.10 Контракта.

Истец представил в материалы дела следующий расчет исковых требований:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

- 11668178,07

10.08.2018

Оплата задолженности на 11668178,07 руб.

-22033830,58

03.09.2018

Оплата задолженности на 10365652,51 руб.

-29473206,44

10.09.2018

Оплата задолженности на 7439375,86 руб.

-37375568,25

20.09.2018

Оплата задолженности на 7902361,81 руб.

-67366155,34

10.12.2018

Оплата задолженности на 29990587,09 руб.

-73362678,74

13.12.2018

Оплата задолженности на 5996523,40 руб.

-88288860,22

17.12.2018

Оплата задолженности на 14926181,48 руб.

-98618577,90

11.03.2019

Оплата задолженности на 10329717,68 руб.

-100462100,42

19.03.2019

Оплата задолженности на 1843522,52 руб.

-103477239,92

01.04.2019

Оплата задолженности на 3015139,50 руб.

-104509648,85

08.04.2019

Оплата задолженности на 1032408,93 руб.

-107179965,34

16.04.2019

Оплата задолженности на 2670316,49 руб.

-108643001,18

08.05.2019

Оплата задолженности на 1463035,84 руб.

-110664420,92

21.05.2019

Оплата задолженности на 2021419,74 руб.

-113088682,12

11.06.2019

Оплата задолженности на 2424261,20 руб.

-117648804,70

18.06.2019

Оплата задолженности на 4560122,58 руб.

-119058318,77

25.06.2019

Оплата задолженности на 1409514,07 руб.

-127676000,73

23.07.2019

Оплата задолженности на 8617681,96 руб.

-133395838,46

20.08.2019

Оплата задолженности на 5719837,73 руб.

-137433065,38

17.09.2019

Оплата задолженности на 4037226,92 руб.

-141048326,84

17.10.2019

Оплата задолженности на 3615261,46 руб.

-150969204,29

24.10.2019

Оплата задолженности на 9920877,45 руб.

-155848767,67

22.11.2019

Оплата задолженности на 4879563,38 руб.

-162280147,27

23.11.2019

Оплата задолженности на 6431379,60 руб.

-170316591,03

10.12.2019

Оплата задолженности на 8036443,76 руб.

-171839345,32

23.12.2019

Оплата задолженности на 1522754,29 руб.

21142965,93

26.12.2019

Новая задолженность 192982311,25 руб.

21142965,93

26.12.2019

15.04.2020

112

4,25

21142965,93*112*1/300*4,25%

335468,39 р.

19239709,31

15.04.2020

Оплата задолженности на 1903256,62 руб.

19239709,31

16.04.2020

14.05.2020

29

4,25

19239709,31*29*1/300*4,25%

79043,14 р.

8261229,95

14.05.2020

Оплата задолженности на 10978479,36 руб.

8261229,95

15.05.2020

18.06.2020

35

4,25

8261229,95*35*1/300*4,25%

40961,93 р.

7220225,68

18.06.2020

Оплата задолженности на 1041004,27 руб.

7220225,68

19.06.2020

30.07.2020

42

4,25

7220225,68*42*1/300*4,25%

42960,34 р.

5229358,30

30.07.2020

Оплата задолженности на 1990867,38 руб.

5229358,30

31.07.2020

12.08.2020

13

4,25

5229358,30*13*1/300*4,25%

9630,73 р.

4442127,08

12.08.2020

Оплата задолженности на 787231,22 руб.

4442127,08

13.08.2020

27.08.2020

15

4,25

4442127,08*15*1/300*4,25%

9439,52 р.

4127066,68

27.08.2020

Оплата задолженности на 315060,40 руб.

4127066,68

28.08.2020

06.10.2020

40

4,25

4127066,68*40*1/300*4,25%

23386,71 р.

1496730,71

30.10.2020

Оплата задолженности на 2630335,97 руб.

Сумма основного долга: 1496730,71 руб.

Сумма неустойки: 540 890,76 руб.

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

- 11668178,07

10.08.2018

Оплата задолженности на 11668178,07 руб.

-22033830,58

03.09.2018

Оплата задолженности на 10365652,51 руб.

-29473206,44

10.09.2018

Оплата задолженности на 7439375,86 руб.

-37375568,25

20.09.2018

Оплата задолженности на 7902361,81 руб.

-67366155,34

10.12.2018

Оплата задолженности на 29990587,09 руб.

-73362678,74

13.12.2018

Оплата задолженности на 5996523,40 руб.

-88288860,22

17.12.2018

Оплата задолженности на 14926181,48 руб.

-98618577,90

11.03.2019

Оплата задолженности на 10329717,68 руб.

-100462100,42

19.03.2019

Оплата задолженности на 1843522,52 руб.

-103477239,92

01.04.2019

Оплата задолженности на 3015139,50 руб.

-104509648,85

08.04.2019

Оплата задолженности на 1032408,93 руб.

-107179965,34

16.04.2019

Оплата задолженности на 2670316,49 руб.

-108643001,18

08.05.2019

Оплата задолженности на 1463035,84 руб.

-110664420,92

21.05.2019

Оплата задолженности на 2021419,74 руб.

-113088682,12

11.06.2019

Оплата задолженности на 2424261,20 руб.

-117648804,70

18.06.2019

Оплата задолженности на 4560122,58 руб.

-119058318,77

25.06.2019

Оплата задолженности на 1409514,07 руб.

-127676000,73

23.07.2019

Оплата задолженности на 8617681,96 руб.

-133395838,46

20.08.2019

Оплата задолженности на 5719837,73 руб.

-137433065,38

17.09.2019

Оплата задолженности на 4037226,92 руб.

-141048326,84

17.10.2019

Оплата задолженности на 3615261,46 руб.

-150969204,29

24.10.2019

Оплата задолженности на 9920877,45 руб.

-155848767,67

22.11.2019

Оплата задолженности на 4879563,38 руб.

-162280147,27

23.11.2019

Оплата задолженности на 6431379,60 руб.

-170316591,03

10.12.2019

Оплата задолженности на 8036443,76 руб.

-171839345,32

23.12.2019

Оплата задолженности на 1522754,29 руб.

21142965,93

10.01.2020

Новая задолженность 192982311,25 руб.

21142965,93

10.01.2020

15.04.2020

97

4,25

21142965,93**97*1/300*4,25%

290539,59 р.

19239709,31

15.04.2020

Оплата задолженности на 1903256,62 руб.

19239709,31

16.04.2020

14.05.2020

29

4,25

19239709,31*29*1/300*4,25%

79043,14 р.

8261229,95

14.05.2020

Оплата задолженности на 10978479,36 руб.

8261229,95

15.05.2020

18.06.2020

35

4,25

8261229,95*35*1/300*4,25%

40961,93 р.

7220225,68

18.06.2020

Оплата задолженности на 1041004,27 руб.

7220225,68

19.06.2020

30.07.2020

42

4,25

7220225,68*42*1/300*4,25%

42960,34 р.

5229358,30

30.07.2020

Оплата задолженности на 1990867,38 руб.

5229358,30

31.07.2020

12.08.2020

13

4,25

5229358,30*13*1/300*4,25%

9630,73 р.

4442127,08

12.08.2020

Оплата задолженности на 787231,22 руб.

4442127,08

13.08.2020

27.08.2020

15

4,25

4442127,08*15*1/300*4,25%

9439,52 р.

4127066,68

27.08.2020

Оплата задолженности на 315060,40 руб.

4127066,68

28.08.2020

06.10.2020

40

4,25

4127066,68*40*1/300*4,25%

23386,71 р.

Сумма основного долга: 4127066,68 руб.

Сумма неустойки: 495 961,96 руб.

 

Проверив расчет истца, суд признал его неверным в части применения учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, в виду чего судом был произведен иной расчет:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

- 11668178,07

10.08.2018

Оплата задолженности на 11668178,07 руб.

-22033830,58

03.09.2018

Оплата задолженности на 10365652,51 руб.

-29473206,44

10.09.2018

Оплата задолженности на 7439375,86 руб.

-37375568,25

20.09.2018

Оплата задолженности на 7902361,81 руб.

-67366155,34

10.12.2018

Оплата задолженности на 29990587,09 руб.

-73362678,74

13.12.2018

Оплата задолженности на 5996523,40 руб.

-88288860,22

17.12.2018

Оплата задолженности на 14926181,48 руб.

-98618577,90

11.03.2019

Оплата задолженности на 10329717,68 руб.

-100462100,42

19.03.2019

Оплата задолженности на 1843522,52 руб.

-103477239,92

01.04.2019

Оплата задолженности на 3015139,50 руб.

-104509648,85

08.04.2019

Оплата задолженности на 1032408,93 руб.

-107179965,34

16.04.2019

Оплата задолженности на 2670316,49 руб.

-108643001,18

08.05.2019

Оплата задолженности на 1463035,84 руб.

-110664420,92

21.05.2019

Оплата задолженности на 2021419,74 руб.

-113088682,12

11.06.2019

Оплата задолженности на 2424261,20 руб.

-117648804,70

18.06.2019

Оплата задолженности на 4560122,58 руб.

-119058318,77

25.06.2019

Оплата задолженности на 1409514,07 руб.

-127676000,73

23.07.2019

Оплата задолженности на 8617681,96 руб.

-133395838,46

20.08.2019

Оплата задолженности на 5719837,73 руб.

-137433065,38

17.09.2019

Оплата задолженности на 4037226,92 руб.

-141048326,84

17.10.2019

Оплата задолженности на 3615261,46 руб.

-150969204,29

24.10.2019

Оплата задолженности на 9920877,45 руб.

-155848767,67

22.11.2019

Оплата задолженности на 4879563,38 руб.

-162280147,27

23.11.2019

Оплата задолженности на 6431379,60 руб.

-170316591,03

10.12.2019

Оплата задолженности на 8036443,76 руб.

-171839345,32

23.12.2019

Оплата задолженности на 1522754,29 руб.

21142965,93

26.12.2019

Новая задолженность 192982311,25 руб.

21142965,93

26.12.2019

15.04.2020

112

6

21142965,93*112*1/300*6%

473602,44 р.

19239709,31

16.04.2020

14.05.2020

29

5,5

19239709,31*29*1/300*5,5%

102291,12 р.

8261229,95

14.05.2020

Оплата задолженности на 10978479,36 руб.

8261229,95

15.05.2020

18.06.2020

35

5,5

8261229,95*35*1/300*5,5%

53009,56 р.

7220225,68

18.06.2020

Оплата задолженности на 1041004,27 руб.

7220225,68

19.06.2020

30.07.2020

42

4,25

7220225,68*42*1/300*4,25%

42960,34 р.

5229358,30

30.07.2020

Оплата задолженности на 1990867,38 руб.

5229358,30

31.07.2020

12.08.2020

13

4,25

5229358,30*13*1/300*4,25%

9630,73 р.

4442127,08

12.08.2020

Оплата задолженности на 787231,22 руб.

4442127,08

13.08.2020

27.08.2020

15

4,25

4442127,08*15*1/300*4,25%

9439,52 р.

4127066,68

27.08.2020

Оплата задолженности на 315060,40 руб.

4127066,68

28.08.2020

06.10.2020

40

4,25

4127066,68*40*1/300*4,25%

23386,71 р.

1496730,71

30.10.2020

Оплата задолженности на 2630335,97 руб.

Сумма основного долга: 1496730,71 руб.

Сумма неустойки: 714 320,42 руб.

 

Таким образом, размер пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1 Контракта, за период с 26.12.2019 по 06.10.2020 составляет                   714 320,42 руб.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

- 11668178,07

10.08.2018

Оплата задолженности на 11668178,07 руб.

-22033830,58

03.09.2018

Оплата задолженности на 10365652,51 руб.

-29473206,44

10.09.2018

Оплата задолженности на 7439375,86 руб.

-37375568,25

20.09.2018

Оплата задолженности на 7902361,81 руб.

-67366155,34

10.12.2018

Оплата задолженности на 29990587,09 руб.

-73362678,74

13.12.2018

Оплата задолженности на 5996523,40 руб.

-88288860,22

17.12.2018

Оплата задолженности на 14926181,48 руб.

-98618577,90

11.03.2019

Оплата задолженности на 10329717,68 руб.

-100462100,42

19.03.2019

Оплата задолженности на 1843522,52 руб.

-103477239,92

01.04.2019

Оплата задолженности на 3015139,50 руб.

-104509648,85

08.04.2019

Оплата задолженности на 1032408,93 руб.

-107179965,34

16.04.2019

Оплата задолженности на 2670316,49 руб.

-108643001,18

08.05.2019

Оплата задолженности на 1463035,84 руб.

-110664420,92

21.05.2019

Оплата задолженности на 2021419,74 руб.

-113088682,12

11.06.2019

Оплата задолженности на 2424261,20 руб.

-117648804,70

18.06.2019

Оплата задолженности на 4560122,58 руб.

-119058318,77

25.06.2019

Оплата задолженности на 1409514,07 руб.

-127676000,73

23.07.2019

Оплата задолженности на 8617681,96 руб.

-133395838,46

20.08.2019

Оплата задолженности на 5719837,73 руб.

-137433065,38

17.09.2019

Оплата задолженности на 4037226,92 руб.

-141048326,84

17.10.2019

Оплата задолженности на 3615261,46 руб.

-150969204,29

24.10.2019

Оплата задолженности на 9920877,45 руб.

-155848767,67

22.11.2019

Оплата задолженности на 4879563,38 руб.

-162280147,27

23.11.2019

Оплата задолженности на 6431379,60 руб.

-170316591,03

10.12.2019

Оплата задолженности на 8036443,76 руб.

-171839345,32

23.12.2019

Оплата задолженности на 1522754,29 руб.

21142965,93

10.01.2020

Новая задолженность на 192 982 311,25 руб.

21142965,93

10.01.2020

15.04.2020

97

6

21142965,93*97*1/300*6%

410173,54 р.

19239709,31

15.04.2020

Оплата задолженности на 1903256,62 руб.

19239709,31

16.04.2020

14.05.2020

29

5,5

19239709,31*29*1/300*5,5%

102291,12 р.

8261229,95

14.05.2020

Оплата задолженности на 10978479,36 руб.

8261229,95

15.05.2020

18.06.2020

35

5,5

8261229,95*35*1/,300*5,5%

53009,56 р.

7220225,58

18.06.2020

Оплата задолженности на 1041004,27 руб.

7220225,58

19.06.2020

30.07.2020

42

4,25

7220225,58*42*1/300*4,25%

42960,34 р.

5229358,30

30.07.2020

Оплата задолженности на 1990867,38 руб.

5229358,30

31.07.2020

12.08.2020

13

4,25

5229358,30*13*1/300*4,25

9630,73 р.

4442127,08

12.08.2020

Оплата задолженности на 787231,22 руб.

4442127,08

13.08.2020

27.08.2020

15

4,25

4442127,08*15*1/300*4,25%

9439,52 р.

4127066,68

27.08.2020

Оплата задолженности на 315060,40 руб.

4127066,68

28.08.2020

06.10.2020

40

4,25

4127066,68*40*1/300*4,25%

23386,71 р.

1496730,71

30.10.2020

Оплата задолженности на 2630335,97 руб.

Сумма основного долга: 1496730,71 руб.

Сумма неустойки: 650 891,52 руб.

 

Сумма пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательства, установленного п. 9 Дополнительного соглашения № 7 (предоставление обеспечения исполнения Контракта), за период с 10.01.2020 по 06.10.2020 составляет 650 891,52 рублей.

Общий размер пени, подлежащий взысканию с Подрядчика в пользу Государственного заказчика, составляет 1 365 211,94 руб. (714320,42 руб. +                          650891,52 руб.).

В соответствии  с исковыми требованиями Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» просит суд взыскать с ответчика общий размер пени в сумме 1 036 852, 72 руб. (540 890,76 руб. +                   495 961,96 руб.).

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможности суда выйти за пределы требований истца. Взыскание пени в меньшем размере – это право истца.

По состоянию на день принятия решения по делу надлежащие и допустимые доказательства погашения суммы неустойки суду не представлены.

Контррасчет со стороны ответчика в материалы дела представлен не был.

На основании вышеизложенного, исковые требования о взыскании неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 15.05.2018 №0175200002318000019_315134, в размере  1 036 852,72 рублей суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Как установлено в части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные суды установлены в статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска: от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей.

Истец при подаче искового заявления был освобожден от уплаты государственной пошлины на основании пп. 1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 333.17 НК РФ ответчики признаются плательщиками государственной пошлины в случае, если решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты.

В силу части 3 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Таким образом, за рассмотрение судом данного искового заявления, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 23 369,00 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Палладиум Энерго» в пользу Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» неустойку (пеню) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 15.05.2018 №0175200002318000019_315134, в размере 1 036 852,72 рублей (за период с 26.12.2019 по 06.10.2020 в размере 540 890,76 рублей; за период с 10.01.2020 по 06.10.2020 в размере 495 961,96 рублей).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Палладиум Энерго» в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в                   размере 23 369,00 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца  со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                       И.А. Ищенко