АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

11.10.2023                                                                                               Дело № А62-5641/2023

                          Резолютивная часть решения оглашена 05.10.2023

                                   Полный текст решения изготовлен 11.10.2023

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Ерохина А. М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Публичного акционерного общества «Мобильные Телесистемы» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о понуждении к исполнению обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств,

при участии:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности, 

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности,

У С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы»  (далее – ПАО «МТС», истец) обратилось в суд с требованием к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» (далее – ПАО «Россети Центр», ответчик) об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «Базовая станция сотовой связи», по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Корохоткинское, западнее д. Ковши, в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 42204283.

Ответчик представил письменный отзыв на иск, в котором заявленные требования не признал, указал, что нарушение ПАО «Россети Центр»  сроков исполнения обязательств в рамках договора  N 42204283 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обусловлено объективными обстоятельствами, связанными с необходимостью различных согласований, без проведения которых  ПАО «Россети Центр» не сможет выполнить принятые на себя обязательства в рамках договора об осуществлении технологического присоединения заключенного с ПАО «МТС».

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Оценив доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (после изменения наименования – Публичное акционерное общество «Россети Центр»»; сетевая организация) и Публичным акционерным обществом «Мобильные Телесистемы»  (заявитель) заключен договор № 42204283 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту - договор).

В соответствии с пунктом 1.1 договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение), в том числе но обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электрознергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 кВт: категория надежности третья: класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения базовой станции сотовой связи, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Корохоткинское, западнее д. Ковши, кадастровый номер: 67:18:0030202 (пункт 3 договора).

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии  с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 27.12.2021 № 353 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Смоленской области на 2022 год» и составляет:

40932(сорок тысяч девятьсот тридцать два) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20 (двадцать) % 6822(шесть тысяч восемьсот двадцать два) руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 5 Договора  срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с пунктом  21 Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

ПАО «МТС» в полном объеме выполнило свои обязательства по договору, внеся плату за технологическое присоединение объекта в размере 100% в сумме 40932 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 613289 от 23.03.2022г.

Однако до настоящего времени работы по технологическому присоединению объекта не выполнены, что ответчиком не оспаривается.

12.04.2023 ПАО «МТС» в адрес ПАО «Россети Центр» была направлена претензия о нарушении сетевой организацией сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта, предусмотренных  договором N 42204283.

Однако требования истца не исполнены, претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Рассмотрев заявленные требования, суд полагает их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35- ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Указанный порядок установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

Из пункта 7 Правил № 861 следует, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором (подпункт «в» пункта 7 Правил № 861).

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а)подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и ихсогласование с системным оператором;

б)разработку сетевой организацией проектной документации согласнообязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в)разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

г)выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

д)проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил № 861, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

е)осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

ж)осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

Таким образом, технологическое присоединение - это поэтапный процесс, который может быть окончен сетевой организацией только после надлежащего исполнения встречных обязательств обеими сторонами.

Пунктом 6 Договора стороны установили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора –т.е. до 23.03.2023.

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 16 Правил № 861 договор об осуществлениитехнологическогоприсоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Таким образом, обязательства сторон по Договору (пункт 1) носят встречный характер.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что возложенные договорные обязательства по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям по договору от 23.03.2022 N 42204283 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по настоящее время не исполнены.

В связи с чем, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

В соответствии с частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные   действия,   не   связанные   с   взысканием   денежных   средств   или   передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Учитывая общий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 23.03.2022 N 42204283 в соответствии с пунктом 6 договора – 1 год, суд считает разумным установить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 30 календарных дней с даты вступления решения в законную силу.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «Базовая станция сотовой связи», по адресу: Смоленская область, Смиоленский район, с.п. Корохоткинское, западнее д. Ковши, в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.03.2022 N 42204283.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества «Мобильные Телесистемы» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья                          А.М. Ерохин