именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

13. 02. 2018 года.                                             Дело № А40-183831/17-151-1586

Резолютивная часть решения объявлена 12. 02. 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 13. 02. 2018 года.

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе председательствующего Чекмарёва Г.С., единолично, 

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Коробков К.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело № А40-183831/17

по иску ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) 

к ООО "ФИРМА ИНТРЭК" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 1 672 665,03 руб. – долга, 1 262 621, 65 руб. – неустойки по п. 13.6 договора,

с участием представителей: от истца – ФИО1, дов. от 01.02.2018 г.;

от ответчика – не явился, извещен.

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 1 672 665,03 руб. – долга, 1 262 621, 65 руб. – неустойки по п. 13.6 договора, на основании статей 183, 309, 310, 408, 720, 753 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, о котором извещен в установленном порядке; не представил отзыв.

Дело рассмотрено по имеющимся в деле документам, представленным истцом в отсутствие отзыва ответчика и представителя ответчика.

30 ноября 2015 года между ООО «ФИРМА ИНТРЭК» (Подрядчик) и ООО «ЭЛТЕХСТРОЙ» (Субподрядчик) заключен договор субподряда № Д/УЭГ/9505-ЭТС от 30.11.2015 года, в соответствии с предметом которого Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами без привлечения других субподрядчиков работы, перечень которых перечислен в п. 1.1 Договора, на объекте Энергоблок ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС, расположенной по адресу: 454006, 

<

...> передать результат работ Подрядчику вместе со всей относящейся к работам документацией, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить за них обусловленную цену.

Объем работ обусловлен пунктом 1.2 Договора, Техническим заданием, Локальными сметными расчетами, Технической документацией, а также Обязательными Техническими Правилами и Применимым правом (п. 1.3 Договора). 

05 апреля 2016 года сторонами Договора заключено Дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым изменена фактическая стоимость работ по Договору, которая составила 5 461 771 рубль 65 копеек, а также внесены иные изменения, в том числе в локальные сметные расчеты, техническое задание.

В соответствии с п. 3.3 Договора, подтвержденные документально Командировочные расходы оплачиваются Подрядчиком.

Командировочные расходы за период с декабря 2015 года по май 2016 года Субподрядчиком подтверждены следующими документами: копия договора возмездного оказания услуг № 15054 от 02.12.2015 г., между ООО «ЭЛТЕХСТРОЙ» и ИП ФИО2 (на временное размещение и проживание); копия договора возмездного оказания услуг № 16010 от 01.01.2016 г., между ООО «ЭЛТЕХСТРОЙ» и ИП ФИО2 (на временное размещение и проживание); копия свидетельства ОГРН в отношении ИП ФИО2; копия свидетельства ИНН в отношении ИП ФИО2; копия Акта № 11 от 30.12.2015 г.; копия Акта № 10 от 31.01.2016 г.; копия Акта № 11 от 29.02.2016 г.; копия Акта № 15 от 31.03.2016 г.; копия Акта № 14 от 30.04.2016 г.; копия Акта № 18 от 20.05.2016 г.; копия платежного поручения № 150725 от 02.12.2015 г.; копия платежного поручения № 150753 от 15.12.2015 г.; копия платежного поручения № 150802 от 23.12.2015 г.; копия платежного поручения № 160008 от 11.01.2016 г.; копия платежного поручения № 160058 от 28.01.2016 г.; копия платежного поручения № 160082 от 04.02.2016 г.; копия платежного поручения № 160115 от 15.02.2016 г.; копия платежного поручения № 160191 от 16.03.2016 г.; копия платежного поручения № 160209 от 24.03.2016 г.; копия платежного поручения № 160287 от 18.04.2016 г.; копия платежного поручения № 160345 от 12.05.2016 г.; копия платежного поручения № 160370 от 25.05.2016 г.; копия приказа (распоряжения) № 15001 - 15005 от 01.12.2015 г. о направлении работника в командировку; копия приказа (распоряжения) № 00000016001 – 00000016006 от 05.01.2016 г. о направлении работника в командировку; копия приказа (распоряжения) № 00000016007 - 00000016013 от 01.02.2016 г. о направлении работника в командировку;копия приказа (распоряжения) № 00000016014 - 00000016018 от 09.03.2016 г. о направлении работника в командировку; копия приказа (распоряжения) № 00000016019 - 00000016023 от 01.04.2016 г. о направлении работника в командировку; копия приказа (распоряжения) № 00000016024 - 00000016028 от 01.05.2016 г. о направлении работника в командировку; копия командировочного удостоверения № 15024 от 02.12.2015 г.; копия командировочного удостоверения №15025 от 02.12.2015 г.; копия командировочного удостоверения №15026 от 02.12.2015 г.; копия командировочного удостоверения №15027 от 02.12.2015 г.; копия командировочного удостоверения №15028 от 02.12.2015 г.; копия командировочного удостоверения №16001 от 05.01.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16002 от 05.01.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16003 от 05.01.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16004 от 05.01.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16005 от 05.01.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16006 от 05.01.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16007 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16008 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16009 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16010 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16011 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16012 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16013 от 01.02.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16018 от 09.03.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16014 от 09.03.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16015 от 09.03.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16016 от 09.03.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16017 от 09.03.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16019 от 01.04.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16020 от 01.04.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16021 от 01.04.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16022 от 01.04.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16023 от 01.04.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16024 от 01.05.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16025 от 01.05.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16026 от 01.05.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16027 от 01.05.2016 г.; копия командировочного удостоверения №16028 от 01.05.2016 г.; копия табеля учета рабочего времени № 00000000012 от 31.12.2015 г. (за декабрь 2015 г.); копия табеля учета рабочего времени № 00ЗП-000001 от 31.01.2016 г. (за январь 2016 г.); копия табеля учета рабочего времени № 003П-000003 от 29.02.2016 г. (за февраль 2016); копия табеля учета рабочего времени № 003П-000004 от 31.05.2016 г. (за март 2016 г.); копия табеля учета рабочего времени № 003П-000005 от 30.04.2016 г. (за апрель 2016 г.); копия табеля учета рабочего времени № 003П-000006 от 31.05.2016 г. (за май 2016 г.); копия служебного задания № 00000015024 – 00000015028 от 02.12.2015 г.; копия служебного задания № 00000016001 - 00000016006 от 05.01.2016 г.; копия служебного задания № 00000016007 - 00000016012 от 01.02.2016 г.; копия служебного задания № 00000016013 от 01.02.2016 г.; копия служебного задания № 00000016014 - 00000016018 от 09.03.2016 г.; копия служебного задания № 00000016019 - 00000016023 от 01.04.2016 г.; копия служебного задания № 00000016024 – 00000016028 от 01.05.2016 г.; копия Расчета № 1 Возмещение затрат на командировочные расходы в декабре 2015г.; копия Расчета № 1. Возмещение затрат на проживание в декабре 2015 г. по договору № 15054; копия Расчета № 1.1 Возмещение затрат на командировочные расходы в январе 2015г.; копия Расчета № 1.2 Возмещение затрат на проживание в январе 2016 г. по договору № 16010; копия Расчета № 2.1 Возмещение затрат на командировочные расходы в феврале 2016г.; копия Расчета № 2.2 Возмещение затрат на проживание в феврале 2016 г. по договору № 16010; копия Расчета № 3.1 Возмещение затрат на командировочные расходы в марте 2016г.; копия Расчета № 3.2 Возмещение затрат на проживание в марте 2016 г. по договору № 16010 копия Расчета № 4.1 Возмещение затрат на командировочные расходы в апреле 2016г.; копия Расчета № 4.2 Возмещение затрат на проживание в апреле 2016 г. по договору № 16010; копия Расчета № 5.1 Возмещение затрат на командировочные расходы в мае 2016г.; копия Расчета № 5.2 Возмещение затрат на проживание в мае 2016 г. по договору № 16010; копия авансового отчета № 150139 от 30.12.2015 г.; копия авансового отчета № 150140 от 30.12.2015 г.; копия авансового отчета № 150141 от 30.12.2015 г.; копия авансового отчета № 150142 от 30.12.2015 г.; копия авансового отчета № 150143 от 30.12.2015 г.; копия авансового отчета № 160001 от 31.01.2016 г.; копия авансового отчета № 160002 от 31.01.2016 г.; копия авансового отчета № 160006 от 31.01.2016 г.; копия авансового отчета № 160007 от 31.01.2016 г.; копия авансового отчета № 160008 от 31.01.2016 г.; копия авансового отчета № 160009 от 31.01.2016 г.; копия авансового отчета № 160061 от 12.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160010 от 18.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160011 от 18.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160012 от 18.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160013 от 18.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160014 от 18.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160015 от 18.02.2016 г.; копия авансового отчета № 160045 от 31.03.2016 г.; копия авансового отчета № 160046 от 31.03.2016 г.; копия авансового отчета № 160047 от 31.03.2016 г.; копия авансового отчета № 160048 от 31.03.2016 г.; копия авансового отчета № 160049 от 31.03.2016 г.; копия авансового отчета № 160062 от 30.04.2016 г.; копия авансового отчета № 160063 от 30.04.2016 г.; копия авансового отчета № 160064 от 30.04.2016 г.; копия авансового отчета № 160065 от 30.04.2016 г.;  копия авансового отчета № 160066 от 30.04.2016 г.; копия авансового отчета № 160067 от 01.05.2016 г.; копия авансового отчета № 160068 от 01.05.2016 г.; копия авансового отчета № 160069 от 01.05.2016 г.; копия авансового отчета № 160070 от 01.05.2016 г.; копия авансового отчета № 160071 от 01.05.2016 г.;

Общая сумма командировочных расходов за период с декабря 2015 г. по май 2016 года, подлежащих возмещению,  составляет 395 241,00 руб.

В соответствии с п. 8.1 Договора, оплата выполненных работ по соответствующему Этапу производится Подрядчиком на основании подписанных Сторонами документов, перечень которых перечислен в п. 8.1 Договора. Платежи производятся в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами вышеуказанных документов, при условии приемки и оплаты указанных работ Заказчиком. 

Пунктом 8.2 стороны в качестве обеспечения исполнения обязательств Субподрядчиком предусмотрели «Отложенный платеж», который составляет 5% от суммы соответствующего счета (п. 8.3 Договора), который выплачивается по истечении 180 календарных дней с момента подписания сторонами Итогового Акта.

Все работы, обусловленные Договором, Субподрядчиком выполнены в срок, что подтверждается следующими документами: Акт о приемке выполненных работ за февраль 2016 года № 1-1 от 21.02.2016 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.02.2016 г. (КС-3); Акт о приемке выполненных работ за февраль 2016 года № 1-2 от 21.02.2016 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 21.02.2016 г. (КС-3); Акт о приемке выполненных работ за май 2016 года № 5 от 31.05.2016 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.05.2016 г. (КС-3); Акт о приемке выполненных работ за май 2016 года № 2-1 от 25.05.2016 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2-1 от 25.05.2016 г. (КС-3); Акт о приемке выполненных работ за май 2016 года № 4-1 от 25.05.2016 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4-1 от 25.05.2016 г. (КС-3); Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2015 года № 1 от 30.06.2016 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.06.2016 г. (КС-3);

В октябре 2016 года сторонами Договора было достигнуто соглашение о заключении дополнительного соглашения на комплекс работ по прогреву блочных трансформаторов на объекте строительства «Энергоблок ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС». Гарантийным письмом исх. № МИ-2016-0004576 от 06.10.2016 года Подрядчик просит срочно приступить к выполнению указанного выше комплекса работ на сумму 550 000,00 рублей.

Вышеуказанные работы также были выполнены в полном объеме, однако Подрядчиком так и не было подписано дополнительное соглашение на их выполнение. 

Письмом исх. № 16306 от 15.12.2016 г. Субподрядчик уведомил Подрядчика о том, что все работы по Договору, в том числе и работы по прогреву блочных трансформаторов на объекте строительства «Энергоблок ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС» закончены, в связи с чем, Субподрядчик просит произвести оплату выполненных работ и компенсировать командировочные расходы.

Выполнение дополнительных работ, обусловленных гарантийным письмом, а также командировочные расходы, неоплаченные Подрядчиком, подтверждаются следующими документами: Акт о приемке выполненных работ № 2 за 2016 год от 31.10.2016 (КС-2) на сумму 395 241,00 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.10.2016 г. (КС-3); Акт о приемке выполненных работ за февраль 2017 года № 1 от 28.02.2017 г. (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.02.2017 г. (КС-3).

 21 января 2017 года, посредством Почты России Подрядчику направлены оригиналы первичных бухгалтерских документов с сопроводительным письмом исх. № 170010 от 20.01.2017 г., в котором перечислены все направляемые документы, а также изложено требование об оплате выполненных работ.

В нарушение п. 7.2 Договора, где строго установлен срок для подписания документации либо предоставления мотивированного отказа в подписании финансовых документов, ответчик не подписывал документы, не давал мотивированного отказа. В ответах ответчика все претензии касаются только оформления документов, которые после исправления повторно направлялись ответчику. При этом каких-либо замечаний относительно выполненных истцом работ не заявлялось. То есть ответчик необоснованно уклоняется от подписания документов и оплаты работ.

Заинтересованность ответчика в работах подтверждена гарантийным письмом Подрядчика исх. № МИ-2016-0004576 от 06.10.2016 года. 

Согласно ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно п. 1 ст. 753 ГК РФ, Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с п.4 ст. 753 ГК РФ,  сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Ответчик мотивированного отказа от приемки работ не представил, следовательно, в силу п. 4 ст. 753 ГК РФ оснований для признания односторонне оформленных истцом документов не имеется, соответственно результат работ сдан, принят без замечаний и подлежит оплате.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В силу части 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями в части существа правоотношений. 

Согласно части 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Требование истца о взыскании долга за выполненные работы в счет возмещения командировочных расходов в сумме 1 672 665,03 руб. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 13.6 Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты выполненных работ, установленных ст. 8 Договора, Субподрядчик имеет право требовать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании пени за период с 23.03.2016 г. по  20.09.2017 г. в сумме 1 262 621, 65 руб. – законное, обоснованное и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом, не оспоренным ответчиком, проверенным судом и признанным верным.

Расходы  по уплате  госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст.ст. 110,112 АПК РФ.

Руководствуясь статьями  4, 41, 65, 66, 70, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО "ФИРМА ИНТРЭК" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) 1 672 665,03 руб. – долга, 1 262 621, 65 руб. – неустойки по п. 13.6 договора, и расходы по уплате госпошлины в сумме 37 676 руб. 

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                              Г.С. Чекмарёв