АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

___________________________________________________________________

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-13145/2018

г. Кострома

22 января 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 22 января 2019 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Паниной С.Л. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Альбит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  об обязании выполнить текущий ремонт в соответствии с локальной сметой и техническим заданием государственного контракта № 172 от 16.10.2017 г.,

Лицо, ведущее протокол: секретарь судебного заседания Маклакова А.А.

При участии в заседании:

от истца: ФИО1 (доверенность от 02.11.2018);

от ответчика: не явился. 

Суд установил следующее.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области (далее – истец, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Кострмоской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Альбит» (далее – ответчик, общество)  об обязании выполнить текущий ремонт в соответствии с локальной сметой и техническим заданием государственного контракта № 172 от 16.10.2017 г.,

Судебное заседание по делу назначено на 09.01.2019.

В судебном заседании по правилам статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 15.01.2019.

После перерыва в судебном заседании представитель истца уточнил исковые требования и просил обязать общество с ограниченной ответственностью «Альбит» исполнить в полном объеме взятые на себя обязательства по выполнению текущего ремонта зданий ФКУЗ «МСЧ МВД России по Костромской области» в соответствии с локальной сметой и техническим заданием государственного контракта № 172 от 16.10.2017 на выполнение текущего ремонта зданий поликлиники и ЦГСН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Костромской области» невыполненных работ, а также безвозмездно устранить выявленные недостатки выполненных работ: а) здание поликлиники по адресу 

<

...>: рамки решеток на окна закрепить по всему периметру анкерами, расстояние между анкерами на решетках сделать не более 500 мм, сечение проушин на решетках сделать 40x6 мм, сделать проушины для двух замков, сделать по два навесных замка на каждой распашной оконной решетке; б) здание ЦГСЭН по адресу 

<

...>: сделать проушины для двух замков, сделать по два навесных замка на каждой распашной оконной решетке.

Уточнение принято судом.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил. Определение с указанием времени и места проведения заседания возвращено, направленное в адрес ответчика. Возвращено в связи с неявкой адресата за получением корреспонденции.

По правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчика следует считать извещенным о рассмотрении дела. По правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

16.10.2017 между Учреждением  (государственный заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение текущего ремонта зданий поликлиники и ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Костромской области» № 172.

На основании пункта 1.1. подрядчик принимает на себя обязательства по выполнение текущего ремонта поликлиники и ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Костромской области»: 

<

...> и 

<

...> в соответствии с условиями настоящего контракта, действующими строительными нормами и правилами, проектно-сметной документацией (приложение №1) и техническим заданием (приложение №2) являющейся неотъемлемой частью контракта, а государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в установленном контрактом порядке.

Цена контракта составляет 1 420 000 руб. без НДС (пункт 2.1. контракта).

Срок выполнения работ по 15 декабря 2017 года (пункт 3.1. договора).

Приемка законченных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оповещения подрядчиком государственного заказчика о выполнении работ. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, действовавшими на дату подписания контракта (пункт 4.1. контракта).

Согласно пункту 4.5. контракта в случае предъявления государственным заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены подрядчиком в десятидневный срок с момента получения этого требования, либо в иной разумный срок, письменно утвержденный сторонами настоящего контракта.

Общество работы не завершены.

01.02.2018, 01.03.2018, 02.04.2018, 03.05.2018, 01.06.2018 истец направил ответчику претензии, в которых потребовал выполнить невыполненные работы (л.д. 70-94).

В гарантийных письмах общество гарантировало выполнение работ в январе 2018 (л.д. 99-100).

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Установлено, что ответчик принятые на себя обязанности по контракту по выполнению работ в полном объеме не исполнил.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательств, свидетельствующих об обратном.

Таким образом, иск является законным и обоснованным.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, Арбитражный суд Костромской области

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Альбит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исполнить в полном объеме взятые на себя обязательства по выполнению текущего ремонта зданий ФКУЗ «МСЧ МВД России по Костромской области» в соответствии с локальной сметой и техническим заданием государственного контракта № 172 от 16.10.2017 на выполнение текущего ремонта зданий поликлиники и ЦГСН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Костромской области» невыполненных работ:

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,

Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количество

1

2

3

Раздел 1. Поликлиника МСЧ МВД России по 

<

...>

д.101

РЕШЕТКИ:

1.

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций

0,0922

2.

Металлическая сварная распашная решетка 1800x1300 мм., ячейкой 150x150 мм., рама из уголка 35x35x4 мм., створки из арматуры диаметром 16 мм., проушины из полосовой стали 40x6 мм. (огрунтованная и окрашенная), 1 шт. (размеры решеток уточнить по месту, монтаж с внутренней стороны здания, цвет уточнить у Заказчика)

1

3.

Замок навесной 3 класса устойчивости к вскрытию, дужка не менее 14 мм из закаленной стали. Стальной корпус. 1 шт.

34

Раздел 2. Центр государственного санэпиднадзора 

<

...>. 19

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

1.

Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,05 т, 1 шт.

1

2.

Тепловая завеса Тропик М-3 или аналог, 1 шт.

1

3.

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, 100 м

0.15

4.

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м

0.15

5.

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м

0.05

6.

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м

0.05

7.

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм, 10 шт.

3

8.

Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м

15

9.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м

0.02

10.

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм, 100 м

0.05

11.

Розетка штепсельная: неутопленноготипа при открытой проводке, 100 шт.

0.01

12.

Розетка открытой проводки с заземлением, 100 шт.

0.01

13.

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2, 1 шт.

1

14.

Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 IP 16А, характеристика С, шт.

1

15.

Бокс для автомата на один модуль, шт.

1

ВЕНТИЛЯЦИЯ:

1,

Прокладка воздуховодов плоских ПВХ 60x204 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов

0.0317

2.

Воздуховод плоский (60*204мм) 2м, шт.

3

3.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАНАЛА (60*204ММ), шт.

13

4.

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАНАЛА (60*204ММ), шт.

2

5.

Колено соединительное 204x60x125 мм, шт.

1

6.

Соединитель Т-образный пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм с анемостатами 

<

Ш5, шт.

2

7.

Колено горизонтальное, 90 градусов. 60x204, шт.

1

8.

Соединитель плоских-круглых каналов 60x204, D125 мм, шт.

1

9.

Анемостат А 125 ВРФ, D125 мм, шт.

3

10.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов

0.0102

11.

ВОЗДУХОВОД КРУГЛЫЙ 12,5ВП2, м

2.6

12.

КОЛЕНО КРУГЛОЕ 12,5ККП, шт

1

13.

СОЕДИНИТЕЛЬ КАНАЛА 12.5СКП, шт

1

14.

Держатель круглого канала 10ДКП, шт

5

15.

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов

0.0267

16.

Воздуховод круглый стальной оцинкованный d 125x2000 мм, м

6.8

17.

Отвод для круглых воздуховодов оцинкованный d 125 мм на 90°, шт.

1

18.

Соединитель для круглых воздуховодов оцинкованный dl25 мм, шт.

3

19.

Грибок стальной оцинкованный, шт.

1

20.

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм, 100 шт.

0.02

21.

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм, 100 отверстий

0.01

22.

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14, 100 отверстий

0.4

23.

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 мЗ заделки

0.1

РЕМОНТ КРЫЛЬЦА

1.

Разборка покрытий кровель (с сохранением материала), 100 м2 покрытия

0.015

2.

Устройство кровель б/у, 100 м2 кровли

0.015

3.

Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев (смена балясины), 100 м элемента

0.01

4.

ФИО2 деревянная фигурная, шт.

1

5.

Устройство металлического каркаса из уголка, 1 т конструкций

0.05

6.

Сталь угловая: 32x32 мм, т

0.05

7.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.01

8.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.01

УСТАНОВКА ВИДЕО ДОМОФОНА

1.

Монтаж видеодомофона, шт

1

2.

Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) (монтаж дополнительного монитора домофона), 1 шт.

1

3.

Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством, 1 шт.

1

4.

Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля, 1 шт.

1

5,

Вызывная панель в/домофона (черная) - 1 шт. Монитор видеодомофона - 1 шт, замок 'электромагнитный -1 шт, ключи контактные Touch Memory - 20 шт, контроллер Z-5R - 1 шт, считываль ключей - 1 шт, (по счету), комплект

1

Раздел 3. Центр государственного санэпиднадзооа 

<

...>

РЕШЕТКИ

1.

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций

0,032

2.

Металлическая сварная решетка 850x460 мм., ячейкой 150x150 мм., рама из уголка 35x35x4 мм., (огрунтованная и окрашенная)

2

3.

Замок навесной 3 класса устойчивости к вскрытию, дужка не менее 14 мм из закаленной стали. Стальной корпус

16

Безвозмездно устранить выявленные недостатки выполненных работ: а) здание поликлиники по адресу 

<

...>: рамки решеток на окна закрепить по всему периметру анкерами, расстояние между анкерами на решетках сделать не более 500 мм, сечение проушин на решетках сделать 40x6 мм, сделать проушины для двух замков, сделать по два навесных замка на каждой распашной оконной решетке; б) здание ЦГСЭН по адресу 

<

...>: сделать проушины для двух замков, сделать по два навесных замка на каждой распашной оконной решетке.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альбит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении десяти дней после вступления решения в законную силу, при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном  порядке в  Арбитражный суд Волго-Вятского округа течение двух месяцев при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

     Судья                                                                                                 С.Л. Панина