АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело N А 14-5350/2017  « 19 » июля 2017 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи  Семенова Г.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению  

Муниципального образования городского округа город Воронеж в лице  Управления строительной политики администрации городского округа  город Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному  обществу «Специализированное ремонтно-строительное управление N 7»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК  РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать акционерное общество «Специализированное ремонтно- строительное управление N 7», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления решения в  законную силу выполнить гарантийные обязательства по муниципальному  контракту № 2012.184124 от 29.12.2012 путем устранения недостатков  работ по строительству объекта «Детский сад на 220 мест по ул.  Ростовская, 69а в городском округе город Воронеж», а именно: выполнить  ремонт проходов из тротуарной плитки возле главного входа площадь 20  кв.м; выполнить ремонт отмостки возле столовой площадь 2 кв.м;  выполнить ремонт напольного покрытия из ламината (в музыкальном зале)  площадью 10 кв.м; выполнить ремонт напольного покрытия в медблоке,  изостудии, в кабинете старших воспитателей из линолеума площадь 35,5  кв.м; выполнить ремонт напольного покрытия в подвальном помещении из  керамогранитных плит площадью 5 кв.м; выполнить ремонт поверхностей  потолков площадью 189 кв.м; выполнить ремонт поверхностей стен  площадью 156 кв.м; выполнить ремонт откосов из гипсокартоновых листов  площадью 4,5 кв.м; устранить неисправность пожарных датчиков в  количестве 3 шт.; устранить неисправность светильников в групповых  помещениях в количестве 4 шт.; устранить неисправность обратного  

клапана на системе водоснабжения диаметром 32 мм в количестве 4 шт.;  устранить неисправность вентиля на системе водоснабжения диаметром 25  мм в количестве 1 шт.; устранить неисправность ограничителя  температуры воды MTCV в количестве 3 шт.; устранить неисправность  электропривода по открыванию окошек в группе на первом этаже в  количестве 1 шт.; устранить неисправность светильника в помещении на 1  этаже в количестве 1 шт.; осуществить ремонт покрытия парапета из  листовой стали над окном делопроизводителя площадью 2,4 кв. м;  выполнить ремонт штукатурки на фасаде здания площадь 10 кв. м;  устранить неисправность решетки на вентиляционной шахте возле  столовой в количестве 1 шт.; выполнить ремонт покрытия кровли в осях А- И/3-8 площадью 874 кв. м; выполнить ремонт гидроизоляционной пленки в  осях А-И/3-8 площадью 961,4 кв. м; выполнить ремонт стяжки на чердаке  площадью 40 кв. м.  

Взыскать с акционерного общества «Специализированное ремонтно- строительное управление N 7», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

На основании пункта 3 статьи 174 Арбитражного процессуального  кодекса РФ муниципальное образование городского округа город Воронеж  в лице Управления строительной политики администрации городского  округа город Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) вправе  осуществить соответствующие действия за счет акционерного общества  «Специализированное ремонтно-строительное управление N 7»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), со взысканием с  него необходимых расходов в случае, если акционерное общество  «Специализированное ремонтно-строительное управление N 7»  не исполнит решение в течение установленного срока.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение  двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд  Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд,  принявший решение.  

Судья Г.В. Семенов