Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-11391/2023

06 декабря 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2024 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе                судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем Котовской Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" (117418, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, ул. Гарибальди, д. 29, к. 4, эт. 2, пом. I, ком. 23, 24, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к акционерному обществу "Нефтегаз Югра" (628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании  10 002 878,65 руб.,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" ФИО1, конкурсного управляющего акционерного общества «ИНГА» ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Марийская Нефтегазовая компания», общество с ограниченной ответственностью «Стройтэк»,

с участием представителей сторон:

 от истца – ФИО3  по доверенности от 13.11.2024 (онлайн),

от ответчика – ФИО4 по доверенности 55/24 от 25.11.2024,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иском к акционерному обществу "Инга" (далее – ответчик) о взыскании 10 002 878,65 руб., в том числе 9 609 924,87 руб. гарантийного удержания, 392 953,78 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты по день исполнения обязательства.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на неисполнение ответчиком обязательств по возврату обеспечительного платежа, удержанного по договору от 03.05.2017 № 0305-08.

Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" ФИО1, конкурсный управляющий акционерного общества «ИНГА» ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Марийская Нефтегазовая компания», общество с ограниченной ответственностью «Стройтэк».

Истец заявленные требования и доводы искового заявления поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал, ссылаясь на их необоснованность, также заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

При открытии судом судебного заседания посредством использования системы вебконференции представитель конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" ФИО5, ходатайство которого об участии в судебном заседании посредством системы «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных дел» удовлетворено судом, не обеспечил надлежащее подключение к каналу связи (отсутствовали изображение и звук).

Установив, что средства связи суда воспроизводят видео и аудиосигнал надлежащим образом, технические неполадки отсутствуют, третьему лицу обеспечена возможность дистанционного участия в процессе, которая не в полной мере реализована им по причинам, находящимся в области его контроля, суд не усмотрел предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ оснований для отложения судебного заседания и пришел к выводу о необходимости проведения судебного заседания при текущей явке.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, установил следующее.

Как следует из материалов дела, между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда на производство строительных работ от 03.05.2017 № 0305-08, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить строительные работы, определенные в подписанных сторонами заказ-нарядах на свой риск и своими силами, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 3.2 договора при оплате выполненных работ заказчик удерживает отложенный платеж в размере 5% от указанной в соответствующем акте формы КС-2 стоимости выполненных работ в целях обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков в работах в течение гарантийного срока. Заказчиком производится выплата отложенного платежа по истечении одного года от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Размер гарантийного удержания составил 9 609 924,87 руб.

1.Заказ-наряд № 1 от 15.05.2017 (общая сумма по выполненным работам составляет                15 678 898,20 руб.)

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

1.1.                акт по форме КС-3 от 31.05.2017 № 1, акт по форме КС-2 от 31.05.2017 № 1 на сумму 1 177 451, 20 руб.;

1.2.                акт по форме КС-3 от 30.06.2017 № 2, акт по форме КС-2 от 30.06.2017 № 2 на сумму 8 305 763,94 руб.;

1.3.                счет-фактура от 10.08.2017 № 108, акт по форме КС-3 от 31.08.2017 № 3, акт по форме КС-2 от 31.08.2017 № 3, на сумму 2 772 756,92 руб.;

1.4.                счет-фактура от 31.08.2017 № 117 акт по форме КС-3 от 31.08.2017 № 4, акт по форме КС-2 от 31.08.2017 № 4 на сумму 391 074,28 руб.;

1.5.                счет-фактура от 28.02.2018 № 29 на сумму 452 948,90 руб.;

1.6.                счет-фактура от 31.03.2018 № 50 на сумму 964 026,96 руб.;

1.7.                счет-фактура от 31.05.2018 № 74, акт по форме КС-3 от 31.05.2018 № 8, акт по форме КС-2 от 31.05.2018 № 8 на сумму 127 868,34 руб.;

1.8.                счет-фактура от 30.06.2018 № 86 на сумму 357 313,44 руб.;

1.9.                счет-фактура от 31.07.2018 № 101, акт по форме КС-3 от 31.07.2018 № 10, акт по форме КС-2 от 31.07.2018 № 10 на сумму 43 913,70 руб.;

1.10.            счет-фактура от 31.10.2018 № 149, акт по форме КС-3 от 31.10.2018 № 11, акт по форме КС-2 от 31.10.2018 № 11 на сумму 92 082,48 руб.;

1.11.            счет-фактура от 28.02.2019 № 17 на сумму 853 796, 40 руб.;

1.12.            счет-фактура от 30.04.2019 № 47, акт по форме КС-3 от 30.04.2019 № 12, акт по форме КС-2 от 30.04.2019 № 12 на сумму 853 796,40 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 1 от 15.05.2017

                Таблица № 1

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказ-наряду № 1

15 678 898,20

2

Отложенный платеж - 5 %

783 944,91

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 1 от 15.05.2017

783  994,91

2.Заказ-наряд № 2 от 20.05.2017 (общая сумма по выполненным работам составляет 8 146 825,02 руб.)

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

2.1.                акт по форме КС-3 от 31.05.2017 № 1, акт по форме КС-2 от 31.05.2017 № 1 на сумму 2 556 862,94 руб.;

2.2.                акт по форме КС-3 от 30.06.2017 № 2, акт по форме КС-2 от 30.06.2017 № 2 на сумму 4 877 653,90 руб.;

2.3.                счет-фактура  от 10.08.2017 № 110, акт по форме КС-3 от 10.08.2017 № 3, акт по форме КС-2 от 31.08.2017 № 3 на сумму 179 888,64 руб.;

2.4.                счет-фактура  от 31.08.2017 № 118, акт по форме КС-3 от 31.08.2017 № 4, акт по форме КС-2 от 31.08.2017 № 4 на сумму 525 063,42 руб.;

2.5.                счет-фактура от 31.12.2018 № 178, акт по форме КС-3 от 31.12.2018 № 5 акт по форме КС-2 от 31.12.2018 № 5 на сумму 7 356,12 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 2 от 20.05.2017

                Таблица № 2

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 2

8 146 825,02

2

Отложенный платеж - 5 %

407 341,26

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 2 от 20.05.2017

407 341,26

3.                      Заказ-наряд № 3 от 01.06.2017 (общая сумма по выполненным работам составляет 5 724 121,18 руб.)

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

3.1.                акт по форме КС-3 от 30.06.2017 № 1, акт по форме КС-2 от 30.06.2017 № 1 на сумму 1 961 891,60 руб.;

3.2.                счет-фактура  от 10.08.2017 № 111, акт по форме КС-3 от 10.08.2017 № 2, акт по форме КС-2 от 10.08.2017 № 2 на сумму 369 950,06 руб.;

3.3.                счет-фактура  от 31.08.2018 № 106, акт по форме КС-3 от 31.08.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 31.08.2018 № 3 на сумму 904 608,06 руб.;

3.4.                счет-фактура  от 30.09.2018 № 132, акт по форме КС-3 от 30.09.2018 № 4, акт по форме КС-2 от 30.09.2018 № 4 на сумму 617 055,04 руб.;

3.5.                счет-фактура от 31.10.2018 № 148, акт по форме КС-3 от 31.10.2018 № 5, акт по форме КС-2 от 31.10.2018 № 5 на сумму 881 418,70 руб.;

3.6.                счет-фактура от 30.11.2018 № 167, акт по форме КС-3 от 30.11.2018 № 6, акт по форме КС-2 от 30.11.2018 № 6 на сумму 275 664,52 руб.;

3.7.                счет-фактура от 31.01.2019 № 6, акт по форме КС-3 от 31.01.2019 № 7, акт по форме КС-2 от 31.01.2019 № 7 на сумму 713 533,20 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 3 от 01.06.2017

                Таблица № 3

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 3

5 724 121,18

2

Отложенный платеж - 5 %

286 206,06

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 3 от 01.06.2017

286 206,06

4.                      Заказ-наряд № 4 от 30.06.2017 (общая сумма по выполненным работам составляет 3 251 735,44 руб.).

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

4.1.                счет-фактура от 10.01.2018 № 1, акт по форме КС-3 от 10.01.2018 № 1, акт по форме КС-2 от 10.01.2018 № 1 на сумму 1 437 533,82 руб.;

4.2.                счет-фактура  от 31.05.2018 № 78, акт по форме КС-3 от 31.05.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 31.05.2018 № 3 на сумму 966 184 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 4 от 30.06.2017

                Таблица № 4

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 4

3 251 735,44

2

Отложенный платеж - 5 %

162 586,78

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 4 от 30.06.2017

162 586,78

5.                      Заказ-наряд № 5 от 30.06.2017 (общая сумма по выполненным работам составляет 6 121 750,32 руб.).

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

5.1.                счет-фактура от 28.02.2018 № 26, акт по форме КС-3 от 28.02.2018 № 1, акт по форме КС-2 от 28.02.2018 № 1 на сумму 6 121 750,32 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 5 от 30.06.2017

                Таблица № 5

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 5

6 121 750,32

2

Отложенный платеж - 5 %

306 087,52

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 5 от 30.06.2017

306 087,52

6.                      Заказ-наряд № 6 от 04.08.2017 (общая сумма по выполненным работам составляет 8 558 332,32 руб.).

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

6.1.                счет-фактура от 28.02.2018 № 27 на сумму 4 510 479,20 руб.;

6.2.                счет-фактура  от 31.03.2018 № 49, акт по форме КС-3 от 31.08.2019 № 2, акт по форме КС-2 от 31.03.2018 № 2 на сумму 2 704 134,02 руб.;

6.3.                счет-фактура  от 31.05.2018 № 76, акт по форме КС-3 от 31.05.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 31.05.2018 № 3 на сумму 782 653,88 руб.;

6.4.                счет-фактура  от 30.06.2018 № 87 на сумму 464 902,30 руб.;

6.5.                счет-фактура от 31.07.2018 № 102, акт по форме КС-3 от 31.07.2018 № 5, акт по форме КС-2 от 31.07.2018 № 5 на сумму 48 900,38 руб.;

6.6.                счет-фактура от 30.09.2018 № 128, акт по форме КС-3 от 30.09.2018 № 6, акт по форме КС-2 от 30.09.2018 № 6 на сумму 47 262,54 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 6 от 04.08.2017

                Таблица № 6

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 6

8 558 332,32

2

Отложенный платеж - 5 %

427 916,62

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 6 от 04.08.2017

427 916,62

7.                      Заказ-наряд № 7 от 10.01.2018 (общая сумма по выполненным работам составляет 59 562 642,46 руб.).

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

7.1.                счет-фактура от 28.02.2018 № 28 на сумму 3 635 137,50 руб.;

7.2.                счет-фактура  от 31.03.2018 № 48, акт по форме КС-3 от 31.03.2019 № 2, акт по форме КС-2 от 31.03.2019 № 2 на сумму 3 961 913,72 руб.;

7.3.                счет-фактура  от 30.04.2018 № 64, акт по форме КС-3 от 30.04.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 30.04.2018 № 3 на сумму 9 595 833,16 руб.;

7.4.                счет-фактура  от 31.05.2018 № 75, акт по форме КС-3 от 31.05.2018 № 4, акт по форме КС-2 от 31.05.2018 № 4 на сумму 10 077 832,48 руб.;

7.5.                счет-фактура от 30.06.2018 № 89, акт по форме КС-3 от 30.06.2018 № 5, акт по форме КС-2 от 30.06.2018 № 5 на сумму 8 048 969,98 руб.;

7.6.                счет-фактура  от 31.07.2018 № 105, акт по форме КС-3 от 31.07.2018 № 6, акт по форме КС-2 от 31.07.2018 № 6 на сумму 5 331 308,44 руб.;

7.7.                счет-фактура  от 31.08.2018 № 120, акт по форме КС-3 от 31.08.2018 № 7, акт по форме КС-2 от 31.08.2018 № 7 на сумму 2 779 395,60 руб.;

7.8.                счет-фактура  от 30.09.2018 № 130, акт по форме КС-3 от 30.09.2018 № 8, акт по форме КС-2 от 30.09.2018 № 8 на сумму 4 272 243,10 руб.;

7.9.                счет-фактура от 31.10.2018 № 147, акт по форме КС-3 от 31.11.2018 № 9, акт по форме КС-2 от 31.10.2018 № 7 на сумму 843 851,04 руб.;

7.10.            счет-фактура  от 30.11.2018 № 169, акт по форме КС-3 от 30.11.2018 № 10, акт по форме КС-2 от 30.11.2018 № 10 на сумму 926 829,82 руб.;

7.11.            счет-фактура  от 31.01.2019 № 5, акт по форме КС-3 от 31.01.2019 № 5, акт по форме КС-2 от 31.01.2019 № 5 на сумму 4 715 140, 80 руб.;

7.12.            счет-фактура от 28.02.2019 № 2019 № 16, акт по форме КС-3 от 28.02.2019 № 12, акт по форме КС-2 от 28.02.2019 № 12 на сумму 631 551, 60 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 7 от 10.01.2018

                Таблица № 7

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 7

59 562 642,46

2

Отложенный платеж - 5 %

2 978 132,11

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 7 от 10.01.2018

2 978 132,11

8.                      Заказ-наряд № 8 от 10.05.2018 (общая сумма по выполненным работам составляет 10 779 684,64 руб.).

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

8.1.                счет-фактура  от 31.05.2018 № 77, акт по форме КС-3 от 31.05.2018 № 1, акт по форме КС-2 от 31.05.2018 № 1 на сумму 885 049,56 руб.;

8.2.                счет-фактура  от 30.06.2018 № 88, акт по форме КС-3 от 30.06.2018 № 2, акт по форме КС-2 от 30.06.2018 № 2 на сумму 1 276 577,10 руб.;

8.3.                счет-фактура  от 31.07.2018 № 103, акт по форме КС-3 от 31.07.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 31.08.2018 № 3 на сумму 2 821 453,16 руб.;

8.4.                счет-фактура  от 31.08.2018 № 121, акт по форме КС-3 от 31.08.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 31.08.2018 № 3 на сумму 1 567 580,44 руб.;

8.5.                счет-фактура  от 30.09.2018 № 131, акт по форме КС-3 от 30.09.2018 № 5, акт по форме КС-2 от 30.09.2018 № 5 на сумму 2 809 875 руб.;

8.6.                счет-фактура  от 31.10.2018 № 146, акт по форме КС-3 от 31.10.2018 № 6, акт по форме КС-2 от 31.10.2018 № 6 на сумму 892 259,36 руб.;

8.7.                счет-фактура  от 30.11.2018 № 168, акт по форме КС-3 от 31.11.2018 № 7, акт по форме КС-2 от 30.11.2018 № 3 на сумму 204 186,02 руб.;

8.8.                счет-фактура  от 30.01.2019 № 4, акт по форме КС-3 от 31.01.2019 № 8, акт по форме КС-2 от 31.01.2019 № 8 на сумму 91 848 руб.;

8.9.                счет-фактура  от 30.11.2019 № 143, акт по форме КС-3 от 30.11.2019 № 9, акт по форме КС-2 от 30.11.2019 № 9 на сумму 230 856 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 8 от 10.05.2018

                Таблица № 8

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 8

10 779 684,64

2

Отложенный платеж - 5 %

538 984,24

Переуступка

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 8 от 10.05.2018

538 984,24

9.                      Заказ-Наряд 9 от 09.07.2018 (общая сумма по выполненным работам составляет 140 726 447,62 руб.).

Выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

9.1.                счет-фактура  от 31.07.2018 № 108, акт по форме КС-3 от 31.07.2018 № 1, акт по форме КС-2 от 31.07.2018 № 1 на сумму 4 663 413,10 руб.;

9.2.                счет-фактура  от 31.08.2018 № 122, акт по форме КС-3 от 31.08.2018 № 2, акт по форме КС-2 от 31.08.2018 № 2 на сумму 379 971,80 руб.;

9.3.                счет-фактура  от 30.09.2018 № 127, акт по форме КС-3 от 30.09.2018 № 3, акт по форме КС-2 от 30.09.2018 № 3 на сумму 1 354 157,38 руб.;

9.4.                счет-фактура  от 31.12.2018 № 179, акт по форме КС-3 от 31.12.2018 № 4, акт по форме КС-2 от 31.12.2018 № 4 на сумму 4 612 092,54 руб.;

9.5.                счет-фактура  от 31.01.2019 № 8, акт по форме КС-3 от 31.01.2019 № 5, акт по форме КС-2 от 31.01.2019 № 5 на сумму 4 680 723,60 руб.;

9.6.                счет-фактура от 30.04.2019 № 48 на сумму 6 547 498,20 руб.;

9.7.                счет-фактура  от 31.05.2019 № 53 на сумму 3 881 290,80 руб.;

9.8.                счет-фактура  от 30.06.2019 № 57, акт по форме КС-3 от 30.06.2019 № 10, акт по форме КС-2 от 30.06.2019 № 10 на сумму 11 423 805,60 руб.;

9.9.                счет-фактура от 30.09.2019 № 110, акт по форме КС-3 от 30.09.2019 № 13, акт по форме КС-2 от 30.09.2019 № 13 на сумму 9 115 234,80 руб.;

9.10.            счет-фактура от 31.10.2019 № 128, акт по форме КС-3 от 31.10.2019 № 14, акт по форме КС-2 от 31.10.2019 № 14 на сумму 8 684 368,80 руб.;

9.11.            счет-фактура от 15.11.2019 № 142, акт по форме КС-3 от 15.11.2019 № 15, акт по форме КС-2 от 30.11.2019 № 15 на сумму 8 757 082,80 руб.;

9.12.            счет-фактура  от 30.11.2019 № 144, акт по форме КС-3 от 30.11.2019 № 16, акт по форме КС-2 от 30.11.2019 № 16 на сумму 9 627 706,80 руб.;

9.13.            счет-фактура  от 31.07.2019 № 82, акт по форме КС-3 от 31.07.2019 № 11, акт по форме КС-2 от 31.07.2019 № 11 на сумму 2 076 561,60 руб.;

9.14.            акт по форме КС-3 от 31.12.2019 № 17, акт по форме КС-2 от 31.12.2019 № 17 на сумму 7 668 822 руб.;

9.15.            счет-фактура от 29.02.2020 № 13, акт по форме КС-3 от 29.02.2020 № 18, акт по форме КС-2 от 29.02.2020 № 18 на сумму 2 561 814 руб.;

9.16.            акт по форме КС-3 от 31.03.2020 № 19, акт по форме КС-2 от 31.03.2020 № 19 на сумму 3 702 571,20 руб.;

9.17.            счет-фактура от 30.06.2020 № 60, акт по форме КС-3 от 30.06.2020 № 20, акт по форме КС-2 от 30.06.2020 № 20 на сумму 857 745,60 руб.;

9.18.            счет-фактура от 15.07.2020 № 66, акт по форме КС-3 от 15.07.2020 № 21, акт по форме КС-2 от 15.07.2020 № 21 на сумму 2 404 204,80 руб.;

9.19.            счет-фактура от 24.07.2020 № 69, акт по форме КС-3 от 24.07.2020 № 22, акт по форме КС-2 от 24.07.2020 № 22 на сумму 500 296,80 руб.;

9.20.            счет-фактура от 31.07.2020 № 70, акт по форме КС-3 от 31.07.2020 № 23, акт по форме КС-2 от 31.07.2020 № 23 на сумму 661 834,80 руб.;

9.21.            счет-фактура от 10.08.2020 № 76, акт по форме КС-3 от 10.08.2020 № 24, акт по форме КС-2 от 10.08.2020 № 24 на сумму 1 987 873,20 руб.;

9.22.            счет-фактура от 20.08.2020 № 74, акт по форме КС-3 от 20.08.2020 № 25, акт по форме КС-2 от 20.08.2020 № 25 на сумму 1 639 170 руб.;

9.23.            счет-фактура  от 31.08.2020 № 84, акт по форме КС-3 от 31.08.2020 № 26, акт по форме КС-2 от 31.08.2020 № 26 на сумму 1 321 104 руб.;

9.24.            счет-фактура от 31.08.2020 № 89, акт по форме КС-3 от 31.08.2020 № 27, акт по форме КС-2 от 31.08.2020 № 28 на сумму 2 642 031,60 руб.;

9.25.            акт по форме КС-3 от 05.09.2020 № 28, акт по форме КС-2 от 05.09.2020 № 28 на сумму 2 493 754,80 руб.;

9.26.            счет-фактура от 12.09.2020 № 94, акт по форме КС-3 от 12.09.2020 № форме КС-2 от 12.09.2020 № 29 на сумму 2 372 848,80 руб.;

9.27.            счет-фактура от 18.09.2020 № 95, акт по форме КС-3 от 18.09.2020 № форме КС-2 от 18.09.2020 № 30 на сумму 3 111 510 руб.;

9.28.            счет-фактура  от 25.09.2020 № 98, акт по форме КС-3 от 25.09.2020 № форме КС-2 от 25.09.2020 № 31 на сумму 4 605 675,60 руб.;

9.29.            счет-фактура  от 30.09.2020 № 103, акт по форме КС-3 от 30.09.2020 по форме КС-2 от 30.09.2020 № 32 на сумму 2 580 223,20 руб.;

9.30.            счет-фактура от 07.10.2020 № 106, акт по форме КС-3 от 07.10.2020 по форме КС-2 от 07.10.2020 № 33 на сумму 1 930 914 руб.;

9.31.            счет-фактура  от 29.10.2020 № 117, акт по форме КС-3 от 29.10.2020 по форме КС-2 от 29.10.2020 № 34 на сумму 1 953 504 руб.;

9.32.            счет-фактура  от 06.11.2020 № 121, акт по форме КС-3 от 06.11.2020 по форме КС-2 от 06.11.2020 № 35 на сумму 1 999 470 руб.;

9.33.            акт по форме КС-3 от 13.11.2020 № 36, акт по форме КС-2 от 13.11.2020 № 36 на сумму 1 997 986,80 руб.;

9.34.            акт по форме КС-3 от 20.11.2020 № 37, акт по форме КС-2 от 20.11.2020 № 37 на сумму 1 298 952 руб.;

9.35.            счет-фактура  от 05.12.2020 № 136, акт по форме КС-3 от 05.12.2020 № 38, акт по форме КС-2 от 05.12.2020 № 38 на сумму 347 851,20 руб.;

9.36.            счет-фактура  от 31.01.2021 № 8, акт по форме КС-3 от 31.01.2021 № 39, акт по форме КС-2 от 31.01.2021 № 39 на сумму 578 244 руб.;

9.37.            счет-фактура от 28.02.2021 № 13, акт по форме КС-3 от 28.02.2021 № 40, акт по форме КС-2 от 28.02.2021 № 40 на сумму 353 281,20 руб.;

9.38.            счет-фактура от 30.04.2021 № 43, акт по форме КС-3 от 30.04.2021 № 41, акт по форме КС-2 от 30.04.2021 № 41 на сумму 1 689 990 руб.;

9.39.            счет-фактура от 31.05.2021 № 52, акт по форме КС-3 от 31.05.2021 № 42, акт по форме КС-2 от 31.05.2021 № 42 на сумму 228 308,40 руб.;

9.40.            счет-фактура от 30.06.2021 № 71, акт по форме КС-3 от 30.06.2021 № 43, акт по форме КС-2 от 30.06.2021 № 43 на сумму 1 122 043,20 руб.;

9.41.            счет-фактура  от 31.08.2021 № 79, акт по форме КС-3 от 31.08.2021 № 44, акт по форме КС-2 от 31.08.2021 № 44 на сумму 1510 944,40 руб.;

9.42счет-фактура от 30.09.2021 № 87, акт по форме КС-3 от 30.09.2021 № 45, акт по форме КС-2 от 30.09.2021 № 45 на сумму 526 944 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 9 от 09.07.2018

                Таблица № 9

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 9

140 726 447,62

2

Отложенный платеж - 5 %

7 036 322,40

3

Выплачена сумма отложенного платежа

582 526,45

4

Переуступка

3 433 675,44

4.1

ООО «Стройтек»

3 433 675,44

4.2

ООО «Марийская Нефтянная компания»

0

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 9 от 09.07.2018

3 020 120,51

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.09.2020 по делу № А75-23174/2019 в реестр требований кредиторов ОАО «ИНГА» включена задолженность перед ООО «СЭСК» в размере 18 741 754 рубля 42 копейки, в том числе 18 589 680 рублей 48 копеек сумма основного долга и 152 073 рубля 94 копейки проценты на сумму долга с учетом положений статьи 137 Закона о банкротстве.

Сумма задолженности, включенная в реестр в размере 18 589 680, 48 (18 741 754, 42 - 152 073) рублей, частично в размере 14 728 861, 35 рубль по договору переуступки права требования от 15.07.2021 № 15-21 передана ООО «Стройтек».

Таблица № 10

№

зака

з-

наря

да

Дата №

первичного

документа

Сумма выполненн ых работ всего

Сумма

отложенн

ого

платежа

всего

10.           - остаток задолженности включенный в реестр по выполненным работам с учетом отложенного платежа;

11.           — сумма по выполненным работам без учета отложенного платежа

Передано

по

договорам уступки по выполненн ым работам

Передано

по

договорам уступки по отложенном у платежу

Итого

сумма

переданная

по

договорам

уступки

Остаток по отложенному платежу ООО «СЭСК»

(0 /остаток выплачен ОАО ИНГА )

Договор от 30.04.2021 № 10-21

9

акт по форме КС-2 от 30.09.2019 № 13

455 761,74

455 761,74

455 761,74

0

9

акт по форме КС-2 от 31.10.2019 № 14

434 218,44

434 218,44

434 218,44

0

9

акт по форме КС-2 от 15.11.2019 № 15

437 854,14

388 498,50

388 498,50

49 355,64

9

акт по форме КС-2 от 31.12.2019 № 17

383 441,1

319 387,08

319 387,08

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 29.02.2020 № 18

128 090,7

106 700,10

106 700,10

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 31.03.2020 № 13

185 128,56

154 232,28

154 232,28

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 30.06.2020 № 20

42 887,28

35 725,08

35 725,08

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 15.07.2020 № 21

120 210,24

100 135,02

100 135,02

остаток

выплачен ОАО

ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 24.07.2020 № 22

25 014,84

20 838,06

20 838,06

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 31.07.2020 № 23

33 091,74

27 565,32

27 565,32

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 10.08.2020 № 24

99 393,66

82 794,96

82 794,96

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 25.08.2020 № 26

66 055,20

66 055,20

66 055,20

0

9

акт по форме КС-2 от 31.08.2020 № 27

132 101,58

132 101,58

132 101,58

0

9

акт по форме КС-2 от 05.09.2020 № 28

124 687,74

103 862,28

103 862,28

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 12.09.2020 № 29

118 642,44

98 737,62

98 737,62

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 18.09.2020 № 30

155 575,50

129 542,70

129 542,70

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 25.09.2020 № 31

230 283,78

191 777,46

191 777,46

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 30.09.2020 № 32

129 011,16

107 468,52

107 468,52

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 07.10.2020 № 33

96 545,70

80 881,26

80 881,26

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 29.10.2020 № 34

52 902,72

44 044,62

44 044,62

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 06.11.2020 № 35

99 973,50

83 287,98

83 287,98

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 13.11.2020 № 36

99 899,34

99 899,34

99 899,34

0

9

акт по форме КС-2 от 20.11.2020 № 37

64 947,60

54 084,12

54 084,12

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 05.12.2020 № 38

17 392,56

14 493,96

14 493,96

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 31.01.2020 № 39

28 912,20

24 083,46

24 083,46

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 28.02.2021 № 40

17 664,06

17 664,06

17 664,06

0

9

акт по форме КС-2 от 30.04.2021 № 41

84 499,5

59 834,70

59 834,70

остаток

выплачен ОАО ИНГА

ИТОГО:

3 433 675,44

3 433 675,44

0

Договор от 29.06.2021

9

акт по форме КС-2 от 30.04.2021 № 41

1 689 990

84 499,5

2 - 1 605 490,5

1 605 490,5

0

1 605 490,5

остаток

выплачен ОАО ИНГА

14

акт по форме КС-2 от 31.05.2021 № 3

355 291,2

17 764,56

2 - 337 526,64

337 526,64

0

337 526,64

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 31.05.2021 № 42

228 308,4

11 415,42

2 - 216 892,98

216 892,98

0

216 892,98

остаток

выплачен ОАО ИНГА

ИТОГО:

2 159 910,12

Договор от 06.09.2021 № 26-21

9

акт по форме КС-2 от 31.08.2021 № 44

510 944,4

25 547,22

2 - 485 397,18

485 397,18

0

485 397,18

остаток

выплачен ОАО ИНГА

ИТОГО:

485 397,18

Договор от 06.10.2021 № 38-21

14

акт по форме КС-2 от 30.09.2021 № 5

297 540

14 877

2 - 282 663

282 663

0

282 663

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 30.09.2021 № 45

526 944

26 347,2

2 - 500 596,8

500 596,8

0

500 596,8

остаток

выплачен ОАО ИНГА

ИТОГО:

783 259,80

Договор от 02.08.2021 № 18-21

14

акт по форме КС-2 от 30.06.2021 № 4

124 704

6 235,2

2 - 118 468,8

118 468,8

0

118 468,8

остаток

выплачен ОАО ИНГА

9

акт по форме КС-2 от 30.06.2021 № 43

1 122 043,2

56 102,16

2 - 1 065 941,04

1 065 941,04

0

1 065 941,04

остаток

выплачен ОАО ИНГА

ИТОГО:

1 184 409, 84

Договор от 15.07.2021 № 15-21

9

акт по форме КС-2 от 30.09.2019 № 13

9 115 234,8

455 761,74

1 - 6 380 664,36

2 514 845,23

0

2 514 845,23

3 865 819,13

9

акт по форме КС-2

8 684 368,8

434 218,44

1 - 6 079 058,16

6 079 058,16

0

6 079 058,16

0

от 31.10.2019 № 14

9

акт по форме КС-2 от 15.11.2019 № 15

8 757 082,8

437 854,14

1 - 6 129 957,96

6 129 957,96

0

6 129 957,96

0

ИТОГО:

14 723 861

В размере 3 865 819, 13 рублей Общество переуступило задолженность ООО «Марийская Нефтянная компания».

                Таблица № 11

№

зака

з-

наря

да

Дата №

первичного

документа

Сумма выполненн ых работ всего

Сумма

отложенн

ого

платежа

всего

12.           - остаток задолженности включенный в реестр по выполненным работам с учетом отложенного платежа;

13.           — сумма по выполненным работам без учета отложенного платежа

Передано

по

договорам уступки по выполненн ым работам

Передано

по

договорам уступки по отложенном у платежу

Итого

сумма

переданная

по

договорам

уступки

Остаток по отложенному платежу ООО «СЭСК»

(0 /остаток выплачен ОАО ИНГА )

Договор от 30.04.2021 № 10-21

9

акт по форме КС-2 от 30.09.2019 № 13

9 115 234,8

455 761,74

1 - 6 380 664,36

3 865 819,13

0

3 865 819,13

0

ИТОГО:

3          865 819,13

10.                  Заказ-Наряд 10 от 10.09.2018 (общая сумма по выполненным работам составляет 3 943 600,94 руб.).

выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

10.1.            счет-фактура  от 30.09.2018 № 133, акт по форме КС-3 от 30.09.2018 № 1, акт по форме КС-2 от 30.09.2018 № 1 на сумму 3 860 903,36 руб.;

10.2.            счет-фактура  от 31.10.2018 № 151, акт по форме КС-3 от 31.10.2018 № 2, акт по форме КС-2 от 31.10.2018 № 2 на сумму 59 213,58 руб.;

10.3.            акт по форме КС-3 от 31.07.2019 № 3, акт по форме КС-2 от 31.07.2019 № 3 на сумму 23 484 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 10 от 10.09.2018

                Таблица № 12

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 9

3 943 600,94

2

Отложенный платеж - 5 %

197 180,05

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 10 от 10.09.2018

197 180,05

11.                  Заказ-Наряд 11 (к.41) от 10.09.2018 (общая сумма по выполненным работам составляет 5 981 225,72 руб.).

Выполнение работ по указанному заказ-наряду подтверждается первичными документами:

11.1.            счет-фактура от 31.10.2018 № 150, акт по форме КС-3 от 31.10.2018 № 1, акт по форме КС-2 от 31.10.2018 № 1 на сумму 4 558 987,82 руб.;

11.2.            счет-фактура от 30.11.2018 № 163, акт по форме КС-3 от 30.11.2018 № 2, акт по форме КС-2 от 30.11.2018 № 163 на сумму 1 365 289,50 руб.

11.3.            счет-фактура  от 31.01.2019 № 7, акт по форме КС-3 от 31.01.2019 № 3, акт по форме КС-2 от 31.01.2019 № 3 на сумму 56 948,40 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 11 от 10.09.2018

                Таблица № 13

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 9

5 981 225,72

2

Отложенный платеж - 5 %

299 061,29

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 11 от 10.09.2018

299 061,29

12.                  Заказ-Наряд 12 (перенос ВЛ) от 28.10.2018 (общая сумма по выполненным работам составляет 5 981 225,72 руб.).

Выполнение работ по указанному заказ-наряду подтверждается первичными документами:

12.1.            акт по форме КС-3 от 31.03.2019 № 1, акт по форме КС-2 от 31.03.2019 № 1 на сумму 4 047 267,60 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 12 от 28.10.2018

                Таблица № 14

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 9

4 047 26,60

2

Отложенный платеж - 5 %

202 363,38

Итого задолженность по отложенному платежу по заказу- наряду № 12 от 28.10.2018

202 363,38

13.                  Заказ-Наряд 13 от 06.03.2019 (общая сумма по выполненным работам составляет 336 831,60 руб.).

выполнение работ по указанному заказу-наряду подтверждается первичными документами:

13.1.            счет-фактура от 30.04.2019 № 46, акт по форме КС-3 от 30.04.2019 № 8, акт по форме КС-2 от 30.04.2019 № 8 на сумму 336 831,60 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 13 от 06.03.2019

                Таблица № 14

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 9

336 831,60

2

Отложенный платеж - 5 %

16 841,58

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 13 от 06.03.2019

16 841,58

14.                  Заказ-Наряд 14 от 30.09.2020 (общая сумма по выполненным работам составляет 2 915 409,60 руб.).

Выполнение работ по указанному заказ-наряду подтверждается первичными документами:

14.1.            счет-фактура  от 13.11.2020 № 127, акт по форме КС-3 от 13.11.2020 № 1, акт по форме КС-2 от 13.11.2020 № 1 на сумму 1 459 747,20 руб.;

14.2.            счет-фактура  от 28.02.2021 № 14, акт по форме КС-3 от 28.02.2021 № 2, акт по форме КС-2 от 28.02.2021 № 2 на сумму 678 127,20 руб.;

14.3.            счет-фактура  от 31.05.2021 № 51, акт по форме КС-3 от 31.05.2021 № 3, акт по форме КС-2 от 31.05.2021 № 3 на сумму 355 291,20 руб.;

14.4.            счет-фактура  от 30.06.2021 № 70, акт по форме КС-3 от 30.06.2021 № 4, акт по форме КС-2 от 30.06.2021 № 4 на сумму 124 704 руб.;

14.5.            счет-фактура  от 30.09.2021 № 88, акт по форме КС-3 от 30.09.2021 № 5, акт по форме КС-2 от 30.09.2021 № 5 на сумму 297 540 руб.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-наряду № 14 от 30.09.2020

                Таблица № 14

№ п/п

Товары (работы услуги)

Сумма

1

Выполненные работы по заказу-наряду № 9

2 915 409,60

2

Отложенный платеж - 5 %

145 770,48

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ- наряду № 14 от 30.09.2020

145 770,48

Отложенный платеж по заказу-наряду № 14 от 30.09.2020 оплачен в полном объеме.

Расчет задолженности по отложенному платежу по заказу-нарядам 1-14

                Таблица № 15

Заказ-наряд

Сумма

Итого задолженность по отложенному

783 944,91

платежу по заказ-наряду № 1 от 15.05.2017

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-

наряду № 2 от 20.05.2017

407 341,26

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 3 от 01.06.2017

286 206,06

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 4 от 30.06.2017

162 586,78

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 5 от 30.06.2017

306 087,52

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 6 от 04.08.2017

427 916,62

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 7 от 10.01.2018

2 978 132,11

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 8 от 10.05.2018

538 984,24

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 9 от 09.07.2018

3 020 120,51

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 10 от 10.09.2018

197 180,05

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 11 от 10.09.2018

299 061,29

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 12 от 28.10.2018

202 363,38

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 13 от 06.03.2019

16 841,58

Итого задолженность по отложенному платежу по заказ-наряду № 14 от 30.09.2020

0

ИТОГО:

9 609 924,87

Ссылаясь на то, что акт КС-11 подписан 01.10.2021, следовательно, предусмотренный договором гарантийный период истек, а в добровольном порядке сумма не уплачена, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, в том числе условия договора, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные сторонами в двустороннем порядке без возражений, установив наличие потребительской ценности работ для ответчика, суд пришел к выводу о доказанности факта выполнения работ по договору истцом и принятия их ответчиком в полном объеме, исходя из того, что основания для выплаты гарантийного удержания наступили), пришел к выводу о возврате гарантийного платежа в сумме 9 609 924,87 руб.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик ссылается на уступку гарантийного обязательства. Между тем, уступленные требования учтены истцом при расчете.

Также ответчик указывает на то, что 13.12.2019 Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по заявлению ПАО Национальный банк «Траст» вынесено определение о возбуждении производства по делу о признании АО «ИНГА» несостоятельным (банкротом).

10.02.2020 в рамках дела №А75-23174/2019 в отношении АО «ИНГА» введена процедура наблюдения.

Требования истца об оплате сумм отложенных платежей основаны на следующих заказах-нарядах: № 1 от 15.05.2017, № 2 от 20.05.2017, № 3 от 01.06.2017, № 4 от 30.06.2017, № 5 от 30.06.2017, № 6 от 04.08.2017, № 7 от 10.01.2018, № 8 от 10.05.2018, № 9 от 09.07.2018, № 10 от 10.09.2018, № 11 от 10.09.2018, № 12 от 28.10.2018, № 13 от 06.03.2019.

Вместе с тем, на момент введения в отношении АО «ИНГА» процедуры наблюдения, обязательство по оплате отложенных гарантийных платежей в рамках подписанных между сторонами актов КС-2 и КС-3 по отдельным этапам работ согласно заказов-нарядов АО «ИНГА» №1,2,3,4,5,6,7,8,9 (частично по работам, выполненным и принятым по актам КС-2, КС-3 до 10.02.2020), 10,11,12,13 наступило 10.02.2020.

По мнению ответчика, требование об оплате отложенных гарантийных платежей существовало с момента подписания сторонами актов КС-2 и КС-3 вне зависимости от наступления срока их исполнения; на момент введения процедуры наблюдения в отношении АО «ИНГА», в соответствии с п. 3 ст. 63 Закона о банкротстве срок исполнения обязательств об оплате отложенных гарантийных платежей наступил 10.02.2020; заявленные требования относились к реестровым требованиям, подлежавшим рассмотрению в деле о банкротстве должника АО «ИНГА»; по завершению конкурсного производства, в отношении АО «ИНГА» наступили последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом, установленные ст. 159 Закона о банкротстве.

Поскольку истец обратился с иском, 11.02.2023, по мнению ответчика, срок исковой давности пропущен.

Между тем, определением суда по делу от 14.07.2023 судом утверждено мировое соглашение, производство по делу № А75-23174/2019 о несостоятельности (банкротстве) АО «ИНГА» прекращено.

С учетом изложенного, нормы Закона о банкротстве применению не подлежат.

В силу статей 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Как указано в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности, начало течения срока исковой давности определяется исходя из того, когда о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого подано такое заявление.

В силу статей 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Как указано в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности, начало течения срока исковой давности определяется исходя из того, когда о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого подано такое заявление.

Из материалов дела следует, что акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 подписан 01.10.2021, следовательно, срок исковой давности в соответствии с пунктом 3.2 договора должен исчисляться 01.10.2022.

В связи с тем, что истец обратился в суд с иском 10.06.2023 (посредством системы «Мой Арбитр»), то требование о взыскании суммы гарантийного удержания заявлено истцом в пределах установленного трехлетного срока исковой давности.

Кроме того, истец просит о взыскании с ответчика 392 953,78 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 04.10.2022 по 20.04.2023, далее проценты по день исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно пункту 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком денежного обязательства подтвержден материалами дела, в связи, с чем истцом правомерно заявлено требование о взыскании процентов при ненадлежащим исполнении обязательства.

Расчет судом проверен, размер процентов рассчитан верным.

В связи, с чем требование о взыскании процентов подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

В связи с удовлетворением исковых требований, в соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины на ответчика, с учетом предоставления отсрочки от уплаты государственной пошлины при подаче иска, с взысканием в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Р Е Ш И Л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Нефтегаз Югра" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" 10 002 878,65 руб., в том числе 9 609 924,87 руб. задолженности, 392 953,78 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с акционерного общества "Нефтегаз Югра" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" проценты за пользование чужими денежными средствами, с начислением на сумму долга в размере 9 609 924,87 руб., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 21.04.2023, по день фактической оплаты суммы долга. Со дня частичного уменьшения суммы основного долга указанные проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению на оставшуюся сумму основного долга.

Взыскать с акционерного общества "Нефтегаз Югра" в доход федерального бюджета 73 014 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья                                                                                                  С.В. Бухарова