28/2017-190702(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-4167/2017

г. Новосибирск

09 ноября 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Ефремова О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), п. Озеро-Карачи  Новосибирской области  

к обществу с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная  строительная организация "Чановская" (ОГРН 

<

***>), р.п. Чаны  Новосибирской области  

об обязании выполнить работы, при участии: от истца: ФИО1 (глава Администрации, паспорт); от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность № 3 от 14.01.2017), 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации Озеро-Карачинского сельсовета  Чановского района Новосибирской области удовлетворить в полном объеме.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью  сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" в соответствии с  

Приложением № 1 «Описание объекта закупки» к муниципальному контракту   № Ф.2016.232598 от 29.08.2016 выполнить следующие работы: установить  стойки из металлической трубы диаметром 76 мм. в количестве 181 штук на  расстоянии 2 метров; обвязать стойки трубами 40х40 мм. для крепления  профилированного листа; смонтировать профилированный лист высотой 2  метра (бирюзового цвета) по всей длине протяженностью 300 метров;  провести антикоррозийную обработку всех металлических конструкций  забора; нанести изображение двух плывущих навстречу друг другу лебедей  белого цвета, в срок до 01.07.2018 года при предоставлении обществу с  ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная  организация "Чановская" Администрацией Озеро-Карачинского сельсовета  Чановского района Новосибирской области по акту готовности строительной  площадки, пригодной для производства работ.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова