АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

 

Дело № А40-277739/23-107-2105

22 апреля 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 17 апреля 2024 года. Полный тест решения изготовлен 22 апреля 2024 года. 

 Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола помощником судьи А.Э. Гогиберидзе, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело № А40-277739/23-107-2105 по иску ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к  ответчику ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 9" (ИНН: 

<

***> ОГРН:  

<

***>) о взыскании суммы задолженности по договору № 27992 от 23.08.2022  в размере 1 009 668,11 р., неустойки по состоянию на 24.11.2023 в размере 53 512,41 р.,  при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 03.10.2023, паспорт,  представителей ответчика: не явился, извещен,  

УСТАНОВИЛ:

ООО "ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" (далее –  истец) обратилось в суд к ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 9" (далее –  ответчик) о взыскании суммы задолженности по договору № 27992 от 23.08.2022 в  размере 1 009 668,11 р., неустойки по состоянию на 24.11.2023 в размере 53 512,41 р.  

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания  извещен надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие  представителя ответчика в порядке ст.ст.123,156 АПК РФ.  

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле  документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца в виду  следующего.  

Как следует из материалов дела, 23 августа 2022 года между Обществом с  ограниченной ответственностью «Геодезическое Сопровождение Строительства»  (далее - Истец) и Общество с ограниченной ответственностью «СУ-9» (далее -  Ответчик) был заключен Договор подряда на выполнение инженерно-геодезических  

работ по сопровождению строительства объекта недвижимости № 27992 от 23.08.2022  г. (далее- Договор) на объектах по адресам: 1. Москва, р-н ФИО2, 3-я Владимирская,  во.23; 2. Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, мкр.Одинцово-1, корп. 1,17  с встр. пристроенным ДОО (приложение № 3).  

По условиям Договора «Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с  условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить работы по инженерно-геодезическому сопровождению  строительства объекта недвижимости (объекта строительства) Заказчика».  

Согласно п. 1.3 Договора и п. 2 Протокола согласования Договорной цены Истец  обязан обеспечить присутствие на объекте строительства заявленного Ответчиком  количества сотрудников Истца в установленные рабочие часы согласно утвержденному  производственному календарю и предоставлять исполнительные схемы,  подготовленные по результатам камеральной обработки информации, которые  передаются Ответчику либо его уполномоченному представителю по Акту сдачи-приемки исполнительной документации при закрытии отчетного периода при условии,  что для выполняемых работ такая документация требуется.  

На основании п.1 Протокола согласовании договорной цены общая стоимость  работ по Договору согласованна Сторонами в следующем размере и на следующих  условиях:  

Стороны установили, что стоимость работ по настоящему договору будет  состоять из сумм фиксированного вознаграждения Подрядчика - постоянной величины,  и меняющейся стоимости за работу сотрудников Подрядчика вне графика работ по  договору, работу в выходные и праздничные дни или в несоответствии с условиями  договора - переменной величины.  

Стоимость одной смены и одного часа работы определяется из расчета:  ежемесячная оплата одного сотрудника-усредненную величину рабочих дней в одном  месяце = стоимость смены + усредненную величину часов в одной смене = стоимость  одного часа. Усредненная величина рабочих дней в одном месяце – 20. Усредненная  величина часов в одной смене – 8.  

Оплата рассчитана за определенный расчетный период в рамках утвержденного  производственного календаря, в расчетный период входит выполнение работ по  инженерно-геодезическому сопровождению строительства объекта недвижимости  согласно графика 5/2, где максимальное количество рабочих часов за смену составляет  8 часов, в рабочее время специалиста исполнителя с 09:00 до 18:00. Также условия  Договора не исключают условия по переработке, рассчитываемых с коэффициентом  К=1,6.  

Согласно п.4 Протокола согласования Договорной цены был установлен  следующий порядок расчетов: Заказчик перечисляет предоплату в размере общей  ежемесячной суммы, указанной в п. 2 протокола в срок не позднее 5 (пяти) рабочих  дней с момента подписания Договора, а также в дальнейшем производит- предоплату в  том же объеме за следующий месяц (расчетный период) указанной в п. 2 протокола не  позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, до дня истечения текущего расчетного периода  (п.4.1 Договора); при переработках и иных установленных настоящим Протоколом и  условиями Договора обстоятельствах расчет производится при окончательном расчете  между сторонами, за установленный расчетный период, дополнительно к пакету  документов указанному в п. 6.1. Договора со стороны Подрядчика прикладывается  пояснительная записка с указанием расчета по всем дополнительным выездам,  коэффициентам и т.д. (п.4.2 Договора); оплата Заказчиком работ Подрядчика  производится на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и  выставленного на имя Заказчика счета. В тоже время при отсутствии надлежаще  оформленного акта выполненных работ по вине Заказчика - акт фиксации  отработанного времени признается приравненным к акту выполненных работ исходя из  

сути его содержания и подтверждения выполнения договорных обязательств  Подрядчика перед Заказчиком (п.4.3 Договора); Стоимость работ, указанная в п.2.  настоящего Протокола, зафиксирована на дату его подписания и не может быть  изменена иначе, как по письменному соглашению сторон, путем направления  Заказчиком Заявки или составления дополнительного соглашения к Договору (п.4.4  Договора).  

Регулярно, по итогам работ за весь период сотрудничества и согласно пп. 4.1.4.  Договора происходило согласование Актов фиксации отработанного времени  Приложение № 2 к Договору, на основании которых составлялись Акты выполненных  работ и Счета на оплату.  

В соответствии с разделом 6 Договора, порядок сдачи-приемки выполненных  работ происходит следующим образом: по результатам выполнения Работ, Подрядчик  ежемесячно до 5(пятого) числа месяца, следующего за отчетным, оформляет и  передает Заказчику копию Акта сверки отработанного времени за указанный период,  акт выполненных работ за указанный период, счет на оплату выполненных работ,  исполнительные схемы на выполненный объем работ за указанный период. Документы  направляются Заказчику с Сопроводительным письмом в количестве: 1 (один)  экземпляр копии акта фиксации отработанного времени, 2 (два) экземпляра акта  выполненных работ, 1 (один) экземпляр счета на оплату выполненных работ, 2 (два)  экземпляра исполнительных схем на выполненный объем работ. Отметка (подпись  сотрудника Заказчика) в приемке Сопроводительного письма подтверждает получение  Заказчиком указанных документов. В случае уклонения Заказчика от получения  указанных выше документов, Подрядчик вправе направить их посредством АО «Почта  России» на юридический адрес письмом с объявленной ценностью и уведомлением о  вручении, в таком случае срок приемки, установленный п.6.2, начинает течь с момента  поступления заказного письма в почтовое отделение Заказчика. Заказчик, получивший  документы, указанные в п.6,1. Договора, обязан рассмотреть их, при отсутствии  обоснованных претензий к качеству Работ принять выполненные Работы и в срок не  позднее 5 (пяти) рабочих дней подписать акт выполненных работ, один экземпляр  которого направить Подрядчику (почтовым отправлением на юридический адрес  Подрядчика либо службой курьерской доставки). В случае, если у Заказчика  имеются претензии или замечания относительно выполненных Работ, то он обязан в  срок, установленный п.6.2. Договора (пять рабочих дней), направить в адрес  Подрядчика письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных  работ с исчерпывающим перечнем замечаний, которые Подрядчик должен устранить  для того чтобы Работы были приняты. В этом случае Стороны составляют в течение 5  (пяти) рабочих дней акт фиксации устранения выявленных недостатков (Приложение   № 4) с указанием сроков их устранения, В случае невыполнения Заказчиком  требований п.6.2. Договора и отсутствия в установленные сроки подписанного акта  выполненных работ, обязательства Подрядчика по Договору считаются выполненными  в полном объеме, Работы подлежащими оплате в полном объеме, а Акты выполненных  работ надлежащим образом оформленными.  

В нарушение п.4 Протокола согласования Договорной цены Приложение № 2 к  Договору Ответчик не произвел своевременное перечисление денежных средства в счет  оплаты выполненных работ, а также предоплату за работы, проводимые в августе 2023  г., в связи с чем Истец 21.08.2023 отправил в адрес Ответчика Уведомление № 278 о  приостановлении работ до момента полного исполнения Ответчиком своих  обязательств перед Истцом согласно п. 3.2.4. Договора (приложение № 11).  

На просьбы Ответчика продолжить работы и обещания произвести оплаты в  ближайшее время, Истец продолжил работы на Объекте, однако не получил от  Ответчика денежные средства в счет оплаты выполненных работ за предыдущие  периоды, а также предоплату за работы, проводимые в октябре 2023 г.  

В результате Истец был вынужден прекратить работы на объекте 23 октября 2023  года и 02 ноября 2023 года направить в адрес Ответчика Уведомление о расторжении и  досудебную претензию о взыскании задолженности по договору подряда от 01 ноября  2023 года (сначала на адрес электронной почты, а позже, в соответствии с п. 10.5.  Договора, почтой России, приложение № 12). На Уведомление о расторжении и  досудебную претензию Ответчик никак не отреагировал, о причине отсутствия оплаты  не сообщил.  

Дополнительно, 13.11.2023г. нарочным Ответчику был направлен комплект  документов по итогам работ за октябрь 2023г. в составе, указанном в описи  сопроводительного письма № 309 от 13.11.2023г., а именно: счет на оплату № 1150 от  01.11.2023г. на сумму 11 600 рублей 00 коп.; акт выполненных работ № 743 от  31.10.2023г. на сумму 341 600 рублей 00 копеек; копия Акта фиксации рабочего  времени (инженер-геодезист от Истца ФИО3) за период с 01.10.2023г. по  31.10.2023г. подписанный со стороны Ответчика.  

Комплект Документов передавался нарочно, сопроводительное письмо подписано  сотрудником Ответчика Пан О.П. и подтверждает факт и наличие переданного  Ответчику комплекта документов.  

По истечении сроков и согласно условиям, указанных в разделе 6 Договора,  Ответчик не выслал в ответ Истцу подписанный Акт выполненных работ и не произвел  оплату, претензии по результатам работ со стороны Ответчика также не поступали.  

На основании перечисленного в п. 6.2. и Договора, Ответчик, получивший  Документы, обязан рассмотреть их согласно срокам и при отсутствии обоснованных  претензий к качеству работ принять выполненные работы в срок не позднее 05 (пяти)  рабочих дней, подписать Акт выполненных работ и направить их Истцу. Претензий от  Ответчика не поступило в срок и на условиях п. 6.3, таким образом и согласно  условиям п.6.4 обязательства Истца по Договору считаются выполненными в полном  объёме, Работы подлежат оплате в полном объеме, а Акты выполненных работ  надлежащим образом оформленными.  

Суммы, указанные в документах, переданных по описи сопроводительного  письма № 309 от 13.11.2023г. (приложение № 13), уже были включены в общий размер  задолженности, указанный в Уведомлении о расторжении и досудебной претензии о  взыскании задолженности по договору подряда от 01.11.2023.  

Согласно п. 5.2. Договора Оплата выполненных Работ осуществляется путем  перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства по оплате  считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика. Авансирование оплаты Работ является обязательным условием для начала  исполнения договорных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, размер  авансирования и порядок его оплаты устанавливается Протоколом согласования  договорной цены.  

В соответствии с пунктом 5.1. Приложения № 1 к Договору, полный расчет между  сторонами за указанный период работ в п.1 Протокола производится в срок не позднее  5 (пяти) дней после истечения расчетного периода.  

Таким образом, на момент подачи искового заявления в арбитражный суд  Ответчик имеет не исполненное обязательство перед Истцом по оплате выполненных  работ на сумму 1 009 668,11 (один миллион девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь)  рублей 11 копеек.  

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от  исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.  

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  

определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в  порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее  результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений  против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.  

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка  его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе  одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт  подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата  работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа  от подписания акта признаны им обоснованными.  

Судом установлено, что Истец свои обязательства по выполнению работ по  договору полностью исполнил, Ответчик свои обязательства по оплате за выполненные  работы не исполнило, на дату рассмотрения дела долг в размере 1 009 668,11 руб.  Ответчиком не оплачен, в связи с чем, в силу положений статей 309, 310, 720 ГК РФ,  требование Истца о взыскании указанной суммы долга с Ответчика подлежит  удовлетворению.  

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности просрочки исполнения.  

В соответствии с п. 7.4. Договора предусмотрено, что за нарушение Заказчиком  сроков оплаты выполненных Работ (за исключением просрочки внесения предоплаты),  Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% за  каждый календарный день просрочки. Последняя оплата была произведена Ответчиком  03.10.2023. Таким образом, по состоянию на 24.11.2023 неустойка (пени) составляет  53512,41 руб.  

Поскольку судом установлено наличие у Ответчика долга перед Истцом за  выполненные по договору работы, который на дату принятия решения не погашен, то в  силу статей 330 ГК РФ и п. 7.4 Договора требование Истца о взыскании с Ответчика  неустойки (пени) в заявленном в иске размере за неисполнение обязательств, согласно  представленному Истцом и проверенному судом расчету, признается обоснованным и  подлежащим удовлетворению.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с  ответчика в доход федерального бюджета в соответствии со статьей 110 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 330, 702, 711  Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 9" в пользу ООО  "ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" сумму задолженности  по договору № 27992 от 23.08.2022 в размере 1 009 668,11 р., неустойки по состоянию  на 24.11.2023 в размере 53 512,41 р. (всего задолженность и неустойка в размере  1 063 180,52 р.), государственную пошлину в размере 23 632 р.  

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении месяца со дня принятия.  

СУДЬЯ М.В. Ларин