Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-6205/2020

«21»

сентября

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ОАО "ЧЕРНЯХОВСКИЙ "РАЙАВТОДОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к МБУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 560 948,41 рублей

установил.

Открытое акционерное общество "ЧЕРНЯХОВСКИЙ "РАЙАВТОДОР" обратилось в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению  "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" о взыскании основного долга в сумме  551 644 рублей, неустойки в сумме 9304,41 рублей.

Дело рассмотрено в  упрощенном порядке.

Установлено.

Между сторонами был заключен контракт от 02.12.2019 года № 0135300007519000193.

По условиям контракта ОАО "ЧЕРНЯХОВСКИЙ "РАЙАВТОДОР"  (подрядчик) обязалось выполнить комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Черняховский городской округ», а МБУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (заказчик)  обязалось работы принимать и оплачивать. 

В соответствии с пунктом 1.2 договора перечень работ и требования к ним представлены в приложении № 1 к контракту. 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена составляет 9 088 5834,78 рублей.

В соответствии с пунктом 3.9 контракта оплата выполненных работ производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта о приемке работ.

В соответствии с пунктом 5.1 контракта поверка выполненных работ производится ежедневно по всему объему выполняемых работ.

В соответствии с пунктом 7.6.2 контракта за нарушение срока оплаты работ заказчик уплачиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ России за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных работ.

04.02.2020 года подрядчик передал заказчику акт выполненных работ от 03.02.2020 года № 3 на общую сумму 551 644,8 рублей.

06.02.2020 года заказчик просил предоставить справку о метеоусловиях.

С письмом от 12.02.2020 года № 48 подрядчик передал заказчику архив погоды по городу Черняховску с 26.12.2019 года по 27.01.2020 года.

Письмом от 13.04.2020 года № 533/5.0 заказчик сообщил, что по итогам рассмотрения справки о затратах на зимнее содержания автомобильных дорог города Черняховска за декабрь 2019 года - январь 2020 года считает, что 07.01.2020 года и 14.01.2020 года не было необходимости в противоголёдной посыпке дорог.

Работы по акту от 03.02.2020 года № 3 оплачены не были в полном объеме, что явилось основанием для обращения истца с настоящим иском.

Суд полагает, что требования истца в части основного долга подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2.1 технического задания необходимость выполнения работ по очистке дорог от снега возникает с момента начала снегопада или обледенения дорожного покрытия по мере необходимости, в соответствии с  таблицами №№ 1-3 технического задания.

Согласно пункта 4.4.2 контракта подрядчик самостоятельно определяет способ выполнения порученных работ. Пунктом 4.3.12 контракта на подрядчика возложена обязанность нести ответственность по дорожно-транспортным происшествиям, связанным с неудовлетворительными дорожными условиями на обслуживаемой улично-дорожной сети.

Согласно справке ФГБУ «Сверо-Западное УГМС» минимальная температура в г. Черняховске 06.01.2020 года была минус 2,3 градуса, 07.01.2020 года - плюс 1,8 градус, 14.01.2020 года - плюс 1,1 градус.   

Согласно журналу производства работ  ночью 07.01.2020 года и 14.01.2020 года диспетчерами в ходе визуального осмотра и патрулирования обслуживаемых участков дорог был зафиксирован местами гололед.

Согласно пояснениями истца станция по измерению температуры находится в 

<

...> а работы осуществлялись в других районах города, в низинах, где температура была ниже; в указанные даты работы по обработке дорог в Черняховском районе выполняли и другие автодорожные предприятия. 

Уведомление заказчика от 13.01.2020 года №14/5.0 о том, что подрядчик не должен проводить зимнюю противогололедную обработку дорог при отсутствии скользкости на дорожном покрытии  получено подрядчиком 17.01.2020 года.

Факты выполнения работ в ночное время также подтверждены путевыми листами, журналом производства работ.

Согласно расчету истца за период с 27.02.2020 года по 28.05.2020 года подлежит уплате неустойка по положениям пункта 7.6.2 контракта в сумме 9304,41 рублей.

Поскольку на дату вынесения решения суда действует ключевая ставка ЦБ России 4,25%, то размер неустойки составляет 7189,77 рулей.

Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества "ЧЕРНЯХОВСКИЙ "РАЙАВТОДОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной долг по  контракту от 02.12.2019 года № 0135300007519000193 в сумме 551 644 рублей, неустойку в сумме 7189,77 рублей (по ставке 4,25%), расходы по госпошлине в сумме 14 165 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                    О.Н.Шкутко