100099_636783 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  27.09.2022 Дело № А62-997/2021  

 Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пехтеревой  Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к областному государственному бюджетному учреждению «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

о взыскании стоимости выполненных работ по государственному контракту  от 20.05.2019 в размере 11 467 170,50 рубля,  

и по встречному исковому заявлению 

областного государственного бюджетного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ в размере  3800405,82 рубля, стоимости устранения выявленных недостатков и  дефектов, выполненных ответчиком в размере 1 522 860 рублей,  

при участии: от ООО «СИКАМ»: ФИО1 – представитель; 

от ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»:  ФИО2 – представитель, ФИО3 – представитель  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «СИКАМ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  удовлетворить в части взыскания задолженности по оплате выполненных  работ по государственному контракту от 20.05.2019 в размере 10 624 950,5  рубля, в остальной части первоначальных исковых требований отказать.  

Встречные исковые требования областного государственного  бюджетного учреждения «Управление капитального строительства  Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  удовлетворить в части взыскания стоимости некачественно выполненных  работ в размере 1 522 860 рублей, в части взыскания неустойки в размере  3 746 464,64 рубля, в остальной части встречных исковых требований  отказать.  

В результате проведенного зачета первоначальных и встречных  исковых требований, произведенных судебных расходов:  

Взыскать с областного государственного бюджетного учреждения  «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СИКАМ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  задолженность по оплате выполненных работ по государственному  контракту от 20.05.2019 в размере 5 355 625,86 рубля.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу областного  государственного бюджетного учреждения «Управление капитального  строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) судебные расходы на проведение судебной экспертизы в  размере 15 280 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 49 347 рублей.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья В.А. Печорина