Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-2701/2025

г. Хабаровск

15 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2025

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.А. Оржеховской

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Асадуллиным

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Окна Оптима» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>)

к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница № 7» Министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681032, 

<

...>)

о расторжении контракта от 03.04.2024 № 923/311 и взыскании 6 818 722 руб. 72 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика – ФИО1, действующей по доверенности от 24.06.2024 б/н,

Общество с ограниченной ответственностью «Окна Оптима» (далее – ООО «Окна Оптима», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница № 7» Министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – КГБУЗ «Городская больница № 7», ответчик) о расторжении контракта от 03.04.2024 № 923/311, взыскании основного долга в размере 6 818 722 руб. 72 коп.

На основании пункта 4 статьи 137 АПК РФ, с учетом пункта 24 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 04.06.2024 № 12 «О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде», суд завершил предварительное заседание и перешел к судебному разбирательству дела.

Истец, как следует из искового заявления, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из контракта от 03.04.2024 № 923/311, наличие основного долга в размере 6 818 722 руб. 72 коп., а также просил суд расторгнуть контракт от 03.04.2024 № 923/311, представил заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца.

Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление, объяснений представителя в судебном заседании, исковые требования признает в полном объеме.

Признание ответчиком требования судом принимается, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя ответчика, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

03.04.2024 между КГБУЗ «Городская больница № 7», заказчик и ООО «Окна Оптима», подрядчик заключен контракт № 923/311, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, в сроки, установленные в контракте, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 5 КГБУЗ «Городская больница № 7» (пункт 1.1 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта цена контракта составляет 8 535 229 руб. 31 коп., цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте, на основании выставленного подрядчиком счета, счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Расчет осуществляется по факту выполнения всех работ.

Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 11.1 контракта).

Дополнительным соглашением от 12.08.2024 № 1 внесены изменения в пункт 2.1 контракта и определена новая цена контракта в размере 7 893 281 руб. 19 коп.

Как следует из заключения эксперта от 19.12.2024 № 233/24, общая стоимость фактически выполненных работ подрядчиком по капитальному ремонту здания поликлиники № 5 КГБУЗ «Городская больница № 7» составляет 6 818 722 руб. 72 коп.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 12.02.2025 с требованием об оплате задолженности, а также просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон.

В ответ (от 14.02.2025 № 1-18/531) ответчик указал, что осуществить оплату без решения суда не представляется возможным.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, признанные стороной, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Ответчик признал иск в полном объеме, признание принято арбитражным судом в качестве факта, не требующего дальнейшего доказывания.

Исковые требования истца о расторжении контракта от 03.04.2024 № 923/311, заключенного между краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница № 7» Министерства здравоохранения Хабаровского края и обществом с ограниченной ответственностью «Окна Оптима», взыскании основного долга в размере 6 818 722 руб. 72 коп. подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в сумме 83 869 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу подлежит возврату 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, которая составляет 195 693 руб.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Расторгнуть контракт от 03.04.2024 №923/311, заключенный между краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница № 7» Министерства здравоохранения Хабаровского края и обществом с ограниченной ответственностью «Окна Оптима».

Взыскать с краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 7» Министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681032, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Окна Оптима» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>) основной долг в размере 6 818 722 руб. 72 коп., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере  83 869 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Окна Оптима» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 195 693 руб., перечисленную платежным поручением от 23.01.2025 №31.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                       М.А. Оржеховская