6/2022-99316(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-5417/2022

г. Ярославль

26 июля 2022 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фалетровой Ю.В.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА  СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Консалтинг Строй Инвест" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о обязании устранить недостатки 

третье лицо – акционерное общество "Управляющая организация многоквартирными  домами Кировского района" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг Строй Инвест" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течении месяца с даты вступления в законную силу  

решения суда устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту крыши  

многоквартирного дома № 13/ба по ул. Челюскинцев в г. Ярославле, а именно: 

- выполнить сплошную обрешетку в коньковом узле, а также вокруг венткороба;  - увеличить ширину сплошной обрешетки в карнизном свесе в соответствии с рабочей  

(проектной) документацией; 

- устранить отрывы снегозадержателей от покрытия кровли;  - выполнить фартук слуховых окон в соответствии с проектной документацией;  

- восстановить гидроизоляцию в местах стыковки слуховых окон с фартуком; - восстановить балясины в соответствии с проектной документацией; 

- установить водосточные воронки (недостающие 2 штуки) в местах их отсутствия;  - выполнить окраску парапетного ограждения;  

- выполнить установку канализационных стояков (2 недостающих) в местах их отсутствия; - выполнить гидроизоляцию в чердачном перекрытии; - выполнить монтаж кирпичных столбиков в осях А,Б 3,4; - выполнить монтаж раскосов и затяжек; - выполнить замену и усиление стропильных ног; 

- устранить разрывы в мауэрлате, восстановить опоры стропильных ног на мауэрлат,  

восстановить гидроизоляцию под мауэрлатом; 

- выполнить замену углового прогона в соответствии с рабочей (проектной)  документацией;  

- выполнить обрешетку в соответствии с рабочей (проектной) документации;  - осуществить антиперирование и антисептирование;  

- выполнить сопряжение вентиляционных выходов с парапетом в соответствии с рабочей  (проектной) документацией;  

- заменить слуховые окна, выполнить узел примыкания в соответствии с рабочей  (проектной) документацией, исключив попадание атмосферных осадков;  

- выполнить примыкание к выступающим над покрытием кровли конструкциям в  соответствии с рабочей (проектной) документации, установить металлическую планку,  

выполнить примыкание к парапету в соответствии с рабочей (проектной) документации; 

- установить клямеры в соответствии с рабочей (проектной) документацией;  - выполнить соединение и герметизацию кровельных картин в соответствии с рабочей  

(проектной) документацией. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинг Строй Инвест"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД  СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную  неустойку в сумме 3000 руб. за каждый день неисполнения решения Арбитражного суда  Ярославской области, начиная с 31 календарного дня с даты вступления решения в законную  силу до момента фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинг Строй Инвест"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу регионального фонда содействия  капитальному ремонту многоквартирных домов ярославской области (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 6 000,00 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья В.А. Танцева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 5:54:04

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна