Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-64028/2020

29 октября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  28 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  29 октября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Мигукина Н.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (адрес:  Россия 196247, Санкт  -  Петербург, площадь Конституции дом 1, ОГРН:  1027809170300);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР "ДЕТСКИЙ ХОР ТЕЛЕ-РАДИО СПБ" (адрес:  Россия 191119, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛИГОВСКИЙ Д. 94 КОРП. 2 ЛИТ. А ПОМ. 14Н, ОГРН:  1037816005787);

о взыскании

при участии

- от истца: до перерыва ФИО2 по доверенности от 07.08.2020, после перерыва ФИО3 по доверенности от 21.11.2019

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Центр «Детский хор теле-радио СПб» (далее – ООО «Центр «Детский хор теле-радио СПб») о взыскании:

- задолженности по оплате технологического присоединения по Договору за оказание Услуги в размере 8 324 624,64 руб.;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 83 914,40 руб. за период с 29.03.2019 по 29.05.2020;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 428 087,62 руб. за период с 11.12.2019 по 29.05.2020;

- процентов за пользование денежными средствами в размере 44 125,06 руб. за период с 30.05.2020 по 06.07.2020

- неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по 1 этапу в размере 2 188 275,42 руб., за период с 31.10.2018 по 13.12.2018;

- неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по 2 этапу в размере 14 422 724,38 руб., за период с 01.12.2018 по 16.09.2019;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежа по 2 этапу услуги в размере 8 324 624,64 руб. за период с 07.07.2020 по день фактической уплаты этих средств ПАО «Ленэнерго»;

- расходов по оплате государственной пошлины.

ООО «Центр «Детский хор теле-радио СПб» отзыв на исковое заявление не представлен.

В настоящее судебное заседание явился представитель истца, представил суду копии затребованных документов, которые приобщены к материалам дела, а также поддержал заявленные требований в полном размере.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения настоящего дела представителя в судебное заседание не направил, ходатайств или заявлений не представил.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела и представленные доказательства, на стадии реплик объявил перерыв в судебном заседании 28.10.2020 до 13 час. 55 мин. 

После перерыва, явился представитель истца, суд огласил резолютивную часть решения.

Как следует из материалов дела, 20.02.2012 между ПАО «Ленэнерго» (Сетевая организация) и ООО «Центр «Детский хор теле-радио СПб» (Заявитель) заключен договор № ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – многофункциональный комплекс, расположенный по адресу: Наличная ул., участок 1 (восточное дома 44, корп.. 2, лит. А по Наличной ул.), с учетом следующих характеристик: максимальная мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств – 120 кВт; категория надежности – первая, уровень напряжения – 0,38 кВ; максимальная мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств – 1020,2 кВт; категория надежности – вторая, уровень напряжения – 0,38 кВ.

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 24 месяца с даты договора (пункты 3.1.1 и 3.2.2).

Заявителю выданы технические условия сроком действия – 2 года.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с решением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов от 29.12.2020 № 384-р и составил 44 458 763,76 руб., включая НДС 18%. (пункт 4.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора, Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в следующем порядке: 

- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 13 337 629,13 руб., в том числе НДС 18%, в течение 15 дней с даты заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 13 337 629,13 руб., в том числе НДС 18%, в течение 60 дней, с даты заключения договора;

 - 40% платы за технологическое присоединение в сумме 17 783 505,50 руб., в том числе НДС 18%, в течение 12 дней со дня заключения настоящего договора.

В ходе исполнения обязательств, сторонами были подписаны следующие дополнительные соглашения:

- Дополнительным соглашением от 12.10.2018 стороны внесли изменения в характеристики присоединяемого объекта, а именно: I этап – 1020,17 кВт по 3 категории надежности, уровень напряжения 10кВ; II этап – 1020,17 кВт по второй категории надежности, в том числе 120 кВт по 1 категории надежности.

Изложили пункты 3.1.1 и 3.2.2 договора в следующей редакции:

«3.1.3. В срок до 30.10.2018 выполнить технические условия по I этапу со стороны Сетевой организации. В срок до 30.11.2018 выполнить технические условия по  II этапу со стороны Сетевой организации.

3.2.2. В срок до 30.10.2018 выполнить технические условия по I этапу со стороны Заявителя и уведомит об этом Сетевую организацию, в срок до 30.11.2018 выполнить технические условия по  II этапу со стороны Заявителя, произвести окончательный расчет за технологическое присоединение и уведомит об этом Сетевую организацию.

- Дополнительным соглашением от 17.12.2018 стороны внесли изменения в характеристики присоединяемого объекта, а именно: I этап – 670 кВт по 3 категории надежности; II этап – 1020,17 кВт по второй категории надежности, в том числе 120 кВт по 1 категории надежности, с учетом ранее присоединенной мощности по I этапу.

А также изложили пункт 4.1 договора в следующей редакции:

«4.1. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряжением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов от 29.12.2010 № 384-р, и составляет 44 458 763,76 руб. включая НДС 18%.

Размер платы за технологическое присоединение по I этапу составляет 29 447 629,12 руб. в том числе НДС 18%;

Размер платы за технологическое присоединение по  II этапу составляет 15 011 134,64 руб., в том числе НДС 18%.

- Дополнительным соглашением от 20.02.2019 стороны внесли изменения в пункты 4.1, 4.2 Договора, а именно размер платы по первому этапу составляет 29 946 741,48 руб., в том числе НДС 20%; размер платы по второму этапу – 15 265 560,65 руб., в том числе НДС 20%.  

В пункте 3 Дополнительного соглашения от 20.02.2019 стороны определили, что Заявитель обязан уплатить услугу в следующем порядке и сроки:

 - часть платы за технологическое присоединение по I этапу в размере 4 396 693,12 руб., в том числе НДС 20% до 15.03.2019;

- часть платы за технологическое присоединение по  I этапу оплачивается передачей в собственность Сетевой организации имущества, созданного в результате выполнения раздела 10 Технических условий, за исключением строительной части ТП по п. 10.1.1 Технических условий, на сумму 25 550 048,36 руб., в том числе НДС 20%, в срок до 30.03.2019;

- плату за технологическое присоединение по II этапу в размере 15 265 560,65 руб., в том числе НДС 20% вносится денежными средствами на расчетный счет Сетевой организации в срок до 30.12.2019.

Пунктом 4  Дополнительного соглашения от 20.02.2019 стороны продлили срок действия Технических условий до 30.12.2019.

- Дополнительным соглашением от 30.09.2019 стороны продлили срок действия Технических условий до 31.12.2019, а также изложили пункт 1.1 договора в новой редакции, согласно которой внесли изменения в характеристики присоединяемого объекта, а именно: I этап – 670 кВт по 3 категории надежности; II этап – 1020,17 кВт: 966,25 кВт по второй категории надежности, 53,92 кВт по первой категории надежности, с учетом ранее присоединенной мощности по I этапу.

По результатам выполнения работ и оказания услуг сторонами подписаны следующие документы:

- Акт об осуществлении технологического присоединения № 94811111111- ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11-18964 от 29.03.2019, согласно которому Сетевая организация оказала услуги по технологическому присоединению объектов электроэнергетики по I этапу на сумму 29 946 741,48 руб., в том числе НДС 20%.

- Акт об осуществлении технологического присоединения № 94811111111- ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11-82997 от 11.12.2019, согласно которому Сетевая организация оказала услуги по технологическому присоединению объектов электроэнергетики по II этапу на сумму 15 265 560,65 руб., в том числе НДС 20%.

ПАО «Ленэнерго», ссылаясь на нарушение ООО «Центр «Детский хор теле-радио СПб» условий договора по оплате, начислило проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платежей, неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению и обратилось в арбитражный суд с настоящим требованием.

Оценив представленные в дело доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пункта 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Принимая во внимание условия договора о поэтапной оплате услуг за технологическое присоединение, факт подписания сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения № 94811111111-ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11-18964 от 29.03.2019 об оказании услуги по технологическому присоединению объектов электроэнергетики по I этапу, и Акта об осуществлении технологического присоединения № 94811111111-ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11-82997 от 11.12.2019 об оказании услуги по технологическому присоединению объектов электроэнергетики по II этапу, отсутствие доказательств внесения требуемых сумм на счет Сетевой организации, суд пришел к выводу о нарушении ООО «Центр «Детский хор теле-радио СПб» сроков оплаты оказанных услуг по договору о технологическом присоединении.

Обращаясь с настоящим заявлением, Истец указал, что за ответчиком числится задолженность по оплате оказанных услуг по II этапу – 15 265 560,65 руб., частичная оплата в размере 6 940 936,01 руб. поступила 29.05.2020, оставшаяся сумма задолженности 8 324 624,64 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательств свидетельствующих об отсутствии задолженности или ином её размере Ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика задолженности по оплате услуг за технологическое присоединение по договору № ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11 от 20.02.2012 в сумме 8 324 624,64 руб. подлежит удовлетворению.

В силу положений пункта 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения а счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проверяя расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, представленный истцом, суд установил ошибку в периоде начисления процентов. 

Так, истец необоснованно начислил проценты за пользование чужим денежными средствами по оплате  II этапа, начиная с 11.12.2019, поскольку в пункте 3 Дополнительного соглашения от 20.02.2019 стороны определили, что плату за технологическое присоединение по II этапу в размере 15 265 560,65 руб., в том числе НДС 20% вносится денежными средствами на расчетный счет Сетевой организации в срок до 30.12.2019.

Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременную оплату услуг по II этапу составляет 421 795,83 руб. за период с 31.12.2019 по 06.07.2020, с учетом погашения части задолженности в сумме 6 490 963,01 руб. 29.05.2020.

Поскольку Ответчиком допущена просрочка в исполнении обязательств по оплате услуг, то требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ за несвоевременное внесение платы по договору подлежит удовлетворению в размере     83 914,40 за период с 29.03.2019 по 29.05.2020 и в размере 421 795,83 руб. за период с 31.12.2019 по 06.07.2020.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору.

Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению по I этапу за период с 31.10.2018 по 13.12.2018 в сумме 2 188 275,42 руб.; II этапу за период с 01.12.2018 по 16.09.2019 в сумме 14 422 724,38 руб. на основании пункта 3.2.2 договора.

Согласно условиям настоящего договора, а именно пункту 5.1, при  нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, любая из сторон договора вправе взыскать с виновной стороны в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

В статье 431 ГК РФ предусмотрено, что при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (часть 1). Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон (части 2).

Оценив условия договора № ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11 от 20.02.2012, в редакции дополнительных соглашений, суд установил отсутствие условий о сроке выполнения мероприятий по технологическому присоединению. 

Пункты 3.1.1 и 3.2.2 относятся к обязанностям сторон, и их условие может отличаться сроков выполнения работ по технологическому присоединению, установленных подпунктом "б" пункта 16 Правил N 861.

Так, в соответствии с подпунктом "б" пункта 16 Правил № 861 (в редакции, действовавшей в период заключения договора), срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 2 года - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Таким образом, срок выполнения работ по технологическому присоединению по настоящему договору составляет 20.02.2014 (но не более 20.02.2016, с учетом положений Правил № 861).

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

С учетом распределения обязанностей сторон, установленных в технических условиях к договору N ОД-СПб-15318-11/20906-Э-11, исходя из объективной невозможности ООО «Центр «Детский хор теле-радио СПб» выполнить со своей стороны мероприятия по технологическому присоединению до выполнения ПАО "Ленэнерго" мероприятий со своей стороны (статья 328 ГК РФ), а также отсутствия в материалах дела доказательств выполнения ПАО "Ленэнерго" мероприятий по этапам технологического присоединения ранее даты подписания соответствующих актов об осуществлении технологического присоединения – 29.03.2019 и 11.12.2019, суд полагает необоснованным требование ПАО "Ленэнерго" о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по I этапу в сумме 2 188 275,42 руб. за период с 31.10.2018 по 13.12.2018 и по II этапу в сумме 14 422 724,38 руб. за период с 01.12.2018 по 16.09.2019, в связи с чем в указанной части в удовлетворении иска отказывает.

С учетом изложенного, исковые требования подлежит удовлетворению частично.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии с частью 5 статьи 15, частью 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр «Детский хор теле-радио СПб» в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» задолженность по оплате технологического присоединения по Договору за оказание Услуги в размере 8 324 624,64 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 83 914,40 руб. за период с 29.03.2019 по 29.05.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 421 795,83 руб. за период с 31.12.2019 по 06.07.2020; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере за просрочку внесения платежа по 2 этапу услуги в размере 8 324 624,64 руб. за период с 07.07.2020 по день фактической уплаты этих средств ПАО «Ленэнерго»; расходов по оплате государственной пошлины в размере 52 119 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Мигукина Н.Э.