АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Томск                                                                                              Дело № А67-551/2020

08.04.2020

Резолютивная часть решения принята 23.03.2020.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Томскдорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 36 586,09 руб. процентов, начисленных на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 11.08.2019 по 26.09.2019 в связи с нарушением согласованных сроков выполнения работ в рамках договора субподряда № 02/03-2019 от 25.03.2019,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Томскдорстрой» обратилось в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» о взыскании 36 586,09 руб. процентов за период с 11.08.2019 по 26.09.2019, начисленных в связи с нарушением согласованных сроков выполнения работ в рамках договора субподряда № 02/03-2019 от 25.03.2019.

         Исковые требования обоснованы статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору субподряда № 02/03-2019 от 25.03.2019, в связи с чем, истцом на основании пункта 8.1 договора и статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации начислены проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Определением Арбитражного суда Томской области от 31.01.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного судопроизводства, без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» отзыв на исковое заявление в соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило, возражений относительно существа предъявленных требований не заявило.

В связи с истечением сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов, дело рассмотрено судом по имеющимся доказательствам согласно части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон.

23.03.2020 в соответствии с частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынесена резолютивная часть решения, которая размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

07.04.2020 общество с ограниченной ответственностью «Томскдорстрой» обратилось в арбитражный суд с заявлением о составлении мотивированного текста решения по делу № А67-551/2020.

Согласно части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных исковых требований.

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Томскдорстрой» (подрядчиком) и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» (субподрядчиком) заключен договор субподряда № 02/03-2019 от 25.03.2019 (далее по тексту – Договор, л.д. 13-26), в соответствии с условиями которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Богашёво – Петухово на участке км 0+689 – км 8+287 в Томской районе Томской области (далее – объект) в соответствии с рабочей документацией шифр 49-р-т17-0217, перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 1 к договору), перечнем нормативных документов (Приложение № 2 к договору) (далее – работы) и сдать выполненные работы подрядчику в установленные договором сроки, а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены договором (пункт 1.1).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора виды и объемы работ указаны в рабочей документации шифр 49-р-т17-0217СД, применение которой является обязательным для сторон договора.

Цена договора составляет 7 328 277, 60 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 1 221 379,60 руб., и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями договора. Цена единицы работы определена в  рабочей документации шифр 49-р-т17-0217сд (пункт 2.1).

Пунктом 3.1 Договора предусмотрены срок начала работ – с даты заключения договора, и срок завершения работ – 10.08.2019.

Датой завершения работ по договору является дата подписания подрядчиком последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 по факту выполнения работ (без претензий со стороны подрядчика), акта приемки законченных работ по ремонту (пункт 3.2 Договора).

Согласно пункту 5.1.18 Договора субподрядчик обязан выполнить все предусмотренные договором работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора и приложениями к нему и сдать результаты работ подрядчику по акту о приемке выполненных работ  по форме КС-2, акту приемки законченных работ по ремонту.

Пунктом 8.1 рассматриваемого договора предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субподрядчик несет ответственность в виде неустоек (штрафов, пени) в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором. Субподрядчик знает об условиях возникновения ответственности, размере штрафа, неустойки и пени по договору субподряда № 02/19 от 28.02.2019, заключенного между подрядчиком и генподрядчиком (ООО «Кузбассдорстрой»), и по государственному контракту № 2-р-т19 от 06.02.2019, заключенному между генподрядчиком и заказчиком (ОГКУ «Томскавтодор»). Субподрядчик обязан возместить убытки подрядчика, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения субподрядчиком условий заключенного договора.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» выполнило часть работ с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1 договора субподряда № 02/03-2019 от 25.03.2019. Так, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами 28.08.2019 на сумму 1 388 876,40 руб. (л.д. 46-62) и 20.09.2019 на сумму 3 402 452,40 руб. соответственно (л.д. 64-103).

В связи с допущенным ответчиком нарушением сроков выполнения работ общество с ограниченной ответственностью «Томскдорстрой» претензией исх. № 14/11 от 21.11.2019 потребовало от ответчика в течение 5 рабочих дней уплатить проценты за несвоевременное завершение работ (л.д. 9-12).

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Томскдорстрой» в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как указано в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», поскольку статья 395 Гражданского кодекса предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения именно денежного обязательства, положения указанной нормы не применяются к отношениям сторон, не связанным с использованием денег в качестве средства платежа (средства погашения денежного долга).

Гражданское законодательство не предусматривает ответственности в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами за нарушение контрагентом неденежного договорного обязательства.

Указанная позиция отражена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2010 № ВАС-17660/09 и определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.05.2011 № ВАС-5603/2011.

В данном случае на основании договора субподряда № 02/03-2019 от 25.03.2019 у общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» возникло обязательство по выполнению работ в согласованный сторонами срок, которое носит неденежный характер, следовательно, проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение такого обязательства начислению не подлежат.

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Письменное соглашение, предусматривающее возможность применения к субподрядчику штрафных санкций в виде процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выполнению работ, сторонами не заключалось, соответствующих положений рассматриваемый договор также не содержит, контрагентом нарушено неденежное договорное обязательство.

При таких обстоятельствах, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их взаимосвязи и совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для привлечения общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» к ответственности в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 36 586,09 руб. за период с 11.08.2019 по 26.09.2019.

При обращении с исковым заявлением истцом уплачена государственная пошлина в размере 2 000 руб. по платежному поручению № 51 от 28.01.2020 (л.д. 140).

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на истца. 

        Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований  отказать.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья                                                                  Н.Н. Какушкина