ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-24266/2023

Дело № А41-45883/23

06 декабря 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена  06 декабря 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  06 декабря 2023 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Игнахиной М.В.,

судей Ивановой Л.Н., Миришова Э.С.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

при участии в заседании:

от ООО «Парус» – представитель ФИО2, по доверенности №1 от 01.10.2022, диплом, паспорт;

от ООО «Композитные технологии» – представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ФИО3 – представитель не явился, извещен надлежащим образом;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  ООО «Композитные технологии» на решение Арбитражного суда Московской области  от  29 сентября 2023 года по делу №А41-45883/23, по иску ООО «Парус» к ООО «Композитные технологии» о взыскании

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Парус» (далее – истец, ООО «Парус») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Композитные технологии» (далее – ответчик, ООО «Композитные технологии») о расторжении договора № 2212/2021 АР от 28.12.2021, взыскании 4 670 714 руб. 20 коп. неотработанного аванса.

Определением Арбитражного  суда Московского округа от 20.06.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3 исполнительный директор ООО «Композитные технологии» (л.д.2).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 сентября 2023 года по делу №А41-45883/23 требования удовлетворены (л.д.113-115).

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Композитные технологии» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение отменить, в удовлетворении  требований отказать.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в соответствии со статьями 266 – 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в соответствии со статьями 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, надлежащим образом извещенных о дате, времени и  месте судебного разбирательства, в том числе публично путем  размещения информации на официальном сайте суда.

В судебном заседании   истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил  решение оставить без изменения.

Повторно исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд  приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения обжалуемого решения.

Из материалов дела следует, что  28 декабря 2021 года между ООО «Парус» (покупатель) и ООО «Композитные технологии» (поставщик) заключен договор 2212/2021АР, в соответствии с которым ООО «Композитные технологии» обязалось изготовить и поставить ООО «Парус» душевые ограждения, ограждения на ванну и зеркала, в объеме и ассортименте согласно спецификации (л.д.39-42).

31 августа 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к указанному договору, согласно которому  установлена очередность поставки товара партиями  (л.д.44-45). Предельный срок поставки душевых ограждений - до 30.09.2022 года; зеркал-до 14.10.2022 года.

Дополнительным соглашением №2 от 10.11.2022 года стороны договорились о предельном сроке поставки душевых перегородок - до 25.11.2022 года (л.д.47-48).

Во исполнение условий договора, ООО «Парус» перечислило ответчику в качестве аванса 12 494 514,20 руб., что подтверждается платежными поручениями №472 от 30,12,2021 на сумму 1 000 000 руб., №185 от 28.02.2022 на сумму 5 765 193,20 руб., №438 от 10.08.2022 на сумму 1 500 000 руб.,  №440 от 02.09.2022 на сумму 2 227 601 руб., №186 от 28.02.2022 на сумму 1 253 000 руб.,  №390 от 02.06.2022 на сумму 670 950 руб., № 38 от 26.01.2023 на сумму 77 770 руб.

В рамках указанного договора по состоянию на 31.12.2022  ООО «Композитные технологии» осуществило поставку  ООО «Парус» товаров общей   стоимостью 4 523 990 руб.

Сторонами подписан акт сверки расчетов по состоянию на 31 декабря 2022 года.

По состоянию на 31.03.2023 ООО «Композитные технологии» дополнительно поставило товары  стоимостью 3 299 810 руб. Таким образом, на 31.03.2023 общая стоимость поставленных товаров составила 7 823 800 руб.

С учетом ранее перечисленного аванса 12 494 514,20 руб., размер неотработанного аванса (недопоставленного товара) составил 4 670 714,20 руб.

Письмом от 28.02.2023 ООО «Парус»  уведомило ООО «Композитные технологии» о расторжении договора на основании п.2 ст.450, п.1 ст. 450.1 и п.4 ст. 523 ГК РФ и потребовало возвратить неотработанный аванс.

Поскольку ответа на уведомление о расторжении договора не последовало, ООО «Парус» направило ООО «Композитные технологии» досудебную претензию о  21.03.2023 №42 (л.д.73) с требованием о возврате неотработанного аванса.

После отправки досудебной претензии, ООО «Композитные технологии» прислало по электронной почте два УПД. Данные документы ООО «Парус»  принял для учета, и сумма задолженности изменилось, что отражено в акте сверки на 31.03.2023.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Повторно исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с  выводом суда первой инстанции  об удовлетворении требований.

Императивными нормами статей 309 и 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ, п. 1 ст.432 ГК РФ содержание договора №2630К от 28.06.2019, последующее поведение сторон, суд первой инстанции  верно  квалифицировал, что между сторонами заключен смешанный договор, содержащий элементы договора поставки (в части обязательства передать заказчику товар) и договора подряда (в части обязательства по изготовлению облицовочной плитки).

Сложившиеся между сторонами правоотношения судом первой инстанции квалифицированы как отношения по договору купли-продажи, подряда, которые регулируются главами 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ).

Согласно нормам, содержащимся в главе 37 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и уплатить обусловленную цену, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ, которая, в свою очередь, устанавливает, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ.

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4). При этом бремя доказывания обоснованности отказа от приемки результата работ возлагается на заказчика.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Срок выполнения работы является существенным условием договора подряда и подлежит изменению только в установленном законом порядке. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное (пункт 1 статьи 452 ГК РФ).

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Статьей 717 ГК РФ предусмотрено, что если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (пункт 2 статьи 453 ГК РФ).

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора" разъяснено, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора.

В соответствии с п. 2 ст. 452  ГК РФ требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Пунктом  3 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с  пунктом 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Из системного толкования положений пункта 3 статьи 450 и пункта 2 статьи 715 ГК РФ следует, что договор подряда считается прекращенным с момента получения подрядчиком отказа заказчика от его исполнения или момента, когда подрядчик мог его получить.

Направляя в адрес ответчика уведомление от 28.02.2023, истец реализовал свое право на отказ от исполнения договора.

Согласно пункту 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ.

Из содержания пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом.

В            данном случае порядок расторжения договора  истцом соблюден путем направления в адрес  ответчика уведомления о расторжении договора. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 года № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Следовательно, удержание денежных средств, перечисленных истцом ответчику в качестве аванса, без встречного удовлетворения, является неосновательным обогащением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

По смыслу названной нормы для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств: приобретение или сбережение имущества на стороне приобретателя (то есть увеличение стоимости его имущества); приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, что, как правило, означает уменьшение стоимости имущества потерпевшего вследствие выбытия из его состава некоторой части имущества; отсутствие правовых оснований, то есть приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке.

Недоказанность хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет отказ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения. При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 1 статьи 65, часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В предмет доказывания при взыскании неосновательного обогащения входят факт перечисления денежных средств, отсутствие законных оснований для такого пользования и размер неосновательно сохраненного или увеличенного имущества на стороне ответчика.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (пункт 2 статьи 1105 ГК РФ).

Из пункта 1 статьи 1107 ГК РФ следует, что лицо которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Как установлено судом первой инстанции  и следует из материалов дела во исполнение договора истцом на расчетный счет ответчика перечислен авансовый платеж. На момент рассмотрения спора ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств по договору или возврата перечисленного аванса.

Принимая во внимание тот факт, что доказательств надлежащего исполнения ответчиком условий договора в материалы дела не представлено, при наличии оплаты истцом ответчику денежных средств и отсутствии доказательств их возврата истцу в связи с расторжением договора, требование истца о расторжении  договора и взыскании с ответчика суммы неотработанного аванса правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Ссылка заявителя  жалобы на  отгрузку  истцу товаров  стоимостью 6 929 975 руб., и наличие неотработанного аванса в размере  3 073 169 руб. 20 коп., отклоняется  судом апелляционной инстанции, поскольку  документально не подтверждена.

Первичных документов, подтверждающих факт поставки товаров на предъявленную ко взысканию сумму, в материалы дела  вопреки  требованиям  статьи 65 АПК РФ не представлено.

Ссылка заявителя  жалобы на приложенное к отзыву уведомление от 09 ноября 2022 года о частичной готовности к поставке, также несостоятельна, ввиду отсутствия документов, подтверждающих направление данного   уведомления истцу.

Утверждение ООО «Композитные технологи»  об уклонении истца от предоставления доступа в помещения, в которых необходимо произвести замеры для изготовления товаров, неосновательно и также  документально не подтверждено.

Учитывая, что предъявленная ко взыскания сумма  неосновательного  обогащения подтверждена подписанным актом сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2021 по 31.12.2021, требование о расторжении договора и взыскании неотработанного аванса в размере 4 670 714 руб. 20 коп.  обоснованно удовлетворено  судом первой инстанции.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для его отмены и удовлетворения апелляционной жалобы.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего дела по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области  от  29 сентября 2023 года по делу №А41-45883/23 оставить  без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный  суд Московского округа в течение  двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

 

Председательствующий

 

М.В. Игнахина

Судьи

 

Л.Н. Иванова

Э.С. Миришов