Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

(по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства)

Дело № А41-13200/23

26 апреля 2023 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.О. Уварова,  рассмотрев без вызова сторон в порядке упрощенного производства дело по  исковому заявлению ООО "ПОДЪЕМНИК-О"  

к ООО "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ И КОМФОРТА" о взыскании  задолженности по договорам № 6Э/21 от 19.04.2021 июнь 2022г., № 9-К от  24.02.2022г., № 10-К от 24.02.2022г., № 134-К от 24.11.2021г., № 135-К от  24.02.2021г. в размере 263 898,97 руб., неустойки в размере 85 390,93 руб.  

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПОДЪЕМНИК-О" обратилось в Арбитражный суд Московской области  с иском к ООО "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ И КОМФОРТА" о взыскании  задолженности по договорам № 6Э/21 от 19.04.2021 июнь 2022г., № 9-К от  24.02.2022г., № 10-К от 24.02.2022г., № 134-К от 24.11.2021г., № 135-К от  24.02.2021г. в размере 263 898,97 руб., неустойки в размере 85 390,93 руб.  

Дело рассмотрено в порядке упрощённого производства без вызова сторон,  после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и  иных документов в соответствии с главой 29 АПК РФ, по имеющимся в материалах  дела доказательствам.  

03.04.2023 принята резолютивная часть решения. 

От ответчика в электронном виде поступила апелляционная жалоба.  

Согласно абзаца 3 части 2 статьи 229 АПК РФ, мотивированное решение  арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица,  участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи  апелляционной жалобы.  

Таким образом, суд счел необходимым изготовить мотивированное решение. 

Как следует из материалов дела, 19 апреля 2021 года между ООО  «Подъемник-О» (далее – Истец) и ООО "Территория счастья и Комфорта" (далее –  Ответчик) заключен договор № 6Э/21 на техническое обслуживание лифтов и систем  диспетчерского контроля лифтов.  

Согласно пункту 1.1 договора Истец принял на себя выполнение работ  (оказание услуг) обслуживанию лифтов и систем диспетчерского контроля лифтов  по адресам, согласно Приложению № 1 к договору, а Ответчик обязался  

осуществить приемку таких работ и услуг, а также их оплату в порядке и в сроки,  установленные Договором.  

Исходя из пункта 5.2. договора, оплата работ и услуг Исполнителя должна  производиться ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

В соответствии с договором Истец в июне 2022г., выполнил работы (оказал  услуги) на сумму 241 542,96 рублей.  

Ответчиком подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) за июнь  2022г., без замечаний, что подтверждает его обязательства по оплате.  

Абзацем 2, 3 пункта 5.3 договора определено: «Если Заказчик не подписал Акт  приемки выполненных работ и услуг в течение 3 (трех) дней с даты предоставления  его Исполнителем, он обязан предоставить в тот же срок письменный  мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ и услуг.  Такой мотивированный отказ должен содержать обоснованные и документально  подтвержденные претензии относительно причин отказа от согласования Акта  приемки выполненных работ и услуг.  

В случае, если Заказчик не подписал полученный им Акт приемки  выполненных работ и услуг, но и не предъявил документально обоснованного  мотивированного отказа, работы и услуги по техническому обслуживанию  Оборудования считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежат  оплате».  

Акты выполненных работ за июнь 2022г., вручено нарочно в офис Ответчика.  Ответчиком в установленные договором сроки акт подписан.  

До настоящего времени претензий от Ответчика по качеству и объему  выполненных работ и услуг за июнь 2022 года не получено. Ответчиком частично  погашено сумма долга в размере 92 645,16 рублей. Следовательно, работы (услуги)  Истца за данный период считаются принятыми и подлежат оплате.  

На момент составления настоящего иска работы (услуги) Истца Ответчиком в  полном объеме не оплачена. Сумма долга по договору за указанный период  составляет 148 897,80 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 79  копеек).  

Таким образом, в соответствии с нормами договора № 6Э/21 от 19.04.2021 и  Гражданского кодекса РФ, на данный момент обязательства ООО "Территория  счастья и Комфорта" на сумму 148 897,80 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот  девяносто семь рублей 79 копеек) перед ООО «Подъемник-О» не исполнены.  

В силу п.6.4. договора, Заказчик несет ответственность за полную оплату  работ Исполнителя по настоящему Договору. В случае нарушения сроков оплаты,  определенных в п. 5.2. настоящего Договора, Исполнитель в праве начислять  Заказчику пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день  просрочки.  

Согласно прилагаемому к иску расчету, договорная неустойка составила на  момент составления настоящего заявления 80 404,81 руб. (Восемьдесят тысяч  четыреста четыре рубля 81 копейка).  

27 июля 2022 года между сторонами достигнуто соглашение о расторжении  договора № 6Э/21 от 19.04.2021 года.  

Согласно п. 1. Соглашение о расторжении договора № 6Э/21 от 19.04.2021 года  последним днем действия договора -30.06.2022 года.  

Пунктом 8.4. договора споры и разногласия по настоящему Договору, не  урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом  Московской области.  

Также обязательства ООО "Территория счастья и Комфорта" по договорам  подряда № 9-К от 24.02.2022г. № 10-К от 24.02.2022г., № 134-К от 24.11.2021г., №  135-К от 24.02.2021г., на сумму 115 001,17 руб. (Сто пятнадцать тысяч один рубль 17  копеек) перед ООО «Подъемник-О» не исполнены.  

24 февраля 2022 года заключен договор подряда № 9-К от 24.02.2022 г. на  ремонт пассажирского лифта.  

Согласно пункту 1.1 договора Заказчик поручает Подрядчику выполнить  ремонт пассажирского лифта г/п 400 кг на 17 остановок зав. № 56775 по адресу:  Московская обл., г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18, корп. 1, п. 1 в объеме,  указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

Подрядчик в свою очередь обязуется выполнить работы, предусмотренные  Договором, в объеме, в сроки и с качеством согласно условиям Договора,  требованиям ГОСТ, ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и сдать их Заказчику  (п.1.2).  

Исходя из пункта 2.2. договора расчет за выполненные Подрядчиком работы  осуществляется в течение десяти банковских дней с момента подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

В соответствии с п. 5.3. договора Приемка выполненных работ производится в  течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки  выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и  затрат по форме № КС-3. В указанный срок Заказчик обязан подписать переданные  ему документы или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от их  согласования. Мотивированный отказ должен содержать перечень выявленных  недостатков в результате работ, а также указание на необходимость их устранения и  сроки устранения.  

В случае, если по истечению 3 (трех) рабочих дней с даты получения  Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 данные документы не  будут им подписаны, но при этом Подрядчику не будет направлен мотивированный  отказ от их подписания, работы считаются принятыми и подлежат оплате в размере,  установленном разделом 2 настоящего Договора.  

В соответствии с договором ООО «Подъемник-О» 24.02.2022 года выполнил  работы (оказал услуги) на сумму 30 424,44 руб. (Тридцать тысяч четыреста двадцать  четыре рубля 44 копейки).  

 Должником подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору,  что подтверждает его обязательства по оплате в полном объеме.  

 До настоящего времени мотивированных документально подтвержденных  претензий от Должника по качеству и объему выполненных работ не получено.  Таким образом, в соответствии с положениями договора работы (услуги)  Подрядчика на сумму 30 424,44 руб. (Тридцать тысяч четыреста двадцать четыре  рубля 44 копейки) считаются принятыми и подлежат оплате.  

24 февраля 2022 года заключен договор подряда № 10-К от 24.02.2022 г. на  ремонт пассажирского лифта.  

Согласно пункту 1.1 договора Заказчик поручает Подрядчику выполнить  ремонт 10-ти пассажирских лифтов по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул.  Заводская, д. 18, корп. 1, п. 1-5 в объеме, указанном в Приложении № 1 к  настоящему Договору.  

Подрядчик в свою очередь обязуется выполнить работы, предусмотренные  Договором, в объеме, в сроки и с качеством согласно условиям Договора,  требованиям ГОСТ, ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и сдать их Заказчику  (п.1.2).  

Исходя из пункта 2.2. договора расчет за выполненные Подрядчиком работы  осуществляется в течение десяти банковских дней с момента подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

В соответствии с п. 5.3. договора Приемка выполненных работ производится в  течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки  выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и  затрат по форме № КС-3. В указанный срок Заказчик обязан подписать переданные  ему документы или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от их  согласования. Мотивированный отказ должен содержать перечень выявленных  недостатков в результате работ, а также указание на необходимость их устранения и  сроки устранения.  

В случае, если по истечению 3 (трех) рабочих дней с даты получения  Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 данные документы не  будут им подписаны, но при этом Подрядчику не будет направлен мотивированный  отказ от их подписания, работы считаются принятыми и подлежат оплате в размере,  установленном разделом 2 настоящего Договора.  

В соответствии с договором ООО «Подъемник-О» 24.02.2022 года выполнил  работы (оказал услуги) на сумму 41 680 руб. (Сорок одна тысяча шестьсот  восемьдесят рублей 00 копеек).  

 Должником подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору,  что подтверждает его обязательства по оплате в полном объеме.  

 До настоящего времени мотивированных документально подтвержденных  претензий от Должника по качеству и объему выполненных работ не получено.  Таким образом, в соответствии с положениями договора работы (услуги)  Подрядчика на сумму 41 680 руб. (Сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей  00 копеек) считаются принятыми и подлежат оплате.  

24 ноября 2021 года заключен договор подряда № 134-К от 24.11.2021 г. на  ремонт пассажирского лифта.  

Согласно пункту 1.1 договора Заказчик поручает Подрядчику выполнить  ремонт пассажирского лифта г/п 1000 кг на 19 остановок зав. № 62086 по адресу:  Московская обл., г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18, корп. 1, п. 4 в объеме,  указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

Подрядчик в свою очередь обязуется выполнить работы, предусмотренные  Договором, в объеме, в сроки и с качеством согласно условиям Договора,  требованиям ГОСТ, ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и сдать их Заказчику  (п.1.2).  

Исходя из пункта 2.2. договора расчет за выполненные Подрядчиком работы  осуществляется в течение десяти банковских дней с момента подписания Сторонами  

Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

В соответствии с п. 5.3. договора Приемка выполненных работ производится в  течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки  выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и  затрат по форме № КС-3. В указанный срок Заказчик обязан подписать переданные  ему документы или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от их  согласования. Мотивированный отказ должен содержать перечень выявленных  недостатков в результате работ, а также указание на необходимость их устранения и  сроки устранения.  

В случае, если по истечению 3 (трех) рабочих дней с даты получения  Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 данные документы не  будут им подписаны, но при этом Подрядчику не будет направлен мотивированный  отказ от их подписания, работы считаются принятыми и подлежат оплате в размере,  установленном разделом 2 настоящего Договора.  

В соответствии с договором ООО «Подъемник-О» в период с 24.11.2021 по  20.12.2021 года выполнил работы (оказал услуги) на сумму 30 424,44 руб. (Тридцать  тысяч четыреста двадцать четыре рубля 44 копейки).  

 Должником подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору,  что подтверждает его обязательства по оплате в полном объеме.  

 До настоящего времени мотивированных документально подтвержденных  претензий от Должника по качеству и объему выполненных работ не получено.  Таким образом, в соответствии с положениями договора работы (услуги)  Подрядчика на сумму 30 424,44 руб. (Тридцать тысяч четыреста двадцать четыре  рубля 44 копейки) считаются принятыми и подлежат оплате.  

24 ноября 2021 года заключен договор подряда № 135-К от 24.11.2021 г. на  ремонт пассажирского лифта.  

Согласно пункту 1.1 договора Заказчик поручает Подрядчику выполнить  ремонт пассажирского лифта г/п 630 кг на 22 остановки зав. № 36826 по адресу:  Московская обл., г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18, корп. 1, и. 5 в объеме,  указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору. Подрядчик в свою очередь  обязуется выполнить работы, предусмотренные Договором, в объеме, в сроки и с  качеством согласно условиям Договора, требованиям ГОСТ, ТР ТС 011/2011  «Безопасность лифтов» и сдать их Заказчику (п.1.2).  

Исходя из пункта 2.2. договора расчет за выполненные Подрядчиком работы  осуществляется в течение десяти банковских дней с момента подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

В соответствии с п. 5.3. договора Приемка выполненных работ производится в  течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки  выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и  затрат по форме № КС-3. В указанный срок Заказчик обязан подписать переданные  ему документы или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от их  согласования. Мотивированный отказ должен содержать перечень выявленных  недостатков в результате работ, а также указание на необходимость их устранения и  сроки устранения.  

В случае, если по истечению 3 (трех) рабочих дней с даты получения  Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 данные документы не  будут им подписаны, но при этом Подрядчику не будет направлен мотивированный  отказ от их подписания, работы считаются принятыми и подлежат оплате в размере,  установленном разделом 2 настоящего Договора.  

В соответствии с договором ООО «Подъемник-О» в период с 24.11.2021 по  22.12.2021 года выполнил работы (оказал услуги) на сумму 12 472,29 руб.  (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят два рубля 29 копеек).  

 Должником подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по договору,  что подтверждает его обязательства по оплате в полном объеме.  

 До настоящего времени мотивированных документально подтвержденных  претензий от Должника по качеству и объему выполненных работ не получено.  Таким образом, в соответствии с положениями договора работы (услуги)  Подрядчика на сумму 12 472,29 руб. (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят два  рубля 29 копеек) считаются принятыми и подлежат оплате.  

ООО «Подъемник-О» неоднократно предпринимались попытки досудебного  урегулирования данного спора, как в порядке устных переговоров, так и путем  направления письменной претензии. Однако до настоящего времени ООО  "Территория счастья и Комфорта" свою задолженность не погасило, что послужило  основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.  

Правоотношения сторон регулируются гл. 39 ГК РФ. 

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по  заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или  осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской  Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке,  которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии  с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

Факт оказания истцом услуг подтверждается материалами дела. 

В соответствии с ч 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными  другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Ответчик не оспорил в рамках настоящего дела обстоятельства, на которые  ссылается истец обоснование своих требований.  

Поскольку ответчик не оспорил наличие задолженности и ее размер,  мотивированного отзыва с возражениями относительно заявленных требований не  представил, в силу ч. 3.1. ст. 70 ПК РФ задолженность ответчика считается им  признанной.  

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, Неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об  уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Представленный истцом расчет произведен исходя из суммы долга 

правомерного периода просрочки, проверен судом и является правильным.  

Учитывая факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по  оплаты оказанных услуг, суд признает требование истца о взыскании неустойки  обоснованным и подлежащим удовлетворению. Оснований для применения ст. 333  ГК РФ не имеется и ответчиком не заявлено. Следовательно, неустойка подлежит  взысканию в полном объеме.  

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле,  в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с ООО "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ И КОМФОРТА" (ИНН  

7714463046) в пользу ООО "ПОДЪЕМНИК-О" (ИНН 5024087218) задолженность в  

размере 263 898,97 руб., неустойку в размере 85 390,93 руб. и расходы по  

госпошлине в размере 9 986 руб. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд  

в порядке, установленном ч. 4 ст. 229 АПК РФ. 

Судья   А.О. Уваров