АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2997/2024

г. Чебоксары

06 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2024 года.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Эскиз" Россия 428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Байдула, д. 10, пом. 8, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

к казенному учреждению Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Россия 428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пл. Красная д. 3, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

о взыскании 1 090 118 руб. 00 коп.,

при участии:

от истца ФИО1, директора, 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 09.01.2024 №05 (сроком до 31.12.2024),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Эскиз" обратилось в арбитражный суд с иском к казенному учреждению Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о взыскании 1 090 118 руб., в том числе:

- 173106 руб. долга за второй этап работ по государственному контракту №138-п/22 от 14.06.2022;

- 917012 руб. долга за второй этап работ по государственному контракту №155-п/22 от 04.07.2022.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика иск не признала по доводам, приведенным в отзыве. Пояснила, что по государственному контракту №138-п/22 от 14.06.2022 положительное заключение экспертизы, отчетная документация по результатам инженерных изысканий и проектная документация были переданы Ответчику по накладной №3, однако 25.12.2023 Ответчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта №138-п/22. Вышеуказанное решение о расторжении государственного контракта вступило в силу, и не было оспорено Истцом в судебном порядке. Поскольку Истец выполнил работы по 2-ому этапу лишь 18.01.2024, т.е. уже после расторжения контракта и за пределами срока действия государственного контракта, то работы не могут быть оплачены Ответчиком, как в связи с расторжением государственного контракта, так и в связи с отсутствием доведенных лимитов по объекту. По государственному контракту №155-п/22 от 04.07.2022 положительное заключение экспертизы, отчетная документацию по результатам инженерных изысканий и проектная документация были переданы Ответчику по накладной №3, однако 25.12.2023 Ответчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта №155-п/22. Вышеуказанное решение о расторжении государственного контракта вступило в силу, и не было оспорено Истцом в судебном порядке. Поскольку Истец выполнил работы по 2-ому этапу лишь 01.02.2024, т.е. уже после расторжения контракта и за пределами срока действия государственного контракта, то работы не могут быть оплачены Ответчиком как в связи с расторжением государственного контракта, так и в связи с отсутствием доведенных лимитов по объекту.

Ввиду отсутствия возражений сторон суд в силу части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание суда первой инстанции.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14.06.2022 казенное учреждение Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Эскиз" (исполнитель) заключили государственный контракт №138-п/22, по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на разработку проектной документации по объекту «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Устройство тротуара и остановочных площадок на участке км 34+500 - км 36+500 автомобильной дороги Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл) в Моргаушском районе Чувашской Республики» в соответствии с Описанием объекта закупки (Заданием) (Приложение № 1 к Контракту) и Календарным графиком представления документации на рассмотрение Заказчику (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Согласно пункту 4.1 контракта от 14.06.2022 общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 681339 руб. 75 коп.

В пункте 6.1 контракта от 14.06.2022 стороны предусмотрели следующие сроки выполнения работ: начало - с даты заключения контракта, окончание - 12 декабря 2022 года. 

В соответствии с пунктом 5.1 контракта от 14.06.2022 в редакции дополнительного соглашения №1 от 20.12.2022 к контракту заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств республиканского бюджета в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на данные цели в 2022 году - 508233 руб. 75 коп., в 2023 году - 173106 руб. 00 коп.

Согласно пунктами 5.2 – 5.4 контракта от 14.06.2022 оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в соответствии с Календарным графиком представления проектной документации на рассмотрение Заказчику (Приложение №2 к Контракту). Оплата работ производится на основании представленной Исполнителем проектной документации в установленном порядке и принятой Заказчиком на рассмотрение. Проектная документация передается Исполнителем на рассмотрение Заказчику по накладной на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на диске в формате, допускающем ее редактирование не позднее 28 числа календарного месяца. Окончательная оплата работ производится после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки от Исполнителя, получения полного комплекта готовой, согласованной во всех контрольных, надзорных и иных надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти проектной документации в полном объеме, устранения Исполнителем всех замечаний. Проектная документация, с оформленными в установленном порядке гарантийными обязательствами, передается Исполнителем Заказчику по накладной на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и в электронном виде на диске в формате, допускающем ее редактирование. Оплата выполненных работ производится на основании представленных Исполнителем подписанных сторонами акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, по форме установленной контрактом (Приложение №3 к Контракту), а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры (при наличии) путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств республиканского бюджета. 

По государственному контракту №138-п/22 от 14.06.2022 согласно акту сдачи-приемки результатов выполненных работ №1 от 16.12.2022 в соответствии с накладной №1 от 16.12.2022 исполнитель сдал, а заказчик принял документацию (первый этап работ «Инженерные изыскания, проектные работы с получением положительного заключения госэкспертизы (проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости)»), стоимость работ составила 508233,75 руб. Данные работы оплачены ответчиком по платежному поручению № 407854 от 19.12.2022 на сумму 508233,75 руб.

Согласно акту сдачи-приемки результатов выполненных работ №2 от 19.02.2024 в соответствии с накладной №3 от 18.01.2024 исполнитель передал заказчику документацию (второй этап работ «Проектные работы по выполнению проекта планировки территории и проекта межевания территории», положительное заключение экспертизы, отчетная документация по результатам инженерных изысканий и проектная документация), стоимость работ составила 173106 руб. Данные работы ответчиком не оплачены.

04.07.2022 казенное учреждение Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Эскиз" (исполнитель) заключили государственный контракт №155-п/22, по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение проектной и изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильной дороги по улицам Центральная и Красноармейская села Тогаево Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» в соответствии с Описанием объекта закупки (Заданием) (Приложение №1 к Контракту) и Календарным графиком представления документации на рассмотрение Заказчику (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Согласно пункту 4.1 контракта от 04.07.2022 общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 1727663 руб. 00 коп.

В пункте 6.1 контракта от 04.07.2022 стороны предусмотрели следующие сроки выполнения работ: начало - с даты заключения контракта, окончание – 10 февраля 2023 года. 

В соответствии с пунктом 5.1 контракта от 04.07.2022 заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств республиканского бюджета в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на данные цели в 2022 году - 810651 руб. 00 коп., в 2023 году - 917012 руб. 00 коп.

Согласно пункту 5.2 – 5.4 контракта от 04.07.2022 оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в соответствии с Календарным графиком представления проектной документации на рассмотрение Заказчику (Приложение №2 к Контракту). Окончательная оплата работ производится после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки от Исполнителя, получения полного комплекта готовой, согласованной во всех контрольных, надзорных и иных надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти проектной документации в полном объеме, устранения Исполнителем всех замечаний. Оплата выполненных работ производится на основании представленных Исполнителем подписанных сторонами акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, по форме установленной контрактом (Приложение №3 к Контракту), а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры (при наличии) путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств республиканского бюджета. 

По государственному контракту №155-п/22 от 04.07.2022 согласно акту сдачи-приемки результатов выполненных работ №1 от 11.11.2022 исполнитель сдал, а заказчик принял документацию (первый этап работ «Инженерно-изыскательские работы, в том числе: сбор исходных данных, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, археологические изыскания»), стоимость работ составила 810651 руб. Данные работы оплачены ответчиком по платежному поручению №358434 от 14.11.2022 на сумму 810651 руб.

Согласно акту сдачи-приемки результатов выполненных работ от 19.02.2024 в соответствии с накладной №3 от 01.02.2024 исполнитель передал заказчику документацию (второй этап работ «Проектные работы с получением положительного заключения госэкспертизы (проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости)», положительное заключение экспертизы, отчетная документация по результатам инженерных изысканий и проектная документация), стоимость работ составила 917012 руб. Данные работы ответчиком не оплачены.

Ненадлежащее исполнение обязательств по оплате явилось основанием для обращения в суда с иском.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт выполнения работ, их стоимость подтверждены представленными в материалы дела документами, и ответчиком не оспорены.

Довод ответчика о том, что истец выполнил работы по 2-ому этапу уже после расторжения контрактов, в связи с чем, работы не подлежат оплате, судом отклоняется, т.к. документы были переданы для прохождения государственной экспертизы до расторжения контрактов, т.е. фактически работы были выполнены до расторжения контрактов, какие-либо проектные работы после расторжения контрактов не выполнялись.

Доказательства оплаты работ ответчиком не представлены.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание наличие положительных заключений государственных экспертиза и потребительской ценности результата работ, требование истца о взыскании 1 090 118 руб. долга подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с казенного учреждения Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Эскиз" 1 090 118 (Один миллион девяносто тысяч сто восемнадцать) руб. долга, 23 901 (Двадцать три тысячи девятьсот один) руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.Е. Владимирова