АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

10 октября 2024 года

Дело № А33-18521/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 26 сентября 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 09 октября 2024 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сергеевой А.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «КЛМ АРТ» (ИНН 2465122735, ОГРН 1152468014467)

к обществу с ограниченной ответственностью «Алстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности № 45 от 19.01.2024, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермаковой О.С., 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «КЛМ АРТ» (далее – истец; ООО «КЛМ АРТ») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Алстрой»  (далее – ответчик; ООО «Алстрой») о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ в размере 41 957 739,04 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 25.06.2024 возбуждено производство по делу.

Протокольным определением от 31.07.2024 судебное заседание отложено на 26.09.2024.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в его отсутствие.

От истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков окончания работ в размере 29 038 165,87 руб.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме с учетом уточнения.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований принято судом.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв, после окончания которого лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО «КЛМ Арт» (заказчиком) и ООО «АлСтрой» (подрядчиком) заключен договор подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/01-07 (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить с использованием своего оборудования и материалов, работы по архитектурным решениям на объекте: «Оздоровительный комплекс и воздушных ванн», расположенном по адресу: Камчатский край, Елизовский район, ул. Санаторная, д. 21.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего договора (пункт 1.2 договора).

В пункте 1.3 договора указано место выполнения работ: 684034, 

<

...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора объем, содержание и перечень работ определены в локальных сметных расчетах № 1, № 2, № 3, № 4 (Приложение № 1 к договору). 

В пункте 1.8 договора работы по настоящему договору выполняются во исполнение государственного оборонного заказа, идентификационный код государственного оборонного заказа (ИГК) № 2122187376022554164000000 (шифр объекта В-26/18-36).

На правоотношения сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона № 275-Ф3 от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе» (пункт 1.9 контракта).

В силу пункта 2.1 цена договора составляет 72 376 225 руб., в том числе НДС 20 %.

Детализация стоимости работ приведена в локальных сметных расчетах № 1, № 2, № 3, № 4 (приложение № 1 к договору). 

В цену договора включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по  договору, в том числе: стоимость всех работ согласно договору, в том числе локального сметного расчета (приложение № 1); затраты, связанные с обеспечением строительства (реконструкции) рабочими, включая заработную плату, транспортные, командировочные расходы, питание, проживание, страхование; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых подрядчиком; накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения договора; все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения подрядчиком обязательств договору.

В пункте 2.8 договора указано, что оплата выполненных подрядчиком работ по договору производится заказчиком в течение 30 рабочих дней после подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ на основании оригинала счета. Заказчик вправе в течение 30 рабочих дней после подписания заказчиком оформленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригиналов счета и счета-фактуры произвести дополнительное финансирование.

Как указано в пункте 2.9 договора оплата выполненных подрядчиком работ по договору производится заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом договора за вычетом ранее перечисленного аванса, произведенного промежуточного финансирования, законных процентов до предела, не превышающего 95 % от цены договора.

В соответствии с пунктом 2.10 договора денежная сумма в размере 5 % от стоимости выполненных работ по договору, удерживается заказчиком по каждому акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в качестве обеспечения выполнения подрядчиком принятых на себя гарантийных обязательств в установленный договором гарантийный срок (гарантийное удержание). 

Согласно пункту 2.12 договора окончательный расчет по договору производится по истечении гарантийного срока, установленного пунктом 4.1 в течение 30 рабочих дней через 12 месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ, а также подписания заказчиком и подрядчиком протокола об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу по форме, установленной приложением № 2 к договору на основании оригинала счета. 

Гарантийное удержание может быть частично или полностью удержано заказчиком и не выплачиваться подрядчику в случаях если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные заказчиком.

Пунктом 3.1 договора установлен срок выполнения работ по настоящему договору.

Срок начала выполнения работ – 19.07.2021. 

Срок завершения выполнения работ – 20.02.2022. 

Датой выполнения всех обязательств подрядчика по договору (за исключением гарантийных) является дата приемки работ заказчиком и подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ. Подписание итогового акта приемки выполненных работ – в течение 15 дней с момента завершения строительно-монтажных работ (в редакции дополнительного соглашения от 10.02.2022 № 2 к договору).

В соответствии с пунктом 5.2 договора сдача-приемка выполненных работ подрядчиком и приемка их заказчиком производится в следующем порядке: сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые подрядчик представляет в срок не позднее 25 числа текущего (отчетного) месяца. 

В пункте 5.4 договора указано, что одновременно с предоставлением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подрядчик представляет заказчику сопроводительным письмом первичные учетные документы (заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, универсальных передаточных документов на оборудование и материалы, указанные в сметах «по прайс-листу», заверенные копии договоров по прочим затратам, включая технологические присоединения, договоров на авторский надзор и проектные работы и т.д.), а также надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на выполненные объемы работ. При сдаче выполненных работ подрядчик обязан предоставить документы (копии договоров, товарных накладных), подтверждающие стоимость приобретенных материалов (товаров). Заказчик при приемке работ и рассмотрении актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3 принимает стоимость материалов по ценам, указанным в прайс-листах, поименованных в локальном сметном расчете к настоящему договору. Если подрядчик приобрел материалы по цене выше, чем указано в прайс-листах, цена работ не подлежит увеличению. Приобретение и использование подрядчиком при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено в прайс-листах, не является экономией подрядчика по смыслу пункта 1 статьи 710 ГК РФ.

Заказчик осуществляет приемку работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 30 рабочих дней со дня получения от подрядчика указанного акта. В случае если подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, и/или качество предъявляемых работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, заказчик в указанный в настоящем абзаце срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке соответствующих работ, возвращает исполнительную документацию и направляет требование об устранении выявленных в ходе приемки недостатков. Повторное рассмотрение заказчиком представленных подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документом в установленном настоящим пунктом порядке. 

В силу пункта 6.4 договора за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, включая промежуточные сроки, подрядчик уплачивает заказчику на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки выполнения работ и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме, включая день исполнения обязательства.

Настоящий договор действует до 31.12.2023 включительно. В случае, если сторонами не исполнены свои обязательства по договору до окончания этого срока, то договор продолжает действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, в т.ч. гарантийных обязательств подрядчика. Действие настоящего договора распространяются на фактические правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2020. Продление срока действия договора не влечет продления срока выполнения работ по договору (пункт 11.2 договора в редакции дополнительного соглашения от 05.04.2023 № 3 к договору).

Сторонами подписаны локальные сметные расчеты № 07-01-02 на сумму 51 696 руб., № 03-03-01 на сумму 676 267,56 руб., № 03-01-01 на сумму 17 817 003,6 руб., № 02-01-01 на сумму 55 621 598,4 руб. с учетом изменения стоимость работ на общую сумму 74 166 565,56 руб. 

Во исполнение обязательств по договору подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 74 166 565,56 руб., в подтверждение чего представлены подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 05.08.2021 № 1, от 05.08.2021 № 2, от 05.08.2021 № 3, от 26.08.2021 № 4, от 26.08.2024 № 5, от 26.08.2021 № 6, от 26.08.2021 № 7,от 26.08.2021 № 8, от 28.09.2021 № 9, от 26.10.2021 № 10, от 26.10.2021 № 11, от 26.10.2021 № 12, от 23.12.2021 № 13, от 21.03.2022 № 12, от 21.03.2022 № 13, от 21.03.2022 № 14, от 01.08.2022 № 16, от 05.12.2022 № 19, от 12.10.2023 № 21, от 12.10.2023 № 20, от 12.10.2023 № 22, от 12.10.2023 № 23, от 12.10.2023 № 24, справки о стоимости выполненных работ от 26.08.2021 № 2, от 28.09.2021 № 3, от 26.10.2021 № 4, от 23.12.2021 № 5, от 31.03.2022 № 6, от 01.08.2022 № 7, от 05.12.2022 № 8, от 12.10.2023 № 9, от 12.10.2023 № 10. 

Платежными поручениями от 25.08.2021 № 2529 на суму 20 000 000 руб., от 06.12.2021 № 3903 на сумму 4 000 000 руб., от 10.01.2022 № 4 на сумму 1 000 000 руб., от 14.01.2022 № 108 на сумму 2 000 000 руб., от 18.01.2022 № 117 на сумму 500 000 руб., от 20.01.2022 № 150 на сумму 2 000 000 руб., от 31.01.2022 № 353 на сумму 3 500 000 руб., от 23.03.2022 № 1178 на сумму 500 000 руб., от 25.05.2022 № 1874 на сумму 1 500 000 руб., от 07.06.2022 № 2059 на сумму 1 428 634,08 руб., от 09.06.2022 № 2087 на сумму 554 240,40 руб., от 20.07.202 № 2580 на сумму 2 000 000 руб., от 11.08.2022 № 2892 на сумму 1 500 000 руб., от 16.05.2023 № 1637 на сумму 2 000 000 руб., от 09.08.2023 № 2656 на сумму 6 460 000 руб., от 27.09.2023 № 3249 на сумму 1 000 000 руб., от 01.11.2023 № 3623 на сумму 2 127 230,42 руб., от 02.11.2023 № 3638 на сумму 20 173 000 руб. заказчик произвел оплату работ.

Сторонами 08.11.2023 подписано соглашение о зачете взаимных требований, в соответствии которым стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований на сумму 4 400 000 руб. (пункт 1 соглашения).

В соответствии с пунктом 2 соглашения о зачете взаимных требований на момент подписания соглашения стороны имеют друг к другу следующие требования:

- у стороны - 1 существует требование к стороне - 2, возникшее на основании договора подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/01-07, в соответствии с которым сторона - 2 должна оплатить стороне - 1 денежные средства 9 923 453,69 руб. (пункт 2.1 соглашения о зачете);

- у стороны - 2 существует требование к стороне - 1, возникшее на основании договора подряда от 20.07.2020 № 588-07-2020, в соответствии с которым сторона - 1 должна оплатить стороне - 2 денежные средства в размере 4 400 000 руб. (пункт 2.2 соглашения о зачете). 

К моменту подписания настоящего соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п. 2.1, п. 2.2. настоящего соглашения, уже наступил (пункт 3 соглашения о зачете).

Согласно пунктам 4 – 4.2 соглашения о зачете 4.  стороны договорились прекратить встречные однородные обязательства в следующем порядке:

- стороны договорились полностью прекратить обязательства стороны - 1 перед стороной - 2 в размере 4 400 000 руб., вытекающие из договора подряда от 20.07.2020 № 588-07-2020; 

- стороны договорились частично прекратить обязательства стороны - 2 перед стороной - 1 на сумму 4 400 000 руб., вытекающие из договора подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/01-07. 

Как указано в пунктах 5-5.2 соглашения после проведения зачета встречных однородных требований в соответствии с п. 4.1., п. 4.2. размер оставшихся требований по указанным договорам, на дату подписания настоящего соглашения, составляет:

- у стороны - 1 перед стороной - 2 по договору подряда от 20.07.2020 № 588-07-2020 задолженность отсутствует; 

- у стороны - 2 перед стороной - 1 по договору подряда от 19.07.2021 № 2122187376022554164000000/01-07 в размере 5 523 453,69 руб. 

Датой зачета является дата подписания соглашения (пункт 6 соглашения о зачете).

В материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 15.05.2024, согласно которому на 15.05.2024 по договору конечное сальдо составляет 3 708 328,28 руб., что является суммой гарантийного удержания в размере 5 %.

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ заказчик обратился к подрядчику с претензией от 18.04.2024 № 117 об оплате неустойки.

Заказчиком также направлено подрядчику уведомление о зачете взаимных требований от 15.05.2024 № 62, согласно которому ООО «КЛМ АРТ» имеет задолженность перед ООО «АЛСТРОЙ», которая подтверждается следующими документами: 

Документ подтверждающий

Сумма зачета

Наименование услуги

Договор №

2122187376022554164000 000/01-07 от 19.07.2021

номер

дата

23101201

12.10.2023

1 742 027,96

Услуги

23101202

12.10.2023

73 097,46

Услуги

Итого:

1 815 125,42

ООО «АЛСТРОЙ» имеет задолженность перед ООО «КЛМ АРТ», которая подтверждается следующими документами: 

Документ, подтверждающий

Наименование

услуги

Договор №

2122187376022554164000 000/01-07 от 19.07.2021

Номер 

Дата 

Исх 117

18.04.2024

1 815 125,42

Услуги, претензия

Итого

1 815 125,42

Согласно почтовой квитанции и описи вложения в письмо уведомление о зачете встречных требований от 15.05.2024 № 62 направлено подрядчику 20.05.2024.

Ссылаясь на выполнение работ с нарушением срока, частичный зачет суммы начисленной неустойки, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ в размере 29 038 165,87 руб. (с учетом уточнения).

Ответчик отзыв на исковое заявление с указанием возражений по существу заявленных требований не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора. 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регламентированы главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Во исполнение обязательств по договору подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 74 166 565,56 руб., в подтверждение чего представлены подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 05.08.2021 № 1, от 05.08.2021 № 2, от 05.08.2021 № 3, от 26.08.2021 № 4, от 26.08.2024 № 5, от 26.08.2021 № 6, от 26.08.2021 № 7,от 26.08.2021 № 8, от 28.09.2021 № 9, от 26.10.2021 № 10, от 26.10.2021 № 11, от 26.10.2021 № 12, от 23.12.2021 № 13, от 21.03.2022 № 12, от 21.03.2022 № 13, от 21.03.2022 № 14, от 01.08.2022 № 16, от 05.12.2022 № 19, от 12.10.2023 № 21, от 12.10.2023 № 20, от 12.10.2023 № 22, от 12.10.2023 № 23, от 12.10.2023 № 24, справки о стоимости выполненных работ от 26.08.2021 № 2, от 28.09.2021 № 3, от 26.10.2021 № 4, от 23.12.2021 № 5, от 31.03.2022 № 6, от 01.08.2022 № 7, от 05.12.2022 № 8, от 12.10.2023 № 9, от 12.10.2023 № 10. 

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.02.2022 № 2 к договору) установлен срок завершения выполнения работ – 20.02.2022. 

Как следует из представленных в материалы дела документов, работы выполнены с нарушением срока 12.10.2023, о чем свидетельствует подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ от 12.10.2023.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ, истец обратился в арбитражный суд с требованиями о взыскании неустойки в размере 29 038 165,87 руб. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме. 

В силу пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

В силу пункта 6.4 договора за нарушение подрядчиком» сроков выполнения работ, включая промежуточные сроки, подрядчик уплачивает заказчику на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки выполнения работ и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме, включая день исполнения обязательства.

Согласно части 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. В части 3 указанной статьи установлено, что цена работ может быть определена путем оставления сметы.

В силу пункта 2.1 цена договора составляет 72 376 225 руб., в том числе НДС 20 %. Детализация стоимости работ приведена в локальных сметных расчетах № 1, № 2, № 3, № 4 (приложение № 1 к договору). 

Согласно представленным в дело документам, сторонами подписаны локальные сметные расчеты № 07-01-02 (изм.1) на сумму 51 696 руб., № 03-03-01 (изм.1) на сумму 676 267,56 руб., № 03-01-01 (изм.1) на сумму 17 817 003,6 руб., № 02-01-01 (изм.1) на сумму 55 621 598,4 руб., итого на общую сумму 74 166 565,56 руб. без подписания дополнительного соглашения.

Более того, как было отмечено ранее, сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на сумму 74 166 565,56 руб.,

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что сторонами внесены изменения в договор в части цены договора на основании подписанных локальных сметных расчетов, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, следовательно, цена договора составляет 74 166 565,60 руб. 

Согласно представленному истцом расчету за нарушение срока выполнения работ по договору истцом начислена неустойка на сумму 29 038 165,87 руб., исходя из расчета: 74 166 565,60 руб. (цена договора) х 0,1% (размер пени, установленный пунктом 6.4 договора) х 413 (дни просрочки за период с 21.02.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 12.10.2023) – 1 815 125,42 руб. (произведенный истцом зачет встречных требований).

Ответчиком расчет неустойки не оспорен, контррасчет не представлен.

Судом установлено, что при расчете неустойки истцом учтены положения постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

В указанном истцом периоде просрочки количество дней просрочки составляет 39 дней и 376 дней (415 дней) с 21.02.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 12.10.2023 соответственно, однако начисление неустойки исходя из меньшего количества дней является правом истца и законных интересов не нарушает.

Проверив расчет неустойки, суд признал его арифметически неверным, поскольку исходя из показателей, указанных в расчете сумма неустойки составит 28 815 666,17 руб. (74 166 565,60 руб. (цена договора) х 0,1% х 413 (количество дней просрочки) – 1 815 125,42 руб. (зачет) = 30 630 791,59 руб. (сумма неустойки) - 1 815 125,42 руб. (зачет).

Учитывая вышеизложенное, требования истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ подлежит частичному удовлетворению на сумму 28 815 666,17 руб. Оснований для удовлетворения требований в остальной части у суда не имеется.

Размер государственной пошлины за рассмотрение иска с учетом уточнения на сумму 29 038 165,87 руб. составляет 168 191 руб. 

Истцом при обращении с настоящим иском в суд оплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб. по платежному поручению от 17.06.2024 № 1491.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Учитывая результат рассмотрения спора: частичное удовлетворение требований на 99,23 %, - 166 902,27 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, 1 288,73 руб. судебных расходов по оплате госпошлины подлежат отнесению на истца, 31 809 руб. излишне уплаченной государственной пошлины подлежит возвращению истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КЛМ АРТ» 28 815 666,17 руб. неустойки, 166 902,27 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «КЛМ АРТ» из федерального бюджета 31 809 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.Ю. Сергеева