АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

14 октября 2025 года

Дело № А33-23124/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

принять заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 об уточнении исковых требований от 04.09.2025 в части обязания публичного акционерного общества «Россети Сибири» в срок не позднее одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществить технологическое присоединение для электроснабжения Нежилой застройки, расположенной по адресу: 

<

...> кадастровый номер: 24:11:0340106:516. Принадлежащей ФИО1, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопрйнимающих устройств, объектов электроэнергетики с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт.; -категория надежности третья;

-  класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

-    максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

- год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025 г.;

-    точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 100 кВт;

Линия (0.4) проектируемая

ТП КТП 10/0,4 кВ, 250 кВА 63-8-64

Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино

ПС ПС 35 кВ Элита №63

- Основной источник питания: ПС 35 кВ Элита № 63.

- Резервный источник питания: отсутствует;

взыскании с публичного акционерного общества «Россети Сибири» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойки за несвоевременное выполнение обязательств по договору в сумме 24 724,36 руб.; взыскании с публичного акционерного общества «Россети Сибири» в пользу ФИО1 судебной неустойки за неисполнение решения суда в части невыполнения технологическое присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 «Нежилой застройки (хозяйственная постройка, нежилое здание)», расположенной по адресу: 

<

...> кадастровый номер: 24:11:0340106:516 в соответствии с условиями Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 8 000 руб. за каждый день неисполнения до момента подписания обоими сторонами акта технологического присоединения.

В удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о снижении размера договорной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и об установлении срока для исполнения обязательств не менее 6 месяцев, отказать. 

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществить технологическое присоединение для электроснабжения нежилой застройки, расположенной по адресу: 

<

...> кадастровый номер: 24:11:0340106:516, принадлежащей ФИО1, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт.; -категория надежности третья;

-  класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

-    максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

-  год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025 г.;

- точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 100 кВт;

Линия (0.4) проектируемая

ТП КТП 10/0,4 кВ, 250 кВА 63-8-64

Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино

ПС ПС 35 кВ Элита №63

-  Основной источник питания: ПС 35 кВ Элита № 63.

- Резервный источник питания: отсутствует.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 24 724,36 руб.  неустойки, а также 25 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

В случае неисполнения решения суда в течение 30 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу,  взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день неисполнения вступившего в силу судебного акта по настоящему делу, подлежащую исчислению со дня, следующего за днем,  установленным судом для исполнения обязательства, по день его фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании судебной неустойки  отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2