РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва                                                                              Дело № А40-28966/19-5-267

23.08.2019 г.

Резолютивная часть решения оглашена 16.08.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 23.08.2019 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Акционерного общества «Компания ЭМК-Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 26.08.2002, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 119991, 

<

...>)

к ответчику: Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 30.11.2007, ИНН: 

<

***>, адрес: 101000, 

<

...>)

о взыскании 4 455 927 руб. 63 коп. 

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2; дов. от 01.04.2019;

от ответчика: ФИО3; дов. от 16.05.2019, № Д-92;

УСТАНОВИЛ:

АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» о взыскании по договорам субподряда гарантийной суммы в размере  4 455 927  руб. 63 коп. 

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал, по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» (далее «Истец», «Новый Подрядчик», «Субподрядчик») и АО «ТЭК Мосэнерего» (далее «Ответчик», «Генподрядчик») возникли правовые отношения на основании следующих договоров субподряда: № 06/Т20/13-9341 от 17.06.2013, № 06/Т20/13-18473 от 26.07.2013, № 06/Т20/13-18506 от 03.09.2013, № 06Л70/13-18511 от 13.09.2013, № 06/Т20/13-18572 от 10.12.2013, № 06/Т20/15-61256 от 11.09.2015, № 06ЛГ20/14-60349 от 23.09.2014, № 06ЛГ20/14-60404 от 22.10.2014.

Объектом указанных договоров подряда является Энергоблок ПГУ-420 МВт ТЭЦ-20 - филиала ОАО «Мосэнерго» на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 420 МВт, тепловой мощностью не менее 220 Гкал/ч, включающий в себя, в том числе, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, который в результате реализации Договора подряда будет располагаться в границах земельного участка, имеющего адресные ориентиры: РФ, 

<

...>.

Истец указывает, что в рамках данных правовых отношений у Ответчика возникла задолженность перед Истцом по оплате Гарантийного платежа в общей сумме 4 455 927,63 руб.

В обоснование заявленных требований Истец указывает, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест» и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/13-9341 от 17.06.2013.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 9341, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте земляные работы по устройству обетонировки циркводоводов в районе 14 оси Главного корпуса и передать Генподрядчику результат выполнения Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 4.1.  Договора субподряда 9341, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ: дата начала выполнения работ - 17.06.2013, дата завершения Работ по Договору - 18.06.2013.

В соответствии с п. 3.1. Договора субподряда 9341, общая цена Договора является твердой и составляет 2 743 422, 59 руб.

Согласно п. 8.1.2. Договора субподряда 9341, 10% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являются гарантийной суммой и оплачиваются в следующем порядке: согласно п. 8.1.2.1., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.2.2., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут выплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика, в течение 30 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 1.1.3. Договора субподряда 9341, Гарантийным сроком по Договору является срок гарантийной эксплуатации выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора к полноте и качеству Работ, в течение которого выполненные Работы должны соответствовать требованиям Договора и в течение которого Субподрядчик безвозмездно устраняет недостатки (дефекты), которые явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств Договору.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 9341, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Также истец указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест», Истцом и Ответчиком заключено Соглашение № 6/Т20/14-60044 от 03.02.2014 о замене стороны по Договору субподряда № 06/Т20/13-9341 от 17.06.2013, согласно п. 1.3. которого, Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику, а Новый Подрядчик принимает на себя и соглашается выполнить все оставшиеся и подлежащие исполнению обязательств Прежнего Подрядчика перед Генподрядчиком по Договору, а также принимает все права Прежнего Подрядчика, возникшие на основании и в связи с Договором, в полном объеме, с учетом сопутствующих прав на применение мер ответственности, и на тех условиях, которые существуют к моменту заключения Соглашения. Генподрядчик, в свою очередь, обязуется выполнить все свои оставшиеся и подлежащие исполнению обязательства по Договору. 

Согласно п. 2.1. Соглашения 60044, Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения Прежним Подрядчиком работы выполнены по Договору в полном объеме на общую сумму 2 743 422, 59 руб., при этом, у Генподрядчика перед Прежним Подрядчиком имеется задолженность по оплате Гарантийной суммы в размере 274 342, 26 руб., которая составляет 10% от стоимости выполненных работ. 

Согласно п. 3.1. Соглашения 60044, Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику право требования оплаты Гарантийной суммы по Договору в размере 274 342,26 руб., указанной в п. 2.4. Договора, которая подлежит оплате Генподрядчиком в пользу Нового Подрядчика на условиях и в сроки, установленные в Договоре.

Обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 9341, по выполнению и сдаче работ полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016, подписанным Ответчиком без замечаний.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 9341, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены.

Истец утверждает, что на основании вышеуказанного, у Ответчика имеется обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 9341, на сумму 274 342, 26 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 16 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 9341 на сумму 274 342, 26 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований истец указывает, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест» и Ответчиком заключен Договор субподряда 06/Т20/13-18473 от 26.07.2013.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 18473, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по устройству фундаментов под каркас и фундаментов котлов резервной водогрейной котельной ПГУ-420Т ТЭЦ-20 - филиал ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 18473 в редакции Дополнительного соглашения № 9, общая цена Договора составляет 41 840 581, 07 руб.

Согласно п. 4.1. Договора субподряда 18473 в редакции Дополнительного соглашения № 8, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения Работ: Дата начала выполнения Работ: 01.08.2013; Дата завершения Работ по Договору: 15.10.2015.

Согласно п. 8.1.2. Договора субподряда 18473, 10% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являются гарантийной суммой и оплачиваются в следующем порядке:

Согласно п. 8.1.2.1., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.2.2., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут выплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика, в течение 30 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 1.1.3. Договора субподряда 18473, Гарантийным сроком по Договору является срок гарантийной эксплуатации выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора к полноте и качеству Работ, в течение которого выполненные Работы должны соответствовать требованиям Договора и в течение которого Субподрядчик безвозмездно устраняет недостатки (дефекты), которые явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств Договору.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 18473, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Истец также указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест», Истцом и Ответчиком заключено Соглашение № 06/Т20/14-60043 от 12.02.2014 о замене стороны по Договору субподряда № 06/Т20/13-18473 от 26.07.2013, согласно которому, Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику, а Новый Подрядчик принимает на себя и соглашается выполнить все оставшиеся и подлежащие исполнению обязательств Прежнего Подрядчика перед Генподрядчиком по Договору, а также принимает все права Прежнего Подрядчика, возникшие на основании и в связи с Договором, в полном объеме, с учетом сопутствующих прав на применение мер ответственности, и на тех условиях, которые существуют к моменту заключения Соглашения. Генподрядчик, в свою очередь, обязуется выполнить все свои оставшиеся и подлежащие исполнению обязательства по Договору.

Согласно п. 2.1.1. Соглашения 60043, Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения Прежним Подрядчиком выполнены работы на общую сумму в размере 25 967 678, 97 руб. 

Согласно п. 2.5.2. Соглашения 60043, Стороны подтверждают, что у Генподрядчика перед Прежним Подрядчиком имеется задолженность по оплате Гарантийной суммы в размере 2 596 767, 89 руб., которая составляет 10% о стоимости выполненных работ, которая подлежит оплате Генподрядчиком в пользу Нового Подрядчика на условиях и в сроки, установленные в Договоре. 

Истец утверждает, что обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 18473, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 43 946 637, 40 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016, подписанным Ответчиком без замечаний.

Так из пояснений истца видно, что согласно п. 4 Акта, Стороны пришли к соглашению, что с учетом пункта 1 настоящего Акта цена Договора подлежит пересмотру и составляет 43 946 637, 40 руб. Согласно п. 5 Акта, сформированная на дату подписания настоящего Акта Гарантийная сумма составляет 4 394 663, 74 руб., что составляет 10% от стоимости выполненных работ.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 18473, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены. В соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 18473, на сумму 4 394 663, 74 руб.

Истец утверждает, что данное обязательство не исполнено Ответчиком в полном объеме, в связи с чем сумма соответствующей задолженности перед Истцом составила 5 878, 00 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 истец направил в адрес Ответчика Счет № 17 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 18473 на сумму 5 878, 00 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований истец указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест» и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/13-18506 от 03.09.2013.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 18506, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по устройству лестниц, перегородок, отделке помещений и отмостки здания Главного корпуса Объекта и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 18506 в редакции Дополнительного соглашения № 5 (копия с приложениями прилагается), общая цена Договора является ориентировочной и составляет 33 895 881, 02 руб., включая НДС (18%) в размере 5 170 558, 12 руб.

Согласно п. 4.1. Договора субподряда 18506 в редакции Дополнительного соглашения № 5, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ, дата начала выполнения работ 02.09.2013, дата завершения работ по договору 31.12.2015.

Согласно п. 8.1.2. Договора субподряда 18506, 10% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являются гарантийной суммой и оплачиваются в следующем порядке:

Согласно п. 8.1.2.1., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.2.2., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут выплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика, в течение 30 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 1.1.3. Договора субподряда 18506, Гарантийным сроком по Договору является срок гарантийной эксплуатации выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора к полноте и качеству Работ, в течение которого выполненные Работы должны соответствовать требованиям Договора и в течение которого Субподрядчик безвозмездно устраняет недостатки (дефекты), которые явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств Договору.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 18506, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Истец также указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест», Истцом и Ответчиком заключено Соглашение № 06/Т20/14-60054 от 12.02.2014 о замене стороны по Договору субподряда № 06/Т20/13-18506 от 03.09.2013, согласно которому,  Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику, а Новый Подрядчик принимает на себя и соглашается выполнить все оставшиеся и подлежащие исполнению обязательств Прежнего Подрядчика перед Генподрядчиком по Договору, а также принимает все права Прежнего Подрядчика, возникшие на основании и в связи с Договором, в полном объеме, с учетом сопутствующих прав на применение мер ответственности, и на тех условиях, которые существуют к моменту заключения Соглашения. Генподрядчик, в свою очередь, обязуется выполнить все свои оставшиеся и подлежащие исполнению обязательства по Договору.

Согласно п. 2.1.1. Соглашения 60054, Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения Прежним Подрядчиком выполнены работы на общую сумму в размере 2 653 810, 48 руб., при этом, у Генподрядчика перед Прежним Подрядчиком имеется задолженность по оплате Гарантийной суммы в размере 265 381, 04 руб., которая составляет 10% о стоимости выполненных работ, и подлежит оплате Генподрядчиком в пользу Нового Подрядчика на условиях и в сроки, установленные в Договоре. 

Согласно п. 5.5. Соглашения 60054, с даты подписания Сторонами Соглашения: Согласно п. 5.5.1., права и обязанности Прежнего Подрядчика по Договору переходят к Новому Подрядчику.

Истец также пояснил, что обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 18506, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 33 895 881,02 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016, подписанным Ответчиком без замечаний.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 18506, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены. В соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 18506, на сумму 3 389 588, 10 руб.

Истец утверждает, что обязательство не исполнено Ответчиком в полном объеме, в связи с чем, сумма задолженности перед Истцом составила 290 352, 06 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 18 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 18506 на сумму 290 352, 06 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований указывает, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест» и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/13-18511 от 13.09.2013.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 18511, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по устройству: подземного хозяйства резервуара аварийного слива трансформаторного масла № 1; перекатки трансформаторов открытой установки трансформаторов; противопожарных перегородок Отрытой установки трансформаторов № 1,2; фундаментов трансформаторов Открытой установки трансформаторов № 1,2; подземного хозяйства компрессной установки ресиверов сжатого воздуха с изготовлением и установкой ограждения; подземной части эстакады на участие от т. 18 до т. 19; опорных конструкций токопроводов Отрытой установки трансформаторов № 1, № 2 ПГУ-420Т ТЭЦ-20 -филиал ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 18511 в редакции Дополнительного соглашения № 6 (копия с приложениями прилагается), общая цена Договора составляет 66 309 680, 06 руб., включая НДС (18%) в размере 10 115 035,94 руб.

Согласно п. 4.1. Договора субподряда 18511 в редакции Дополнительного соглашения № 6, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения Работ: Дата начала выполнения Работ: 15.09.2013; Дата завершения Работ по Договору: 30.01.2016.

Согласно п. 8.1.3. Договора субподряда 18511, 10% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являются гарантийной суммой и оплачиваются в следующем порядке:

Согласно п. 8.1.З.1., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.З.2., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут выплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика, в течение 30 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 18511, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Истец также указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест», Истцом и Ответчиком заключено Соглашение № 06/Т20/14-60045 от 12.02.2014  о замене стороны по Договору субподряда №06/Т20/13-18511 от 13.09.2013, согласно которому, Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику, а Новый Подрядчик принимает на себя и соглашается выполнить все оставшиеся и подлежащие исполнению обязательств Прежнего Подрядчика перед Генподрядчиком по Договору, а также принимает все права Прежнего Подрядчика, возникшие на основании и в связи с Договором, в полном объеме, с учетом сопутствующих прав на применение мер ответственности, и на тех условиях, которые существуют к моменту заключения Соглашения. Генподрядчик, в свою очередь, обязуется выполнить все свои оставшиеся и подлежащие исполнению обязательства по Договору

Согласно п. 2.1.1. Соглашения 60045, Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения Прежним Подрядчиком выполнены работы на общую сумму в размере 23 536 234, 52 руб.

Согласно п. 2.5.2. Соглашения 60045, Стороны подтверждают, что у Генподрядчика перед Прежним Подрядчиком имеется задолженность по оплате Гарантийной суммы в размере 2 353 623, 46 руб., которая составляет 10% о стоимости выполненных работ и подлежит оплате Генподрядчиком в пользу Нового Подрядчика на условиях и в сроки, установленные в Договоре. 

Истец утверждает, что обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 18511, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 66 001 930, 89 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016, подписанным Ответчиком без замечаний. Так, согласно п. 4 Акта, Стороны пришли к соглашению, что с учетом пункта 1 настоящего Акта цена Договора подлежит пересмотру и составляет 66 001 930, 89 руб.

Согласно п. 5 Акта, сформированная на дату подписания настоящего Акта Гарантийная сумма составляет 6 600 193, 10 руб., что составляет 10% от стоимости выполненных работ.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 18511, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены.

В соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 18511, на сумму 6 600 193, 10 руб. В свою очередь, данное обязательство не исполнено Ответчиком в полном объеме, в связи с чем, сумма задолженности перед Истцом составила 13 829,15 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 19 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 18511 на сумму 13 829, 15 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-ТОО 1, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований истец указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест» и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/13-18572 от 10.12.2013.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 18572, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по устройству полов в здании Главного корпуса для нужд строительства" энергоблока ПГУ-420Мвт на ТЭЦ-20 - филиал ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 2.2. Договора субподряда 18572, объем и перечень выполняемых Работ и их описание указаны в Техническом задании. Стоимость выполняемых Работ определена в Ведомости договорной цены. Последовательность и сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 18572 в редакции Дополнительного соглашения № 5 (копия с приложениями прилагается), общая цена Договора составляет 47 369 869, 31 руб., включая НДС (18%) в размере 7 225 912,27 руб.

Согласно п. 4.1. Договора субподряда 18572 в редакции Дополнительного соглашения № 6, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения Работ: Дата начала выполнения Работ: 10.01.2014; Дата завершения Работ по Договору: 30.11.2015.

Согласно п. 8.1.3. Договора субподряда 18572, 10% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являются гарантийной суммой и оплачиваются в следующем порядке: Согласно п. 8.1.З.1., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30 рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.3.2., 5% общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут выплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика, в течение 30 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 1.1.3. Договора субподряда 18572, Гарантийным сроком по Договору является срок гарантийной эксплуатации выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора к полноте и качеству Работ, в течение которого выполненные Работы должны соответствовать требованиям Договора и в течение которого Субподрядчик безвозмездно устраняет недостатки (дефекты), которые явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств Договору.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 18572, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Также истец указал, что между ООО «Холдинговая компания Топфлор-инвест», Истцом и Ответчиком заключено Соглашение № 06/Т20/14-60037 от 03.02.2014 о замене стороны по Договору субподряда № 06/Т20/13-18572 от 10.12.2013.

Согласно п. 1.3. Соглашения 60037, Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику, а Новый Подрядчик принимает на себя и соглашается выполнить все оставшиеся и подлежащие исполнению обязательств Прежнего Подрядчика перед Генподрядчиком по Договору, а также принимает все права Прежнего Подрядчика, возникшие на основании и в связи с Договором, в полном объеме, с учетом сопутствующих прав на применение мер ответственности, и на тех условиях, которые существуют к моменту заключения Соглашения. Генподрядчик, в свою очередь, обязуется выполнить все свои оставшиеся и подлежащие исполнению обязательства по Договору.

Согласно п. 2.1.1. Соглашения 60037, Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего Соглашения Прежним Подрядчиком выполнены работы на общую сумму в размере 234 732, 92 руб. 

Согласно п. 2.5.2. Соглашения 60037, Стороны подтверждают, что у Генподрядчика перед Прежним Подрядчиком имеется задолженность по оплате Гарантийной суммы в размере 23 473, 29 руб., которая составляет 10% о стоимости выполненных работ. Согласно п. 3.1.2. Соглашения 60037, Прежний Подрядчик передает Новому Подрядчику право требования оплаты Гарантийной суммы по Договору в размере 23 473, 29 руб., указанной в п. 2.5.2. Договора.

Согласно п. 3.2.2. Соглашения 60037, Гарантийная сумма в размере 23 473, 29 руб. подлежит оплате Генподрядчиком в пользу Нового Подрядчика на условиях и в сроки, установленные в Договоре. Согласно п. 5.5. Соглашения 60037, с даты подписания Сторонами Соглашения: Согласно п. 5.5.1., права и обязанности Прежнего Подрядчика по Договору переходят к Новому Подрядчику; Согласно п. 5.5.2., субподрядчиком по Договору становится Новый Подрядчик.

Истец утверждает, что Обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 18572, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 47 369 869, 31 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016 (копия прилагается), подписанным Ответчиком без замечаний.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 18572, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены.

В соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 18572, на сумму 4 736 986, 93 руб. В свою очередь, данное обязательство не исполнено Ответчиком в полном объеме, в связи с чем сумма соответствующей задолженности перед Истцом составила 3 591 986, 92 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 20 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 18572 на сумму 3 591 986, 92 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований Истец указал, что между Истцом и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/15-61256 от 11.09.2015.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 61256, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по устройству ограждений лестниц и площадок из нержавеющей полированной стали в главном корпусе и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 2.2. Договора субподряда 61256, объем и перечень выполняемых Работ и их описание указаны в Техническом задании. Стоимость выполняемых Работ определена в Ведомости договорной цены. Последовательность и сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 61256 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (копия с приложениями прилагается), общая цена Договора составляет 1 714 596, 10 руб. 

Согласно п. 4.1. Договора субподряда 61256 в редакции Дополнительного соглашения № 1, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения Работ: Дата начала выполнения Работ: 15.09.2015; Дата завершения Работ по Договору: 15.12.2015. 

Согласно п. 8.1.3. Договора субподряда 61256, при оплате выполненных Работ Генподрядчик удерживает в счет Гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей, в размере 10% от суммы платежей за выполненные Работы.

Согласно п. 8.1.З.1., 50% сформированной Гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30-ти Рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.З.2., оставшиеся 50% сформированной Гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика (и/или Заказчика), в течение 30 дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 1.1.3. Договора субподряда 61256, Гарантийным сроком по Договору является срок гарантийной эксплуатации выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора к полноте и качеству Работ, в течение которого выполненные Работы должны соответствовать требованиям Договора и в течение которого Субподрядчик безвозмездно устраняет недостатки (дефекты), которые явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств Договору.

Согласно п 10.2. Договора субподряда 61256, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Истец указывает, что обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 61256, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 1 714 596, 10 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016, подписанным Ответчиком без замечаний.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 61256, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены.

Истец указал, что в соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.3.1. и п. 8.1.3.2. Договора субподряда 61256, на сумму 171 459, 62 руб. В свою очередь, данное обязательство Ответчиком не исполнено, в связи с чем, сумма задолженности перед Истцом составила 171 459, 62 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 14 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 61256 на сумму 171 459, 62 руб., а также Письмо № Исх. 29Д11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований Истец указал, что между Истцом и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/14-60349 от 23.09.2014.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 60349, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по подливке оборудования главного корпуса ПГУ-420Т ТЭЦ-20 -филиала ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 60349, общая цена Договора является приблизительной и составляет 896 459, 40 руб., включая НДС (18%) в размере 136 748, 04 руб. Согласно п. 4.1. Договора субподряда 60349, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ: дата начала выполнения работ: 04.03.2014; Дата завершения работ по Договору: 30.09.2014.

Согласно п. 8.1.2. Договора субподряда 60349, при оплате выполненных Работ Генподрядчик удерживает в счет Гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей, в размере 10% от суммы платежей за выполненные Работы.

Согласно п. 8.1.2.1., 50% сформированной Гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30-ти Рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.2.2., оставшиеся 50% сформированной Гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика (и/или Заказчика), в течение 30 дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 60349, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Истец указывает, что обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 60349, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 896 459, 40 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 22.04.2016, подписанным Ответчиком без замечаний.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 60349, датой истечения Гарантийного срока по Договору является 22.04.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензии по выполненным Работам не направлялись, какие-либо недостатки Работ не обнаружены.

В соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 60349, на сумму 89 645, 94 руб. В свою очередь, данное обязательство Ответчиком не исполнено, в связи с чем, сумма задолженности перед Истцом составила 89 645, 94 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 15 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 60349 на сумму 89 645, 94 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Также в обоснование заявленных требований Истец указал, что между Истцом и Ответчиком заключен Договор субподряда № 06/Т20/14-60404 от 22.10.2014.

Согласно п. 2.1. Договора субподряда 60404, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика в соответствии с Техническим заданием и Технической документацией выполнить на Объекте Работы по устройству эпоксидного покрытия под фальшполами главного корпуса ПГУ-420Т ТЭЦ-20 - филиала ОАО «Мосэнерго» и передать Генподрядчику результат выполненных Работ, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

Согласно п. 3.1. Договора субподряда 60404, общая цена Договора является приблизительной и составляет 312 435, 37 руб. 

Согласно п. 4.1. Договора субподряда 60404, сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ: дата начала выполнения работ: 01.10.2014; дата завершения работ по Договору: 11.11.2014.

Согласно п. 8.1.2. Договора субподряда 60404, при оплате выполненных Работ Генподрядчик удерживает в счет Гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей, в размере 10% от суммы платежей за выполненные Работы.

Согласно п. 8.1.2.1., 50% сформированной Гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта приемки всего объема Работ по Договору, указанного в п. 9.12. Договора, в течение 30-ти Рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов: счета Субподрядчика с отметкой 5% - гарантийная сумма; Акта приемки всего объема Работ, подписанного Сторонами.

Согласно п. 8.1.2.2., оставшиеся 50% сформированной Гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после истечения Гарантийного срока на Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика (и/или Заказчика), в течение 30 дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, выставленного после истечения Гарантийного срока.

Согласно п. 10.2. Договора субподряда 60404, Гарантийный срок на выполненные Работы начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке всего объема Работ по Договору согласно п. 9.12. Договора и истекает по истечение 24 месяцев с Даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Истец утверждает, что обязательства субподрядчика, предусмотренные Договором субподряда 60404, по выполнению и сдаче работ общей стоимостью 312 435, 37 руб. полностью исполнены, что подтверждается Актом приемки всего объема работ по договору от 16.03.2016, подписанным Ответчиком без замечаний.

В соответствии с п. 10.2. Договора субподряда 60404, датой истечения Гарантийного срока по Договору является  16.03.2018. В течение действия Гарантийного срока Ответчиком в адрес Истца претензий по выполненным Работам не направлялось, какие-либо недостатки Работ не обнаружены.

В соответствии с вышесказанным, у Ответчика возникло обязательство перед Истцом по оплате Гарантийной суммы, предусмотренной п. 8.1.2.1. и п. 8.1.2.2. Договора субподряда 60349, на сумму 31 243, 54 руб. В свою очередь, данное обязательство не исполнено Ответчиком в полном объеме, в связи с чем сумма соответствующей задолженности перед Истцом составила 18 433, 68 руб.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 29.11.2018 Истец направил в адрес Ответчика Счет № 13 от 16.11.2018 на оплату гарантийных удержаний по Договору субподряда 60404 на сумму 18 433, 68 руб., а также Письмо № Исх. 29/11-Т001, содержащее требование об оплате соответствующей суммы и предупреждение об обращении в суд в случае неисполнения данного требования.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 1 ст. 702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В силу ч. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только исполнение обязательства, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство исполнением (ст. 408 ГК РФ). 

Материалами дела подтверждается подписание между сторонами актов выполненных работ и актов о приемке всего объема работ, предусмотренного п. 9.12 договоров.

Таким образом, оснований для удержания 5% гарантийного платежа у Ответчика не имеется.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик указал на отсутствие в материалах дела актов ввода в эксплуатацию объектов. Также ссылался на положения ст. 327.1 ГК РФ.

При этом, Истец считает условия договоров о сроке возврата гарантийного удержания ничтожными.

При рассмотрении настоящего дела суд учитывает правовую позицию, изложенную в вопросе 2 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2017) (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017), согласно которой по общему правилу установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ).

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ исчисление срока исполнения обязательства допускается в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Подобным же образом, в силу ст. 327.1 ГК РФ, исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

Таким образом, п. п. 8.1.2.2. и 10.2 договоров сами по себе не противоречат нормам действующего законодательства. 

При этом, в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» указано, что по смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

Вместе с тем, в силу ст. 190 ГК РФ срок может определяться указанием лишь на такое событие, которое должно неизбежно наступить, то есть не зависит от воли и действий сторон.

В то же время невыполнение требования п. 2 ст. 190 ГК РФ о неизбежности наступления события не позволяет считать срок установленным.

В рассматриваемом случае сторонами в п. 10.2 договора согласовано условие, которое зависит от действий третьих лиц (ввод объекта в эксплуатацию), что исключает его неизбежный характер.

Вместе с тем свобода условий договора может изменять правила поведения сторон гражданского оборота, предусмотренные диспозитивными положениями действующего законодательства, при этом не может изменять обязательные правила поведения, императивно установленные законом.

Ни общие нормы ГК РФ, ни специальные нормы ГК РФ о подряде не предоставляют Ответчику право на неисполнение обязательства по оплате выполненных и принятых работ.

Кроме того, Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о невозможности ввода в эксплуатацию объектов ввиду ненадлежащего исполнения Истцом обязательств по договорам.  

Таким образом, доказательств, свидетельствующих об отсутствии оснований для возврата гарантийного удержания, Ответчиком не представлено, в то время как в соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат  удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.  

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 329, 330, 431,702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.49, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Компания ЭМК-Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) долг 4 455 927 (четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 63 коп., а также 45 280 (тридцать восемь тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Киселева Е.Н.