РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

г.Москва

20.08.2018                                                                     Дело № А40-49936/18-110-369  

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.2018

Решение в полном объеме изготовлено 20.08.2018

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЦЕНТР" (ОГРН 

<

***>, 127422, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "ПСК ГЕНПОДРЯД" (ОГРН 

<

***>, 127055, 

<

...>, помещение I комн. 44 офис 528) о взыскании 7 909 632,82 руб., 

при участии:

 от истца – ФИО2 по дов.  от  01.04.2018 №1-0104-АС1,

от ответчика- не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЦЕНТР" обратилось с иском  к обществу с ограниченной ответственностью "ПСК ГЕНПОДРЯД" о взыскании (с учетом принятого изменения размере в порядке ст. 49  АПК РФ)  по договору № 1211-АС1 от 18.11.2015 г. гарантийное удержание в сумме 105 092,37 рублей, по договору № 0607-АС 1 от 04.07.2016 г. задолженность по оплате выполненных работ в сумме 160 000,00 рублей, неустойку в размере 194 598,30 рублей, по договору № 0512-ЗВ от 05.12.2016 г. задолженность по оплате выполненных работ в сумме 1 658 767,50 рублей, неустойку в размере 368 615,00 рублей, по договору № 0812-Огр от 08.12.2016 г. задолженность по оплате выполненных работ в сумме 2 832 566,40 рублей, неустойку в размере 629 459, 20 рублей.

Ответчик не явился, отзыв не представил, спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

 Заслушав представителя истца,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО «ПартнерЦентр» и ООО «ПСК Генподряд» заключены договоры:

№ 1211-АС1 от 18.11.2015 г. в соответствии с п. 2.1 которого, Подрядчик поручает Субподрядчику выполнение на Объекте отдельных видов работ по монтажу ограждения лестниц и кровли в объеме, определенном Проектом, переданным на момент заключения Договора и сметой, с качеством в соответствии с требованиями СНиП (п. 2.2 Договора).

Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в размере 2 101 847,50 рублей (п.п. 2.3, 3.1 Договора), в том числе НДС 18 %.

Оплата строительно-монтажных работ производится по фактически выполненному объему работ за отчетный период, на основании Актов о приемке выполненных работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания указанных актов, а также счета с указанием удержания аванса и Гарантийного удержания в размере 5 % (пяти процентов), пропорционально выполненным работам. Гарантийное удержание возвращается Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента истечения 24 (двадцати четырех) календарных месяцев после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, на основании выставленного счета, за вычетом стоимости устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного периода и не устранённых Субподрядчиком (п. 4.2.6 Договора).

Работы по Договору выполнены Субподрядчиком в полном объеме.

ООО «ПСК Генподряд» произведена оплата выполненных работ в соответствии с п. 4.2.6 Договора.

Сумма Гарантийного удержания по Договору составила 105 092,37 рублей.

По состоянию на 11.03.2018 г. истек 24 месячный срок Гарантийного удержания, которое в соответствии с условиями договора, подлежит возврату ООО «ПартнерЦентр».

Счет на выплату Гарантийного удержания направлен в адрес ООО «ПСК Генподряд» 07.04.2018 г. и получен ответчиком 20.04.2018 г.

До настоящего времени денежные средства в сумме 105 092,37 рублей на расчетный счет

000«ПартнерЦентр» не поступили.

№ 0607-АС1 от 04.07.2016 г. в соответствии с п. 2.1 которого, Подрядчик поручает Субподрядчику выполнение на Объекте отдельных видов работ по монтажу зонтов вентканалов в объеме, определенном Проектом, переданным на момент заключения Договора и сметой, с качеством в соответствии с требованиями СНиП (п. 2.2 Договора).

Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в размере

1945 983,00 рублей (п.п. 2.3, 3.1 Договора) в том числе НДС 18%.

Оплата строительно-монтажных работ производится по фактически выполненному объему работ за отчетный период, на основании Актов о приемке выполненных работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания указанных актов, а также счета с указанием удержания аванса и Гарантийного удержания в размере 5 % (пяти процентов), пропорционально выполненным работам. Гарантийное удержание возвращается Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента истечения 24 (двадцати четырех) календарных месяцев после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, на основании выставленного счета, за вычетом стоимости устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного периода и не устранённых Субподрядчиком (п. 4.2.6 Договора).

Окончательный платеж осуществляется после завершения Субподрядчиком всех Работ по настоящему договору и подписания подрядчиком Акта сдачи-приемки Работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания указанного акта (п. 4.3 Договора).

В случае нарушения порядка платежей, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора, исключая оплату аванса, более чем на 15 рабочих дней, Субподрядчик вправе взимать неустойку с подрядчика в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от общей суммы Договора. Штрафные санкции взимаются с полной стоимости просроченного платежа (п. 15.2 Договора).

Работы по Договору выполнены Субподрядчиком в полном объеме.

С учетом предоплаты в сумме 972 991,50 руб., на основании актов КС2 ответчик произвел оплату выполненных работ в размере 1 688 683,85 рублей.

Сумма Гарантийного удержания по Договору составила 97 299,15 рублей.

Финальный Акт сдачи-приемки работ подписан сторонами 25.11.2016 г.

Таким образом, по состоянию на 19.12.2016 г. у ООО «ПСК «Генподряд» перед ООО «ПартнерЦентр» имеется задолженность по оплате выполненных работ в сумме 160 000,00 рублей.

Количество дней просрочки, по состоянию на 28.05.2018 г. включительно - 526 дней. Размер неустойки составляет: 526 дней х 160 000 рублей : 100 % х 0,5 % = 420 800 рублей. Размер неустойки (10% от общей суммы договора) - 194 598,30 рублей. Претензию истца ответчик оставил без удовлетворения.

№ 0512-ЗВ от 05.12.2016 г. в соответствии с п. 2.1 которого, Подрядчик поручает Субподрядчику выполнение на Объекте отдельных видов работ по монтажу вентиляционных зонтов в объеме, определенном Проектом, переданным на момент заключения Договора и сметой, с качеством в соответствии с требованиями СНиП (п. 2.2 Договора).

Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в размере 3 686 150,00 рублей (п.п. 2.3, 3.1 Договора) в том числе НДС 18 %.

Оплата строительно-монтажных работ производится по фактически выполненному объему работ за отчетный период, на основании Актов о приемке выполненных работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания указанных актов, а также счета с указанием удержания аванса и Гарантийного удержания в размере 5 % (пяти процентов), пропорционально выполненным работам. Гарантийное удержание возвращается Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента истечения 24 (двадцати четырех) календарных месяцев после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, на основании выставленного счета, за вычетом стоимости устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного периода и не устранённых Субподрядчиком (п. 4.2.6 Договора).

Окончательный платеж осуществляется после завершения Субподрядчиком всех Работ по настоящему договору и подписания подрядчиком Акта сдачи-приемки Работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания указанного акта (п. 4.2.7 Договора).

В случае нарушения порядка платежей, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора, исключая оплату аванса, более чем на 15 рабочих дней, Субподрядчик вправе взимать неустойку с подрядчика в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, ноне более 10 % от общей суммы Договора. Штрафные санкции взимаются с полной стоимости просроченного платежа (п. 15.2 Договора).

Работы по Договору выполнены Субподрядчиком в полном объеме, о чем 10.02.2017 г. составлен финальный Акт сдачи-приемки работ.

С учетом предоплаты в сумме 1 843 075,00 руб., на основании актов КС2 ответчик произвел оплату выполненных работ в размере 1 658 767,50 рублей.

Сумма Гарантийного удержания по Договору составила 184 307,50 рублей.

Финальный Акт сдачи-приемки работ ООО «ПСК Генподряд» не подписан, направлен Подрядчику почтой РФ. Претензий по качеству выполненных работ от Подрядчика до настоящего времени не поступило.

Таким образом, по состоянию на 06.03.2017 г. у ООО «ПСК «Генподряд» перед ООО «ПартнерЦентр» имеется задолженность по оплате выполненных работ в сумме 1 658 767,50 рублей.

Количество дней просрочки, по состоянию на 28.05.2018 г. включительно - 449 дней. Размер неустойки составляет: 449 дней х 1 658 767,50 рублей : 100 % х 0,5 % = 3 723 933,03 рублей.

Размер неустойки (10% от общей суммы договора) - 368 615,00 рублей. Претензию истца ответчик оставил без удовлетворения.

№ 0812-Огр от 08.12.2016 г. в соответствии с п. 2.1 которого, Подрядчик поручает Субподрядчику выполнение на Объекте отдельных видов работ по монтажу ограждений в объеме, определенном Проектом, переданным на момент заключения Договора и сметой, с качеством в соответствии с требованиями СНиП (п. 2.2 Договора).

Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы в размере 6 294 592,00 рублей (п.п. 2.3, 3.1 Договора) в том числе НДС 18 %.

Оплата строительно-монтажных работ производится по фактически выполненному объему работ за отчетный период, на основании Актов о приемке выполненных работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания указанных актов, а также счета с указанием удержания аванса и Гарантийного удержания в размере 5 % (пяти процентов), пропорционально выполненным работам. Гарантийное удержание возвращается Субподрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента истечения 24 (двадцати четырех) календарных месяцев после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, на основании выставленного счета, за вычетом стоимости устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного периода и не устранённых Субподрядчиком (п. 4.2.6 Договора).

Окончательный платеж осуществляется после завершения Субподрядчиком всех Работ по настоящему договору и подписания подрядчиком Акта сдачи-приемки Работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания указанного акта (п. 4.2.7 Договора).

В случае нарушения порядка платежей, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора, исключая оплату аванса, более чем на 15 рабочих дней, Субподрядчик вправе взимать неустойку с подрядчика в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, ноне более 10 % от общей суммы Договора. Штрафные санкции взимаются с полной стоимости просроченного платежа (п. 15.2 Договора).

Работы по Договору выполнены Субподрядчиком в полном объеме, о чем 20.02.2017 г. составлен финальный Акт сдачи-приемки работ.

С учетом предоплаты в сумме 3 147 296,00 руб., на основании актов КС2 ответчик произвел оплату выполненных работ в размере 2 832 566,40 рублей.

Сумма Гарантийного удержания по Договору составила 314 729,60 рублей.

Финальный Акт сдачи-приемки работ ООО «ПСК Генподряд» не подписан, направлен Подрядчику почтой РФ. Претензий по качеству выполненных работ от Подрядчика до настоящего времени не поступило.

Таким образом, по состоянию на 14.03.2017 г. у ООО «ПСК «Генподряд» перед ООО «ПартнерЦентр» имеется задолженность по оплате выполненных работ в сумме 2 832 566,40 рублей.

Количество дней просрочки, по состоянию на 28.05.2018 г. включительно - 441 день. Размер неустойки составляет: 441 день х 2 832 566,40 рублей : 100 % х 0,5 % = 6 245 808,91 рублей.

Размер неустойки (10% от общей суммы договора) - 629 459,20 рублей. Претензию истца ответчик оставил без удовлетворения.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом

В силу п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

 При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123,156,167-171 АПК РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ПСК ГЕНПОДРЯД" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЦЕНТР" 5 737 433 руб. 54 коп. задолженности, 2 172 199 руб. 28  коп. неустойки,  62 548 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко