АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2017 года

Дело №

А56-83152/2015

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Нефедовой О.Ю., судей Власовой М.Г. и Никитушкиной Л.Л.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» Деминой Э.В. (доверенность от 06.05.2015 № 6), от общества с ограниченной ответственностью «ГТК Строймонтаж» Павлова Н.Д. (доверенность от 10.01.2017), от общества с ограниченной ответственностью «Миро Групп» Федотовой Е.Б. (доверенность от 30.06.2016),

рассмотрев 07.06.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ГТК Строймонтаж» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2016 (судья Лобова Д.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 (судьи Третьякова Н.О., Дмитриева И.А., Згурская М.Л.) по делу № А56-83152/2015, 

                                               у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис», место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, Минеральная улица, дом 13, литера А, помещение 44, ОГРН 1117847226705, ИНН 7804462671 (далее – ООО «СтройСервис»), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ГТК Строймонтаж», место нахождения: 190121, Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 43-45, литера А, помещение 2-Н, ОГРН 1037851003277, ИНН 7826121509 (далее – ООО «ГТК Строймонтаж»), о взыскании 910 661 руб. 81 коп. убытков.

Иск принят судом с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Миро Групп», место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 6А, ОГРН 1107847189999, ИНН 7841427964 (далее – ООО «Миро Групп»). 

Решением суда первой инстанции от 26.09.2016, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 06.03.2017, иск удовлетворен.

В кассационной жалобе ООО «ГТК Строймонтаж» просит отменить вынесенные судебные акты и принять новый - об отказе в иске.

ООО «ГТК Строймонтаж» утверждает, что в нарушение пункта 4 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заказчик не известил его о выявленных недостатках в выполненных работах. В деле отсутствуют доказательства того, что общество с ограниченной ответственностью «Олимп» (далее – ООО «Олимп») выполняло работы по устранению дефектов в работах, выполненных ООО «ГТК «Строймонтаж».  

Ответчик полагает, что суды не применили норму права, подлежащую применению, - статью 723 ГК РФ.

Податель жалобы обращает внимание на то, что акт от 27.02.2014 составлен в связи с затоплением объекта из-за прорыва водопроводной трубы, принадлежащей водостанции «Лебяжье».

В отзыве на кассационную жалобу ООО «СтройСервис» просит оставить в силе обжалуемые судебные акты, считая их обоснованными и законными.

В судебном заседании представитель ООО «ГТК Строймонтаж» поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе. Представители ООО «СтройСервис» и ООО «Миро Групп» обратились с просьбой отказать в ее удовлетворении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Суды двух инстанций установили, что Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре администрации муниципального образования Ломоносовского муниципального района (муниципальный заказчик) и ООО «Миро Групп» 25.09.2013 заключили муниципальный контракт № 0145300026813000010-0290563-01 (далее - Контракт), по условиям которого подрядчик (ООО «Миро Групп») обязался выполнить работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения п. Лебяжье, Ломоносовский район, Ленинградская область. 1-я очередь. Строительство 2 резервуаров чистой воды емкостью по 2000 куб.м каждый и прокладка водопроводных сетей ВСН до точки 3 из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм».

ООО «Миро Групп» (заказчик) и ООО СтройСервис» (исполнитель) 18.11.2013 заключили договор № 25 на выполнение работ по устройству обвязки двух резервуаров воды из ПНД-труб на том же объекте. 

ООО «СтройСервис» (заказчик) и ООО «ГТК Строймонтаж» (исполнитель) 20.11.2013  заключили  договор  на  выполнение  строительно-монтажных  работ 

№ 20-330/11-СМР (далее – Договор), по условиям которого исполнитель обязался выполнить работы по устройству обвязки двух резервуаров воды из ПНД-труб и прокладке магистрали, Д=280 мм, L=1100 м, на объекте, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, и сдать заказчику результат работ; заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора стоимость работ составила 2 750 000 руб., включая НДС.

В пункте 5.3.2 Договора стороны предусмотрели, что исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с утвержденным проектом и условиями Договора. Исполнитель гарантирует, что качество работ, вспомогательных материалов, оборудования, используемых исполнителем будет соответствовать требованиям и условиям Договора, СНиПам.

ООО «СтройСервис» и ООО «ГТК «Строймонтаж» 27.02.2014 составили акт, в котором отразил, что на объекте не установлены спускные ступени в колодцы, не произведена внутренняя гидроизоляция; наблюдается просадка грунта, требуется повторная замена трубопровода.

В связи  с наличием недостатков в выполненных работах ООО «СтройСервис» 07.03.2014 направило ООО «ГТК «Строймонтаж» претензию с указанием на невыполнение значительного объема работ, на выполнение ряда работ с нарушением требований действующих нормативов, проектов и условий Договора. Кроме того, в претензии содержится предложение устранить выявленные недостатки и представить график завершения работ.

ООО «ГТК «Строймонтаж» выявленные недостатки не устранило.

ООО «Миро Групп» и ООО «СтройСервис» 30.04.2014 подписали соглашение о расторжении договора от 18.11.2013 № 25 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

Согласно пункту 3 названного соглашения ООО «СтройСервис» обязалось возместить ООО «Миро Групп» стоимость невыполненных работ, а также стоимость работ, выполненных с нарушением действующих нормативных технических документов.

ООО «Миро Групп», ООО «СтройСервис» и ООО «ГТК Строймонтаж» 03.07.2014 составили акты обследования № 03/07/В, 03/07/В2, 03/07/К3, 03/07/ОТ, 03/07/П, 03/07/ПР, 03/07/СП, в которых зафиксированы недостатки в выполненных ООО «ГТК «Строймонтаж» работах. Представители ООО «ГТК Строймонтаж» указанные акты не подписали.

Ввиду наличия у ООО «ГТК Строймонтаж» возражений относительно выводов, изложенных в указанных актах, ООО «Миро Групп» 24.07.2015 заключило с обществом с ограниченной ответственностью «Олимп» (далее - ООО «Олимп») договор подряда на выполнение работ по освидетельствованию системы наружного водоснабжения и канализации согласно проекту МК 0145300026813000010-0290563-01-ВК.

В результате проведенного освидетельствования ООО «Олимп» подготовило отчет и акт обследования качества выполненных работ, в которых приведен перечень нарушений, требующих незамедлительного устранения.

Отчет от 13.08.2014, подготовленный ООО «Олимп», содержит выводы о неудовлетворительном состоянии колодцев: наружные стены покрыты только грунтующим раствором битума в бензине, без обмазки горячим битумом и без оклейки стыков колец изолирующим материалом, то есть колодцы собраны с отступлениями от проектных требований; закладные элементы крепления при монтаже колец не использовались, что повлекло смещение колец относительно друг друга; стыки соединены бетонным раствором без добавления силиката (раствор высох, сыпуч и легко растирается руками); кроме того, места проходов трубопроводов не герметизированы или герметизация выполнена с нарушением технологии и не обеспечивает изоляцию от грунтовых вод; при подготовке основания под плиты днища колодцев не выполнена подготовка из бетона, в результате часть колодцев отклонена по вертикали и имеет наклон. 

Как следует из акта от 28.08.2014 обследования качества выполненных работ, ООО «Олимп» при проведении работ по обследованию смонтированной сети, выявило недостатки в производстве работ, нарушения при монтаже трубопроводов и фланцевых соединений в месте присоединения к бетонным резервуарам, установило, что не были выполнены приемо-сдаточные гидравлические испытания систем. В акте также указано, что в существующем виде трубопроводы водоснабжения и канализации не пригодны к эксплуатации в связи с явными нарушениями требований СНиП 3.05.04-85*, требуют демонтаж и последующая укладка трубопроводов и бетонных колодцев.  

Поскольку ООО «ГТК Строймонтаж» не устранило недостатки в выполненных работах, ООО «Миро Групп» 10.08.2014 заключило с ООО «Олимп» договор подряда № 128/ос для устранения нарушений, выявленных в результате выполнения работ по Договору. Стоимость работ составила 1 149 048 руб. 36 коп.

В ходе проведения демонтажных работ были выявлены дополнительные недостатки (дефекты), которые необходимо было устранить, в связи с чем ООО «Миро Групп» и ООО «Олимп» заключили дополнительные соглашения.

Работы, выполненные ООО «Олимп», переданы ООО «Миро Групп» по актам от 06.10.2014 № 1 и от 10.11.2014 № 1 и оплачены согласно платежному поручению от 27.11.2014 № 973 (750 000 руб.), акту сверки взаимных расчетов за период с 11.08.2014 по 28.11.2014 по договору от 11.08.2014 № 15/СТ и акту зачета взаимных требований юридических лиц от 28.11.2014 (470 151 руб. 12 коп.).     

ООО «Миро Групп» 17.11.2014 направило ООО «СтройСервис» претензию № 285/14, в которой потребовало возместить 3 254 930 руб. 36 коп. убытков, понесенных в связи с некачественным исполнением работ по заключенному между ними договору.

В ответ на указанную претензию ООО «СтройСервис» письмом от 25.11.2014 № 118 сообщило ООО «Миро Групп» о том, что фактически работы по заключенному между ними договору выполняло ООО «ГТК Строймонтаж», а также, что признает требования претензии обоснованными. 

Возместив в полном объеме ООО «Миро Групп» убытки, понесенные последним в результате некачественного выполнения ООО «ГТК Строймонтаж» работ по Договору, ООО «СтройСервис» предъявило настоящий иск.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск со ссылкой на статьи 15, 393, 702, 721, 723, 724 ГК РФ, признав его обоснованным по праву и размеру.

Кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения жалобы.

В силу пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Под убытками в силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ следует понимать расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 25) по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Таким образом, требование о взыскании убытков может быть удовлетворено, только если доказана совокупность следующих условий: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершение незаконных действий или бездействие), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер убытков. 

Суды первой и апелляционной инстанций оценили представленные в дело доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ и пришли к правильному выводу о доказанности истцом совокупности условий, необходимых для удовлетворения настоящего иска.

Как правильно указали суды, ненадлежащее исполнение ООО «ГТК «Строймонтаж» обязательств по Договору подтверждается в том числе и заключением судебной строительно-технической экспертизы от 02.06.2016 № 59-2/16, проведенной при рассмотрении Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области дела № А56-24293/2014 (по иску ООО «ГТК Строймонтаж» о взыскании с ООО «СтройСервис» задолженности).

Довод ответчика о том, что он не был надлежащим образом уведомлен о наличии недостатков в выполненных им работах, опровергается перепиской сторон, а также актами, составленными с участием ООО «ГТК «Строймонтаж».

Кроме того, из акта от 27.02.2014 следует, что ООО «ГТК «Строймонтаж» после обнаружения недостатков в выполненных работах гарантировало выполнение работ.

Довод подателя жалобы о неприменении судами статьи 723 ГК РФ несостоятелен в связи с тем, что названная норма применена судами двух инстанций.

Суды двух инстанций приняли во внимание факт извещения ООО «ГТК Строймонтаж» о наличии недостатков, гарантию подрядчиком выполнения работ (акт от 27.02.2014), а также невыполнение им требований заказчика об их устранении в разумный срок и пришли к правильному выводу о наличии права заказчика на их устранение силами третьих лиц с последующим возмещением заказчику соответствующих расходов.

Поскольку факт некачественного выполнения работ ООО «ГТК Строймонтаж», а также необходимость устранения недостатков выполненных ответчиком работ доказаны, суды обоснованно и законно удовлетворили иск.Согласно статье 286 АПК РФ кассационный суд при рассмотрении дела проверяет законность принятых судебных актов, устанавливая правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов арбитражных судов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в нем доказательствам.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам. Суды правильно применили нормы материального и процессуального права. В связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

                                             п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по делу № А56-83152/2015  оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ГТК Строймонтаж» - без удовлетворения.

 

Председательствующий

О.Ю. Нефедова

Судьи

М.Г. Власова

Л.Л. Никитушкина