АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

17 июля 2025 года

Дело № А33-29764/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10.07.2025.

В полном объёме решение изготовлено 17.07.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Отели Красноярска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "М-200" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки, штрафа, судебных издержек,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общества с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>);

- ФИО1 (ИНН 

<

***>);

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 25.09.2024 (сроком действия 31.12.2025), представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена паспортом,

в отсутствие ответчика, третьих лиц,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой А.Е.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Отели Красноярска" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  к обществу с ограниченной ответственностью "М-200" (далее – ответчик) о взыскании:

- 4 873 800,96 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору;

- 2 975 000 руб. штрафа за нарушение в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности;

Определением от 24.09.2024 исковое заявление оставлено судом без движения.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.10.2024 возбуждено производство по делу.

Определением от 18.11.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (ИНН 

<

***>).

Определением от 13.05.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО «М-200»  утвержден ФИО1.

Судебное заседание откладывалось судом.

Представители ответчика, третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей ответчика, третьих лиц.

Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

30.06.2025 посредством сервиса «Мой Арбитр» от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать 4 869 832, 60 руб. неустойки, 2 975 000 руб. штрафа.

В соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований принято судом. Спор рассматривается с учетом принятых уточнений.

Представитель истца поддержал исковые требований с учетом уточнения.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

17.11.2023 между обществом с ограниченной ответственностью «Отели Красноярска» (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «М-200» (генподрядчиком) заключен договор подряда № ОТКР-Д-23-0143, по условиям пункта 2.1 которого генподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по капитальному ремонту и пусконаладочным работам в соответствии с договором, в том числе приложением № 1 технической документацией, рабочим проектом (шифр 049/22) и проектом усиления конструкций, разработанными ранее и переданными заказчиком на бумажном и электронных носителях (далее - «Работы»). Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора работы и уплатить цену работ в порядке, предусмотренном договором.

Объем работ закреплен технической документацией и сметной документацией (приложение №2) и в любом случае включает в себя (без ограничения приведенным ниже перечнем): (1) строительно-монтажные работы, включая общестроительные, специальные и иные строительные работы, в отношении объекта; (2) пусконаладочные работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных договором и обязательными техническими правилами; (3) приобретение оборудования (в том числе, запасных частей к нему) на условиях, определенных договором, включая его транспортировку, погрузку, перегрузку, разгрузку, хранение, сертификацию, монтаж и пусконаладку; (4) приобретение материалов на условиях, определенных договором, в том числе их закупку, транспортировку, разгрузку, погрузку, хранение, сертификацию и использование при выполнении работ; (5) предоставление заказчику документации, необходимой для эксплуатации объекта и ремонта установленного оборудования; (6) инструктаж персонала генподрядчика и / или заказчика; (7) устранение дефектов и недоделок, выявленных заказчиком на момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 3.1 договора генподрядчик обязуется выполнить работы и обеспечить результат работ в сроки, последовательности и порядке, установленные договором и приложением № 3. Начало работ – 17 ноября 2023 года, окончание работ – 31 января 2024 года. Поэтапные сроки выполнения работ указаны в приложении № 3. Сроки выполнения работ изменены сторонами - 17.11.2023 г. по 30.04.2024 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.02.2024 г. к договору.

Согласно пункту 3.2 договора условие о сроке окончания работ считается соблюденным генподрядчиком, если в дату, определенную в договоре как дата окончания (завершения) выполняемых работ, генподрядчиком завершены все предусмотренные договором работы и предъявлены заказчику к приемке.

В силу пункта 4.1 договора цена работ по договору определена в соответствии с локальными сметными расчётами (приложение 2), приложением № 1 13 (протокол согласования договорной цены) и составляет: 33 100 666 (тридцать три миллиона сто тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 80 коп., включая НДС 20 %, 5 516 777, 80 руб.

В пункте 5.1 договора предусмотрено, что заказчик выплачивает генподрядчику аванс в размере 25% (двадцати пяти процентов) от стоимости работ по договору, составляющий          8 275 166,70 руб., в том числе НДС 1 379 194,45 руб., после подписания договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по договору генподрядчик обязан возвратить аванс в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования заказчика, за вычетом стоимости работ, выполненных и принятых заказчиком, на момент получения соответствующего требования заказчика.

Как установлено пунктом 5.4 договора, генподрядчик не позднее 25-го (двадцать пятого) числа текущего месяца (отчетного периода) либо последнего рабочего дня завершенного этапа работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2) направляет заказчику оригиналы следующих документов: 1) акт о приемке выполненных работ, содержащий перечень выполненных работ (в трех экземплярах); 2) справку о стоимости выполненных работ (в трех экземплярах); 3) исполнительную документацию в трех экземплярах по работам, выполненным за оплачиваемый период, во избежание сомнений, предоставление исполнительной документации генподрядчиком заказчику по работам, выполненным за каждый оплачиваемый период, является существенным условием договора; 4) счет на оплату выполненных работ; 5) счет-фактуру, соответствующий требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации; 6) счет-фактуру, после получения частичной оплаты в счёт предстоящих работ, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения оплаты.

На основании пункта 5.5 договора заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от генподрядчика указанных документов производит их проверку и, при отсутствии замечаний подписывает акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ либо направляет генподрядчику мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока проверки документов генподрядчика с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ заказчика является основанием для устранения генподрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в согласованные сторонами сроки. В случае если генподрядчик не устраняет недостатки в согласованный с заказчиком срок, заказчик вправе устранить их своими силами или с привлечением третьих лиц.  Генподрядчик обязан возместить заказчику документально подтвержденные расходы, связанные с самостоятельным устранением недостатков.

Пунктом 5.6 договора установлено, что заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ производит оплату выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

В соответствии с пунктом 21.2 договора приемка работ по договору осуществляется ежемесячно в соответствии с графиком выполнения работ и оформляется документами, указанными в подразделе 5 договора. При этом объемы выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ фиксируются ежемесячно путем составления генподрядчиком и утверждения заказчиком в порядке, предусмотренном пунктами 5.4-5.5 договора, исполнительной документации. Заказчик вправе отказать генподрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией. Об отказе в приемке работ генподрядчику выдается мотивированный отказ.

Согласно пункту 21.4 договора генподрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме в срок, установленный договором, о чем предварительно уведомляет заказчика в письменной форме. Заказчик производит приемку работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения генподрядчика об их готовности к сдаче.

В силу пункта 21.5 договора итоговая приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей сторон. Приемка результата выполненной работы производится лишь при наличии исполнительной документации, подписанной (утвержденной) заказчиком.

В пункте 21.6 договора указано, что по результатам приемки сторонами всех работ подписывается акт приемки законченного строительством объекта. Указанный акт подписывается сторонами при отсутствии у заказчика замечаний к качеству и объему выполнения работ.

В соответствии с пунктом 29.4. договора в случае нарушения генподрядчиком срока начала или срока окончания выполнения работ, в том числе этапа работ, заказчик вправе взыскать с генподрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки выполнения таких работ или поручить выполнение работ третьему лицу с отнесением расходов на генподрядчика.

Пунктом 29.11. договора  установлено, что за несоблюдение положений Соглашения о соблюдении генподрядчиком требований в области охраны труда, охраныокружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребыванияна территории объектов заказчика, и Соглашения о соблюдении требований в областиантитеррористической        безопасности генподрядчик           несет        ответственность, предусмотренную Разделом 7 Приложения №12 к договору.

В соответствии с п.29.27. договора заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание/зачет неустоек (штрафов/пеней) и/или убытков из любых сумм, причитающихся генподрядчику за выполненные и принятые заказчиком работы, или (по усмотрению заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и/или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

На основании пункта 32.3 договора заказчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе.

В соответствии с п.32.4. договора в случае невыполнения генподрядчиком либо лицом, привлеченным генподрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии и/или нарушения требований внутриобъектового режима на объекте, заказчик имеет право после предоставления генподрядчику письменного уведомления о нарушении и не устранения такого нарушения генподрядчиком в срок, указанный в уведомлении заказчика, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора и вступить в распоряжение работами и строительной площадкой, включая все, что на ней находится.

Пунктом 32.5 договора конкретизированы случаи расторжения заказчиком договора в одностороннем порядке:

- если генподрядчик не приступает к исполнению договора в сроки в соответствии с графиком выполнения работ и такая просрочка составляет более 5 (пяти) календарных дней;

- если генподрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности, если генподрядчик полностью или частично приостановит выполнение работ без оснований, вытекающих из условий договора и действующего законодательства, на срок более 5 (пяти) календарных дней;

- если генподрядчик не выполняет или ненадлежащим образом выполняет работы за отчетный период либо в рамках этапа работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2.), в том числе, в случае нарушения сроков выполнения работ (этапа работ) по графику выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

Об отказе от исполнения договора заказчик направляет генподрядчику письменное уведомление, в котором указывается срок, с которого договор считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, договор считается расторгнутым с даты получения генподрядчиком такого уведомления (п.32.6. договора).

Приложением №3 (3.1) к договору согласован график выполнения работ.

Стороны подписали соглашение о соблюдении генподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории объектов заказчика от 17.11.2023, которое является приложением №11 к договору подряда №ОТКР-Д-23-0143 от 17.11.2023.

Согласно п. 1.1. приложения №11 «Соглашение о соблюдении Генподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика» к договору, генподрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области охраны труда, правил противопожарного режима в РФ, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды, а также за обеспечение в ходе выполнения работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными генподрядчиком субподрядными организациями.

Заказчик, согласно п. 1.5. приложения №11 к договору, оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов Приложения №11 на участках и объектах выполнения работ, а также вправе потребовать оплату штрафа от генподрядчика за каждый случай выявленного нарушения, в соответствии с перечнем п.7 Приложения №11 к договору.

Порядок фиксации нарушений, совершенных Генподрядчиком установлен Разделом 8 Приложения №11, Порядок привлечения к ответственности за допущенные нарушения предусмотрен в Разделе 9 Приложения №11:

Согласно п.8.1. Приложения №11, при обнаружении факта допущения нарушения(-ий) персоналом генподрядчика или персоналом субподрядной организации, уполномоченным лицом заказчика (руководителем филиала, любого подразделения заказчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу генподрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию заказчика, сторонних организаций персоналом генподрядчика и/или субподрядной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, нарушений режима допуска и пребывания на территории объектов заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами заказчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (форма Акта - Приложение №1 к Приложению №11 к Договору).

Фиксация нарушений и/или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности) (п.8.2. Приложения №11).

Требования к Акту проверки установлены в п.8.3. Приложения №11, и включают в себя наличие в Акте следующих сведений: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение генподрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку; отсутствие/наличие фото-или видеофиксации; описание выявленных нарушений; меры для их устранения.

Акт проверки должен быть подписан со стороны генподрядчика ответственным руководителем и/или производителем работ, в случае отказа генподрядчика от подписания Акта, обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки (п. 8.3.5., 8.4. Приложения №11 к договору).

Составленный и подписанный генподрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору договора, который впоследствии оформляет и направляет в адрес генподрядчика претензию об оплате штрафа. Претензия вручается руководителю генподрядчика либо направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ генподрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении (п.9.1., 9.2. Приложения №11).

Согласно п.9.3. Приложения №11 в претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к генподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 Приложения №11) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов заказчика о режиме допуска и пребывания на территории объектов заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов заказчика.

В случае неудовлетворения генподрядчиком требований претензии заказчик вправе предъявить требования к генподрядчику в судебном порядке (п. 9.4. Приложения №11 к договору).

Приложением №13 к договору сторонами подписан протокол согласования договорной цены.

В материалы дела представлены Локальные сметные расчеты №08-01-01, 09-01-10.2, 09-01-04.2, 09-01-04.3, 09-01-04.4, а также ведомость объёмов работ№4.

В качестве доказательства выполнения работ по договору в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 13.03.2024 № 1 на сумму 533 151,60 руб. и № 2 на сумму 453 307,20 руб.

Платежными поручениями от 19.12.2023 № 3030 на сумму 8 275 166,70 руб. и от 16.05.2024 № 1272 на сумму 223 965,58 руб. заказчиком выплачен генподрядчику аванс.

Из иска и пояснений истца следует, что по итогам проведения проверок было выявлено, что генподрядчик систематически не исполняет условия договора и требования действующего законодательства в части соблюдения вышеуказанных требований, часть нарушений генподрядчиком не устранялась и совершалась повторно. За период выполнения работ генподрядчиком, сторонами было составлено 11 актов проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности на территории объекта при выполнении работ по договору, каждым из которых было зафиксировано наличие многочисленных нарушений с приложением фотографических материалов.

В связи с допущенными нарушениями истцом начислены штрафы в общем размере 2 975 000 руб., в том числе:

-  50 000 руб. по п. 12 Акта №03 от 17.01.2024, направленного  письмом №СТИ-Исх-0086-24 от 26.01.2024;

- 345 000 руб. по п. 3, п. 4, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 16, п. 17, п. 18, п. 20 Акта №10 от 07.02.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0162-24 от 08.02.2024;

- 310 000 руб. по п. 6, п. 9, п. 17, п. 19, п. 21, п. 22, п. 23 Акта №14 от 14.02.2024, направленного письмом СТИ-Исх-0183-24 от 15.02.2024;

- 695 000 руб. по п. 19, п. 23, п. 29, п. 31, п. 15, п. 16, п. 22, п. 27, п. 30, п. 18, п. 21, п. 24, п. 25, п. 32 Акта №20 от 05.03.2024, направленного письмом СТИ-Исх-0271-24 от 14.03.2024;

- 175 000 руб. по п. 1, п., 2, п. 3, п. 5, п. 33, п. 34 Акта №24 от 13.03.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0275-24 от 18.03.2024;

- 25 000 руб. по п. 1-34 Акта №25 от 15.03.2024, направленного письмом СТИ-Исх-0282-24 от 18.03.2024;

- 200 000 руб. по п. 1 -34 Акта №28 от 20.03.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0316-24 от 25.03.2024;

- 210 000 руб. по п. 9, п. 15, п. 20, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25 Акта №37 от 18.04.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0464-24 от 25.04.2024;

- 485 000 руб. по п. 4, п. 5, п. 6, п. 8, п. 14, п. 15, п. 18, п. 19, п. 21, п. 22 Акта №46 от 15.05.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0546-24 от  17.03.2024;

- 405 000 руб. по п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24 Акта № 49 от 29.05.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0636-24 от 04.06.2024;

- 75 000 руб. по п. 17, п. 18, п. 19 Акта №60 от 19.06.2024, направленного письмом  №СТИ-Исх-0772-24 от 01.07.2024.

29.02.2024 ответчику направлено письмо №ОТКР-00019/24 в соответствии с которыми истец выставил требование оплатить штрафы.

22.03.2024 истцом направлено письмо №ОТКП-00019/24 согласно которому со стороны генподрядчика выявлены нарушения, которые влекут за собой начисление штрафных санкций согласно приложения №11 к договору.

Письмом №ОТКР-00019/24 от 15.05.2024 истец просил ответчика в срок до 20.05.2024 направить в адрес заказчика графики, усилить мобилизацию и увеличить темпы производства работ на объекте.

Письмом ОТКР- исх-00046/24 от 20.05.2024 ответчику предложено устранить выявленные нарушения.

21.05.2024 письмом №ОТКР-Исх-00047/24 от 21.05.2024 ответчику о нарушении требований законодательства, оплате штрафных санкций

Письмом ОТКР-Исх-00049/24 от 23.05.2024 истцом  сообщено о срыве сроков выполнения работ.

05.06.2024 истец письмом №ЛЬКР-ИСХ-00055/24 уведомил ответчика о систематическом невыполнении условий договора.

Ссылаясь на несоблюдение генподрядчиком сроков ведения работ, прекращение их производства, наличие нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, непредставление банковской гарантии, документов, необходимых для оплаты работ, заказчик письмом от 17.07.2024 № ОТКР-РС-0030/24 уведомил генподрядчика об отказе от договора в одностороннем порядке с 23.07.2024, указав, что последним дней действия договора будет считаться 22.07.2024.

Уведомление о расторжении договора получено генподрядчиком 24.07.2024, что подтверждается отметкой на письме.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по договору истец начислил штраф в размере 4 869 832, 60 руб. (расчет представлен в материалы дела).

Неисполнение претензионных требований об оплате начисленных неустойки за нарушение сроков выполнения работ и штрафов послужило основанием обращения истца в суд с настоящим иском.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о рассмотрении настоящего спора, ознакомленный с существом рассматриваемых требований путем предоставления доступа к материалам дела в электронном виде, отзыв на исковое заявление с изложением мотивированных возражений не представил.

Третье лицо в отзыве на исковое заявление ссылалось на наличие оснований для удовлетворения исковых требований, поддерживая доводы истца.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Между истцом и ответчиком заключен договор подряда, урегулированный положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из содержания пункта 4.1 договора следует, что цена работ по договору определена в соответствии с локальными сметными расчётами (приложение 2), приложением № 1 13 (протокол согласования договорной цены) и составляет 33 100 666,  80 руб., включая НДС.

В качестве доказательства выполнения работ по договору в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 13.03.2024 № 1 на сумму 533 151,60 руб. и № 2 на сумму 453 307,20 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Как следует из материалов дела, ссылаясь на несоблюдение генподрядчиком сроков ведения работ, прекращение их производства, наличие нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, непредставление банковской гарантии, документов, необходимых для оплаты работ, заказчик письмом от 17.07.2024 № ОТКР-РС-0030/24 уведомил генподрядчика об отказе от договора в одностороннем порядке с 23.07.2024, указав, что последним дней действия договора будет считаться 22.07.2024.

Уведомление о расторжении договора получено генподрядчиком 24.07.2024, что подтверждается отметкой на письме.

Доказательств признания недействительным одностороннего отказа истца от договора материалы дела не содержат.

Вместе с тем, ссылаясь на нарушение сроков выполнения работ истец начислил неустойку в размере 4 869 832, 60 руб.

Кроме того, ссылаясь на несоблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности на территории объекта при выполнении работ по договору истец выставил ответчику штрафы в размере 2 975 000 руб.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В процессе исполнения договора истцом в рамках п.1.5. приложения №11 к договору проводились комплексные, комиссионные проверки с целью контроля за соблюдением генподрядчиком требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при проведении строительно-монтажных работ.

По итогам проведения проверок было выявлено, что генподрядчик систематически не исполняет условия договора и требования действующего законодательства в части соблюдения вышеуказанных требований, часть нарушений генподрядчиком не устранялась и совершалась повторно.

За период выполнения работ генподрядчиком было составлено 11 Актов проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности на территории объекта при выполнении работ по договору, каждым из которых было зафиксировано наличие многочисленных нарушений с приложением фотографических материалов.

Пунктом 29.11. договора  установлено, что за несоблюдение положений Соглашения о соблюдении генподрядчиком требований в области охраны труда, охраныокружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребыванияна территории объектов заказчика, и Соглашения о соблюдении требований в областиантитеррористической безопасности генподрядчик несет ответственность, предусмотренную Разделом 7 Приложения №11 к договору.

Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности указан в подразделе 7.1 раздела 7 Приложения №11 к договору подряда, где обозначены конкретные размеры штрафов за каждый вид допущенного нарушения.

В связи с допущенными нарушениями истцом начислены штрафы в общем размере 2 975 000 руб., в том числе:

-  50 000 руб. по п. 12 Акта №03 от 17.01.2024, направленного  письмом №СТИ-Исх-0086-24 от 26.01.2024;

- 345 000 руб. по п. 3, п. 4, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 16, п. 17, п. 18, п. 20 Акта №10 от 07.02.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0162-24 от 08.02.2024;

- 310 000 руб. по п. 6, п. 9, п. 17, п. 19, п. 21, п. 22, п. 23 Акта №14 от 14.02.2024, направленного письмом СТИ-Исх-0183-24 от 15.02.2024;

- 695 000 руб. по п. 19, п. 23, п. 29, п. 31, п. 15, п. 16, п. 22, п. 27, п. 30, п. 18, п. 21, п. 24, п. 25, п. 32 Акта №20 от 05.03.2024, направленного письмом СТИ-Исх-0271-24 от 14.03.2024;

- 175 000 руб. по п. 1, п., 2, п. 3, п. 5, п. 33, п. 34 Акта №24 от 13.03.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0275-24 от 18.03.2024;

- 25 000 руб. по п. 1-34 Акта №25 от 15.03.2024, направленного письмом СТИ-Исх-0282-24 от 18.03.2024;

- 200 000 руб. по п. 1 -34 Акта №28 от 20.03.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0316-24 от 25.03.2024;

- 210 000 руб. по п. 9, п. 15, п. 20, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25 Акта №37 от 18.04.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0464-24 от 25.04.2024;

- 485 000 руб. по п. 4, п. 5, п. 6, п. 8, п. 14, п. 15, п. 18, п. 19, п. 21, п. 22 Акта №46 от 15.05.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0546-24 от  17.03.2024;

- 405 000 руб. по п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24 Акта № 49 от 29.05.2024, направленного письмом № СТИ-Исх-0636-24 от 04.06.2024;

- 75 000 руб. по п. 17, п. 18, п. 19 Акта №60 от 19.06.2024, направленного письмом  №СТИ-Исх-0772-24 от 01.07.2024.

Представленный истцом расчет суммы штрафа проверен судом и признан обоснованным, соответствующим обстоятельствам дела, в связи с чем, исковые требования в данной части подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также, истцом начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ.

Общий срок выполнения всех работ по договору - с 17.11.2023 г. по 30.04.2024 г. (с учетом дополнительного соглашения №1 от 01.02.2024  к договору). Промежуточные сроки выполнения работ указаны в Приложении №3 к договору (График выполнения работ).

Порядок и сроки приемки выполненных работ установлены сторонами в Разделе 21 договора.

За нарушение сроков выполнения работ договором  (п. 29.4) установлена ответственность в размере 0,1% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки выполнения таких работ.

В процессе исполнения договора ответчик допустил неоднократные нарушения промежуточных сроков выполнения работ, общий срок выполнения работ также соблюден не был.

Истец неоднократно сообщал ответчику о срыве сроков выполнения работ.

Таким образом, с учетом уточненного расчета, представленного истцом в материалы дела, за нарушение сроков выполнения работ по договору истцом начислена неустойка в размере 4 869 832,60 руб.

Проверив расчет истца, суд признал его арифметически верным, соответствующим условиям договора и обстоятельствам дела.

Поскольку факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ подтвержден материалами дела, требование истца о взыскании с ответчика неустойки заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Таким образом, исковые требования, заявленные в рамках настоящего дела о взыскании с ответчика штрафов и неустойки удовлетворяются судом в полном объеме.

Частью 1 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом результата рассмотрения настоящего спора с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходов по уплате государственной пошлины исходя из цены иска.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "М-200" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Отели Красноярска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 4 869 832,60 руб. неустойки, 2 975 000 руб. штрафа, 260 345 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Отели Красноярска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 21 549 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №2574 от 01.10.2024.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.А. Горбатова