654/2024-9002(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-221888/23 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.  

Судей Семикиной О.Н., Бодровой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2023г. (резолютивная часть от 26.10.2023г.) по делу № А40-221888/23 

по иску ООО "БОНСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>)  к ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН: 

<

***>) о взыскании,  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 16.01.2024, от ответчика: не явился, извещен 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "БОНСТРОЙ" (подрядчик) предъявило ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  (заказчик) иск о взыскании задолженности по договору подряда № 21VP14448- СМР_21_БС от 11.07.2022 в размере 6 847 223,75 руб., по договору подряда   № 21VP1448-СМР/21/БС/1 от 06.02.2023 в размере 5 989 111,44 руб., неустойку за  нарушение сроков оплаты по договору подряда № 21VP14448-СМР_21_БС от  11.07.2022 в размере 121 252,91 руб.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176  АПК РФ 26.10.2023г., изготовленным в полном объеме 30.10.2023г. исковые  требования удовлетворены.  

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Истец по требованиям и  доводам жалобы возражал, неявившийся Ответчик уведомлен о времени и месте  рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на  официальном сайте суда в сети Интернет (т. 1 л.д. 101).  

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения  суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.  

Установлено, что между сторонами заключен договор подряда № 21VP14448- СМР_21_БС от 11.07.2022 на выполнение строительно-монтажных работ по  переустройству бесхозяйных байпасов по адресу: проспект 60-летия Октября и договор  подряда № 21VP1448-СМР/21/БС/1 от 06.02.2023 на выполнение строительно- монтажных работ по переустройству бесхозяйных байпасов по адресу: ул. Воронцово  поле,д.5-7, стр.2, в соответствии с которыми субподрядчик обязался выполнить  строительно-монтажные работы по переустройству бесхозных байпасов, а подрядчик  обязался принять и оплатить на условиях и в порядке установленном договорами  выполненные субподрядчиком работы.  

Сроки окончания работ 31.12.2022 и 29.09.2023. 

Каждым заключенным договором (п.5.1.) был определен порядок приемки  выполненных работ: работы выполняются субподрядчиком поэтапно.  

Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно/ежеквартально. 

В течение 10-ти (десяти) рабочих дней после завершения всего комплекса работ,  выполняемых по договору, субподрядчик направляет подрядчику акт о приемке  выполненных работ (этапа работ), справку о стоимости выполненных работ и  затрат(КС 3), счет, комплект документации, указанной в настоящем договоре и/или  дополнительном соглашении к нему, счет-фактуру, документ, подтверждающий сдачу  полного комплекта исполнительной документации заказчику и/или акт осмотра и  разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки потребителя, выданный  территориальным управлением МТУ «Ростехнадзора», документы, обосновывающие  размер стоимости материалов и оборудования, в том числе договоры, накладные, счета-  фактуры, платежные документы, при этом, стоимость материально технических  ресурсов и оборудования, подтверждаемая субподрядчиком форме представления  счетов-фактур и товарных накладных, не должна превышать стоимость указанную в  смете. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения актов о  приемке выполненных работ обязан подписать их и возвратить субподрядчику или в  тот же срок направить мотивированный отказ с указанием полного и исчерпывающе  перечня необходимых доработок (недостатков).  

В соответствии с п. 6.1. договора подряда № 21VP14448-CMP_21_БC от  11.07.2022 подрядчик оплачивает субподрядчику выполненные и принятые работы в  размере 90 (девяносто процентов) от цены настоящего договора, указанной в п.2.1.  договора, основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных  работ (КС-справок о стоимости выполненных работ (КС-3), предоставления счета,  счетов-фактур течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления документов  согласно настоящему пункту. Окончательный расчет в размере 10% (десяти процентов)  от цены настоящего договора, указанной в п.2.1. договора, за выполненные работы  производится подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от  субподрядчика исполнительной документации в полном объеме.  

В соответствии с п. 6.1. договора подряда № 21VP1448-CMP/21/BC/1 от  06.02.2023 подрядчик оплачивает субподрядчику выполненные и принятые работы в  размере 90 (девяносто процентов) от цены настоящего договора, указанной в п.2.1.  договора на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных  работ (КС-справок о стоимости выполненных работ (КС-3), предоставления счета,  счетов-фактур течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления документов  согласно настоящего пункта. Окончательный расчет в размере 10% (десяти процентов)  от цены настоящего договора, указанной в п.2.1. договора, за выполненные работы  производится подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты  заказчиком ПАО «МОЭК» данных работ подрядчик ООО «Новые технологии».  

05.04.2023 в адрес подрядчика предоставлен пакет документов установленный  договором подряда № 21VP14448-CMP_21_БC от 11.07.2022. Общая стоимость  выполненных работ составила 6 847 223,75 руб.  

05.06.2023 года в адрес подрядчика был предоставлен пакте документов  установленный договором подряда № 21УР1448-СМР/21/БС/1 от 06.02.2023. Общая  стоимость выполненных работ составила 5 989 111, 44 руб.  

Указанные работы были приняты подрядчиком в полном объеме, что  подтверждается подписанными актами по форме КС-2 от 05.04.2023 (по договору  подряда № № 21УР14448-СМР_21_БС от 11.07.2022) и от 05.06.2023 (по договору  подряда № 21VP1448-CMP/21/BC/1 от 06.02.2023).  

Фактом надлежащего исполнения договорных обязательств в том числе в части  предоставления документов и их подписания сторонами является подписание  ответчиком актов сверки по каждому из заключённых договоров на 24.08.2023 года, в  соответствии с которыми общая задолженность составила 12 836 335,19 руб.  

Также истцом предъявлено требование о взыскании неустойки за просрочку  платежа, начисленной в соответствии с п. 8.11 договора подряда № 21VP14448- СМР_21_БС от 11.07.2022, что за период с 03.05.2023 по 22.09.2023 составляет 121  252,91 руб. расчет неустойки судом проверен и признан правильным.  

Доказательств погашения задолженности в добровольном порядке ответчик не  представил.  

Поскольку требование истца об уплате основного долга, ответчиком добровольно  не удовлетворено, задолженность по договору подряда № 21VP14448-СМР_21_БС от  11.07.2022 в размере 6 847 223,75 руб. и по договору подряда № 21VP1448-СМР/21/БС/1  от 06.02.2023 в размере 5 989 111,44 руб., неустойка за нарушение сроков оплаты по  договору подряда № 21VP14448-СМР_21_БС от 11.07.2022 в размере 121 252,91 руб.  подлежат присуждению ко взысканию с него на основании ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711  ГК РФ в судебном порядке.  

Доводов по существу заявленных исковых требований апелляционная жалоба  ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" не содержит, документальных доказательств,  опровергающих обоснованность оспариваемого судебного акта, заявителем в суд  первой инстанции не представлено.  

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что задолженность на стороне  ответчика отсутствует, т.к. он произвел оплату выполненных истцом работ в полном  объеме, - не доказан.  

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том,  что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит  оставлению без изменения.  

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2023г. (резолютивная часть  от 26.10.2023г.) по делу № А40-221888/23 оставить без изменения, апелляционную  жалобу – без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья Е.Е. Кузнецова  

Судьи О.Н. Семикина  

 Е.В. Бодрова