ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-71809/2024

Дело № А40-109441/24

г. Москва

05 декабря 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 03 декабря 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 декабря 2024 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семикиной О.Н., 

судей Гузеевой О.С., Семёновой А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Саидмурадовым А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью "КОНКОРД" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.09.2024г. по делу № А40-109441/24 

по иску общества с ограниченной ответственностью "АНТ ЯПЫ" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> ) 

к обществу с ограниченной ответственностью "КОНКОРД" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> ) 

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 18.11.2024,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АНТ ЯПЫ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "КОНКОРД" о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 000 000 руб. 00 коп., процентов, начисленных на сумму 4 000 000 руб., начиная с 15.05.2024 по день фактической оплаты.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2024г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2024г., ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца в судебном заседании возражал против апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителя ответчика извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в связи с чем дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2024г. не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, исковые требования мотивированы тем, что между ООО «АНТ ЯПЫ» (заказчик) и ООО «КОНКОРД» (подрядчик) 15.01.2024 г. заключен договор подряда № 15/01/24 на общую сумму - 137 000 000 рублей, по которому подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы на Объекте Заказчика: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мнёвники, улица Нижние Мневники, земельный участок 35, локация «Остров 4» - в полном соответствии с условиями договора, рабочей документации, строительными нормами и правилами (СНиП), за цену и в сроки, установленные настоящим договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок выполнения работ, установленные графиком производства работ и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком работ и оплатить его в соответствии с условиями договора.

В соответствие с п. 3.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные договором и графиком производства работ (приложение № 3 к Договору). Дата начала Работ - 25 января 2024 года. Дата окончания работ 31 августа 2024 г. В соответствие с п. 4.4.1 договора заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора при условии получения от подрядчика счета на оплаты оплачивает Подрядчику аванс в размере 4 000 000 рублей.

В соответствие с п. 15.2 договора заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, путем направления простого уведомления в адрес подрядчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения договора, в следующих случаях:

15.2.1. Нарушения Подрядчиком любого срока, установленного в графике производства работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

15.2.1. Приостановка выполнения работ без указания заказчика более чем на 5 (пять) календарных дней.

Так, 18.03.2024 заказчик направил претензию исх. № АНТ/ОСТ-04-24/109 в адрес подрядчика с просьбой увеличить количество привлекаемых специалистов до обещанного количества в 50 человек до 22.03.2024 г., либо освободить стройплощадку объекта с дальнейшим возвратом неотработанного аванса.

Впоследствии 22.03.2024 заказчик направил повторную претензию исх. № АНТ/ОСТ-04-24/109 в адрес подрядчика с просьбой освободить строительную площадку и вернуть ранее уплаченный аванс в размере 4 000 000 рублей с учетом неустойки.

Между тем, по состоянию на сегодняшний день, ответа ни на одну претензию не последовало.

17.04.2024 заказчик направил подрядчику досудебную претензию с уведомлением о расторжении договора.

Согласно п.15.2. заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, путем направления простого уведомления в адрес Подрядчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения договора.

Таким образом, договор считается расторгнутым с 14.05.2024 г.

После расторжения договора подрядчик обязан возвратить заказчику сумму не отработанного аванса в размере 4 000 000 руб.

Претензионный порядок урегулирования спора истцом соблюден, в добровольном порядке ответчиком требования истца не удовлетворены, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу положений ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями норм ст.ст. 309-310, 1102 ГК РФ. 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Обязательства вследствие неосновательного обогащения возникают при наличии следующих условий: - приобретения или сбережения имущества в смысле увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранения имущества, которое по установленным законом основаниям должно было выйти из состава его имущества; - отсутствия правовых оснований для получения спорного имущества (денежных средств) ответчиком.

Судом первой инстанции установлено, что истцом совокупность данных обстоятельств доказана и подтверждена материалами дела.

Судом первой инстанции правильно определен характер спорных взаимоотношений и дана полная оценка обстоятельствам дела.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, в силу следующего.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы проверены судом апелляционной инстанции в полном объеме и подлежат отклонению в силу их несостоятельности.

Согласно п. 15.2. договора заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, путем направления простого уведомления в адрес подрядчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения договора.

Таким образом, договор считается расторгнутым с 14.05.2024 г.

После расторжения договора подрядчик обязан возвратить заказчику сумму неотработанного аванса в размере 4 000 000 руб.

Доводы заявителя жалобы сводятся по существу к несогласию с оценкой судом обстоятельств дела, что не является основанием для отмены либо изменения судебного акта.

Несогласие заявителя с оценкой судом представленных доказательств и сформулированными на ее основе выводами по фактическим обстоятельствам дела не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Апелляционная жалоба не содержит указания на обстоятельства и соответствующие доказательства, наличие которых позволило бы иначе оценить те юридически значимые обстоятельства, верная оценка которых судом первой инстанции повлекла принятие обжалуемого решения.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. 

В свою очередь, доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 17.09.2024.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2024 по делу №А40-109441/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья О.Н. Семикина

Судьи О.С. Гузеева

 А.Б. Семёнова