АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 http:// www.altai-krai.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

г. Барнаул Дело № А03-22643/2017 «12» сентября 2018 года.  

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фролова О.В., при ведении  

протокола помощником судьи Донцовой Т.Г., рассматривает в судебном заседании в  

помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...> дело по иску  Администрации города Яровое Алтайского края (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>), г. Яровое, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Бийскмелиоводстрой»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), пос. Пригородный Бийского района  

Алтайского края, о понуждении к исполнению контракта, 

при участии в судебном заседании от представителей:  от истца: ФИО1, по доверенности № 44/17 от 03.11.2017 г.  

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 28.12.217 г.   ФИО3, по доверенности от 28.12.2017 г.  

На основании статьи 8, 12 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь статьями  27, 65, 70, 71, 110 статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Иск Администрации города Яровое Алтайского края удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Бийскмелиоводстрой»  исполнить муниципальный контракт от 21 августа 2017 года № ЕП9-0120170114 на  выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства  «Инженерная защита берега озера Большое Яровое в районе законсервированного  участка захоронения химических отходов в г. Яровое Алтайского края» - выполнить  следующие работы на общую сумму 3 965 385 руб. 38 коп. согласно контракта и  локальных сметных расчетов № 02-01-01 и 02-02-01, в том числе:  

 №

Обоснование

Наименование работ 

Ед. 

Объёмы 

Объёмы 

(указан 

изм. 

по смете 

невыполненные

согласно 

позиции в 

смете) 

 Подготовка территории строительства 

3 

смета

На закладку рэперов и марок 

1 

1

Основные объекты строительства 

Инженерная защита 

Локальная смета 

 № 02-01-01

7

Устройство

100

49 

38,2 

противофильтрационного 

м2 

экрана из нетканого геотекстиля 

экран

а 

9

Нетканый геотекстиль Дорнит 

м2 

5880 

4584 

350 г/м2, примен. 

12

Крепление откосов при уклоне 

100

5,3 

5,3 

1:3 и положе скальной породой 

м3 

или камнем слоем толщиной: до 

одеж

1 м (камень Д15см) 

ды 

13

Камень бутовый марка 600, 

м3 

545,9 

545,9 

размер от 150 до 500 мм 

14

0,84 

0,84 

Возведение плотин каменно- 

набросных, призм, пригрузок, 

1

000

банкетов, перемычек при 

м3 

отсыпке насухо (призма, камень 

набро

Д20см) 

ски

15

Камень бутовый марка 600, 

873,6 

873,6 

размер от 150 до 500 мм 

м3 

16

Крепление откосов при уклоне 

100

13,7 

5,28 

1:3 и положе скальной породой 

м3 

или камнем слоем толщиной: до 

одеж

1 м (камень Д20см) 

ды 

17

Камень бутовый марка 600, 

1411,1

543,84 

размер от 150 до 500 мм 

м3 

18

Устройство покрытий толщиной 

3,6 

3,6 

15 см при укатке щебня с 

1

000

пределом прочности на сжатие 

м2 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): 

покр

однослойных (20см)

ытия

19

На каждый 1 см изменения 

1

000

3,6 

3,6 

толщины слоя добавлять или 

м2 

исключать к расценкам 27-04- 

покр

014-01 

ытия

20

Разработка грунта с погрузкой 

0,91 

0,91 

на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

1

000

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

м3 

группа грунтов 1 (растительный 

грунт

грунт) 

а 

21

Перевозка грузов 

1184 

1184 

автомобилями- самосвалами на 

1 т 

расстояние: до 7 км I класс груза 

груза

22

Разравнивание кавальеров 

1000

0,91 

0,91 

(отвалов) при перемещении 

м3 

грунта до 10 м бульдозерами 

грунт

мощностью: 96 кВт (130  

л.

с.),

а 

группа грунтов 1 (растительный 

грунт) (низовой откос)

23

Укрепление откосов земляных 

45,5 

45,5 

100

сооружений посевом 

м2 

многолетних трав 

26

Семена газонных трав (смесь) 

кг 

122,9 

122,9 

Локальная смета 

 № 02-02-01 Трубчатый переезд

1

Разработка грунта с погрузкой 

0,175 

0,05152 

1000

на автомобили-самосвалы 

м3 

экскаваторами с ковшом 

грунт

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

а 

группа грунтов 1 

2

Перевозка грузов 

1 т 

332,5 

97,898 

автомобилями- самосвалами на 

груза

расстояние: до 11 км 1 класс 

3

0,175 

0,05152 

гВроуззвае дение плотин, дамб, 

насыпей и нижней части 

экранов и ядер насухо: из 

1000

несвязных грунтов катками 

м3 

массой свыше 16 т 

грунта

4

Разработка грунта с погрузкой 

0,026 

0,026 

на автомобили-самосвалы 

1000

экскаваторами с ковшом 

м3 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

грунт

группа грунтов 1 

а 

5

Перевозка грузов 

33,8 

33,8 

автомобилями- самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

1 т 

расстояние: до 7 км I класс груза 

груза

6

Разравнивание кавальеров 

0,026 

0,026 

(отвалов) при перемещении 

грунта до 10 м бульдозерами 

1000

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

м3 

группа грунтов 1 (растительный 

грунт

грунт)

а 

7

Укрепление откосов земляных 

1,3 

1,3 

сооружений посевом 

100

многолетних трав 

м2 

10

Семена газонных трав (смесь) 

кг 

3,51 

3,51 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бийскмелиоводстрой» 

в доход Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в  размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья О.В. Фролов